Арбитражный суд Калининградской области

Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040

E-mail: kaliningrad.info@arbitr.ru 

http://www.kaliningrad.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Калининград

Дело №

А21-6752/2020

«18»

ноября

2020 года

Резолютивная часть решения объявлена  

«16»

ноября

2020 года

Решение изготовлено в полном объеме   

«18»

ноября

2020 года

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Шкутко О.Н.

при ведении протокола судебного заседания ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО «ЦЕНТРЖИЛСТРОЙ» к Специализированной некоммерческой организации Калининградской области «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» о взыскании 496 648,14 рублей

третье лицо: Администрация муниципального образования «Черняховский городской округ»

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 по доверенности  

от ответчика:  н/я

от третьего лица: н/я 

установил.

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРЖИЛСТРОЙ» обратилось  в суд с иском к Специализированной некоммерческой организации Калининградской области «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» о взыскании основного долг в сумме 421 760,91 рублей, неустойки по состоянию на 07.07.2020 года в сумме 74 887,23 рублей.

Администрация муниципального образования «Черняховский городской округ» просила рассмотреть дело в отсутствие представителя.

Дело рассмотрено в порядке статьи 156 АПК РФ.

В судебном заседании представитель истца уточнила требования. Просила взыскать основной долг в сумме 364 223,84 рублей, неустойку по состоянию на 5.10.2020 года (по ставке 4,25%) в сумме 49 847,12 рублей, неустойку на дату вынесения решения. Суду представлены доказательства передачи ответчику уточненных требований. Уточненные требования приняты судом к рассмотрению.

Судом установлено.

Между сторонами был заключен договор  от 16.05.2018 года № 2/310-2.

По условиям договора ООО «ЦЕНТРЖИЛСТРОЙ» (подрядчик) обязалось выполнить разработку проектно-сметной документации на выполнение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов №№ 9, 11, 15 по ул. Театральной, №№ 8, 12, 14 по ул. Садовой в г. Черняховске, а также выполнить весь комплекс работ по их капитального ремонту.

В соответствии с пунктом 3.1 договора цена договора согласована 55 232 748,34 рублей.

В соответствии с пунктом 3.2 договора окончательная оплата выполненных строительных работ по каждому объекту производится в течение 90 календарных дней со дня подписании актов.

В соответствии с пунктом 11.3 договора в случае просрочки оплаты выполненных работ заказчик уплачивает пени в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ России от подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки.

Акты о передаче проектно-сметной документации подписаны 31.07.2018 года, 14.08.2018 года, 23.11.2018 года.

Подписанные акты и справки о стоимости выполненных строительных работ от 06.08.2018 года, от 09.08.2018 года, от 3.09.2018 года, от 9.10.2018 года, от 09.11.2018 года, от 23.11.2018 года, от 30.11.2018 года,  от 12.12.2018 года, от 13.12.2018 года представлены  в материалы дела.

Согласно расчету истца по состоянию на 07.07.2020 года долг заказчика по оплате за выполненные строительные работы составил 421 760,91 рублей.

22.07.2020 года заказчик дополнительно оплатил 20 901,26 рублей, 14 222,93 рублей, 22 412,88 рублей.

Доказательств оплаты долга в сумме 364 223,84 рублей ответчиком не представлено, размер долга не оспорен.

Согласно расчету истца по состоянию на 5.10.2020 года подлежит уплате неустойка по положениям пунктов  3.2, 11.3 договора в сумме в сумме 49 847,12 рублей. Расчет произведен с учетом ключевой ставки ЦБ России 4,25% за весь период.

За период с 06.10.2010 года по 16.11.2020 года неустойка составляет 2167,13 рублей (364 223,84 х 4,25% х 42 : 300).

Требования истца подлежат удовлетворению на основании положений статей 309, 310, 330 ГК РФ, положений договора.

Руководствуясь статьями 167-171 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать со Специализированной некоммерческой организации Калининградской области «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРЖИЛСТРОЙ» (ОГРН 

<

***>) основной долг в сумме 364 223,84 рублей, неустойку в сумме 52 014,25 рублей, расходы по госпошлине в сумме 11 325 рублей.

Возвратить  обществу с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРЖИЛСТРОЙ» из Федерального бюджета госпошлину в сумме 1608 рублей.

Решение может быть обжаловано в  месячный срок в арбитражный апелляционный суд.

Судья                    О.Н.Шкутко