АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

300041 Россия, Тульская область, город Тула, Красноармейский проспект, д. 5

телефон (факс): 8(4872)250-800; http://www.tula.arbitr.ru/

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А68-12207/2019

город Тула

21 января 2020 года

Арбитражный суд Тульской области в составе судьи Воронцова И.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ИнжТехСтрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к акционерному обществу «Тульская региональная корпорация развития государственно-частного партнерства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

о взыскании 950 000 руб.,

при участии в заседании:

от истца: представитель по доверенности ФИО2,

от ответчика: представитель по доверенности ФИО3,

УСТАНОВИЛ:

ООО «ИнжТехСтрой» (далее - ООО «ИТС») обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к АО «Тульская региональная корпорация развития государственно-частного партнерства» (далее – АО «Корпорация развития Тульской области») о взыскании задолженности по договору № Д277 от 17.10.2017 в размере 950 000 руб.

Представитель истца в судебном заседании поддержал исковые требования в полном объеме.

Представитель ответчика исковые требования не признал по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление.

Из материалов дела суд установил следующее.

17.10.2017 между АО «Тульская региональная корпорация развития государственно-частного партнерства» (Заказчик) и ООО «ИнжТехСтрой» (Исполнитель) заключен договор на выполнение работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за строительно-монтажными работами по объекту: «Сети газораспределения в ОЭЗ ППТ «Узловая» № Д277, согласно которому Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за строительно-монтажными работами по объекту: «Сети газораспределения в ОЭЗ ППТ «Узловая» (п. 1.2 Договора).

Исполнитель обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.2  Договора, в соответствии с Приложениями к Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные в полном объеме работы (п. 1.3 Договора).

Место выполнения работ/местоположение объекта – Тульская область, Узловский район, территория индустриального парка «Узловая» и ОЭЗ ППТ «Узловая» (п. 1.4 Договора).

Начало работ по Договору: день подписания Договора – 17.10.2017 (4.1.1 Договора).

В соответствии с п. 4.1.2 Договора строительный контроль (технический надзор) осуществляется в течение срока выполнения строительно-монтажных работ по объекту: «Сети газораспределения в ОЭЗ ППТ «Узловая» согласно условиям Договора, заключенного между АО «Корпорация развития Тульской области» и ООО «Стройгазсервис».  

 Стоимость подлежащих выполнению работ составляет 950 000 руб. (без НДС) (п. 2.1 Договора).

Документы, предоставляемые Исполнителем Заказчику по окончании работ и необходимые для расчета: соответствующий счет на оплату; акт сдачи-приемки выполненных работ (п. 3.2 Договора).

Согласно  п. 3.3 Договора Заказчик производит расчет с Исполнителем не позднее 20 дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ на основании выставленного счета.

В соответствии с п. 6.3 Договора после ввода объекта в эксплуатацию исполнитель передает Заказчику счет на оплату, счет-фактуру (при  общей системе налогообложения), документы (материалы, предусмотренные Техническим заданием, акт сдачи-приемки выполненных работ).

Акт с дачи-приемки выполненных работ подписывается Заказчиком только после ввода Объекта в эксплуатацию (п. 6.4 Договора).

Согласно п. 6.5 Договора Заказчик обязан в срок не позднее 20 дней со дня получения документов согласно п. 6.3 настоящего договора подписать акт сдачи-приемки выполненных работ и направить подписанный акт Исполнителю или направить в адрес Исполнителя письменный мотивированный отказ от подписания соответствующего акта.  

Как указывает истец, строительно-монтажные работы по объекту подрядной организацией ООО «Стройгазсервис» завершены, произведена подача газа, Объект эксплуатируется с 15.02.2018.

Факт выполнения обществом работ по Договору подтверждается актом приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от 25.01.2018, актом сдачи-приемки выполненных работ № 1 от 21.06.2019, счетом на оплату № 1 от 21.06.2019, которые были направлены истцом в адрес ответчика письмом № 048/06 и получены Заказчиком.

В ответе на письмо истца ответчик сослался на отсутствие подписанного со стороны подрядной организации ООО «Стройгазсервис» акта по форме КС-11, следовательно, оплата счета № 1 от 21.06.2019 и акта сдачи-приемки выполненных работ №1 от 21.06.2019 не представляется возможным.

22.08.2019 ООО «ИТС» направило в адрес ответчика претензию № 075/08 с требованием оплатить задолженность, которая последним оставлена без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Проанализировав представленные доказательства, выслушав позицию сторон, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как - то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Согласно пункту 2 статьи 307 ГК РФ обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе. 

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается в силу статьи 310 ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Согласно пункту 1 статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

По смыслу указанных правовых норм исполнитель может считаться надлежаще исполнившим свои обязательства при совершении перечисленных в договоре действий или осуществлении определенной деятельности.

Из материалов дела усматривается, что строительно-монтажные работы по Объекту подрядной организацией ООО «Стройгазсервис» завершены, произведена подача газа и Объект эксплуатируется с 15 февраля 2018 года.

Согласно п.п. 92-97 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, (далее - Технического регламента), утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.10 г. № 870 следует, что приемка сети газораспределения после строительства либо реконструкции осуществляется по завершении строительных и монтажных работ.

Приемка сетей газораспределения и газопотребления осуществляется приемочной комиссией, создаваемой застройщиком или инвестором (далее - приемочная комиссия), в состав которой входят представители: а)застройщика; б) строительной организации; в) проектной организации; г) эксплуатационной организации; д) федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль в области охраны окружающей среды (в случаях, предусмотренных частью 7_статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации); е) федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора; ж) федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности.

При приемке сетей газораспределения и газопотребления, осуществляемой приемочной комиссией, строительная организация предоставляет следующие документы и      материалы): а) проектная      документация      (исполнительная документация); б) положительное заключение экспертизы на проектную документацию; в) журналы:надзора за строительством со стороны организации, разработавшей проектнуюдокументацию (при наличии договора на его проведение); технического надзора состороны эксплуатационной организации; контроля производства строительных работ;г) протоколы: проведения испытаний на герметичность сетей газораспределения игазопотребления; проверки сварных соединений и защитных покрытий; д) строительныепаспорта газопроводов, газоиспользующего оборудования и технологических устройств;е) документы, подтверждающие соответствие используемых технических устройств, труб,фасонных частей, сварочных и изоляционных материалов; ж) технико-эксплуатационнаядокументация изготовителей технических и технологических устройств (паспорта,инструкции по эксплуатации и монтажу); з) акты о: разбивке и передаче трассы; приемкескрытых работ; приемке специальных работ; приемке внутренней полости газопровода;приемке изоляционного покрытия; приемке установок электрохимической защиты;проверке состояния промышленных дымоотводящих и вентиляционных систем; орезультатах пусконаладочных работ и комплексном опробовании газоиспользующегооборудования; и) копия приказа о назначении лица, ответственного за безопасностьэксплуатации сетей газораспределения и газопотребления; к) положение о газовой службеили договор с организацией, имеющей опыт проведения работ по техническомуобслуживанию и ремонту сети газораспределения и сети газопотребления; л) планлокализации и ликвидации аварийных ситуаций.

Кроме того, согласно п. 98 Технического регламента следует, что документальным подтверждением соответствия построенных или реконструированных сетей газораспределения и газопотребления требованиям, установленным настоящим техническим регламентом и иными техническими регламентами, является акт приемки, который подписывается всеми членами приемочной комиссии.

Доказательством сдачи Подрядчиком, Исполнителем результата работ и приемки его Заказчиком является акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от 25.01.2018, удостоверяющий приемку выполненных работ, который подписан приемочной комиссией в составе: председателя комиссии – представителя Заказчика заместителя генерального директора по строительству и эксплуатации АО «Корпорация развития Тульской области» ФИО4; представителем Генерального подрядчика главным инженером ООО «Стройгазсервис», а также членами комиссии: строительным контролером ООО «УниверсалМонтажСтрой» ФИО5; представителем проектной организации ГИП ООО «Стройгазсервис» ФИО6; генеральным директором субподрядной организации ООО «Ремстром» ФИО7; главным инженером ООО ИнтерПромЭнергоТула» ФИО8; ген. подрядчиком строительного контроля ООО «ИнжТехСтрой» ФИО9, а также представителем Ростехнадзора ФИО10 

Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от 25 января 2018 г. является окончательным документом подтверждающим завершение работ по строительству объекта газораспределительной системы и готовности его к эксплуатации.

Таким образом, факт выполнение Исполнителем работ и их принятие без каких-либо замечаний к качеству со стороны Заказчика подтверждается актом приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от 25.01.2018, актом сдачи-приемки выполненных работ № 1 от 21.06.2019, счетом на оплату № 1 от 21.06.2019, которые истцом были направлены ответчику письмом № 048/06 и получены Заказчиком, следовательно, Заказчик обязан оплатить выполненные Исполнителем работы.

ООО «ИТС» надлежаще известил Заказчика о сдаче-приемке работ в соответствии с Контрактом, неподписание акта о приемке выполненных работ само по себе не освобождает Заказчика от их оплаты.

Доводы ответчика о том, что акт формы КС-11 не оформлялся, а представленный истцом акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от 25 января 2018 г. не подтверждает ввод объекта в эксплуатацию, следовательно, обязанность заказчика по оплате выполненных исполнителем работ не возникла, являются необоснованными и противоречат представленным доказательствам и установленным по делу обстоятельствам.

Подписанный в установленном гражданским законодательством акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от 25.01.2018, а также акт сдачи-приемки выполненных работ 31 от 21.06.2019, подписанный исполнителем в отсутствии мотивированного отказа от его подписания со стороны заказчика, является достаточным доказательством факта выполненных работ, в связи с чем, отсутствие подписанного сторонами акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 не освобождает ответчика от исполнения обязательств по оплате фактически выполненных работ в полном объеме.

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Истцом Заказчику был направлен акт формы КС-2 и счет на оплату выполненных работ.

Указанный акт является односторонним, однако таковой может быть расценен в качестве надлежащего доказательства оказания услуг при определенных условиях.

Так, односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (п. 4 ст. 753 ГК РФ).

Как следует из пункта 14 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», односторонний акт приемки результата работ является доказательством исполнения подрядчиком обязательства по договору, и при отказе заказчика от оплаты на суд возлагается обязанность рассмотреть доводы заказчика, обосновывающие его отказ от подписания акта приемки результата работ.

Таким образом, положения Гражданского Кодекса Российской Федерации предусматривают возможность составления одностороннего акта сдачи-приемки результата работ, защищая интересы подрядчика, если заказчик необоснованно отказался от надлежащего оформления документов, удостоверяющих приемку.

При этом в силу п. 2 ст. 65 АПК РФ именно заказчик должен представить доказательства обоснованности отказа от подписания акта выполненных работ.

В нарушение ст. 65 АПК РФ ответчиком не представлено в суд документальных доказательств, достоверно свидетельствующих о правомерности отказа от подписания вышеуказанного акта сдачи-приемки выполненных работ, о некачественности оказанных истцом услуг, а также доказательств оплаты оказанных исполнителем услуг по договору№Д277 от 17.10.2017.

Таким образом, поскольку размер задолженности подтвержден материалами дела, доказательств оплаты за оказанные услуги ответчиком не представлено, суд признает требование истца о взыскании с ответчика задолженности в сумме 950 000 руб. обоснованным и подлежащим удовлетворению. 

Согласно статьям 101, 110, 112 АПК РФ вопросы о понесённых сторонами судебных расходах, к которым относится государственная пошлина, разрешается судом в судебном акте. 

В силу ст. 110 АПК РФ расходы по уплате госпошлины по иску в размере 22 000 руб. относятся на ответчика и подлежат взысканию с последнего в пользу истца.

Руководствуясь ст.ст. 110, 156, 167 - 171, 176, 180, 181, 318 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с акционерного общества «Тульская региональная корпорация развития государственно-частного партнерства» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ИнжТехСтрой» 950 000 руб. задолженности, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 22 000 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня изготовления его в полном объеме в Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Тульской области.

Судья                                       И.Ю. Воронцов