АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51 / 53-02-05, http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  (резолютивная часть)  

город Омск  № дела  19 сентября 2024 года А46-10440/2024  

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Чекурды Е.А., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Токаревой К.И., рассмотрев в  судебном заседании дело по иску бюджетного учреждения города Омска «Управление  дорожного хозяйства и благоустройства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к  обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-производственная компания  «ДорСтрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании,  

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований  относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «Скадис» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>),  

в судебном заседании приняли участие: 

от истца – ФИО1 по доверенности от 09.02.2024 (паспорт гражданина РФ,  

диплом), от ответчика – не явились, извещены, от третьего лица - не явились, извещены, 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

обязать общество с ограниченной ответственностью «Строительно-производственная  

компания «ДорСтрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в срок до  

30.04.2025 безвозмездно устранить недостатки работ: 1. По контракту от 25.04.2022 № Ф.2022.000321, а именно: по ул. 75 Гвардейской бригады (от ПК0+00 до ПК0+610): 

- выкрашивание бетона поребрика на всем протяжении участка;  - отсутствие паспорта объекта БКД в районе ул. 50 лет ВЛКСМ;  - просадка плитки на тротуаре в районе 

<

...>;  

- провал плитки в районе 

<

...>; - разрушение поребрика в районе 

<

...>; - выкрашивание бетона бортового камня на всем протяжении участка. по ул. 50 лет ВЛКСМ (от ПК0+00 до ПК0+960): 

- выкрашивание бетона поребрика на техническом тротуаре на всем протяжении  

участка; 

- выкрашивание бетона поребрика на тротуаре на всем протяжении участка;  - раскрытие шва между поребриком и покрытием тротуара;  

- выкрашивание бетона бортового камня в районе ООТ «50 лет ВЛКСМ»; 

- трещины на покрытии технического тротуара в районе 

<

...> ВЛКСМ;  - просадка люка в районе 

<

...> ВЛКСМ;  

- раскрытие шва между плиткой тротуара и поребриком. по ул. ФИО2 (от ПК0+00 до ПК0+600): 

- выкрашивание бетона поребрика на разворотной площадке в районе ООТ  

«ФИО2» на всем протяжении участка; 

- выкрашивание бетона бортового камня на разворотной площадке в районе ООТ  

«ФИО2» на всем протяжении участка; 

- раскрытие шва между поребриком и покрытием тротуара;  - просадка плитки в районе ООТ «ФИО2»;  

- разрушение бордюрного камня в районе ООТ «ФИО2»;  - раскрытие шва между поребриком и покрытием технического тротуара;  

- не заполнены швы между плитками тротуара в районе 

<

...>;  - выкрашивание бетона поребрика на всем протяжении участка;  

- выкрашивание бетона бортового камня на всем протяжении участка;  - трещины на покрытии технического тротуара в районе 

<

...>;  

- застой воды на покрытии парковки; 

- разрушение бетонного замка поребрика в районе 

<

...>;  

- разрушение поребрика в районе 

<

...>;  - разрушение поребрика на тротуаре в районе 

<

...>.  

по ул. Будеркина (от ПК0+00 до ПК0+540): 

- выкрашивание бетона поребрика на всем протяжении участка;  - просадка люка на проезжей части в районе ООТ «Шинный завод» (правая сторона);  

- раскрытие шва между поребриком и покрытием тротуара.  по ул. П. Осминина (от ПК0+00 до ПК0+710):  

- выкрашивание бетона поребрика на тротуаре на всем протяжении участка;  

- раскрытие шва между поребриком и покрытием тротуара;  - выкрашивание бетона поребрика на техническом тротуаре на всем протяжении  

участка; - не заполнены швы между плиткой тротуара. 

2. По контракту от 15.03.2021 № Ф.2021.000049, а именно:  по ул. Воровского (от ПК0+00 до ПК0+280):  

- выкрашивание бетона бортового камня на всем участке. по ул. 6-я Ленинградская (от ПК0+00 до ПК0+340): 

- раскрытые необработанные продольные и поперечные трещины на покрытии  проезжей части;  

- трещины на покрытии тротуара в районе ООТ «3-я Станционная».  по ул. Калинина (от ПК0+00 до ПК0+540):  

- разрушения покрытия технического тротуара в районе 

<

...>;  - просадка решетки люка на проезжей части в районе магазина «Вазовский».  

по ул. Труда (от ПК0+00 до ПК0+870): 

- выкрашивание бетона бортового камня на всем протяжении участке;  - просадка на покрытии тротуара в районе д. 10 по ул. Труда.  

по дороге через пос. 7-й Кирпичный (от ПК0+00 до ПК0+630):  - разрушение асфальтобетонного покрытия на посадочной площадке ООТ «Детский  

сад»; 

- раскрытые необработанные продольные и поперечные трещины на покрытии  проезжей части;  

- трещины на покрытии тротуара; 

- зазор между покрытием тротуара и бортовым камнем свыше 3 см.;  - зазор между покрытием тротуара и поребриком свыше 3 см.;  

- разрушение вокруг швеллера посадочной площадки в районе ООТ «Детский сад». по ул. Лобкова (от ПК0+00 до ПК0+590): - одиночные выбоины на асфальтобетонном покрытии; - сетка трещин вокруг люка на проезжей части; 

- просадка с разрушением асфальтобетонного покрытия вокруг крышки люка;  - выкрашивание бетона поребрика тротуара в районе д. 20 по ул. Лобкова.  

по ул. Светловская (от ПК0+00 до ПКЗ+770): - не заделаны места отбора кернов. 

по ул. 1-я Красной Звезды (от ПК0+00 до ПК0+910):  

- выкрашивание бетона бортового камня в районе ООТ «4-я Новая»;  - одиночные выбоины в районе ООТ «4-я Новая»;  

- трещины на тротуаре в районе 

<

...>.  по ул. 1-я Советская (от ПК0+00 до ПК0+590):  

- трещины на покрытии тротуара; - разрушение обочин; 

- разрушение покрытия тротуара в районе ООТ «1-я Советская»;  - разрушение покрытия тротуара, зазор между покрытием тротуара и поребриком;  

- выкрашивание бетона бортового камня в районе ООТ «1-я Советская»;  

- просадка на покрытии тротуара в районе ООТ «1-я Советская»;  - трещины на покрытии тротуара в районе ООТ «1-я Советская»;  -выбоины на асфальтобетонном покрытии в районе ООТ «1-я Советская»;  

- раскрытие шва между покрытием тротуара и поребриком в районе АЗС.  по ул. Моторная (от ПК0+00 до ПК0+880):  

- раскрытые необработанные продольные и поперечные трещины на покрытии  проезжей части;  

- трещины на покрытии технического тротуара в районе 

<

...>; 

- трещины на покрытии пешеходного тротуара на всем протяжении участка;  - отсутствует решетка ливневой канализации в районе 

<

...>;  - просадка люка на техническом тротуаре;  

- отсутствует решетка ливневой канализации в районе ул. Машиностроительной;  - разрушение асфальтобетонного покрытия вокруг крышки люка в районе школы №  

108; - одиночные выбоины в районе 

<

...>; - раскрытие шва между поребриком и тротуаром свыше 3 см.; 

- просадка на тротуаре в районе 

<

...>;  - просадка люка колодца в районе школы № 108.  

по пер. Безымянный (от ПК0+00 до ПК0+210): 

- раскрытые необработанные продольные и поперечные трещины на покрытии  проезжей части.  

3. По договору от 16.01.2020 № Ф.2019.001731, а именно: 

по дороге под сухим пролетом (от ул. 12-й Пролетарской до ул. 1-й Красной Звезды):  

- выбоины на асфальтобетонном покрытии в районе путепровода;  - раскрытые необработанные поперечные трещины на покрытии проезжей части.  

по ул. 1-я Красной Звезды (от ул. 1-Марьяновская до дороги под сухим пролетом):  - выбоины на асфальтобетонном покрытии в районе 

<

...>;  

- колейность на а/б покрытии проезжей части в районе 

<

...>; 

- выбоины на асфальтобетонном покрытии в районе пешеходного перехода 

<

...>;  

- колейность на асфальтобетонном покрытии проезжей части в районе пешеходного  перехода 

<

...>;  

- выбоины на асфальтобетонном покрытии в районе ООТ «ДЭУ ЛАО».  по ул. 1-я Марьяновская (от ул. 1-я Красной Звезды до ул. Воровского):  - трещины на покрытии тротуара.  

по ул. 25 лет Октября (от ул. Иртышской набережной до ул. Шаумяна):  - выбоины на асфальтобетонном покрытии на повороте к гаражному кооперативу;  

- выкрашивание асфальтобетонного покрытия на проезжей части в районе гаражного  кооператива;  

- просадка люка на проезжей части в районе гаражного кооператива;  

- разрушение асфальтобетонного покрытия вокруг крышки люка;  - выкрашивание бетона поребрика на всем протяжении участка;  

- просадка с разрушением на техническом тротуаре. по ул. Шаумяна (от ул. 9-я Ленинская до ул. 12-я Пролетарская): 

- выбоины на асфальтобетонном покрытии в районе д. 55 и в районе АЗС;  - просадка на тротуаре в районе ООТ «Авангард»;  

- выбоины на асфальтобетонном покрытии в районе ООТ «Авангард». по ул. 12-я Пролетарская (от ул. Труда до дороги под сухим пролетом): 

- выкрашивание асфальтобетонного покрытия на пересечении с ул. Труда;  - раскрытие шва между покрытием тротуара и бордюрным камнем;  

- выбоины на асфальтобетонном покрытии в районе ООТ «Ленинский суд»; 

- выкрашивание асфальтобетонного покрытия в районе заездного кармана ООТ  «Ленинский суд».  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительно-производственная  компания «ДорСтрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  бюджетного учреждения города Омска «Управление дорожного хозяйства и  благоустройства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 6 000 руб. расходов по уплате  государственной пошлины.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не  подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия  постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Омской области в порядке  апелляционного производства в Восьмой арбитражный апелляционный суд (644024, 

<

...> Октября, д. 42) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в  полном объеме), а после проверки законности решения в апелляционном порядке также в  порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа  (625010, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления  в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.  

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного  производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно  получить соответственно на интернет-сайтах Восьмого арбитражного апелляционного суда:  http://8aas.arbitr.ru и Арбитражного суда Западно-Сибирского округа: http://faszso.arbitr.ru.  

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных  дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Судья Е.А. Чекурда