Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40- 54780/23-3-430

г. Москва

08 июня  2023 г.

Резолютивная часть объявлена 22 мая  2023  г.

Дата изготовления решения в полном объеме 08 июня  2023 г.

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Федоточкина А.А.,

при ведении протокола секретарём судебного заседания ФИО1,

с использованием средств аудиозаписи,

рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью "ЛЕММИНКЯЙНЕН СТРОЙ" (197374, 

<

...> ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 579, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 01.04.2003, ИНН: 

<

***>, КПП: 781401001) к обществу с ограниченной ответственностью "ЗЕМДОРСТРОЙ" (394016, РОССИЯ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., ГОРОД ВОРОНЕЖ Г.О., ВОРОНЕЖ Г., ВОРОНЕЖ Г., МОСКОВСКИЙ ПР-КТ, Д. 53, ОФИС 1106, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 16.04.2013, ИНН: 

<

***>, КПП: 366201001) о взыскании 6 222 760, 54 руб. с учетом принятых судом уточнений  в порядке ст. 49 АПК РФ

От истца: ФИО2 по дов. от 10.03.2022 г.

От ответчика: не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕММИНКЯЙНЕН СТРОЙ" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ЗЕМДОРСТРОЙ"  о взыскании задолженности по договору № 06.05/18 в размере 3 385 538 руб. 52 коп., задолженности по договору 12.09/18 в размере 1 133 572 руб. 26 коп., задолженности по договору № 06.05/19 в размере 233 401 руб. 56 коп., задолженности по договору № 1829L8-С0250 в размере 17 115 руб. 22 коп., задолженности по договору № 12.12/17 в размере 960 541 руб. 90 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами по договору № 06.05/18 в размере 183 503 руб. 82 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами по договору 12.09/18 в размере 71 210 руб. 45 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами по договору № 06.05/19 в размере 14 121 руб. 94 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами по договору № 1829L8-С0250 в размере 1 254 руб. 51 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами по договору № 12.12/17 в размере 22 500 руб. 37 коп. с последующим начислением суммы процентов, начиная с 25.04.2023 г. по день фактической оплаты суммы долга с учетом принятых судом уточнений  в порядке ст. 49 АПК РФ

В судебное заседание не явился представитель ответчика. Определение суда о времени и месте проведения судебного заседания, направленное ответчику  заказным письмом с уведомлением о вручении по юридическому адресу, получено адресатом.

В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений (ст. 165.1), доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

В силу п. 1 ст. 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

В соответствии с частью 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ) информация о принятии искового заявления, о времени и месте судебного заседания опубликована на сайте http://www.msk.arbitr.ru.

Частью 6 статьи 121 АПК РФ установлено, что лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления к производству и возбуждении производства по делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

Согласно части 1 статьи 123 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, направленной ему в порядке, установленном настоящим Кодексом, или иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе.

При этом лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.

Учитывая изложенное, суд считает ответчика извещенным надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, на основании п. 2 ч. 4 ст. 123 АПК РФ, в связи с чем, в соответствии с ч. 3 ст. 156 АПК РФ, считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя ответчика.

Представитель истца требования поддержал в полном объёме, представил письменные пояснения на отзыв ответчика.

Изучив материалы дела, оценив представленные доказательства, проверив обоснованность исковых требований по имеющимся в деле материалам, заслушав представителя  ответчика, суд пришел к следующим выводам.

Как установлено судом, между ООО «Лемминкяйнен  Строй»  (далее  -  Субподрядчик  или Истец) и ООО «ЗемДорСтрой» (далее - Подрядчик или Ответчик) были заключены следующие договоры: договор № 06.05/18 от 04.05.2018 (далее - Договор № 06.05/18) на выполнение подрядных работ по ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 117+173 км 121+000, Московской области; договор № 12.09/18 от 20.09.2018 (далее - Договор №12.09/18) на выполнение подрядных работ по ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы черед Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийская на участке км 152+200 км 193+000 (обратное направление), Тульская область; договор №06.05/19 от 27.05.2019 (далее - Договор № 06.05/19) на выполнение подрядных работ по ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 132+770 км и 152+200 (обратное направление), Тульская область; договор J№ 1829L8-0250 от 12.10.2018 (далее - Договор № 1829L8-0250) на выполнение подрядных работ по ремонту транспортной развязки на км 199+500 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск, Тульская область. договор № 12.12/17 от 25 декабря 2017 г. (далее - Договор № 12.12/17) на выполнение планово-предупредительных работ на мосту через р. Шиворонь на км 218+017 (левый), путепроводе через а.д. на км. 219+925 (левый) автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Тульская область.

В рамках договора № 06.05/18 Подрядчик обязуется поручить, а Субподрядчик обязуется выполнить работы по ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону -Краснодар - Новороссийск на участке км 132+770 - км 152+200 (обратное направление), Тульская область (далее по тексту - Объект) в соответствии с Ведомостью объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору), Техническим заданием на выполнение работ по ремонту (Приложение № 1 к Договору), действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными документами, приведенными в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ (Приложение № 5 к Договору), указаниями Подрядчика, не противоречащими условиям Договора, выполнить все работы и сдать в установленном порядке Объект Подрядчику в сроки, определенные Договором, а также исполнить гарантийные обязательства.

Цена Договора составляет 13 337 232 рубля 01 копейка, в том числе НДС 20% 2 222 872 рубля 00 копеек.

Промежуточные платежи за выполненные работы по Договору осуществляются Подрядчиком на основании актов о приемке выполненных работ справок о стоимости выполненных работ и затрат по формам КС-2 и КС-3, утвержденным Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 (далее - актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат) и счета. При расчете суммы очередного платежа Подрядчиком из стоимости выполненных работ удерживается гарантийная сумма в размере пяти процентов стоимости выполненных работ, которая является обеспечением надлежащего исполнения Субподрядчиком гарантийных обязательств по Договору. Выплата гарантийных сумм производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты истечения сроков таких гарантийных обязательств (в соответствии с Графиком финансирования (Приложение № 15 к Договору)), за вычетом средств, израсходованных на устранение выявленных дефектов в период действия гарантийных обязательств в соответствии с Регламентом исполнения гарантийных обязательств (Приложение № 17 к Договору) и Гарантийным паспортом (Приложение № 10 к Договору).

Оплата работ производится на основании Акта о приемки выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета.

Оплата выполненных работ осуществляется Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения денежных средств от Заказчика.

Под стоимостью работ за отчетный период в Договоре понимается стоимость работ по Договору за соответствующий отчетный период, указанная в Календарном графике выполнения подрядных работ с учетом НДС 20%.

Сроки начала выполнения работ - с даты заключения Договора, окончание выполнения работ по Договору - 31 августа 2019 года.

В порядке п. 3.1 договора из стоимости выполненных Субподрядчиком работ, Подрядчиком была удержана гарантийная сумма в размере 3 982 286,4' рублей, которая согласно Приложению № 11 к Договору № 06.05/18 подлежит оплате в следующие сроки: 2019- 597 447,97 руб. (оплачено), 2020-597 447,97 руб., 2021 – 796 597,30 руб., 2022-1 991 493,25 руб.

Однако, сумма гарантийного удержания в размере 3 385 538,52 руб. по договору не оплачена. 

В рамках договора № 12.09/18 Субподрядчик обязуется на свой риск собственными силами и средствами выполнить подрядные работы по «Ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва-Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск на участке км 152+200 - км 193+000 (обратное направление), Тульская область» (далее - Объект) в соответствии с Ведомостью объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору), Техническим заданием на выполнение работ по ремонту (Приложение № 1 к Договору), действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами, приведенными в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ (Приложение № 5 к Договору), в том числе нормативными документами, перечисленными в Перечне нормативных документов, приведенном на сайте Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (http://www.russianhighways.ru) в разделе «нормативная база/деятельность Госкомпании»), указаниями Подрядчика, не противоречащими условиям Договора, и сдать в установленном порядке Объект в эксплуатацию в сроки, определенные Договором, а также исполнить гарантийные обязательства.

Подрядчик обязуется принять результат выполненных работ по Объекту и оплатить их стоимость на условиях, и в сроки, определенные Договором.

Цена Договора составляет 35 255 273 (тридцать пять миллионов двести пятьдесят пять тысяч двести семьдесят три) рубля 00 копеек, включая НДС 18% 5 377 923 (пять миллионов триста семьдесят семь тысяч девятьсот двадцать три) рубля 00 копеек.

Дополнительным соглашением № 2 от 15.05.2019 г. изменена стоимость договора, а также график финансирования.

Календарные сроки выполнения работ по Объекту определяются Календарным графиком выполнения подрядных работ (Приложение № 3 к Договору).

Работы по настоящему Договору должны быть выполнены в соответствии с Календарным графиком выполнения подрядных работ и Ведомостью объемов и стоимости работ.

На момент подписания Договора дата окончания выполнения работ (дата подписания приемочной комиссией акта ввода Объекта в эксплуатацию по форме, являющейся Приложением № 17 к настоящему Договору), в том числе даты окончания выполнения этапов работ, определенные Календарным графиком выполнения подрядных работ и Договором, являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

Сроки начала выполнения работ по Договору - с даты заключения Договора, окончание выполнения работ по Договору - 25 августа 2019 года, при этом в 2018 году ввод - 10,0 км.

Промежуточные платежи за выполненные работы по Договору осуществляются Подрядчиком на основании актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат по формам КС-2 и КС-3, утвержденным Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 (далее - актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат) и счета. При расчете суммы очередного платежа Подрядчиком из стоимости выполненных работ удерживается гарантийная сумма в размере пяти процентов стоимости выполненных работ, которая является обеспечением надлежащего исполнения Субподрядчиком гарантийных обязательств по Договору. Выплата гарантийных сумм производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Акта о завершении действия гарантийных обязательств в соответствии с Графиком финансирования (Приложение  № 10 к настоящему Договору), за вычетом средств, израсходованных на устранение выявленных дефектов в период действия гарантийных обязательств в соответствии с Регламентом исполнения гарантийных обязательств (Приложение № 12 к настоящему Договору) и Гарантийным паспортом (Приложение № 9 к настоящему Договору) при условии получения денежных средств от Заказчика.

В случае представления Подрядчику Акта о завершении действия гарантийных обязательств позже даты подписания, указанной в этом Акте, Подрядчик регистрирует данный Акт в журнале документов, срок оплаты сумм гарантийных удержаний в данном случае в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты регистрации входящего документа (Акта) при условии получения денежных средств от Заказчика.

Оплата выполненных работ осуществляется Подрядчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Оплата выполненных работ производится при условии получения денежных средств от Заказчика.

В соответствии с пунктом 5.1 Договора № 12.09/18, из стоимости выполненных Субподрядчиком работ, Подрядчиком была удержана гарантийная сумма в размере 1 498 348,95 рублей, которая согласно Приложению № 10 к Договору № 12.09/18 в редакции дополнительной соглашения № 2 от 15.05.2019 подлежит оплате в следующие сроки: 2019 – 214 981,51 (выплачено), 2020 – 214 981,51 (ввод 2018), 49 433,04 (ввод 2019, выплачено), 2021- 286642,01 (ввод 2018), 49 433,04(ввод 2019), 2022- 716 605,03 (ввод 2018, 65 910,67 (ввод 2019), 2023 – 164 776,69 (ввод 2019).

В связи с изложенным, на сегодняшний день сумма долга Подрядчика перед Субподрядчиком по Договору № 12.09/18 составляет 1 133 572,26 рублей без учета суммы долга в размере 164 776,69 рублей, которая оплачивается Подрядчиком Субподрядчику по истечении 2023 года.

По договору № 06.05/19 Подрядчик обязуется поручить, а Субподрядчик обязуется выполнить работы по ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону -Краснодар - Новороссийск на участке км 132+770 - км 152+200 (обратное направление), Тульская область (далее по тексту - Объект) в соответствии с Ведомостью объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору), Техническим заданием на выполнение работ по ремонту (Приложение № 1 к Договору), действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными документами, приведенными в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ (Приложение № 5 к Договору), указаниями Подрядчика, не противоречащими условиям Договора, выполнить все работы и сдать в установленном порядке Объект Подрядчику в сроки, определенные Договором, а также исполнить гарантийные обязательства.

Субподрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ с применением строительных материалов в соответствии с Техническим заданием. Все расходы по приобретению материалов, необходимых для выполнения работ на Объекте, несет Субподрядчик.

Все поставляемые для выполнения работ на Объекте материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть представлены Подрядчику до начала выполнения работ (с применением таких материалов). Применение для выполнения работ на Объекте импортных материалов согласовывается Подрядчиком и сертифицируется в установленном порядке.

Цена Договора составляет 13 337 232 рубля 01 копейка, в том числе НДС 20% 2 222 872  рубля 00 копеек.

Промежуточные платежи за выполненные работы по Договору осуществляются Подрядчиком на основании актов о приемке выполненных работ справок о стоимости выполненных работ и затрат по формам КС-2 и КС-3, утвержденным Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 (далее - актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат) и счета. При расчете суммы очередного платежа Подрядчиком из стоимости выполненных работ удерживается гарантийная сумма в размере пяти процентов стоимости выполненных работ, которая является обеспечением надлежащего исполнения Субподрядчиком гарантийных обязательств по Договору. Выплата гарантийных сумм производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты истечения сроков таких гарантийных обязательств (в соответствии с Графиком финансирования (Приложение № 15 к Договору)), за вычетом средств, израсходованных на устранение выявленных дефектов в период действия гарантийных обязательств в соответствии с Регламентом исполнения гарантийных обязательств (Приложение № 17 к Договору) и Гарантийным паспортом (Приложение № 10 к Договору).

Оплата работ производится на основании Акта о приемки выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета. Оплата выполненных работ осуществляется Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения денежных средств от Заказчика.

Под стоимостью работ за отчетный период в Договоре понимается стоимость работ по Договору за соответствующий отчетный период, указанная в Календарном графике выполнения подрядных работ (Приложение № 3 к Договору) с учетом НДС 20%.

Сроки начала выполнения работ - с даты заключения Договора, окончание выполнения работ по Договору - 31 августа 2019 года.

Календарные сроки выполнения работ по Объекту определяются Календарным графиком выполнения подрядных работ (Приложение № 3 к Договору). Работы по Договору должны быть выполнены в соответствии с Календарным графиком выполнения подрядных работ и Ведомостью объемов и стоимости работ.

В соответствии с пунктом 3.1 Договора № 06.05/19, из стоимости выполненных работ Субподрядчиком работ, Подрядчиком была удержана гарантийная сумма в размере 666 861,6 рублей, которая подлежит возврату в следующие сроки: 2020-100 029,24 руб. (выплачено), 2021 – 100 029,24, 2022-133 372,32 руб., 2023 – 333 430,80.

В связи с отсутствием оплаты, сумма долга Подрядчика перед Субподрядчиком по Договору № 06.05/19 составила  233 401,56 рублей без учета суммы долга в размере 333 430,80 рублей, которая оплачивается Подрядчиком Субподрядчику по истечении 2023 года.

По договору № 1829L8-С0250 Генподрядчик обязуется поручить, а Субподрядчик обязуется выполнить работы по ремонту на Объекте в соответствии с условиями Предварительного договора, в соответствии с Ведомостью объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору), Техническим заданием на выполнение работ по ремонту (Приложение № 1 к Договору), действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными документами, приведенными в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ (Приложение № 5 к Договору), указаниями Генподрядчика, не противоречащими условиям Договора, выполнить все работы и сдать в установленном порядке Объект Генподрядчику в сроки, определенные Договором, а также исполнить гарантийные обязательства.

Субподрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ с применением строительных материалов в соответствии с Техническим заданием.

Все расходы по приобретению материалов, необходимых для выполнения работ на Объекте, несет Субподрядчик.

Цена Договора составляет 342 304 рубля 21 копейка, в том числе НДС 18% 52 215 рублей 90 копеек.

Промежуточные платежи за выполненные работы по Договору осуществляются Генподрядчиком на основании актов о приемке выполненных работ справок о стоимости выполненных работ и затрат по формам КС-2 и КС-3, утвержденным Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 (далее - актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат) и счета. При расчете суммы очередного платежа Генподрядчиком из стоимости выполненных работ удерживается гарантийная сумма в размере пяти процентов стоимости выполненных работ, которая является обеспечением надлежащего исполнения Субподрядчиком гарантийных обязательств по Договору. Выплата гарантийных сумм производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты истечения сроков таких гарантийных обязательств (в соответствии с Графиком финансирования (Приложение № 16 к Договору), за вычетом средств, израсходованных на устранение выявленных дефектов в период действия гарантийных обязательств в соответствии с Регламентом исполнения гарантийных обязательств (Приложение № 17 к Договору) и Гарантийным паспортом (Приложение № 10 к Договору).

Оплата работ производится на основании Акта о приемки выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета. Оплата выполненных работ осуществляется Генподрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения денежных средств от Заказчика.

Под стоимостью работ за отчетный период в Договоре понимается стоимость работ по Договору за соответствующий отчетный период, указанная в Календарном графике выполнения подрядных работ (Приложение № 3 к Договору) с учетом НДС 18%.

Генподрядчик ежемесячно оказывает Субподрядчику услуги по обеспечению технической документацией, координации СМР, выполняемых Субподрядчиком, взаимодействию с Заказчиком и т.п. (далее - услуги генподряда).

Стоимость услуг генподряда (в том числе НДС-18%) составляет 10% (десять процентов) от стоимости выполненных Субподрядчиком работ (в том числе НДС-18%), указанной в справке по форме КС-3 за соответствующий отчётный период. Стоимость услуг генподряда отражается в справке по форме КС-3 отдельной строкой.

Об оказании услуг генподряда за соответствующий отчётный период Стороны подписывают Акт на оказание услуг генподряда (Приложение № 15 к Договору) с последующим предоставлением (в течение 5 календарных дней) Генподрядчиком счёт-фактуры, оформленной в соответствии с налоговым законодательством РФ.

Сроки начала выполнения работ - с даты заключения Договора, окончание выполнения работ по Договору - 25 ноября 2018 года.

Календарные сроки выполнения работ по Объекту определяются Календарным графиком выполнения подрядных забот (Приложение № 3 к Договору). Работы по Договору должны быть выполнены в соответствии с Календарным графиком выполнения подрядных работ и Ведомостью объемов и стоимости работ.

В соответствии с пунктом 3.1 Договора № 1829L8-C0250, из стоимости выполненных Субподрядчиком работ, Подрядчиком была удержана гарантийная сумма в размере 17 115,22 рублей, которая согласно Приложению № 16 к Договору № 1829L8-C0250 подлежит оплате в следующие сроки:  2019 – 2 567,28, 2020-2 567,28, 2021-3 423,04, 2022-8 557,61.

В связи с тем, что ответчик не оплатил сумму долга,  на сегодняшний день сумма долга Подрядчика перед Субподрядчиком по Договору № 1829L8-C0250 составила  17 115,22 рублей.

По договору № 12.12/17 Субподрядчик обязуется на свой риск собственными и /или привлеченными силами и средствами выполнить планово-предупредительные работы на мосту через р. Шиворонь на км 218+017 (левый), путепроводе через а.д. на км 219+925 (левый) автомобильной дороги М-4 "Дон" -от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Тульская область (далее - Объект) в соответствии с Ведомостью объемов и стоимости работ (Приложение № 1 к настоящему Договору), действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными документами, перечисленными в Перечне нормативных документов, утвержденном распоряжением Заказчика и приведенном на сайте Заказчика (http://www.russianhighways.ru) в разделе «нормативная база/деятельность госкомпании» (далее -Перечень нормативных документов), указаниями Заказчика, не противоречащими условиям Договора, выполнить все работы и сдать в установленном порядке Объект в эксплуатацию в сроки, определенные Договором, а также исполнить гарантийные обязательства.

Подрядчик обязуется принять результат выполненных работ по Объекту и оплатить их стоимость на условиях, и в сроки, определенные Договором.

Обязательства по настоящему Договору должны быть обеспечены за счет средств Субподрядчика.

Условием выплаты Подрядчиком Субподрядчику аванса в соответствии с п. 5.6 Договора является предоставление Субподрядчиком безотзывной банковской гарантии, обеспечивающей обязательства по возврату Подрядчику аванса, на сумму предоставляемого аванса. Такая банковская гарантия должна быть предоставлена банком, отвечающим требованиям, установленным в Приложении № 15 к Договору, на срок выполнения всех работ по Договору, увеличенный на 2 (два) календарных месяца. Банковская гарантия должна соответствовать форме, предусмотренной Приложением № 16 к Договору.

Цена Договора составляет 19 210 838,09 рублей, в том числе НДС 2 930 466,83 рублей, из них в 2018 году 268 217,96 рублей (двести шестьдесят восемь тысяч двести семнадцать рублей 96 копеек), в том числе НДС 40 914,60 рублей (сорок тысяч девятьсот четырнадцать рублей 60 копеек).

Подрядчик осуществляет платежи по настоящему Договору через Федеральное казначейство.

Промежуточные платежи за выполненные работы по настоящему Договору осуществляются Подрядчиком на основании актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат по формам КС-2 и КС-3, утвержденным Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 (далее - актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат), счета и счета-фактуры. При расчете суммы очередного платежа Подрядчиком из стоимости выполненных работ удерживается: сумма аванса, удерживаемого в соответствии с условиями Договора (если применимо) и гарантийная сумма в размере пяти процентов стоимости выполненных работ, которая является обеспечением надлежащего исполнения Субподрядчиком гарантийных обязательств по Договору. Выплата гарантийных сумм производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты истечения сроков таких гарантийных обязательств (в соответствии с Графиком возврата гарантийных сумм (Приложение № 3 к настоящему Договору), за вычетом средств, израсходованных на устранение выявленных дефектов в период действия гарантийных обязательств в соответствии с Регламентом исполнения гарантийных обязательств (Приложение № 12 к настоящему Договору) и Гарантийным паспортом (Приложение № 10 к настоящему Договору).

В случае предоставления Субподрядчиком банковской гарантии, обеспечивающей исполнение гарантийных обязательств, на основании п. 1.4.3 Договора, Подрядчик производит возврат гарантийных сумм в размере, соответствующем размеру предоставленной банковской гарантии, срок, определенный дополнительным соглашением Сторон.

Оплата выполненных работ осуществляется Подрядчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения от Субподрядчика счета на оплату. Счет может быть оформлен и направлен Субподрядчиком только на основании подписанного Подрядчиком акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат.

В соответствии с пунктом 5.2 Договора № 12.12/17, из стоимости выполненных Субподрядчиком работ, Подрядчиком была удержана гарантийная сумма в размере 960 541,90 рублей, которая согласно Приложению № 3 к Договору № 12.12/17 подлежит оплате в следующие сроки: 2022- 960 541,90 руб.

В связи с тем, что ответчик не оплатил сумму гарантийного удержания в установленные графиком сроки, на сегодняшний день сумма долга Подрядчика перед Субподрядчиком по Договору № 12.12/17 составила  960 541,90 рублей.

Так, факт сдачи и принятия работ подтверждается актами о приемке выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 08.06.2018, № 1 от 21.05.2018 г., № 3 от 07.09.2018 г.,  по договору № 06.05/18, актами о приемке выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 22.04.2019 г.,  № 1 от 20.11.2018 г. по договору № 12.09/18, актами о приемке выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.07.2019 г.,№ 2 от 23.08.2019 г. по договору № 06.05/19, актами о приемке выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ и затрат № от 12.11.2018 по договору № 1829L8-C0250, актами о приемке выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 10.07.2018 г.,  по договору № 12.12./17.

В целях досудебного урегулирования спора, истец направил в адрес ответчика претензию № 04/23 от 06.02.2023 г. с требованием погасить задолженность.

Претензионные требования ответчиком оставлены без рассмотрения, в связи с чем, истец обратился с настоящим иском в суд.

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства  должны  исполняться  надлежащим образом  в  соответствии с условиями  обязательства   и требованиями закона,  иных  правовых  актов,  а  при  отсутствии  таких  условий   и  требований  - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно  предъявляемыми  требованиями.

Статья 310 ГК РФ  указывает на то, что односторонний отказ от  исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не  допускается.

Согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии  со ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно ст. 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Основанием для возникновения обязательства ответчика по оплате выполненных работ является сдача ему результата работ (ст. ст. 711, 720, 746, 753 ГК РФ).

Согласно Информационному письму Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику. 

Согласно п. 4 ст. 753 ГК РФ, сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. 

В соответствии с нормой ст. 721 Гражданского кодекса Российской Федерации качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода, при этом, п. 2 названной статьи предусмотрено, что если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.

В силу ст. 755 ГК РФ подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. Установленный законом гарантийный срок может быть увеличен соглашением сторон.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Из принципа свободы договора (ст. 421 ГК РФ) следует, что стороны вправе определить порядок оплаты выполненных работ по своему усмотрению, в частности отступить от общего правила ст. 711 ГК РФ об оплате работ после окончательной сдачи их результата, установив, что частичная оплата выполненных работ приостанавливается до истечения гарантийного срока ("гарантийное удержание").

Подобное удержание применено сторонами для покрытия возможных расходов заказчика, вызванных ненадлежащим выполнением подрядчиком обязательств в отношении качества строительных работ. В соответствии со ст. 740 ГК РФ денежное обязательство заказчика по оплате является встречным по отношению к обязательству подрядчика по выполнению в натуре работ надлежащего качества (ст. 328 ГК РФ). Следовательно, неисправный подрядчик не вправе требовать выплаты полной договорной цены работ, если в гарантийный период выявлены не устраненные за его счет скрытые недостатки переданного объекта. Поэтому уменьшение договорной цены на стоимость устранения недостатков не является зачетом в том смысле, который придается данному понятию в ст. 410 ГК РФ.

Как следует из п.20 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2018) утв. Президиумом Верховного Суда РФ 14.11.2018 является законным условие договора о гарантийном удержании части стоимости работ и возврате подрядчику гарантийного удержания по истечении гарантийного срока.

Цель гарантийного удержания части оплаты работ заключается в том, чтобы понудить подрядчика качественно выполнять работы и обеспечивает возмещение заказчиком убытков, которые могут возникнуть при обнаружении скрытых дефектов спустя определенное время после приемки от подрядчика результатов работ.

Гарантийное удержание имеет правовую природу обеспечительного платежа и предназначено для компенсации Заказчиком из указанной суммы денежных средств в случае обнаружения скрытых дефектов, возникших после приемки работ от подрядчика.

В соответствии с нормой ст. 721 Гражданского кодекса Российской Федерации качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода, при этом, п. 2 названной статьи предусмотрено, что если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.

В силу ст. 755 ГК РФ подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. Установленный законом гарантийный срок может быть увеличен соглашением сторон.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Из принципа свободы договора (ст. 421 ГК РФ) следует, что стороны вправе определить порядок оплаты выполненных работ по своему усмотрению, в частности отступить от общего правила ст. 711 ГК РФ об оплате работ после окончательной сдачи их результата, установив, что частичная оплата выполненных работ приостанавливается до истечения гарантийного срока ("гарантийное удержание").

Подобное удержание применено сторонами для покрытия возможных расходов заказчика, вызванных ненадлежащим выполнением подрядчиком обязательств в отношении качества строительных работ. В соответствии со ст. 740 ГК РФ денежное обязательство заказчика по оплате является встречным по отношению к обязательству подрядчика по выполнению в натуре работ надлежащего качества (ст. 328 ГК РФ). Следовательно, неисправный подрядчик не вправе требовать выплаты полной договорной цены работ, если в гарантийный период выявлены не устраненные за его счет скрытые недостатки переданного объекта. Поэтому уменьшение договорной цены на стоимость устранения недостатков не является зачетом в том смысле, который придается данному понятию в ст. 410 ГК РФ.

Как следует из п.20 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2018) утв. Президиумом Верховного Суда РФ 14.11.2018 является законным условие договора о гарантийном удержании части стоимости работ и возврате подрядчику гарантийного удержания по истечении гарантийного срока.

Цель гарантийного удержания части оплаты работ заключается в том, чтобы понудить подрядчика качественно выполнять работы и обеспечивает возмещение заказчиком убытков, которые могут возникнуть при обнаружении скрытых дефектов спустя определенное время после приемки от подрядчика результатов работ.

Гарантийное удержание имеет правовую природу обеспечительного платежа и предназначено для компенсации Заказчиком из указанной суммы денежных средств в случае обнаружения скрытых дефектов, возникших после приемки работ от подрядчика.

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик ссылается на следующее.

Согласно техническому регламенту Заказчиком - ГК «Автодор» совместно с эксплуатирующими организациями, Подрядчиками, Субподрядчиками в четвертом квартале года подходящего к концу осуществляется выезд и осмотр гарантийных участков на предмет выявления дефектов, проявившихся на отремонтированных участках, в случае выявления дефектов выносится Предписание, по которому необходимо устранить нарушения, в случае если дефекты не обнаружены, либо Предписание исполнено, составляется Акт об исполнении/завершении гарантийных обязательств за период и производится оплата по счету за указанный период.

Следовательно, как полагает ответчик, для выплат сумм гарантийного обеспечения Субподрядчик должен предоставить Генподрядчику Акт об исполнении/завершении гарантийных обязательств за каждый из периодов и счет на оплату, а Генподрядчик в свою очередь при условии получения денежных средств от Заказчика, произвести выплату сумм гарантийных обязательств, за вычетом средств, израсходованных для устранения выявленных дефектов если они были.

Акты комиссионного осмотра участка автомобильной дороги и о завершении действия гарантийных обязательств по конструктивным элементам Объекта и/или Объекта в целом по договору №12.09/18 от 20.09.2018г. по «Ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 152+200 - км 193+00( (обратное направление), Тульская область» Ответчику не предоставлены Истцом, следовательно, и оснований для выплаты Истцу - Субподрядчику нет.

Акты комиссионного осмотра участка автомобильной дороги и о завершении действия гарантийных обязательств по конструктивным элементам Объекта и/или Объекта в целом по договору №06.05/19 от 27.05.2019г. по «Ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 132+770 - км 152+20( (обратное направление), Тульская область» Ответчику не предоставлены Истцом, следовательно, и оснований для выплаты Истцу - Субподрядчику нет.

Акты комиссионного осмотра участка автомобильной дороги и о завершении действия гарантийных обязательств по конструктивным элементам Объекта и/или Объекта в целом по договору №1829L8-C0250 от 12.10.2018г. по «Ремонту транспортной развязки на км 199+501 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар Новороссийск, Тульская область» Ответчику не предоставлены Истцом, следовательно, и оснований для выплаты Истцу - Субподрядчику нет.

Акты комиссионного осмотра участков автомобильных дорог и о завершении действия гарантийных обязательств по конструктивным элементам Объекта и/или Объектов в целом, а также счета на оплату Истцом до настоящего времени не предоставлены окончание гарантийного периода, исчисляемого согласно графикам финансирования по вышеуказанным договорам само по себе, не является основанием для выплат суммы гарантийных обязательств.

Кроме того, помимо не представленных Актов комиссионного осмотра участков автомобильной дороги и о завершении действия гарантийных обязательств по конструктивным элементам Объекта и/или Объекта в целом ООО «ЗемДорСтрой» (Ответчик) неоднократно получал предписания с требованиями устранения замечаний, выявленных в ходе осмотра гарантийных участков от Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» по объектам: по Договору №06.05/18 от 04.05.2018г. «Ремонт автомобильной дороги М-4 «Дон» о Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 117+17 - км 121+000, Московская область», по Договору №12.12/17 от 25.12.2017г. «Планово-предупредительные работы на мосту через р. Шиворонь на км 218+017 (левый), путепроводу через а.д. на км. 219+925 (левый) автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска Тульская область».

Разделом 10 Договора №06.05/18 от 04.05.2018г. установлены Гарантии качества 4 года.

Разделом 10 Договора №12.12/17 от 25.12.2017г. установлены Гарантии качества 5 лет.

Ответчик также указывает, что в нарушение условий заключенных договоров №06.05/18 от 04.05.2018г. №12.12/17 от 25.12.2017 г. а также норм действующего законодательства выполнил работы не качественно.

23.04.2021 г. поступило письмо №1214-ВТ от Воронежского филиала ГК «Автодор» (направлении Акта №5/ТО/ВФ-2021 от 15.04.2021г. комиссионного осмотра и выявленных дефекта: асфальтобетонного покрытия на мосту через реку Шиворонь км 218+017 (о.н.) по (Договор; №12.12/17 от 25.12.2017г. с Истцом).

28.04.2021г. поступило Предписание №27 от Голицынского филиала ГК «Автодор» о выявленных дефектах асфальтобетонного покрытия на  км. 117+300, 119+600, 119+700, 120+20' (по Договору №06.05/18 от 04.05.2018г. с Истцом).

О вышеуказанных дефектах на объектах Истец был уведомлен 14.05.2021 г. сопроводительным Претензионным письмом №28/04-1 от 28.04.2021г., письмо было направлен Истцу как почтой РФ по юридическому адресу: 197374, 

<

...>, лит. А, пом. 579, так и посредством электронной почты на адреса: еIena.kudinova@yit.ru, vladimir.kirginekov@yit.ru, ext-irina.semenova@yit.ru , marina.eremenko@vit.ru, по телефонной связи руководство так же связывалось с Истцом, однако замечания им устранены не были, в ответ получили письмо с требованием досрочного возврата сумм гарантийных обязательств исх. № 131/21 от 15.07.2021г.

ООО «ЗемДорСтрой» было вынуждено собственными силами исправлять дефект: асфальтобетонного покрытия.

05.05.2022 г. от Голицынского филиала ГК «Автодор» поступило Предписание №80 и № №80 от 25.04.2022г. комиссионного осмотра и выявленных дефектах асфальтобетонного покрытия на км 117+200, 119+300 (по Договору №06.05/18 от 04.05.2018г. с Истцом).

26.07.2022г. поступило письмо №3448-ГФ от Голицынского филиала ГК «Автодор» с Предписанием №98 от 08.07.2022г. и Актом №98 от 07.07.2022г. комиссионного осмотра выявленных дефектах асфальтобетонного покрытия на км 117+000 - км 119+000 (по Договору №06.05/18 от 04.05.2018г. с Истцом).

Вышеуказанные предписания Ответчик направил Истцу по адресам: 

<

...>, лит. А, пом. 579 и 

<

...> Б «Мирлэнд», стр. 15, оф. 404, вместе с ответом на поступившую Досудебную претензию №82/22 от  26.07.2022г. в виде Встречного претензионного требования исх. №03/08-1 от 03.08.2022г. в котором ООО «ЗемДорСтрой» требовало устранить выявленные замечания.

Ответчик привлек к выполнению работ по устранению дефектов и повреждений асфальтобетонных покрытий на участке автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 117+173 - км 121+000 Московская область 3-е лицо - Индивидуального предпринимателя ФИО3, заключив договор №09/09-1 от 09.09.2022г., стоимость работ по устранению дефектов и повреждений асфальтобетонного покрытия (в том числе устранение колейности), согласно Акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 №1 от 01.11.2022г., Справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 №1 от 01.11.2022г. и счет-фактуре №22 от 01.11.2022г. составила 3 300 000,00 рублей, без учета стоимости материала.

Материал ООО «ЗемДорСтрой» был поставлен самостоятельно в форме давальческого сырья для переработки, согласно Накладной на отпуск материалов на сторону №11 от 14.09.2022г., Отчету о переработке материалов №1 от 01.11.2022г. стоимость Асфальтобетонной Щебеночно-мастичной смеси ЩМА-20 на ПБВ-60 с доставкой до Объекта (км 117+173 - км 121+000) составила 3 701 250,00 рублей.

Итого стоимость работ по устранению колейности, дефектов и повреждений асфальтобетонного покрытия составила 7 001 250,00  рублей.

Работы были приняты комиссией Голицынского филиала ГК «Автодор» по Акту №125 от 21.09.2022г., ход работ был отснят ведущим специалистом отдела эксплуатации дорожных сооружений и транспортной безопасности.

До настоящего времени Акт комиссионного осмотра участка автомобильной дороги и о завершении действия гарантийных обязательств по конструктивным элементам Объекта и/или Объекта в целом по Договору №12.12/17 от 25.12.2017г. по планово-предупредительным работам на мосту через р. Шиворонь на км 218+017 (левый), путепроводу через а.д. на км. 219+925 (левый) автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска Тульская область» не подписан, поскольку ранее выявленные дефекты не были устранены, и выплата гарантийного обеспечения Ответчику ГК «Автодор» не была произведена, задолженность перед Ответчиком составляет 1 073 305,00 рублей, оснований для выплаты Ответчику нет, следовательно, и оснований для выплаты Истцу - Субподрядчику нет.

Между тем, доводы ответчика носят голословный характер, не подтвержденный документальными доказательствами.

Суд усматривает, что доказательств извещения/уведомления истца о возникновении недостатков в выполненных Истцом работах в материалах дела не имеется.

В соответствии с пунктами 10.4., 10.6., 10.7. и 18.11 Договора№ 12.12/17 и Договора 06.05/18 следует, что для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Субподрядчик обязан направить своего представителя не позднее трех рабочих дней со дня получения письменного извещения Подрядчика».

При отказе или уклонении Субподрядчика от составления или подписания акте обнаруженных дефектов Подрядчик создает комиссию, в состав которой входят представителе Подрядчика, Инженерной организации, эксплуатационной организации...».

В случае нарушения Субподрядчиком гарантийных обязательств по настоящем Договору, Подрядчик вправе удовлетворить свои требования к Субподрядчику за счет средств предусмотренных пунктом 5.2. Договора...»

Любое сообщение (уведомление, требование, запрос), адресованное одной Стороной, другой Стороне в связи с исполнением, расторжением или прекращением Договора, должна совершаться в письменной форме.

Сообщение считается переданным надлежащим образом и полученным адресатом: в момент вручения адресату, если оно доставлено курьером, в том числе его уполномоченному представителю; в момент доставки или (в зависимости от того, что наступит раньше) по истечении 1 (десяти) календарных дней со дня сдачи его в организацию связи, если оно направлено адресат заказным либо ценным почтовым отправлением; на следующий рабочий день, если оно направлено телеграфом».

Ответчик приложил к своему отзыву копию Письма № 1214-ВТ от 23.04.2021 г. Воронежского филиала ПС «Автодор» с актом № 5/ТО/ВФ-2021 от 15.04.2021 г. комиссионного осмотра, копию  предписания № 27 от 28.04.2021 г. от Голицынского филиала ГК «Автодор», копию претензионного письма № 28/04-1 от 28.04.2021 г., копию предписания № 80 и Акта комиссионного осмотра № 80 с 25.04.2022 г. от Голицынского филиала ГК «Автодор», копию письма № 3448-ГФ от 26.07.2022 г. с Голицынского филиала ГК «Автодор» с Предписанием № 98 от 08.07.2022 г. и Актом № 98 с 07.07.2022 г. комиссионного осмотра свои письма в адрес Истца от 14.05.2021 г., однако Ответчик не доказал, что указанные документы были отправлены Истцу и Ответчик выполнил все требования, предусмотренные Договорами для случаев возникновения недостатков, возникших в гарантийный период.

Также Ответчик в письмах от 03.08.2022 г. № 03/08-1 и с 05.09.2022 исх. № 05/09-1, заявлял что им уже устранены недостатки асфальтобетонного покрытия и Ответчик приступил к устранению недостатков по объекту: «Ремонт автомобильной дороги М-«Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска км 117+173 - к 121+000 Московская области по Договору № 06.05/18.

Однако, ответчик не доказал, что недостатки непосредственно возникли в работах, которые выполнял Истец.

Приложенные к отзыву предписания ГК «Автодор» не доказывают, что эти недостатки возникли в работах, выполненных Истцом, поскольку Ответчиком не представлен в материалы дела договор подряда, заключенный с ГК «Автодор», не доказан тот факт, что других договоров во исполнение договора с ГК «Автодор» Ответчиком не было заключено с другими субподрядчиками.

Ответчик не доказал, что Ответчик действительно устранил недостатки на сумму 7 001 250 рублей.

Договор № 09/09-1, заключенный 09.09.2022 г. не содержит ни техническое задание, ни смету.

Кроме того, нет платежного поручения на оплату указанной суммы.

Ответчиком в материалы дела представлена товарная накладная на поставку ООО «ЗемДорСтрой» ИП ФИО3 асфальтобетонной щебеночно-мастичной смеси ЩМА-20 на ПБВ-60 № 11 от 14.09.2022 г. на сумму 3 701 250 рублей, однако ООО «ЗемДорСтрой» не представлены документы, подтверждающие каким образом и по какой стоимости указанное сырье возникло у ООО «ЗемДорСтрой».

Более того, работы по Договору № 09/09-1, по заключенному 09.09.2022 г. между ООО «ЗемДорСтрой» и ИП ФИО3 были выполнены согласно представленным Ответчиков КС-2 и КС-3 только 1 ноября 2022 года, тогда как Акт № 125 подписан Ответчиком с Голицынским филиалом ГК «Российские автомобильные дороги» за полтора месяца до этого - 21.09.2022 г.

При этом, в Акте не сказано, что работы выполнены или недостатки устранены. В акте  указано, что «замечания отсутствуют». Принимая во внимание вышеизложенное, а также тот факт, что с момента оставшегося без ответа требования Истца о предоставлении документов подтверждающих убытки Ответчика по устранению недостатков прошло почти полгода.

Исходя из условий договоров следует, что выплата гарантийных сумм производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты истечения сроков таких гарантийных обязательств (в соответствии с Графиком финансирования (Приложение № 11 к настоящему Договору), за вычетом средств, израсходованных на устранение выявленных дефектов в период действия гарантийных обязательств в соответствии с Регламентом исполнения гарантийных обязательств (Приложение № 13 к настоящему Договору) и Гарантийным паспортом (Приложение № 10 к настоящему Договору).

Стороны согласовали график возвращения денежных средств, согласно Приложениям.

Также согласовали условие о том, что началом срока гарантийных обязательств субподрядчика считается дата подписания акта ввода объекта в эксплуатацию приемочной комиссией.  

В соответствии со ст. 327.1 ГК РФ исполнение обязанностей может быть обусловлено совершением или несовершением одной из сторон обязательства определенных действий либо наступлением иных обстоятельств, предусмотренных договором, в том числе полностью зависящих от воли одной из сторон.

Наступление "иных обстоятельств" - это событие, которое носит вероятный характер. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию относится к такому событию. В таком случае право подрядчика на возврат гарантийного удержания становится неопределенным во времени, поскольку объект строительства никогда не может быть сдан по не зависящим от сторон обстоятельствам в эксплуатацию (например, отсутствие финансирования строительства, ненадлежащие действия других подрядчиков на объекте, банкротство генерального подрядчика и т.д.).

Так, что момент возврата гарантийного удержания должен быть определен указанием на событие, которое неизбежно должно наступить. Ввод объекта в эксплуатацию, получение справки от эксплуатирующей организации к событию, которое неизбежно должно наступить, не относится.

Таким образом, ссылка ответчика о том, что по настоящему делу срок возврата суммы гарантийного обеспечения не наступил является необоснованным, поскольку между сторонами не согласовано условие о гарантийном сроке. 

Стороны установили поэтапный порядок сдачи-приемки работ Субподрядчиком Подрядчику. Под этапом работ для целей настоящего Договора понимается объем работ, который, в соответствии с Календарным графиком выполнения подрядных работ должен быть выполнен Субподрядчиком в течение отчетного периода. Приемка очередного этапа работ осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные Регламентом приемки выполненных работ. Отчетным периодом (сроком выполнения этапа работ) признается период с 21-го числа предыдущего месяца по 20-е число отчетного месяца (включительно), если иной период не предусмотрен Календарным графиком выполнения подрядных работ (Приложение №3 к настоящему Договору).

Подрядчик вправе отказать Субподрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждаются исполнительной и другой технической документацией, о чем Субподрядчику направляется письменное уведомление.

В случае установления Подрядчиком при приемке очередного этапа работ несоответствия качества выполненных Субподрядчиком работ, акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ и затрат Подрядчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений. При этом, если несоответствие качества выполненных Субподрядчиком работ установлено Подрядчиком после подписания акта о приемке выполненных работ и (или) справки о стоимости выполненных работ и затрат, и до ввода Объекта в эксплуатацию в порядке, предусмотренном разделом 9 Договора, Субподрядчик обязан по требованию Подрядчика за свой счет устранить выявленные нарушения в согласованные Подрядчиком сроки.

Риск случайной гибели результата работ и/или результата этапа работ переходит от Субподрядчика к Подрядчику после выполнения работ в полном объеме, предусмотренном Договором, и подписания последнего акта о приемке выполненных работ.

Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней подписывает Акт о приемке выполненных работ (КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), или предоставляет мотивированный отказ, в противном случае переданные Субподрядчиком Акт о приемке выполненных работ (КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), считаются принятыми Подрядчиком и подлежащими оплате.

Проведение приемочной комиссии по вводу Объекта в эксплуатацию: 9.1.1 Не менее чем за 5 (пять) календарных дней до ожидаемого срока завершения работ на Объекте Субподрядчик извещает Подрядчика о готовности завершенного ремонтом Объекта к проведению приемочной комиссии по вводу Объекта в эксплуатацию (далее -приемочная комиссия). После извещения Субподрядчика о готовности Объекта к вводу в эксплуатацию, Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней назначает дату проведения и состав приемочной комиссии.

Состав приемочной комиссии Подрядчик определяет в соответствии с ВСН 19-89 и действующими нормативно-правовыми документами. В обязательном порядке в состав приемочной комиссии должны быть включены представители Подрядчика, Субподрядчика (в т.ч., при необходимости, субподрядной организации), эксплуатационной организации, Инженерной организации. При необходимости, Подрядчик вправе привлечь к участию в работе приемочной комиссии представителей других организаций. Руководство деятельностью приемочной комиссией осуществляет ее председатель, назначаемый Подрядчиком.

Субподрядчик обязан организовать работу приемочной комиссии в назначенное Подрядчиком время и обеспечить ее всеми необходимыми материалами, оборудованием за свой счет.

Субподрядчик предоставляет Подрядчику и Инженерной организации за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения приемочной комиссии документы, необходимые для сдачи Объекта в эксплуатацию, указанные в перечне.

Итоги работы приемочной комиссии по вводу Объекта в эксплуатацию документируются соответствующим актом, оформленным по форме Приложения № 20 к настоящему Договору.

При этом, как следует из материалов дела, работы были приняты в 2018-2019 году, что  подтверждается актами о приемке выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 08.06.2018, № 1 от 21.05.2018 г., № 3 от 07.09.2018 г., по договору № 06.05/18, актами о приемке выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 22.04.2019 г.,  № 1 от 20.11.2018 г. по договору № 12.09/18, актами о приемке выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.07.2019 г.,№ 2 от 23.08.2019 г. по договору № 06.05/19, актами о приемке выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ и затрат № от 12.11.2018 по договору № 1829L8-C0250, актами о приемке выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 10.07.2018 г.,  по договору № 12.12./17.

Таким образом, удерживая сумму гарантийного удержания ответчик получает неосновательное обогащение.

В соответствии со ст. 64 АПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим кодексом и другими Федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования или возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио-видеозаписи, иные документы и материалы. 

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

В соответствии со ст. 71 АПК РФ доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. 

Арбитражным процессуальным законодательством установлены критерии оценки доказательств в качестве подтверждающих фактов наличия тех или иных обстоятельств. 

Доказательства, на основании которых лицо, участвующее в деле, обосновывает свои требования и возражения должны быть допустимыми, относимыми и достаточными. 

Признак допустимости доказательств предусмотрен положениями ст. 68 АПК РФ. 

В соответствии с указанной статьей обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. 

Достаточность доказательств можно определить как наличие необходимого количества сведений, достоверно подтверждающих те или иные обстоятельства спора. 

Отсутствие хотя бы одного из указанных признаков является основанием не признавать требования лица, участвующего в деле, обоснованными (доказанными).

В результате исследования и оценки имеющихся в деле доказательств, арбитражный суд пришел к выводу о необоснованности и документальной неподтвержденности доводов ответчика.

Учитывая вышеизложенное, суд считает требование истца о взыскании задолженности по договору № 06.05/18 в размере 3 385 538 руб. 52 коп., задолженности по договору 12.09/18 в размере 1 133 572 руб. 26 коп., задолженности по договору № 06.05/19 в размере 233 401 руб. 56 коп., задолженности по договору № 1829L8-С0250 в размере 17 115 руб. 22 коп., задолженности по договору № 12.12/17 в размере 960 541 руб. 90 коп., правомерным и подлежащим  удовлетворению, так как от ответчика не поступили в суд документы, подтверждающие возврат денежных средств и поскольку односторонний отказ от исполнения денежных обязательств противоречит ст. ст. 309, 310 ГК РФ.

Также истцом заявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 24.04.2023 г. по договору № 06.05/18 в размере 183 503 руб. 82 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами по договору 12.09/18 в размере 71 210 руб. 45 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами по договору № 06.05/19 в размере 14 121 руб. 94 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами по договору № 1829L8-С0250 в размере 1 254 руб. 51 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами по договору № 12.12/17 в размере 22 500 руб. 37 коп. с последующим начислением суммы процентов, начиная с 25.04.2023 г. по день фактической оплаты суммы долга, расчет которого проверен судом, признан верным и обоснованным.

В соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

В силу действовавшей до 01.08.2016 редакции п. 1 ст. 395 ГК РФ размер процентов определяется существующими в месте жительства кредитора или, если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения, опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц (п. 1 ст. 395 ГК РФ, в редакции Федерального закона от 08.03.2015 г. № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В соответствии с редакцией п. 1 ст. 395 ГК РФ, действующей с 01.08.2016, размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды (п. 1 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 315-ФЗ).

Согласно положениям Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции настоящего Федерального закона применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Как следует из п. 48 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24 марта 2016 г. № 7 «О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ» сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

Расчет процентов, начисляемых после вынесения решения, осуществляется в процессе его исполнения судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). Размер процентов, начисленных за периоды просрочки, имевшие место с 1 июня 2015 года по 31 июля 2016 года включительно, определяется по средним ставкам банковского процента по вкладам физических лиц, а за периоды, имевшие место после 31 июля 2016 года, - исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды после вынесения решения (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 07.02.2017 № 6).

В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (статья 202 ГПК РФ, статья 179 АПК РФ).

Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание, что ответчик не доказал возврат денежных средств, суд приходит к выводу, что исковые требования в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 24.04.2023 г. по договору № 06.05/18 в размере 183 503 руб. 82 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами по договору 12.09/18 в размере 71 210 руб. 45 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами по договору № 06.05/19 в размере 14 121 руб. 94 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами по договору № 1829L8-С0250 в размере 1 254 руб. 51 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами по договору № 12.12/17 в размере 22 500 руб. 37 коп. с последующим начислением суммы процентов, начиная с 25.04.2023 г. по день фактической оплаты суммы долга, являются обоснованными и подлежащими удовлетворению в заявленном размере.

Расходы по госпошлине в сумме 54 114 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца, в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

Госпошлина в размере 307 руб., уплаченной по платежному поручению № 59 от 14.03.2023 г.  подлежит возврату истцу с учетом принятых судом уточнений исковых требований  в порядке ст. 49 АПК РФ.

На основании ст. ст. 8-12, 309, 310, 395, 702, 711, 753 ГК РФ, руководствуясь ст. ст.  64, 65, 67, 71, 110, 167-171, 176, 180 АПК РФ, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЗЕМДОРСТРОЙ" (394016, РОССИЯ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., ГОРОД ВОРОНЕЖ Г.О., ВОРОНЕЖ Г., ВОРОНЕЖ Г., МОСКОВСКИЙ ПР-КТ, Д. 53, ОФИС 1106, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 16.04.2013, ИНН: 

<

***>, КПП: 366201001) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЛЕММИНКЯЙНЕН СТРОЙ" (197374, 

<

...> ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 579, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 01.04.2003, ИНН: 

<

***>, КПП: 781401001) задолженность по договору № 06.05/18 в размере 3 385 538 (Три миллиона триста восемьдесят пять тысяч пятьсот тридцать восемь) руб. 52 коп., задолженность по договору 12.09/18 в размере 1 133 572 (Один миллион сто тридцать три тысячи пятьсот семьдесят два) руб. 26 коп., задолженность по договору № 06.05/19 в размере 233 401 (Двести тридцать три тысячи четыреста один) руб. 56 коп., задолженность по договору № 1829L8-С0250 в размере 17 115 (Семнадцать тысяч сто пятнадцать) руб. 22 коп., задолженность по договору № 12.12/17 в размере 960 541 (Девятьсот шестьдесят тысяч пятьсот сорок один) руб. 90 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами по договору № 06.05/18 в размере 183 503 (Сто восемьдесят три тысячи пятьсот три) руб. 82 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами по договору 12.09/18 в размере 71 210 (Семьдесят одна тысяча двести десять) руб. 45 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами по договору № 06.05/19 в размере 14 121 (Четырнадцать тысяч сто двадцать один) руб. 94 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами по договору № 1829L8-С0250 в размере 1 254 (Одна тысяча двести пятьдесят четыре) руб. 51 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами по договору № 12.12/17 в размере 22 500 (Двадцать две тысячи пятьсот) руб. 37 коп. с последующим начислением суммы процентов, начиная с 25.04.2023 г. по день фактической оплаты суммы долга, расходы по оплате госпошлины в размере 54 114 (Пятьдесят четыре тысячи сто четырнадцать) руб.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "ЛЕММИНКЯЙНЕН СТРОЙ" (197374, 

<

...> ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 579, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 01.04.2003, ИНН: 

<

***>, КПП: 781401001) из дохода федерального бюджета госпошлину в размере 307 (Триста семь) руб., уплаченной по платежному поручению № 59 от 14.03.2023 г.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

 

Судья                                                                             А.А. Федоточкин