АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-18923/2019

13 августа 2019 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 13 августа 2019 года

Полный текст решения изготовлен 13 августа 2019 года

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.А. Ерина при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 

ФИО1 рассмотрел в судебном заседании дело по иску 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮЗА-ГАЗ» 

(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к ОТДЕЛУ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ 

(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

об обязании заключить дополнительного соглашения к муниципальному контракту от 25.06.2018 №0162300019118000071-0189232-03 и о взыскании 7 697 147 руб. 08 коп.,

 

при участии в судебном заседании

от истца: ФИО2, представитель по доверенности от 07.11.2018;

от ответчика: не явился, о времени и месте судебного заседания надлежащим образом извещен. 

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов суду, ходатайств не заявлено.

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮЗА-ГАЗ» (далее – общество «ЮЗА-ГАЗ», истец) обратилось в суд с исковым заявлением к ОТДЕЛУ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ (далее – отдел, ответчик) об обязании заключить дополнительного соглашения к муниципальному контракту от 25.06.2018 №0162300019118000071-0189232-03 и о взыскании 7 697 147 руб. 08 коп.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о дате и времени судебного заседания, в том числе публично, путем размещения информации на официальном сайте арбитражного суда, полномочного представителя для участия в судебном разбирательстве не направил, письменных возражений по существу заявленных требований в материалы дела не представил. Судебное заседание проведено в его отсутствие в порядке ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Истец заявил частичный отказ от исковых требований в части взыскания задолженности за выполненные работы по монтажу котельной, монтажу инженерных сетей объекта «Блочно-модульная газовая котельная 1.0 МВт (0,86 Гкал/час», расчета стоимости выполненных работ на 20.02.2019 г., на сумму 7 697 147 руб. 08 коп.

Частичный отказ принят судом в порядке ч.2 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поступившие 02.07.2019, 23.07.2019 дополнительные документы с ходатайством о приобщении документов к материалам дела, судом приобщены к материалам дела.  

Рассмотрев материалы дела, суд  

 

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, между обществом «ЮЗА-ГАЗ» (подрядчик) и отделом (заказчик) заключен муниципальный контракт от 25.06.2018 №0162300019118000071-0189232-03 на выполнение работ по строительству «Блочно-модульная газовая котельная 1.0 МВт (0,86 Гкал/час» в деревни Сызги муниципального образования Красноуфимского округ Свердловской области», расположенной по адресу: 

<

...> (далее – контракт). 

В соответствии с п. 1 контракта подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектной документацией, техническим заданием, календарным планом выполнения работ и сводным сметным расчетом являющимися неотъемлемой частью контракта в сроки указанные в контракте. Срок выполнения работ по контракту до 07.12.2018. Согласно п. 3.3. оплата производится заказчиком после завершения всего объема работ, а так же получения заключения Управления Ростехнадзора, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на основании счета/счета - фактуры по форме КС-11, КС-14.

Письмом № 299 от 05.12.2018г. истец уведомил отдел о завершении строительства объекта в полном объеме - 03.12.2018г.

18.12.2018г., в соответствии с п. 4.2.3. контракта, представителями Заказчика, Подрядчика, эксплуатационной организации, Уральского управления Ростехнадзора подписан акт приемки газопроводов и газоиспользующей установки для проведения комплексного опробования (пуско-наладочные работы) «Блочно-модульной газовой котельной 1,0 МВт (0,86 Гкал/час) в деревне Сызги, Муниципального образования Красноуфимский округ Свердловской области».

Истцом выполнены работы по монтажу инженерных сетей объекта «Блочно-модульная газовая котельная 1.0 МВт (0,86 Гкал/час), в соответствии с техническим заданием Ответчика, техническими регламентами и проектной документацией, а также Ответчику переданы акты приемки выполненных работ, исполнительная и иная документация.

Пунктом 4.2.2. контракта, приложения № 2 истец обязан выполнить пуско-наладочные работы оборудования газорегуляторного пункта.

Истец с согласия заказчика обратился с письмом исх. № 3236 от 30.10.2018г. к АО «ГАЗЭКС» (Красноуфимский участок) с предложением о заключении договора субподряда на выполнение работ по технологическому присоединению блочно-модульной газовой котельной 1,0 МВт (0,86 Гкал/час) в деревне Сызги, Муниципального образования Красноуфимский округ Свердловской области к существующему газопроводу ГЗ о57хЗ,5 в точке А в соответствии с планом газопровода М1:500. АО «ГАЗЭКС» письмом № 3/3.5-3/193 от 14.11.2018г. 

Согласно пунктам 1.4., 2.2. контракта, работы считаются завершенными с момента получения заключения Управления Ростехнадзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-11, КС-14.

Актом приемки газопроводов и газоиспользующей установки для проведения комплексного опробования от 18.12.2019г. установлен срок окончания проведения ПНР - 15 марта 2019г.

26.12.2018г. Истец направил в адрес Ответчика претензию исх. № 322, в которой указал, что проведение пуско-наладочных работ будет произведено после получения Истцом подтверждения от Ответчика о заключении им договоров на технологическое подключение к электрическим сетям, технологическое подключение газопровода.

20.02.2019г. Истец направил в адрес Ответчика претензию (исх. № 431, прилагается) в которой сообщает, что на 20.02.2019г. Ответчиком не выполнено технологическое присоединение системы газопотребления объекта (блочно-модульной газовой котельной 1,0 МВт (0,86 Гкал/час) в деревне Сызги, Муниципального образования Красноуфимский округ Свердловской области) к действующей газопроводной сети и не осуществлена подача топлива для проведения пуско-наладочных работ (ПНР) Истцом.

Письмом № 433 от 20.02.2019г. истец направил в адрес ответчика два экземпляра дополнительного соглашения от «20» февраля 2019г. к муниципальному контракту № 0162300019118000071-0189232-03 от 25 июня 2018г. на выполнение работ по строительству «Блочно-модульной газовой котельной 1,0 МВт (0,86 Гкал/час) в деревне Сызги, Муниципального образования Красноуфимский округ Свердловской области». Согласно письму истец предлагает дополнить пункт 3 контракта «Цена контракта и порядок расчета» подпунктом 3.3.1. следующего содержания: «Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком российскими рублями по безналичному расчету, путём перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика платежным поручением в течение 15 рабочих дней после завершения строительных работ, получения акта приемки (разрешения) Управления Ростехнадзора для проведения пуско-наладочных работ, актов приема передачи технической, исполнительной документации, актов по форме КС-2, КС-3, без изменения цены контракта».

Ответчик письмом исх. № 39 от 25.02.2019г заявил об отказе от подписи дополнительного соглашения к контракту, направленного Истцом в адрес Ответчика письмом № 433 от 20.02.2019г. и произвести оплату в размере 7 697 147,08 руб., указанной в претензии Истца № 431 от 20.02.2019г.

Истец письмом № 893 от 07.03.2019г. направил в адрес отдела претензию с требованием исполнить обязанность по выполнению технологического присоединения системы газопотребления объекта (блочно-модульной газовой котельной 1,0 МВт (0,86 Гкал/час) в деревне Сызги, Муниципального образования Красноуфимский округ Свердловской области) к действующей газопроводной сети (АО «ГАЗЭКС») и осуществить подачу топлива для проведения пуско-наладочных работ Истцом. 

Полагая, что уклонение ответчика от выполнения технологического присоединения системы газопотребления объекта к действующей газопроводной сети и осуществления подачи топлива для проведения пуско-наладочных работ, а также от оплаты 7 697 147,08 руб. незаконным и необоснованным, истец обратился в суд с настоящим иском.

Исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к следующим выводам.

Возникшие между сторонами правоотношения регулируются нормами гл. 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом положений Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В силу п. 1 ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.

При этом установленный ст. 452 Гражданского кодекса Российской Федерации порядок изменения договора предполагает передачу спора на разрешение суда только в случае, если стороны не смогли достичь соглашения об изменении договора в досудебном порядке.

В п. 4 ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по решению суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях.

Согласно части 13.1 статьи 34 указанного Закона срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего Федерального закона, за исключением случая, указанного в части 8 статьи 30 настоящего Федерального закона, а также случаев, когда Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок оплаты.

Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком; часть 7 статьи 94 Закона №44-ФЗ).

Согласно п. 5.1. контракта по окончании выполнения работ Истец предоставляет Ответчику подписанные акты сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2. КС-3 и КС-11, КС-14.

Пунктом 5.2. контракта предусмотрено, что Ответчик в 10-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ, обязан направить Истцу один экземпляр подписанных актов сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

18.12.2018г., представителями Заказчика, Подрядчика, эксплуатационной организации, Уральского управления Ростехнадзора. подписан акт  приемки газопроводов и газоиспользующей установки для проведения комплексного опробования (пуско-наладочные работы) «Блочно-модульной газовой котельной 1,0 МВт (0,86 Гкал/час) в деревне Сызги, Муниципального образования Красноуфимский округ Свердловской области».

21.12.2018г. ответчиком подписаны акты выполненных работ КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, счет-фактура.

Как пояснил истец, ответчик не произвел технологическое присоединение системы газопотребления объекта (блочно-модульной газовой котельной 1,0 МВт (0,86 Гкал/час) в деревне Сызги, Муниципального образования Красноуфимский округ Свердловской области) к действующей газопроводной сети и не осуществил подачу топлива для проведения пуско-наладочных работ истцом. 

Согласно п. 3.3. оплата производится заказчиком после завершения всего объема работ, а так же получения заключения Управления Ростехнадзора, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на основании счета/счета - фактуры по форме КС-11, КС-14.

Согласно п. 3.3. оплата производится заказчиком после завершения всего объема работ, а так же получения заключения Управления Ростехнадзора, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на основании счета/счета - фактуры по форме КС-11, КС-14.

Между тем, работы по  монтажу инженерных сетей объекта «Блочно-модульная газовая котельная 1.0 МВт (0,86 Гкал/час), в соответствии с техническим заданием Ответчика, техническими регламентами и проектной документацией, истцом выполнены. Акты выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС- 3 ответчику переданы. 

Проанализировав изложенные обстоятельства в совокупности с нормами материального права, учитывая, что ответчик возражений против внесения изменений в условия контракта не заявил, новое условие касается изменения порядка оплаты выполненных работ, суд пришел к выводу о том, что требование истца об обязании ответчика заключить дополнительного соглашения к муниципальному контракту от 25.06.2018 №0162300019118000071-0189232-03 подлежит удовлетворению на основании п. п. 1 п. 2 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Истец заявил частичный отказ от требования о взыскании с ответчика 7 697 147 руб. 08 коп.

Согласно ч. 2 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявитель вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

В соответствии с ч. 5 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд не принимает отказ от заявленных требований, уменьшение размера требований, признание иска ответчиком, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу.

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом, производство по делу подлежит прекращению.

Учитывая, что заявленный частичный отказ истца от иска не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону, суд его принимает.

Производство по делу в части требования о взыскании с ответчика 7 697 147 руб. 08 коп. подлежит прекращению в связи с принятием судом отказа от иска.

В соответствии с ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В связи с тем, что требования истца удовлетворены в полном объеме, судебные расходы по уплате государственной пошлины на основании ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат взысканию с ответчика в пользу истца. В связи с отказом от части требований, государственная пошлина в размере 55486 руб. подлежит возврату из бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

1. Принять отказ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮЗА-ГАЗ» от исковых требований о взыскании с ОТДЕЛА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ 7 697 147 руб. 08 коп. Производство по делу в данной части прекратить.

2. Исковые требования  удовлетворить.

3. Обязать ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ заключить дополнительное соглашение о внесении изменения в муниципальный контракт № 0162300019118000071-0189232-03 от 25 июня 2018г. на выполнение работ по строительству «Блочно-модульной газовой котельной 1,0 МВт (0,86 Гкал/час) в деревне Сызги, Муниципального образования Красноуфимский округ Свердловской области» на следующих условиях:

Дополнительное соглашение к Муниципальному контракту № 0162300019118000071-0189232-03 от 25 июня 2018г.

г. Красноуфимск                                                                  «__» _____ 2019 г.

Отдел ЖКХ Администрации МО Красноуфимский округ, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника ФИО3, действующего на основании Положения с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ЮЗА-Газ», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ФИО4, действующего на основании устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании протокола подведения итогов электронного аукциона № 0162300019118000071-0189232-3 от «01» июня 2018 г., заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1.      В связи с завершенным строительством блочно-модульной газовой котельной 1,0 МВт (0,86 Гкал/час) в деревне Сызги, Муниципального образования Красноуфимский округ Свердловской области», расположенной по адресу 

<

...> и в соответствии с:

-  проектной документацией, техническим заданием, календарным планом выполнения работ, сводным сметным расчетом, утверждённых Заказчиком и согласованных Подрядчиком;

-  Актом приемки газопроводов и газоиспользующей установки для проведения комплексного опробования (пуско-наладочных работ, срок окончания 15 марта 2019г.), подписанного 18.12.2019г. представителями заказчика, подрядчика, эксплуатационной организации, Уральского управления Ростехнадзора;

-        Актом приема передачи технической, исполнительной документации, подписанных сторонами муниципального контракта и переданных подрядчиком заказчику 21.12.2018г.;

-        Акта выполненных работ КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3. счет-фактуры, на сумму 7 697 147,08 рублей, подписанных сторонами муниципального контракта и переданных подрядчиком заказчику 21.12.2018г, «Стороны» договорились дополнить пункт 3 контракта «Цена контракта и порядок расчета» подпунктом 3.3.1. следующего содержания: «Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком российскими рублями по безналичному расчету, путём перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика платежным поручением в течение 15 рабочих дней после завершения строительных работ, получения акта приемки (разрешения) Управления Ростехнадзора для проведения пуско-наладочных работ, актов приема передачи технической, исполнительной документации, актов по форме КС-2, КС-3, без изменения цены контракта».

2.      Дополнительное соглашение вступает в силу с «01» марта 2019г.

3.      Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах по одному для каждой из «Сторон».

4.      Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями муниципального контракта

Заказчик 

Отдел ЖКХ Администрации МО Красноуфимский округ

Юридический адрес: 623300, Свердловская

область, Красноуфимский район п.Березовая

Роща, ул.Загородная, 4

Фактический адрес:623300, Свердловская

область, 

<

...>

ИНН 

<

***> КПП 661901001

УФК по Свердловской области (Финансовый

отдел АМО Красноуфимский округ, Отдел

ЖКХ АМО Красноуфимский округ, л/с 

<

***>)

Уральское ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург

Р/Счет 

<

***> 

ОКП041718933 ОКОГУ32100 ОКВЭД74.14

ОКФС 14 ОКОПФ 81 Тел.(34394) 2-39-9

Начальник Отдела ЖКХ Администрации МО Красноуфимский округ(подпись)______                                                                    (Ф.И.О.)

 

Исполнитель

Общество с ограниченной ответственностью «ЮЗА-Газ» 

Юридический адрес: г Омск, 644007, ул. Яковлева-ул. ФИО5, 163/45 корпус 1, 

Почтовый адрес: г Омск, 644007, ул. Яковлева-ул. ФИО5, 163/45 корпус 1 

ИНН 

<

***> 

КПП 550301001 

р/счет 

<

***> 

Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк», 630099 

<

...>,

БИК 045004816

К/счет 30101810500000000816, ОКПО 51640592,

ОКОНХ71100, ОКВЭД 71.12, ОКТМО52701000, 

ОГРН 

<

***>, Тел. 

<

***>, е-

mail: info@juza.ru

Директор ООО "ЮЗА-Газ»

(подпись)                                                              (Ф.И.О.)

 

4. Взыскать с  ОТДЕЛА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮЗА-ГАЗ» 6 000 (Шесть тысяч) руб. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.

5. Возвратить ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮЗА-ГАЗ» в связи с частичным отказом от исковых требований из федерального бюджета часть уплаченной при подаче иска государственной пошлины в размере 55 486 (Пятьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят шесть) руб. по платежному поручению от 26.03.2019 № 1652 в составе суммы 61 486 руб.

6. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

7. С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение». 

Выдача исполнительных листов производится не позднее пяти дней со дня вступления в законную силу судебного акта.

По заявлению взыскателя дата выдачи исполнительного листа (копии судебного акта) может быть определена (изменена) в соответствующем заявлении, в том числе посредством внесения соответствующей информации через сервис «Горячая линия по вопросам выдачи копий судебных актов и исполнительных листов» на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» либо по телефону Горячей линии 371-42-50.

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение». 

 

 

Судья                                                                А.А. Ерин