Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-53041/2024

09 апреля 2025 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена 25 марта 2025 года.

Полный текст решения изготовлен  09 апреля 2025 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеевой О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Шулаевой В. А., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью «СтройТехИмпорт» (адрес: 197345, 

<

...>, литера А, помещ. 2-Н, ОГРН: 

<

***>), 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью «Татаир Инжиниринг» (адрес: 420043, Республика Татарстан (Татарстан),  

<

...>/2, ОГРН: 

<

***>) 

о взыскании, 

при участии

- от истца: ФИО1 (доверенность от 05.12.2024), 

- от ответчика: не явился (извещен), 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «СтройТехИмпорт» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Татаир Инжиниринг» о взыскании с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ):

1) по договору поставки № 04-БПИ-ТАИ от 27.09.2023 - 2 351 759,20 руб. неосновательного обогащения; - 3 974 473,05 руб. неустойки за период с 08.11.2023 по 24.04.2024.

 2) по договору поставки № 25-07/2023-ПТ от 25.07.2023 - 1 218 375,51 руб. неосновательного обогащения; - 2 502 126,50 руб. неустойки за период с 06.10.2023 по 24.04.2024. 

3) по договору поставки № 28-07/2023-ПТ от 28.07.2023 - 2 401 008,48 руб. неосновательного обогащения; - 4 850 037,13 руб. неустойки за период с 06.10.2023 по 24.04.2024. 

4) по договору поставки № 02-БПИ-ТАИ от 25.09.2023 - 2 748 014,04 руб. неосновательного обогащения; - 4 644 143,73 руб. неустойки за период с 08.11.2023 по 24.04.2024. 

5) по договору поставки № 03-БПИ-ТАИ от 26.09.2023 - 2 909 432,80 руб. неосновательного обогащения; - 4 916 941,43 руб. неустойки за период с 08.11.2023 по 24.04.2024. 

6) по договору субподряда № 088-ПР от 04.10.2023 - 700 000 руб. неосновательного обогащения; - 2 432 453,75 руб. неустойки за период с 22.11.2023 по 24.04.2024; - 88 680,56 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 30.05.2024 по 30.01.2025; - проценты за пользование чужими денежными средствами, начисляемые на сумму неотработанного по договору № 088-ПР от 04.10.2023 аванса (700 000 руб.) с 31.01.2025 по дату фактического исполнения обязательства; 

7) по договору субподряда № 07-07/2023 от 07.07.2023 - 3 100 000 руб. неосновательного обогащения; - 9 355 087,56 руб. неустойки за период с 26.10.2023 по 24.04.2024; - 392 728,16 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 30.05.2024 по 30.01.2025; - проценты за пользование чужими денежными средствами, начисляемые на сумму неотработанного по договору № 07-07/2023 от 07.07.2023 аванса (3 100 000 руб.) с 31.01.2025 по дату фактического исполнения обязательства. 

8) по договору субподряда № 01-ЭБ-ТАТ от 12.06.2023 - 701 933,40 руб. неосновательного обогащения; - 900 580,91 руб. неустойки за период с 18.10.2023 по 24.04.2024; - 88 925,48 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 30.05.2024 по 30.01.2025; - проценты за пользование чужими денежными средствами, начисляемые на сумму неотработанного по договору № 01-ЭБ-ТАТ от 12.06.2023 аванса (701 933,40 руб.) с 31.01.2025 по дату фактического исполнения обязательства. 

9) по договору субподряда № 02-ЭБ-ТАТ от 12.06.2023 - 871 249,48 руб. неосновательного обогащения; - 1 276 133,08 руб. неустойки за период с 18.10.2023 по 24.04.2024; - 110 375,55 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 30.05.2024 по 30.01.2025; - проценты за пользование чужими денежными средствами, начисляемые на сумму неотработанного по договору № 02-ЭБ-ТАТ от 12.06.2023 аванса (871 249,48 руб.) с 31.01.2025 по дату фактического исполнения обязательства.

 10) по договору субподряда № 03-ЭБ-ТАТ от 12.06.2023 - 369 399,20 руб. неосновательного обогащения; - 613 009,07 руб. неустойки за период с 18.10.2023 по 24.04.2024; - 46 797,89 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 30.05.2024 по 30.01.2025; - проценты за пользование чужими денежными средствами, начисляемые на сумму неотработанного по договору № 03-ЭБ-ТАТ от 12.06.2023 аванса (369 399,20 руб.) с 31.01.2025 по дату фактического исполнения обязательства. 

11) по договору субподряда № 04-ЭБ-ТАТ от 12.06.2023 - 930 982,80 руб. неосновательного обогащения; - 2 515 316,90 руб. неустойки за период с 18.10.2023 по 24.04.2024; - 117 942,96 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 30.05.2024 по 30.01.2025; - проценты за пользование чужими денежными средствами, начисляемые на сумму неотработанного по договору № 04-ЭБ-ТАТ от 12.06.2023 аванса (930 982,80 руб.) с 31.01.2025 по дату фактического исполнения обязательства. 

12) по договору субподряда № 05-ЭБ-ТАТ от 12.06.2023 - 1 043 277 руб. неосновательного обогащения; - 1 383 886,76 руб. неустойки за период с 18.10.2023 по 24.04.2024; - 132 169,12 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 30.05.2024 по 30.01.2025; - проценты за пользование чужими денежными средствами, начисляемые на сумму неотработанного по договору № 05-ЭБ-ТАТ от 12.06.2023 аванса (1 043 277 руб.) с 31.01.2025 по дату фактического исполнения обязательства. 

13) по договору субподряда № 08-СИМ-ПР от 02.02.2024 - 2 150 000 руб. неосновательного обогащения; - 272 375,99 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 30.05.2024 по 30.01.2025; - проценты за пользование чужими денежными средствами, начисляемые на сумму неотработанного по договору № 08-СИМ-ПР от 02.02.2024 аванса (2 150 000 руб.) с 31.01.2025 по дату фактического исполнения обязательства. 

14) по договору субподряда № 01-СЕВ-TAT от 16.06.2023 - 2 800 000 руб. неосновательного обогащения; - 4 842 079,33 руб. неустойки за период с 21.09.2023 по 24.04.2024; - 354 722,21 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 30.05.2024 по 30.01.2025; - проценты за пользование чужими денежными средствами, начисляемые на сумму неотработанного по договору № 01-СЕВ-TAT от 16.06.2023 аванса (2 800 000 руб.) с 31.01.2025 по дату фактического исполнения обязательства. 

15) по договору субподряда № 07-БПИ-ТАИ от 30.11.2023 - 2 000 000 руб. неосновательного обогащения; - 253 373,01 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 30.05.2024 по 30.01.2025; - проценты за пользование чужими денежными средствами, начисляемые на сумму неотработанного по договору № 07-БПИ-ТАИ от 30.11.2023 аванса (2 000 000 руб.) с 31.01.2025 по дату фактического исполнения обязательства. 

Ответчик отзыв на иск не представил, требования истца по существу не оспорил. 

Представитель ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, поэтому дело рассмотрено в его отсутствие в порядке статьи 156 АПК РФ. 

В судебном заседании истец поддержал заявленные требования в полном объеме с учетом уточнения. 

Исследовав материалы дела, заслушав позицию истца, суд установил следующие обстоятельства. 

27.09.2023 между Истцом и Ответчиком заключен договор поставки № 04-БПИ-ТАИ, по условиям которого Поставщик (ООО «ТАТАИР ИНЖИНИРИНГ») обязуется поставить, а Покупатель (ООО «СТИ») принять и оплатить Товар, наименование, количество, качество, цена, сроки поставки, порядок оплаты, порядок и способ доставки которого указаны в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Договора.

Цена Договора определяется стоимостью Товара согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору), составляет 2 351 759,20 руб. (пункт 2.1 Договора) и оплачена платежным поручением № 248 от 05.10.2023. 

25.07.2023 между Истцом и Ответчиком заключен договор поставки № 25-07/2023-ПТ, по условиям которого Поставщик (ООО «ТАТАИР ИНЖИНИРИНГ») обязуется поставить, а Покупатель (ООО «СТИ») принять и оплатить Товар, наименование, количество, качество, цена, сроки поставки, порядок оплаты, порядок и способ доставки которого указаны в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Договора.

Цена Договора определяется стоимостью Товара согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору), составляет 1 446 197,57 руб. (пункт 2.1 Договора) и оплачена платежным поручением № 175 от 12.09.2023.

28.07.2023 между Истцом и Ответчиком заключен договор поставки № 28-07/2023-ПТ, по условиям которого Поставщик (ООО «ТАТАИР ИНЖИНИРИНГ») обязуется поставить, а Покупатель (ООО «СТИ») принять и оплатить Товар, наименование, количество, качество, цена, сроки поставки, порядок оплаты, порядок и способ доставки которого указаны в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Договора.

Цена Договора определяется стоимостью Товара согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору), составляет 2 401 008,48 руб. (пункт 2.1 Договора) и оплачена платежным поручением № 174 от 12.09.2023.

25.09.2023 между Истцом и Ответчиком заключен договор поставки № 02-БПИ-ТАИ, по условиям которого Поставщик (ООО «ТАТАИР ИНЖИНИРИНГ») обязуется поставить, а Покупатель (ООО «СТИ») принять и оплатить Товар, наименование, количество, качество, цена, сроки поставки, порядок оплаты, порядок и способ доставки которого указаны в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Договора.

Цена Договора определяется стоимостью Товара согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору), составляет 2 748 014,04 руб. (пункт 2.1 Договора) и оплачена платежным поручением № 245 от 05.10.2023.

 26.09.2023 между Истцом и Ответчиком заключен договор поставки № 03-БПИ-ТАИ, по условиям которого Поставщик (ООО «ТАТАИР ИНЖИНИРИНГ») обязуется поставить, а Покупатель (ООО «СТИ») принять и оплатить Товар, наименование, количество, качество, цена, сроки поставки, порядок оплаты, порядок и способ доставки которого указаны в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью Договора.

Цена Договора определяется стоимостью Товара согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору), составляет 2 909 432,80 руб. (пункт 2.1 Договора) и оплачена платежным поручением № 247 от 05.10.2023.

Сроки поставки по вышеперечисленным договорам поставки определены в течение 30 календарных дней с момента оплаты Товара (пункты 4 Спецификаций к договорам поставки).

В связи с тем, что Товар в установленные договорами поставки сроки Ответчиком поставлен не был ООО «СТИ» 25.04.2024 направило в адрес Ответчика претензию с требованием возвратить перечисленные Ответчику авансы.

04.10.2023 между Истцом и Ответчиком заключен договор субподряда № 088-ПР, по условиям которого ООО «ТАТАИР ИНЖИНИРИНГ» (Субподрядчик) обязалось выполнить на Объекте «Административное здание прокуратуры Гагаринского района г. Севастополя», расположенном по адресу: 

<

...>, строительно-монтажные работы по благоустройству территории (далее – Работы) в сроки и в объеме, предусмотренные настоящим Договором, а ООО «СТИ» (Генподрядчик) - создать необходимые условия для выполнения Работ, принять результат выполненных Работ и уплатить Цену Договора (пункт 2.1).

Цена договора в силу пункта 4.1 Договора составила 3 138 650,00 руб. 

Срок выполнения работ согласно пункту 3.1. Договора – не позднее 21.11.2023.

Платежными поручениями № 4436 от 09.10.2023 и № 4524 от 13.10.2023 ООО «СТИ» оплатило аванс в размере 700 000 руб.

07.07.2023 между Истцом и Ответчиком заключен договор субподряда № 07-07/2023 от, по условиям которого ООО «ТАТАИР ИНЖИНИРИНГ» (Субподрядчик) обязалось выполнить на Объекте - ГБУ РК «Бахчисарайский психоневрологический интернат», расположенный по адресу: 

<

...> строительно-монтажные работы по устройству слаботочных систем (далее – Работы) в сроки и в объеме, предусмотренные настоящим Договором, а ООО «СТИ» (Генподрядчик) - создать необходимые условия для выполнения Работ, принять результат выполненных Работ и уплатить Цену Договора.  

Цена договора в силу пункта 4.1 Договора составила 10 280 316,00 руб. 

Срок выполнения работ согласно пункту 3.1. Договора – не позднее 25.10.2023.

Платежными поручениями № 3114 от 20.07.2023, № 3321 от 01.08.2023, № 3595 от 18.08.2023 ООО «СТИ» оплатило аванс в размере 3 100 000 руб.

12.06.2023 между Истцом и Ответчиком заключен договор субподряда № 01-ЭБ-ТАТ от, по условиям которого ООО «ТАТАИР ИНЖИНИРИНГ» (Субподрядчик) обязалось выполнить на Объекте - «Строительство центра полиэтнической культуры молодёжи при РВУЗ "КИПУ" в г. Симферополь (1-й пусковой комплекс - Главный корпус). 1 очередь 1-й пусковой комплекс. Главный корпус.» строительно-монтажные работы по устройству дератизации (далее – Работы) в сроки и в объеме, предусмотренные настоящим Договором, а ООО «СТИ» (Генподрядчик) - создать необходимые условия для выполнения Работ, принять результат выполненных Работ и уплатить Цену Договора.

Цена договора в силу пункта 4.1 Договора составила 947 979,90 руб. 

Согласно пункту 3.1. Договора начало работ - с даты заключения Договора, окончание работ – по истечении 90 рабочих дней с даты начала работ. 

Платежным поручением № 56 от 26.06.2023 ООО «СТИ» оплатило аванс в размере 701 933,40 руб.

12.06.2023 между Истцом и Ответчиком заключен договор субподряда № 02-ЭБ-ТАТ от, по условиям которого ООО «ТАТАИР ИНЖИНИРИНГ» (Субподрядчик) обязалось выполнить на Объекте - «Строительство центра полиэтнической культуры молодёжи при РВУЗ "КИПУ" в г. Симферополь (1-й пусковой комплекс - Главный корпус). 1 очередь 1-й пусковой комплекс. Главный корпус.», строительно-монтажные работы по контролю довзрывоопасной концентрации газа (далее – Работы) в сроки и в объеме, предусмотренные настоящим Договором, а ООО «СТИ» (Генподрядчик) - создать необходимые условия для выполнения Работ, принять результат выполненных Работ и уплатить Цену Договора.

Цена договора в силу пункта 4.1 Договора составила 1 343 297,98 руб. 

Согласно пункту 3.1. Договора начало работ - с даты заключения Договора, окончание работ – по истечении 90 рабочих дней с даты начала работ. 

Платежным поручением № 64 от 29.06.2023 ООО «СТИ» оплатило аванс в размере 871 249,48 руб.

12.06.2023 между Истцом и Ответчиком заключен договор субподряда № 03-ЭБ-ТАТ, по условиям которого ООО «ТАТАИР ИНЖИНИРИНГ» (Субподрядчик) обязалось выполнить на Объекте - «Строительство центра полиэтнической культуры молодёжи при РВУЗ "КИПУ" в г. Симферополь (1-й пусковой комплекс - Главный корпус). 1 очередь 1-й пусковой комплекс. Главный корпус.» строительно-монтажные работы по устройству охранной сигнализации (далее – Работы) в сроки и в объеме, предусмотренные настоящим Договором, а ООО «СТИ» (Генподрядчик) - создать необходимые условия для выполнения Работ, принять результат выполненных Работ и уплатить Цену Договора. 

Цена договора в силу пункта 4.1 Договора составила 645 272,70 руб. 

Согласно пункту 3.1. Договора начало работ - с даты заключения Договора, окончание работ – по истечении 90 рабочих дней с даты начала работ. 

Платежным поручением № 58 от 26.06.2023 ООО «СТИ» оплатило аванс в размере 369 399,20 руб.

12.06.2023 между Истцом и Ответчиком заключен договор субподряда № 04-ЭБ-ТАТ, по условиям которого ООО «ТАТАИР ИНЖИНИРИНГ» (Субподрядчик) обязалось выполнить на Объекте - «Строительство центра полиэтнической культуры молодёжи при РВУЗ "КИПУ" в г. Симферополь (1-й пусковой комплекс - Главный корпус). 1 очередь 1-й пусковой комплекс. Главный корпус.» строительно-монтажные работы по устройству системы связи лифтов (далее – Работы) в сроки и в объеме, предусмотренные настоящим Договором, а ООО «СТИ» (Генподрядчик) - создать необходимые условия для выполнения Работ, принять результат выполненных Работ и уплатить Цену Договора.

Цена договора в силу пункта 4.1 Договора составила 2 647 702 руб. 

Согласно пункту 3.1. Договора начало работ - с даты заключения Договора, окончание работ – по истечении 90 рабочих дней с даты начала работ. 

Платежным поручением № 59 от 26.06.2023 ООО «СТИ» оплатило аванс в размере 930 982,80 руб.

12.06.2023 между Истцом и Ответчиком заключен договор субподряда № 05-ЭБ-ТАТ, по условиям которого ООО «ТАТАИР ИНЖИНИРИНГ» (Субподрядчик) обязалось выполнить на Объекте - «Строительство центра полиэтнической культуры молодёжи при РВУЗ "КИПУ" в г. Симферополь (1-й пусковой комплекс - Главный корпус). 1 очередь 1-й пусковой комплекс. Главный корпус.» строительно-монтажные работы по устройству тревожной сигнализации и системы экстренной связи (далее – Работы) в сроки и в объеме, предусмотренные настоящим Договором, а Генподрядчик обязуется создать необходимые условия для выполнения Работ, принять результат выполненных Работ и уплатить Цену Договора.

Цена договора в силу пункта 4.1 Договора составила 1 456 722,90 руб. 

Согласно пункту 3.1. Договора начало работ - с даты заключения Договора, окончание работ – по истечении 90 рабочих дней с даты начала работ. 

Платежным поручением № 60 от 26.06.2023 ООО «СТИ» оплатило аванс в размере 1 043 277 руб.

16.06.2023 между Истцом и Ответчиком заключен договор субподряда № 01-СЕВ-TAT от, по условиям которого ООО «ТАТАИР ИНЖИНИРИНГ» (Субподрядчик) обязалось выполнить на Объекте «Административное здание прокуратуры Гагаринского района г. Севастополя» адрес: 

<

...>. строительно-монтажные работы по устройству систем вентиляции и кондиционирования (далее – Работы) в сроки и в объеме, предусмотренные настоящим Договором, а ООО «СТИ» (Генподрядчик) - создать необходимые условия для выполнения Работ, принять результат выполненных Работ и уплатить Цену Договора.

Цена договора в силу пункта 4.1 Договора составила 4 462 745,93 руб. 

Согласно пункту 3.1. Договора срок окончания работ – не позднее 20.09.2023. 

Платежными поручениями № 2545 от 21.06.2023, № 3534 от 15.08.2023, № 3307 от 31.07.2023, № 3806 от 08.09.2023 ООО «СТИ» оплатило аванс в размере 2 800 000 руб.

02.02.2024 между Истцом и Ответчиком заключен договор субподряда № 08-СИМ-ПР, по условиям которого ООО «ТАТАИР ИНЖИНИРИНГ» (Субподрядчик) обязалось выполнить на Объекте - «Строительство центра полиэтнической культуры молодёжи при РВУЗ "КИПУ" в г. Симферополь (1-й пусковой комплекс - Главный корпус). 1 очередь 1-й пусковой комплекс. Главный корпус» строительно-монтажные работы по устройству слаботочных систем (далее – Работы) в сроки и в объеме, предусмотренные настоящим Договором, а ООО «СТИ» (Генподрядчик) - создать необходимые условия для выполнения Работ, принять результат выполненных Работ и уплатить Цену Договора. 

Цена договора в силу пункта 4.1 Договора составила 38 184 869,13 руб. 

Согласно пункту 3.1. Договора срок окончания работ – 01.10.2024. 

Платежными поручениями № 567 от 16.02.2024, № 426 от 08.02.2024, № 682 от 29.02.2024 ООО «СТИ» оплатило аванс в размере 2 150 000 руб.

30.11.2023 между Истцом и Ответчиком заключен договор субподряда № 07-БПИ-ТАИ от, по условиям которого ООО «ТАТАИР ИНЖИНИРИНГ» (Субподрядчик) обязалось выполнить на Объекте - ГБУ РК «Бахчисарайский психоневрологический интернат», расположенный по адресу: 

<

...> строительно-монтажные работы по устройству охранной пожарной сигнализации (далее – Работы) в сроки и в объеме, предусмотренные настоящим Договором, а Генподрядчик обязуется создать необходимые условия для выполнения Работ, принять результат выполненных Работ и уплатить Цену Договора.

Цена договора в силу пункта 4.1 Договора составила 8 232 787,50 руб. 

Согласно пункту 3.1. Договора срок окончания работ – 30.04.2024. 

Платежным поручением № 5666 от 27.12.2023 ООО «СТИ» оплатило аванс в размере 2 000 000 руб.

25.04.2024 ООО «СТИ» направлено в адрес ООО «ТАТАИР ИНЖИНИРИНГ» требование о представлении документов, подтверждающих использование перечисленных по договорам субподряда аванса по его целевому назначению, либо возвратить сумму неосвоенного аванса.

Поскольку претензии по договорам поставки и договорам субподряда оставлены Ответчиком без ответа и удовлетворения ООО «СТИ» обратилось с рассматриваемым иском в суд.

В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Согласно статье 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

В силу пункта 1 статьи 487 ГК РФ в случаях, когда договором купли-продажи предусмотрена обязанность покупателя оплатить товар полностью или частично до передачи продавцом товара (предварительная оплата), покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором, а если такой срок договором не предусмотрен, в срок, определенный в соответствии со статьей 314 названного Кодекса.

В случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок (статья 457), покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом (пункт 3 статьи 487 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Указанные в пункте 2 статьи 405 ГК РФ последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков (пункт 3 статьи 708 ГК РФ). 

Если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков (пункт 2 статьи 405 ГК РФ). 

Предоставленное ГК РФ или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором (пункт 1 статьи 450.1 ГК РФ). 

В соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 453 ГК РФ в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60 ГК РФ), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

В пункте 1 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении» разъяснено, что положения пункта 4 статьи 453 ГК РФ не исключают возможности истребовать в качестве неосновательного обогащения полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала. При ином подходе на стороне ответчика имела бы место необоснованная выгода.

В силу статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Кодекса. Правила, предусмотренные главой 60 ГК РФ, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

ООО «ТАТАИР ИНЖИНИРИНГ» односторонние отказы истцом от договоров поставки и подряда, требования о возврате уплаченных авансовых платежей, заявленные в письмах ООО «СТИ» от 23.04.2024 и 22.04.2024, не оспорило. Ответчик не представил в материалы дела доказательств поставки товаров истцу и сдачи результатов работ на уплаченные суммы авансов, равно как не представил и доказательств невозможности исполнения принятых на себя обязательств по причинам, с ним не связанным. 

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что истец правомерно и обоснованно в одностороннем порядке отказался от Договоров, договоры между сторонами прекращены. У ответчика возникли обязанности по возврату полученных от истца авансовых платежей. 

На основании изложенного, требования Истца о взыскании с ответчика неосновательного обогащения в виде неотработанных авансов по договорам поставки и договорам подряда являются законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Пунктами 7.2 договоров поставки предусмотрена неустойка за нарушение срока поставки составляет 1 % от стоимости непоставленного/недопоставленного Товара за каждый день просрочки.

Пунктами 10.2.1 договоров подряда предусмотрено, что за нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ, установленных настоящим Договором, более чем на 3 (три) календарных дня, Генподрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплатить неустойку в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) % от цены, указанной в п. 4.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки.

Истцом предъявлены к ответчику требования о взыскании неустоек по договорам подряда и договорам поставки, начисленных за период с даты истечения сроков исполнения Ответчиком своих обязательств по договорам до даты направления претензий. Расчет представлен в приложении к ходатайству об уточнении исковых требований от 14.01.2025. 

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

По смыслу закона неустойка является мерой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, направленной на восстановление нарушенного права. Размер неустойки может быть установлен в твердой сумме (штраф) или в виде периодически начисляемого платежа (пени), о чем указано в абзаце первом пункта 60 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств».

Материалами дела подтверждается нарушение ответчиком обязательств по договору в части сроков оплаты, в связи с чем, у истца возникло право на взыскание пени. 

Проверив расчет, суд признал его обоснованным, выполненным в соответствии с условиями договоров и подлежащим применению. Ответчик расчет неустойки не оспорил; контррасчет не представил; ходатайство о применении статьи 333 ГК РФ не заявил. 

В пункте 2 статьи 1107 ГК РФ предусмотрено, что на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395 ГК РФ) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором (пункт 1 статьи 395 ГК РФ).

Поскольку встречное предоставление равное по сумме перечисленных Ответчику авансовых платежей по договорам субподряда не представлено, и указанные средства не возвращены, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для взыскания с Ответчика начисленных на предъявленные ко взысканию суммы неосновательного обогащения по договорам субподряда в виде неотработанного аванса процентов с даты отказа Истцом от договоров.

Из разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенных в пункте 48 постановления от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» следует, что сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

Расчет процентов проверен судом и признан верным. Ответчик расчет процентов не оспорил, контррасчет не представил. 

Требования истца о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами, начисляемыми на предъявленные ко взысканию суммы неосновательного обогащения по договорам субподряда в виде неотработанного аванса, за период с 31.01.2025 по дату фактического исполнения обязательства подлежат удовлетворению.  

На основании изложенного, требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме с отнесением на ответчика в порядке статьи 110 АПК РФ расходов по уплате государственной пошлины. 

Руководствуясь статьями 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Татаир Инжиниринг» в пользу общества с ограниченной ответственностью «СтройТехИмпорт»: 

1) по договору поставки № 04-БПИ-ТАИ от 27.09.2023 - 2 351 759,20 руб. неосновательного обогащения; - 3 974 473,05 руб. неустойки за период с 08.11.2023 по 24.04.2024.

 2) по договору поставки № 25-07/2023-ПТ от 25.07.2023 - 1 218 375,51 руб. неосновательного обогащения; - 2 502 126,50 руб. неустойки за период с 06.10.2023 по 24.04.2024. 

3) по договору поставки № 28-07/2023-ПТ от 28.07.2023 - 2 401 008,48 руб. неосновательного обогащения; - 4 850 037,13 руб. неустойки за период с 06.10.2023 по 24.04.2024. 

4) по договору поставки № 02-БПИ-ТАИ от 25.09.2023 - 2 748 014,04 руб. неосновательного обогащения; - 4 644 143,73 руб. неустойки за период с 08.11.2023 по 24.04.2024. 

5) по договору поставки № 03-БПИ-ТАИ от 26.09.2023 - 2 909 432,80 руб. неосновательного обогащения; - 4 916 941,43 руб. неустойки за период с 08.11.2023 по 24.04.2024. 

6) по договору субподряда № 088-ПР от 04.10.2023 - 700 000 руб. неосновательного обогащения; - 2 432 453,75 руб. неустойки за период с 22.11.2023 по 24.04.2024; - 88 680,56 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 30.05.2024 по 30.01.2025; - проценты за пользование чужими денежными средствами, начисляемые на сумму неотработанного по договору № 088-ПР от 04.10.2023 аванса (700 000 руб.) с 31.01.2025 по дату фактического исполнения обязательства; 

7) по договору субподряда № 07-07/2023 от 07.07.2023 - 3 100 000 руб. неосновательного обогащения; - 9 355 087,56 руб. неустойки за период с 26.10.2023 по 24.04.2024; - 392 728,16 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 30.05.2024 по 30.01.2025; - проценты за пользование чужими денежными средствами, начисляемые на сумму неотработанного по договору № 07-07/2023 от 07.07.2023 аванса (3 100 000 руб.) с 31.01.2025 по дату фактического исполнения обязательства. 

8) по договору субподряда № 01-ЭБ-ТАТ от 12.06.2023 - 701 933,40 руб. неосновательного обогащения; - 900 580,91 руб. неустойки за период с 18.10.2023 по 24.04.2024; - 88 925,48 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 30.05.2024 по 30.01.2025; - проценты за пользование чужими денежными средствами, начисляемые на сумму неотработанного по договору № 01-ЭБ-ТАТ от 12.06.2023 аванса (701 933,40 руб.) с 31.01.2025 по дату фактического исполнения обязательства. 

9) по договору субподряда № 02-ЭБ-ТАТ от 12.06.2023 - 871 249,48 руб. неосновательного обогащения; - 1 276 133,08 руб. неустойки за период с 18.10.2023 по 24.04.2024; - 110 375,55 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 30.05.2024 по 30.01.2025; - проценты за пользование чужими денежными средствами, начисляемые на сумму неотработанного по договору № 02-ЭБ-ТАТ от 12.06.2023 аванса (871 249,48 руб.) с 31.01.2025 по дату фактического исполнения обязательства.

 10) по договору субподряда № 03-ЭБ-ТАТ от 12.06.2023 - 369 399,20 руб. неосновательного обогащения; - 613 009,07 руб. неустойки за период с 18.10.2023 по 24.04.2024; - 46 797,89 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 30.05.2024 по 30.01.2025; - проценты за пользование чужими денежными средствами, начисляемые на сумму неотработанного по договору № 03-ЭБ-ТАТ от 12.06.2023 аванса (369 399,20 руб.) с 31.01.2025 по дату фактического исполнения обязательства. 

11) по договору субподряда № 04-ЭБ-ТАТ от 12.06.2023 - 930 982,80 руб. неосновательного обогащения; - 2 515 316,90 руб. неустойки за период с 18.10.2023 по 24.04.2024; - 117 942,96 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 30.05.2024 по 30.01.2025; - проценты за пользование чужими денежными средствами, начисляемые на сумму неотработанного по договору № 04-ЭБ-ТАТ от 12.06.2023 аванса (930 982,80 руб.) с 31.01.2025 по дату фактического исполнения обязательства. 

12) по договору субподряда № 05-ЭБ-ТАТ от 12.06.2023 - 1 043 277 руб. неосновательного обогащения; - 1 383 886,76 руб. неустойки за период с 18.10.2023 по 24.04.2024; - 132 169,12 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 30.05.2024 по 30.01.2025; - проценты за пользование чужими денежными средствами, начисляемые на сумму неотработанного по договору № 05-ЭБ-ТАТ от 12.06.2023 аванса (1 043 277 руб.) с 31.01.2025 по дату фактического исполнения обязательства. 

13) по договору субподряда № 08-СИМ-ПР от 02.02.2024 - 2 150 000 руб. неосновательного обогащения; - 272 375,99 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 30.05.2024 по 30.01.2025; - проценты за пользование чужими денежными средствами, начисляемые на сумму неотработанного по договору № 08-СИМ-ПР от 02.02.2024 аванса (2 150 000 руб.) с 31.01.2025 по дату фактического исполнения обязательства. 

14) по договору субподряда № 01-СЕВ-TAT от 16.06.2023 - 2 800 000 руб. неосновательного обогащения; - 4 842 079,33 руб. неустойки за период с 21.09.2023 по 24.04.2024; - 354 722,21 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 30.05.2024 по 30.01.2025; - проценты за пользование чужими денежными средствами, начисляемые на сумму неотработанного по договору № 01-СЕВ-TAT от 16.06.2023 аванса (2 800 000 руб.) с 31.01.2025 по дату фактического исполнения обязательства. 

15) по договору субподряда № 07-БПИ-ТАИ от 30.11.2023 - 2 000 000 руб. неосновательного обогащения; - 253 373,01 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 30.05.2024 по 30.01.2025; - проценты за пользование чужими денежными средствами, начисляемые на сумму неотработанного по договору № 07-БПИ-ТАИ от 30.11.2023 аванса (2 000 000 руб.) с 31.01.2025 по дату фактического исполнения обязательства. 

16) 200 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья                                                                            Сергеева О.Н.