АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

 

 

 

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-9742/2023

г. Чебоксары

01 апреля 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 19 марта 2024 года.

 

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Владимировой О.Е.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "Честрой" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), Россия, 428003, г. Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия, проезд Монтажный д. 23, каб 13

к некоммерческой организации "Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов", 428003, г. Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия, ул. Энгельса д. 42А, ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>,

о взыскании 150964 руб. 06 коп.,

при участии:

от истца ФИО2 по доверенности от 09.01.2024 (сроком по 31.12.2026),

от ответчика ФИО3 по доверенности от 01.02.2024 №11 (сроком по 31.01.2025),

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Честрой" обратилось в суд с иском, уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ, к некоммерческой организации "Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов" о взыскании 150964 руб. 06 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.01.2020 по 13.12.2023 в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по возврату сумм обеспечения по договора №134-ПР от 17.06.2019, №243-КР от 10.10.2019, №9-ПР-СМР от 01.02.2021, №10-ПР-СМР от 01.02.2021, №11-ПР-СМР от 01.02.2021, №17-ПР-СМР от 26.04.2021.

В судебном заседании представитель истца уточненные исковые требования поддержал. Возражал против применения моратория.

Представитель ответчика иск не признала по основаниям, приведенным в отзыве. Пояснила, что истцом неверно произведен расчет процентов за пользование денежными средствами без учета моратория, установленного Постановлениями Правительства РФ от 03.04.2020 №428 и от 28.03.2022 №497. Кроме того, истцом неверно произведен расчет процентов за пользование денежными средствами, без учета условий заключенных договоров между Фондом (Заказчик) и ООО «Честрой» (Подрядчик), которыми предусмотрено, что «обеспечение исполнения обязательств Подрядчика возвращается по письменному требованию Подрядчика с указанием реквизитов для возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения обязательств, в течение 60 (шестидесяти) банковских дней со дня подписания в порядке, установленном договором, Акта приемки в эксплуатацию и получения Заказчиком такого требования». (п.3.10 договора №243-КР от 10.10.2019, п. 4.10 договора №9-ПР-СМР от 01.02.2021г., №10-ПР-СМР от 01.02.2021, №11-ПР-СМР от 01.02.2021, №17-ПР-СМР от 26.04.2021). 10.11.2023 от Подрядчика в адрес Фонда поступила претензия о возврате денежных средств, перечисленных в пользу НО «Фонд капитального ремонта» в счет обеспечения выполнения обязательств подрядчика по вышеуказанным договорам. Договорные обязательства по возврату подрядчику обеспечения были исполнены Фондом надлежащим образом в полном объеме, что подтверждается платежными поручениями от 13.12.2023 №№4343-4348.

Выслушав пояснения представителей сторон, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

17.06.2019 некоммерческая организация "Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов" (заказчик) и общество с ограниченной ответственностью "Честрой" (подрядчик) заключили договор №134-ПР, по условиям которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе по замене лифтов, расположенных на территории города Новочебоксарск Чувашской Республики (далее - Документация), в соответствии с Перечнем объектов капитального ремонта - согласно Приложению 1 к настоящему договору (далее - объект, объекты) и техническому заданию (Приложение 2 к настоящему договору) в порядке, объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором. Цена договора составляет 100548 руб. Сроки выполнения работ: начало - с даты заключения договора; окончание - не более 45 календарных дней с даты заключения договора до 31.07.2019. Размер обеспечения исполнения обязательств по договору составляет 7560 руб.

По договору от 17.06.2019 №134-ПР акты приемки подписаны 12.08.2019.

Письмом №77 от 18.02.2022, претензией №10-11/2023-1 от 10.11.2023 истец обращался к ответчику с требованиями о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения.

10.10.2019 некоммерческая организация "Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов" (заказчик) и общество с ограниченной ответственностью "Честрой" (подрядчик) заключили договор №243-КР, по условиям которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту (замена лифтов, ремонт машинных и блочных помещений) общего имущества многоквартирного дома по следующему адресу: 

<

...> (далее - Объекты), выполняемых и оплачиваемых в соответствии с условиями настоящего Договора, в полном объёме и в соответствии с техническими строительными нормами и правилами, государственными стандартами. Цена договора составляет 4069214 руб. 82 коп. Срок выполнения работ составляет 80 календарных дней, т.е. до 28.12.2019. Размер обеспечения исполнения обязательств составляет 1233095 руб. 40 коп.

По договору от 10.10.2019 №243-КР акты приемки объекта в эксплуатацию подписаны 27.12.2019.

Письмом №77 от 18.02.2022, претензией №10-11/2023-1 от 10.11.2023 истец обращался к ответчику с требованиями о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения.

01.02.2021 некоммерческая организация "Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов" (заказчик) и общество с ограниченной ответственностью "Честрой" (подрядчик) заключили договор №9-ПР-СМР, по условиям которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 10 к настоящему Договору) своими силами, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить весь комплекс работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома (далее «Работы») в соответствии с Графиком производства и стоимости работ (Приложение № 1 к настоящему Договору), по адресу, предусмотренным Адресным перечнем (Приложение № 2 к настоящему договору), (далее «Объект» / «Объекты»), включая оценку технического состояния и проектирование капитального ремонта общего имущества, выполнение строительно-монтажных работ на каждом Объекте, поставку Материалов, Изделий, Конструкций, своевременное устранение недостатков (дефектов), сдачу выполненных работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по Акту приемки выполненных работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, сдачу выполненных работ по системе (элементу) здания по Акту приемки выполненных работ по элементу (системе) здания, сдачу Объекта(-ов) по Акту приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома по Объекту, выполнение обязательств в течение Гарантийного срока, выполнение иных, неразрывно связанных работ, а Заказчик принимает надлежащим образом выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. Цена договора составляет 1597308 руб. Срок выполнения работ составляет не более 150 календарных дней с момента подписания Договора. Размер обеспечения исполнения обязательств составляет 106920 рублей.

По договору от 01.02.2021 №9-ПР-СМР акты приемки объекта в эксплуатацию подписаны 11.05.2021.

Письмами №745 от 02.09.2021, №77 от 18.02.2022, претензией №10-11/2023-1 от 10.11.2023 истец обращался к ответчику с требованиями о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения.

01.02.2021 некоммерческая организация "Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов" (заказчик) и общество с ограниченной ответственностью "Честрой" (подрядчик) заключили договор №10-ПР-СМР, по условиям которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 10 к настоящему Договору) своими силами, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить весь комплекс работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома (далее «Работы») в соответствии с Графиком производства и стоимости работ (Приложение № 1 к настоящему Договору), по адресу, предусмотренным Адресным перечнем (Приложение № 2 к настоящему договору), (далее «Объект» / «Объекты»), включая оценку технического состояния и проектирование капитального ремонта общего имущества, выполнение строительно-монтажных работ на каждом Объекте, поставку Материалов, Изделий, Конструкций, своевременное устранение недостатков (дефектов), сдачу выполненных работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по Акту приемки выполненных работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, сдачу выполненных работ по системе (элементу) здания по Акту приемки выполненных работ по элементу (системе) здания, сдачу Объекта(-ов) по Акту приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома по Объекту, выполнение обязательств в течение Гарантийного срока, выполнение иных, неразрывно связанных работ. Заказчик принимает надлежащим образом выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. Цена договора составляет 4792924 руб. Срок выполнения работ составляет не более 150 календарных дней с момента подписания Договора. Размер обеспечения исполнения обязательств составляет 320760 руб.

По договору от 01.02.2021 №10-ПР-СМР акты приемки объекта в эксплуатацию подписаны 06.05.2021 и 11.05.2021.

Письмами №745 от 02.09.2021, №77 от 18.02.2022, претензией №10-11/2023-1 от 10.11.2023 истец обращался к ответчику с требованиями о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения.

01.02.2021 некоммерческая организация "Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов" (заказчик) и общество с ограниченной ответственностью "Честрой" (подрядчик) заключили договор №11-ПР-СМР, по условиям которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 10 к настоящему Договору) своими силами, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить весь комплекс работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома (далее «Работы») в соответствии с Графиком производства и стоимости работ (Приложение № 1 к настоящему Договору), по адресу, предусмотренным Адресным перечнем (Приложение № 2 к настоящему договору), (далее «Объект» / «Объекты»), включая оценку технического состояния и проектирование капитального ремонта общего имущества, выполнение строительно-монтажных работ на каждом Объекте, поставку Материалов, Изделий, Конструкций, своевременное устранение недостатков (дефектов), сдачу выполненных работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по Акту приемки выполненных работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, сдачу выполненных работ по системе (элементу) здания по Акту приемки выполненных работ по элементу (системе) здания, сдачу Объекта(-ов) по Акту приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома по Объекту, выполнение обязательств в течение Гарантийного срока, выполнение иных, неразрывно связанных работ. Заказчик принимает надлежащим образом выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. Цена договора составляет 3194616 руб. Срок выполнения работ составляет не более 150 календарных дней с момента подписания Договора. Размер обеспечения исполнения обязательств составляет 213840 руб.

По договору от 01.02.2021 №11-ПР-СМР акты приемки объекта в эксплуатацию подписаны 05.05.2021 и 11.05.2021.

Письмами №745 от 02.09.2021, №77 от 18.02.2022, претензией №10-11/2023-1 от 10.11.2023 истец обращался к ответчику с требованиями о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения.

26.04.2021 некоммерческая организация "Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов" (заказчик) и общество с ограниченной ответственностью "Честрой" (подрядчик) заключили договор №17-ПР-СМР, по условиям которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 10 к настоящему Договору) своими силами, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить весь комплекс работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома (далее «Работы») в соответствии с Графиком производства и стоимости работ (Приложение № 1 к настоящему Договору), по адресу, предусмотренным Адресным перечнем (Приложение № 2 к настоящему договору), (далее «Объект» / «Объекты»), включая оценку технического состояния и проектирование капитального ремонта общего имущества, выполнение строительно-монтажных работ на каждом Объекте, поставку Материалов, Изделий, Конструкций, своевременное устранение недостатков (дефектов), сдачу выполненных работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по Акту приемки выполненных работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, сдачу выполненных работ по системе (элементу) здания по Акту приемки выполненных работ по элементу (системе) здания, сдачу Объекта(-ов) по Акту приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома по Объекту, выполнение обязательств в течение Гарантийного срока, выполнение иных, неразрывно связанных работ. Заказчик принимает надлежащим образом выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. Цена договора составляет 98831947 руб. 50 коп. Срок выполнения работ составляет не более 150 календарных дней с момента подписания Договора, т.е. до 23.09.2021. Размер обеспечения исполнения обязательств составляет 5068305 руб.

По договору от 26.04.2021 №17-ПР-СМР акты приемки объектов в эксплуатацию подписаны 21.09.2021, 22.09.2021, 23.08.2021, 18.08.2021, 08.09.2021, 25.08.2021, 20.08.2021, 16.09.2021, 18.09.2021, 08.09.2021, 31.08.2021, 01.09.2021, 08.09.2021, 30.08.2021.

Письмом №77 от 18.02.2022, претензией №10-11/2023-1 от 10.11.2023 истец обращался к ответчику с требованиями о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения.

Согласно пункту 3.10 договора от 17.06.2019 №134-ПР обеспечение исполнения обязательств Подрядчика возвращается по письменному требованию Подрядчика с указанием реквизитов для возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения обязательств, в течение 15 банковских дней со дня подписания в порядке, установленном договором, Акта приемки объекта в эксплуатацию и получения Заказчиком такого требования.

В соответствии с пунктом 3.10 договоров от 10.10.2019 №243-КР, пунктом 4.10 договоров от 01.02.2021 №9-ПР-СМР, от 01.02.2021 №10-ПР-СМР, от 01.02.2021 №11-ПР-СМР, от 26.04.2021 №17-ПР-СМР обеспечение исполнения обязательств Подрядчика возвращается по письменному требованию Подрядчика с указанием реквизитов для возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения обязательств, в течение 60 банковских дней со дня подписания в порядке, установленном договором, Акта приемки в эксплуатацию и получения Заказчиком такого требования.

Согласно платежным поручениям №4343, №4344, №4346, №4347, №4348 суммы обеспечительных платежей возвращены 13.12.2023.

Предметом иска является требование о взыскании 150964 руб. 06 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.01.2020 по 13.12.2023 за несвоевременный возврат обеспечительных платежей.

Согласно статьям 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств допускается в исключительных случаях, прямо указанных в законе.

Согласно пункту 1 статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Несвоевременный возврат обеспечительных платежей подтвержден материалами дела. 

Проверив расчет начисления процентов, суд признает его неверным, поскольку истцом не учтен мораторий, введенный Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 №497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами".

В связи с чем, суд удовлетворяет требование истца о взыскании процентов частично в сумме 104198 руб. 75 коп. за период с 01.01.2020 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 13.12.2023:

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Проценты

с

по

дней

21 420,00 р.

01.01.2020

09.02.2020

40

6,25

21 420,00 ? 40 ? 6.25% / 366

146,31 р.

21 420,00 р.

10.02.2020

26.04.2020

77

6,00

21 420,00 ? 77 ? 6% / 366

270,38 р.

21 420,00 р.

27.04.2020

21.06.2020

56

5,50

21 420,00 ? 56 ? 5.5% / 366

180,26 р.

21 420,00 р.

22.06.2020

26.07.2020

35

4,50

21 420,00 ? 35 ? 4.5% / 366

92,18 р.

21 420,00 р.

27.07.2020

31.12.2020

158

4,25

21 420,00 ? 158 ? 4.25% / 366

392,99 р.

21 420,00 р.

01.01.2021

21.03.2021

80

4,25

21 420,00 ? 80 ? 4.25% / 365

199,53 р.

21 420,00 р.

22.03.2021

25.04.2021

35

4,50

21 420,00 ? 35 ? 4.5% / 365

92,43 р.

21 420,00 р.

26.04.2021

14.06.2021

50

5,00

21 420,00 ? 50 ? 5% / 365

146,71 р.

21 420,00 р.

15.06.2021

25.07.2021

41

5,50

21 420,00 ? 41 ? 5.5% / 365

132,33 р.

21 420,00 р.

26.07.2021

04.08.2021

10

6,50

21 420,00 ? 10 ? 6.5% / 365

38,15 р.

+3 041,08 р.

05.08.2021

Новая задолженность

+11 934,28 р.

05.08.2021

Новая задолженность

+10 189,40 р.

05.08.2021

Новая задолженность

46 584,76 р.

05.08.2021

12.09.2021

39

6,50

46 584,76 ? 39 ? 6.5% / 365

323,54 р.

46 584,76 р.

13.09.2021

24.10.2021

42

6,75

46 584,76 ? 42 ? 6.75% / 365

361,83 р.

46 584,76 р.

25.10.2021

16.12.2021

53

7,50

46 584,76 ? 53 ? 7.5% / 365

507,33 р.

+651 149,04 р.

17.12.2021

Новая задолженность

697 733,80 р.

17.12.2021

19.12.2021

3

7,50

697 733,80 ? 3 ? 7.5% / 365

430,11 р.

697 733,80 р.

20.12.2021

13.02.2022

56

8,50

697 733,80 ? 56 ? 8.5% / 365

9 099,21 р.

697 733,80 р.

14.02.2022

27.02.2022

14

9,50

697 733,80 ? 14 ? 9.5% / 365

2 542,43 р.

697 733,80 р.

28.02.2022

31.03.2022

32

20,00

697 733,80 ? 32 ? 20% / 365

12 234,24 р.

Сумма процентов: 27 189,96 р.

 

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Проценты

с

по

дней

697 733,80 р.

02.10.2022

23.07.2023

295

7,50

697 733,80 ? 295 ? 7.5% / 365

42 294,14 р.

697 733,80 р.

24.07.2023

14.08.2023

22

8,50

697 733,80 ? 22 ? 8.5% / 365

3 574,69 р.

697 733,80 р.

15.08.2023

17.09.2023

34

12,00

697 733,80 ? 34 ? 12% / 365

7 799,33 р.

697 733,80 р.

18.09.2023

29.10.2023

42

13,00

697 733,80 ? 42 ? 13% / 365

10 437,33 р.

697 733,80 р.

30.10.2023

13.12.2023

45

15,00

697 733,80 ? 45 ? 15% / 365

12 903,30 р.

Сумма процентов: 77 008,79 р.

Расходы по государственной пошлине суд относит на стороны пропорционально удовлетворенным требованиям по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Излишне уплаченная государственная пошлина подлежит возврату истцу из федерального бюджета по правилам статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

 

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить частично.

Взыскать с некоммерческой организации "Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Честрой" 104 198 (Сто четыре тысячи сто девяносто восемь) руб. 75 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.01.2020 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 13.12.2023, 3 816 (Три тысячи восемьсот шестнадцать) руб. расходов по государственной пошлине.

В остальной части в иске отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Честрой" из федерального бюджета 14 434 (Четырнадцать тысяч четыреста тридцать четыре) руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению №1103 от 08.12.2023.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

 

Судья

О.Е. Владимирова