РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-175661/21-110-1155

г. Москва

22 ноября 2021 г.

Резолютивная часть решения объявлена 09 ноября 2021 года 

Решение в полном объеме изготовлено 22 ноября 2021 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Милкиной К.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску акционерного общества "ДОК-3" (109202, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 1-Я КАРАЧАРОВСКАЯ, 8, ОГРН: 1027700302002) к  обществу с ограниченной ответственностью "АЛЬПЫ - ГОЛЬФ" (101000, МОСКВА ГОРОД, ЧИСТОПРУДНЫЙ БУЛЬВАР, 12, СТР.1, ОГРН: 1025001104677) о взыскании 7 105 994,49 руб.,

при участии:

от истца – Лохина  Е.И. по дов.  от  01.07.2021,

от ответчика-не явился,

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "ДОК-3" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "АЛЬПЫ - ГОЛЬФ" о взыскании 2 683 772,56 руб. задолженности по Договору №64 от 27.03.2020, 147 607,49 руб. неустойки, 2 990 882,07 руб. задолженности по Договору №82 от 09.06.2020, 164 498,51 руб. неустойки, 1 060 885,18 руб. задолженности по Договору №138 от 18.08.2020, 58 348,68 руб. неустойки.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте проведения предварительного судебного заседания, а также о рассмотрении спора по существу в случае его неявки и в отсутствие заявленных возражений против завершения предварительного судебного заседания и открытия судебного заседания в I инстанции, в заседание не явился, возражений против открытия судебного заседания в I инстанции непосредственно после завершения предварительного судебного заседания не заявил. С учетом своевременного размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, суд   рассмотрел спор в его отсутствие на основании ст.ст.121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, п.5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011г. №12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27.07.2010 №228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ». Иск не признал, по мотивам, изложенным в отзыве.

Заслушав представителя истца, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, между Истцом (АО «ДОК-3 »-Подрядчик) и Ответчиком (ООО «АЛЬПЫ-ГОЛЬФ» -Заказчик) был заключен договор заключен договор № 64 от 27.03.2020 года, в редакции дополнительного соглашения № 1 от 19.06.2020 года, согласно которому Подрядчик обязуется по заданию Заказчика своими силами выполнить полный комплекс работ по изготовлению, поставке и монтажу оконных и дверных алюминиевых блоков на объект капитального строительства "Академия гольфа" на территории Целеево Гольф и Поло Клуба (далее - Объект) в установленный Договором срок и сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену. Стоимость работ составила - 4 312919,3 8 (Четыре миллиона триста двенадцать тысяч девятьсот девятнадцать рублей 38 копеек) рублей, в том числе НДС 20 % - 718 819,90 рублей; срок выполнения работ - 31.05.2021 года.

Ответчик перечислил Истцу аванс в сумме 1 293 875,81 рублей платежным поручением № 516 от 17.04.2020 года.

Свои обязательства по Договору Истец выполнил своевременно и в полном объеме, что подтверждается актом выполненных работ № 1 от 31.05.2021 года, справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.05.2021 года.

Согласно п. 6.3. Договора № 64 от 27.03.2020 года расчеты за выполненные работы осуществляются в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости работ и затрат по форме № КС-3 с учетом ранее выплаченного аванса, пропорционально стоимости выполненных работ и условии предоставления Подрядчиком счета на оплату. Заказчик производит перечисление денежных средств за выполненные работы на расчетный счет подрядчика в Банке Союз по следующим реквизитам: Банк Союз (АО) г. Москва БИК 044525148, к/с 30101810845250000148, р/сч 40702810300010001653.

Ответчик выполнил свои обязательства не в полном объеме, окончательный расчет за выполненные работы не произвел. По состоянию на 22.07.2021 года задолженность ООО «АЛЬПЫ-Гольф» перед АО «ДОК-3» по договору № 64 от 27.03.2020 года составляет 2 683 772,56 (Два миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи семьсот семьдесят два рубля 56 копеек) рублей.

В соответствии с п. 13.5. Договора за невыполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по срокам оплаты выполненных работ Заказчик уплачивает Подрядчику, по его требованию, неустойку в размере 0,1 % от стоимости принятых и неоплаченных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от Цены Договора.

Истец одновременно с Актом выполненных работ и справкой о стоимости выполненных работ и затрат передал Ответчику счет на оплату, поскольку оплата не поступила, Истец направил Ответчику счет на оплату почтовым отправлением с сопроводительным письмом исходящий № 768/35 от 16.07.2021 года.

На дату подготовки искового заявления задолженность за выполненные работы не оплачена, в связи, с чем подлежит уплате неустойка в размере 147 607,49 рублей.

Между Истцом (АО «ДОК-3»-Подрядчик) и Ответчиком (ООО «АЛЬПЫ-ГОЛЬФ» -Заказчик) был заключен договор заключен договор № 82 от 09.06.2020 года, в редакции дополнительного соглашения № 1 от 27.07.2020 года, согласно которому Подрядчик обязуется по заданию Заказчика своими силами выполнить полный комплекс работ по изготовлению, поставке и монтажу оконных и дверных блоков на объект капитального строительства "Академия гольфа" на территории Целеево Гольф и Поло Клуба (далее -Объект) в установленный Договором срок и сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену. Стоимость работ составила - 5 761 181,02 (Пять миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча сто восемьдесят один рубль 02 копейки) рубль, в том числе НДС 20 % - 960 196,84 рублей; срок выполнения работ - 31.05.2021 года.

Ответчик перечислил Истцу аванс в сумме 2 304 472,40 рубля платежным порученим № 808 от 18.06.2020 года.

Свои обязательства по Договору Истец выполнил своевременно и в полном объеме, что подтверждается актом выполненных работ № 1 от 31.05.2021 года, справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.05.2021 года.

Согласно п. 6.3. Договора № 82 от 09.06.2020 года расчеты за выполненные работы осуществляются в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости работ и затрат по форме № КС-3 с учетом ранее выплаченного аванса, пропорционально стоимости выполненных работ и условии предоставления Подрядчиком счета на оплату. Заказчик производит перечисление денежных средств за выполненные работы на расчетный счет подрядчика в Банке Союз по следующим реквизитам: Банк Союз (АО) г. Москва БИК 044525148, к/с 30101810845250000148,р/сч 40702810300010001653.

Ответчик выполнил свои обязательства не в полном объеме, окончательный расчет за выполненные работы не произвел. По состоянию на 22.07.2021 года задолженность ООО «АЛЬПЫ-Гольф» перед АО «ДОК-3» по договору № 82 от 09.06.2020 года составляет 2 990 882,07 (Два миллиона девятьсот девяносто тысяч восемьсот восемьдесят два рубля 07 копеек)рубля.

В соответствии с п. 13.5. Договора за невыполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по срокам оплаты выполненных работ Заказчик уплачивает Подрядчику, по его требованию, неустойку в размере 0,1 % от стоимости принятых и неоплаченных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от Цены Договора.

Истец одновременно с Актом выполненных работ и справкой о стоимости выполненных работ и затрат передал Ответчику счет на оплату, поскольку оплата не поступила, Истец направил Ответчику счет на оплату почтовым отправлением с сопроводительным письмом исходящий № 768/35 от 16.07.2021 года.

На дату подготовки искового заявления задолженность за выполненные работы не оплачена, в связи, с чем подлежит уплате неустойка в размере 164 498,51 рублей.

Между Истцом (АО «ДОК-3»-Подрядчик) и Ответчиком (ООО «АЛЬПЫ-ГОЛЬФ» -Заказчик) был заключен договор заключен договор № 138 от 18.08.2020 года, в редакции дополнительного соглашения № 1 от 04.09.2020 года, согласно которому Подрядчик обязуется по заданию Заказчика своими силами выполнить полный комплекс работ по изготовлению, поставке и монтажу наличников, откосов и отливов на алюминиевые оконные и дверные блоки на объект капитального строительства "Академия гольфа" на территории Целеево Гольф и Поло Клуба (далее - Объект) в установленный Договором срок и сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену. Стоимость работ составила - 2 538 095,77 (Два миллиона пятьсот тридцать восемь тысяч девяносто пять рублей 77 копеек) рублей, в том числе НДС 20 % - 423 015,96 рублей; срок выполнения работ- 31.05.2021 года.

Ответчик перечислил Истцу аванс в сумме 1 269 047,88 рублей платежным поручением № 1294 от 28.08.2020 года.

Свои обязательства по Договору Истец выполнил своевременно и в полном объеме, что подтверждается актом выполненных работ № 1 от 31.05.2021 года, справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.05.2021 года.

Согласно п. 6.3. Договора № 138 от 18.08.2020 года расчеты за выполненные работы осуществляются в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости работ и затрат по форме № КС-3 с учетом ранее выплаченного аванса, пропорционально стоимости выполненных работ и условии предоставления Подрядчиком счета на оплату. Заказчик производит перечисление денежных средств за выполненные работы на расчетный счет подрядчика в Банке Союз по следующим реквизитам: Банк Союз (АО) г. Москва БИК

044525148, к/с 30101810845250000148,р/сч 40702810300010001653.

Ответчик выполнил свои обязательства не в полном объеме, окончательный расчет за выполненные работы не произвел. По состоянию на 22.07.2021 года задолженность ООО «АЛЬПЫ-Гольф» перед АО «ДОК-3» по договору № 138 от 18.08.2020 года составляет 1 060 885,18 (Один миллион шестьдесят тысяч восемьсот восемьдесят пять рублей 18 копеек) рублей.

В соответствии с п. 13.5. Договора за невыполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по срокам оплаты выполненных работ Заказчик уплачивает Подрядчику, по его требованию, неустойку в размере 0,1 % от стоимости принятых и неоплаченных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от Цены Договора.

Истец одновременно с Актом выполненных работ и справкой о стоимости выполненных работ и затрат передал Ответчику счет на оплату, поскольку оплата не поступила, Истец направил Ответчику счет на оплату почтовым отправлением с сопроводительным письмом исходящий № 768/35 от 16.07.2021 года.

На дату подготовки искового заявления задолженность за выполненные работы не оплачена, в связи, с чем подлежит уплате неустойка в размере 58 348,68 рублей.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов и прекращаться согласно п. 1 ст. 408 ГК РФ надлежащим их исполнением.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускается также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Односторонний отказ Ответчика от исполнения принятых на себя обязательств по договору не предусмотрен ни законом, ни договором, поэтому Ответчик до настоящего времени неправомерно не исполняет свои обязательства, допуская просрочку возврата денежных средств.

Так, п/п №№1881 от 20.08.2021, №2389 от 28.10.2021, №2385 от 27.10.2021, №2257 от 13.10.2021 ответчиком была погашена задолженность в размере 6 735 539,81 руб.

При указанных обстоятельствах иск подлежит частичному удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине относятся на ответчика.

На основании  изложенного, руководствуясь ст.ст.   110, 123,156, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью "АЛЬПЫ - ГОЛЬФ" в пользу акционерного общества "ДОК-3" 370 454 руб.  68  коп.  неустойки, 58 529,97 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

 

Судья:

А.В. Мищенко