РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-293944/22-110-2232

г. Москва

27 марта 2023 г.

Резолютивная часть решения от 16 марта 2023 года

Полный текст решения изготовлен 27 марта 2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи ФИО1 /единолично/,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (123317, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>) к публичному акционерному обществу "ФАРМСИНТЕЗ" (188663, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН, КУЗЬМОЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК, ТЕР. СТАНЦИЯ КАПИТОЛОВО, СТАНЦИЯ КАПИТОЛОВО 134, ЛИТЕР 1, ОГРН: 

<

***>) о взыскании 600 000 руб. аванса по государственному контракту от 09.07.2012 №12411.0810200.13.В23,

без проведения судебного заседания

УСТАНОВИЛ:

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации обратилось с иском к публичному акционерному обществу "ФАРМСИНТЕЗ"  о взыскании 600 000 руб. аванса по государственному контракту от 09.07.2012 №12411.0810200.13.В23.

Определением суда от 30 декабря 2022 года было назначено рассмотрение дела в порядке упрощенного производства по правилам гл. 29 АПК РФ. Суд располагает доказательствами надлежащего извещения сторон в соответствии со ст. 123 АПК РФ.

16 марта 2023 года Арбитражным судом г. Москвы вынесена резолютивная часть по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства (в порядке ст. 229 АПК РФ).

Согласно материалам дела, в соответствии с положениями ст.ст. 121, 122, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны надлежащим образом были извещены о принятии заявления к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства без вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и иных документов в соответствии с частью 3 ст. 228 АПК РФ.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

Исследовав представленные доказательства, оценив их, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, между Минпромторгом России (далее - заказчик) и ПАО «Фармсинтез» (далее исполнитель) был заключён государственный контракт № 12411.0810200.13.В23. на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы. Шифр «Сополимер 4» от 09.07.2012 (далее - государственный контракт, контракт).

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 08.07.2022 по делу № А40-86299/государственный контракт признан расторгнутым. Решение вступило в законную сил.

В соответствии с п. 1 государственного контракта исполнитель обязуется выполнить обусловленную техническим заданием научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую  работу  Шифр «Сополимер 4» (далее - НИОКР).

Как следует из п. 2 государственного контракта НИОКР выполняется исполнителем в полном соответствии с требованиями технического задания (далее - ТЗ).

Содержание и сроки выполнения НИОКР (этапа НИОКР) определяются ведомостью исполнения НИОКР.

Согласно п. 3 контракта разработанная, согласно контракту, научно-техническая документация должна отвечать требованиям ТЗ. содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций исполнителя, подтверждённое экспериментальными данными и теоретическими расчётами и удовлетворять требованиям следующих документов: ГОСТ 15.101-98. ГОСТ Р 15.201 -2000. ГОСТ 7.32-2001.

В соответствии с п. 8 государственного контракта НИОКР выполняется в сроки, указанные в ведомости исполнения НИОКР.

Начало выполнения НИОКР - 09.07.2012;

¦ Окончание выполнения НИОКР - через 878 дней с даты заключения государственного контракта (03.12.2014).

Как указано в п. 10 государственного контракта датой исполнения исполнителем обязательств по контракту считается дата подписания (утверждения) заказчиком акта сдачи-приёмки НИОКР или этапа НИОКР.

Согласно п. 11 государственного контракта за 20 дней до окончания НИОКР (папа НИОКР) исполнитель обязан в письменной форме уведомить заказчика о готовносш НИОКР (этапа НИОКР) к сдаче.

Вместе с уведомлением исполнитель передаёт заказчик) акт сдачи-приемки НИОКР (папа НИОКР) в 4-х экземплярах. К акту сдачи сдачи-приёмки НИОКР (этапа НИОКР) прилагаются отчет о выполнении НИОКР, аннотация, рецензия, протокол заседания научно-технического совета исполнителя о рассмотрении хода выполнения и результатов по конкретной работе (при необходимости) и иные результаты работ и документы, предусмотренные ТЗ.

Заказчик в 20-дневный срок со дня получения акта сдачи-приёмки НИОКР (этапа НИОКР) и отчётных документов, указанных в п. 11 государственного контракта, обязан направить исполнителю один экземпляр подписанного акта сдачи-приёмки или мотивированный отказ от приёмки работ.

В соответствии с п. 20 государственного контракта расчёты между исполнителем и заказчиком за выполненные по этапу работы производятся не позднее 30 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приёмки этапа НИОКР.

Выполнение НИОКР включает 3 этапа. Работы по 1 и 2 этапам НИОКР выполнены исполнителем и оплачены заказчиком в полном объёме. Это подтверждается подписанными сторонами Актом № 1 выполненных работ от 24.12.2012. Актом № 2 выполненных работ от 11.12.2013. а также платёжными поручениями № 418362 от 27.07.2012 на сумму 9 000 000 руб.. № 822460 от 28.12.2012 на сумму 21 000 000 руб.. № 921049 от 21.03.2013 на сумму 2 700 000.00 руб.. № 1653263 от 21.12.2013 на сумму 6 300 000 руб.

Во исполнение принятых на себя обязательств платёжным поручением от 13.03.2014 № 53654 заказчик перечислил исполнителю аванс за выполнение 3-го этапа НИОКР в размере 600 000 руб.

Согласно сведениям, полученным в Департаменте развития фармацевтической и медицинской промышленности, работы по 3-му этапу НИОКР по состоянию на 09.12.2022 не выполнены.

В соответствии с ч. 1 ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо,

которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счёт другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбережённое имущество (неосновательное обогащение).

Таким образом, задолженность ПАО «Фармсинтез» перед Минпромторгом России составляет 600 000 руб.

Вместе с тем, в январе 2014 г. Исполнитель (Ответчик) приступил к выполнению 3-го этапа НИОКР. В соответствии с Протоколом согласования цены государственного контракта (Приложение № 3 к государственному контракту) цена 3-го этапа НИОКР составляет 2 ООО 000,00 рублей. 13.03.2014 Ответчик получил от Заказчика (Истца) аванс за выполнение 3-го этапа НИОКР в размере 600 000,00 (шестьсот тысяч) рублей.

На 3-м этане НИОКР Ответчиком выполнены следующие работы:

1.         Наработка опытно-промышленных партий лекарственного препарата для проведения клинических исследований.

2.         Разработка документов клинического исследования лекарственного препарата «Миелоксен (Ксемис), лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; 0,15 мг, 0,45 мг» по протоколу MX-MS-2-01: «Проспективное многоцентровое рандомизированное двойное слепое сравнительное плацебо-контролируемое исследование безопасности и эффективности препарата Миелоксен (Ксемис), (в дозах 150 и 450 мкг/ в неделю) у субъектов с рецидивируюше-ремиттирующим рассеянным склерозом» (включая протокол клинического исследования лекарственного препарата Ксемис № MX-MS-2-01, версия 0.1 от 21 июля 2016 г.; брошюру исследователя, версия 3.0 от 23.10.2015; информационный листок добровольца и форму информированного согласия по протоколу № MX-MS-2-01, версия 2.0 от 18.10.2015).

Для выполнения работ по государственному контракту Ответчиком была сформирована рабочая группа из сотрудников Ответчика.

Работы, указанные в пунктах 1 и 2 выше, проводились сотрудниками Исполнителя на основании приказа № 45.1 от 31 марта 2014 г. «О внесении изменений в составе рабочих групп по контрактам Шифр «Рекомбелок 4.3». «Рекомбелок 4.1», «Сополимер 4». «Пептоиды 2012». «Гепатит вакцина 2012»» (далее - Приказ 1) и приказа № 1 от 01 января 2015 г. «О внесении изменений в составе рабочих групп по контрактам Шифр «Рекомбелок 4.3», «Рекомбелок 4.1», «Сополимер 4». «2.3 Пептоиды 2012», «2.3 Гепатит вакцина 2012», «2.2 ВИЧ инфекции 2014» и по проекту «Бифункциональные агенты»» (далее - Приказ 2).

В рамках выполнения работ по 3-му этапу НИОКР сотрудниками Исполнителя велись работы в период 01.01.2014 - 15.03.2022.

 

За период 01.0"; .2014 - 15.03.2022 расходы Ответчика по 3-му этапу НИОКР составили:

•          в соответствии с Приказом 1 и Приказом 2 расходы на заработную плату сотрудников, занятых по 3-му этапу HHOKR и начисленные налоги на ФОТ в сумме 5 470 863,40 руб.;

•          расходы на покупку олигопептидов GK-16 (GFGYGGRASDYKSAHK), GH-17 (GGDRGAPKRGSGKDSHH). QR-24 (QGTLSKIFKLGGRDSRSGSPMARR) по контракту с компанией Jiangxi Kelem Biotech Co.Ltd (Цзянси, Китай) № СН/43439835/171 от 15.12.2021 в сумме 239 724,33 руб. (2 980,00 долларов США).

5 470 863,4 руб. + 239 724.33 руб. = 5 710 587.73 руб.

Таким образом, общий размер расходов, понесенных Ответчиком в рамках выполнения работ по 3-му этапу НИОКР. составляет 5 710 587,73 (Пять миллионов семьсот десять тысяч пятьсот восемьдесят семь) руб. 73 копейки.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 08.07.2022 по делу № А40-86299/22-5-625 государственный контракт был расторгнут в связи с невозможностью достижения результатов технического задания вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя (Ответчика).

Истец направил Ответчику досудебную претензию от 12.08.2022 № 77999/19 о возврате аванса по государственному контракту в сумме 600 000,00 рублей (далее - Претензия), полученную Ответчиком 13.09.2022. По мнению Истца, указанная сумма является неосновательным обогащением на стороне Ответчика.

Ответчик направил Истцу ответ от 04 октября 2022 г. № 202 на Претензию с обоснованием расходов, понесенных Ответчиком в рамках выполнения работ по 3-му этапу НИОКР, и в подтверждение фактических затрат в адрес Истца были направлены первичные и иные документы, подтверждающие несение данных затрат в рамках выполнения 3-го этапа работ, на сумму 5 710 587.73 руб. (всего 15 документов).

Согласно ст. 775 ГК РФ, если в ходе научно-исследовательских работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от исполнителя, заказчик обязан оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные договором на выполнение научно-исследовательских работ результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в договоре.

Предметом договоров на выполнение научно-исследовательских работ является результат творческой деятельности, который в отличие от результата обычной подрядной работы не может быть гарантирован исполнителем.

Данная особенность приводит к иному распределению рисков между сторонами договора, а именно, пунктом 3 статьи 769 ГК РФ установлено, если иное не предусмотрено законом или договором, риск случайной невозможности исполнения договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ несет заказчик.

Таким образом, у Истца (Заказчика) имелась обязанность компенсировать произведенные Исполнителем (Ответчиком) затраты, в связи с чем авансовые платежи не могут быть признаны неосновательным обогащением.

Ответчик потратил на выполнение работ по 3-му этапу НИОКР 5 710 587.73 руб.. из них 600 000.00 руб. - аванс, полученный от Истца, и 5 1 10 587.73 руб. собственных средств.

В соответствии со ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьёй 1109 настоящего Кодекса.

Таким образом, для возникновения обязательств из неосновательного обогащения необходимы приобретение или сбережение имущества за счет другого лица, отсутствие правового основания такого сбережения или приобретения, отсутствие обстоятельств, предусмотренных ст. 1109 ГК

Ответчик выполнял работы на основании заключенного договора, невозможность достижения положительного результата НИОКР была обусловлена объективными причинами, что установлено вступившим в законную силу решением Арбитражного суда г. 1Москвы, риск случайной невозможности исполнения договоров на выполнение научно-исследовательских работ возложен на заказчика. Ответчиком в материалы дела предоставлены документы, подтверждающие реальные расходы, которые понесены им на 3-м этапе НИОКР. При таких обстоятельствах Заказчик (Истец) обязан компенсировать произведенные Исполнителем (Ответчиком) затраты, в связи с чем авансовый платеж не может быть признан неосновательным обогащением и не подлежит возврату.

При указанных обстоятельствах иск удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 169-170,229 АПК РФ, 

 

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней с даты его принятия,  а в случае составления мотивированного решения - со дня принятия решения в полном объеме.

 

Судья:

ФИО1