100000157_1548419  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А03-1535/2021

22 июня 2022 года

г. Барнаул

 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Сосина Е.А., при ведении  протокола помощником судьи Фоминой А.В. (до перерыва), секретарем судебного  заседания ФИО1 (после перерыва), рассмотрев в открытом судебном заседании  дело по иску администрации города Рубцовска Алтайского края (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>), место нахождения: 658200, 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью «Райагропромстрой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), место нахождения: 656049, 

<

...>, офис н2) об устранении недостатков в  выполненных работах и взыскании 198 803 руб., с привлечением к участию в деле в  качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно  предмета спора, государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства  Алтайского края «Юго-Западное дорожно-строительное управление» (ОГРН  

<

***> ИНН 

<

***>), место нахождения: 658208, Алтайский край,  

<

...>). 

при участии в заседании: от истца: ФИО2 - представителя по доверенности; от ответчика: ФИО3 - представителя по доверенности; от третьего лица: не явился, 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

обязать общество с ограниченной ответственностью «Райагропромстрой» в течение  30 дней со дня вступления настоящего решения в законную силу устранить недостатки в  работах, выполненных по муниципальному контракту № Ф.2017.336704 от 14.08.2017,  путем выполнения следующих работ:  

1. Восстановление покрытия из бетонной тротуарной плитки тип «Б1», тип «Б1.1»,  тип «Б2», тип «Б2.1», включая покрытие пандусов из бетонной тротуарной плитки, а  именно:  

1.1 разборка покрытия из плит (с дальнейшим использованием, за исключением  бетонных тротуарных плиток, имеющих повреждения лицевой поверхности) из бетонных  тротуарных плит по всей площади покрытия - 1388м2;  

1.2 демонтаж бетонных бортовых камней (с дальнейшим использованием) на  участках криволинейного профиля борта (радиус которых составляет менее 15 метров)99м;  

1.3 установка криволинейных бетонных бортовых камней (в местах демонтажа),  ширина швов между бортовыми камнями не должна превышать 10 мм, либо установка  

прямолинейных бортовых камней, с уменьшением их длины и подтеской торцевых  частей, таким образом, чтобы внутренний угол между отдельными бортовыми камнями  составлял не менее 176 градусов (исходя из минимального радиуса 15м) - 99м;  

1.4 исправление и уплотнение профиля песчано-гравийного основания1 388 000 м2; 1.5 заделка швов цементным раствором в стыках бетонных бортовых камней19,2 м. шва; 

1.6 устройство покрытия из бетонных тротуарных плит по всей площади покрытия  с заделкой швов песком - 1 388 м2;  

2 Восстановление покрытия из бетонной тротуарной плитки тип «Б3», тип «Б3.1»,  а именно:   

2.1 разборка покрытия из плит (с дальнейшим использованием, за исключением  бетонных тротуарных плиток, имеющих повреждения лицевой поверхности) из бетонных  тротуарных плит по всей площади покрытия - 1 027м2;  

 2.2 разборка бетонного основания - 61,6м3, устройство бетонного основания  толщиной 60 мм из бетона класса В22,5 - 61,6м3;   

2.3 исправление профиля песчано-гравийного основания - 1 027м2;  

2.4 устройство покрытия из бетонных тротуарных плит по всей площади покрытия  с заполнением швов цементным раствором - 1 027м2;  

3 Конструктивные элементы. Подпорная стенка (включая боковые стенки пандусов  и крылец):  

3.1 разборка облицовки подпорной стенки, боковых стенок пандусов и крылец1 565 м2; 

3.2 очистка и оштукатуривание поверхностей подпорной стенки, боковых стенок  пандусов и крылец -159м2;  

3.3 облицовка подпорной стенки, боковых стенок пандусов и крылец  керамогранитными плитками с затиркой швов - 159м2;  

4. восстановить асфальтобетонное покрытие по всей площади общественной  территории;  

5. заменить плитку на подпорной стенке вокруг зеленой зоны. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Райагропромстрой» в  пользу администрации города Рубцовска Алтайского края 198 803 руб. в счет возмещения  убытков и 19 000 руб. в счет возмещения судебных издержек по экспертизе.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Райагропромстрой» в  доход федерального бюджета РФ 12 964 руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск, в течение месяца со дня принятия  решения, либо в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со  дня вступления решения в законную силу, если такое решение было предметом  рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья Е.А. Сосин 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 04.02.2022 0:59:40 Кому выдана Сосин Евгений Александрович