АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А45-17699/2022

г. Новосибирск

28 ноября 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 22 ноября 2022 года

Решение изготовлено в полном объёме 28 ноября 2022 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Исаковой С.А., при ведении протокола секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «СМРстрой» (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск, к обществу с ограниченной ответственностью «Спектр» (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск, о взыскании 513 307 руб. 56 коп.,

при участии в судебном заседании представителей:

истца:  ФИО2, доверенность от  21.03.2022, диплом, паспорт;

ответчика: не явился, извещён,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «СМРстрой» (далее по тексту - истец) обратилось с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Спектр» (далее по тексту - ответчик), с учётом уточнения исковых требований по правилам статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту - АПК РФ), принятого судом, о взыскании задолженности в размере 224 920 руб. 28 коп., пени за нарушение сроков окончания выполнения работ в размере 168 244 руб. 94 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 29 705 руб. 99 коп.

Ответчик письменный отзыв на исковое заявление не представил, в судебное заседание не явился, о дате и времени рассмотрения дела извещён надлежащим образом.

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения сторон, суд установил следующее.

В соответствии со статьёй 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Как следует из материалов дела, 24.07.2019 между истцом (генподрядчик) и ответчиком (подрядчик) заключён договор подряда №495 (далее по тексту - договор), предметом которого является выполнение отделочных работ на объекте строительства: Многоэтажный жилой дом с помещениями культурно-бытового и социального назначения по ул. Стартовая 1, б/с 19 в Ленинском районе г. Новосибирска, в объёмах, предусмотренных спецификацией №1 (приложение №1 к договору).

Пунктом 4.1. договора установлены сроки выполнения работ: начало работ: с момента подписания договора; окончание работ: 75 календарных дней с даты подписания договора.

Дата подписания договора подряда 24.07.2019, дата окончания работ по договору 07.10.2019 соответственно.

В соответствии с пунктами 5.1., 5.1.1. договора общая стоимость договора определяется на основании спецификации №1 и составляет 6 475 773 руб. 07 коп., без НДС. Общая стоимость материалов определяется на основании спецификации №1 и составляет 2 125 347 руб. 14 коп., без НДС.

Оплата по договору осуществляется генподрядчиком за фактически выполненные подрядчиком работы, на основании форм КС-2, КС-3, содержащих предусмотренные пунктом 6.5. договора отметки, сданных по акту сдачи-приёмки актов скрытых работ, исполнительной документации, ивыставленных счетов ежемесячно в течение 45 календарных дней со дня подписания соответствующих форм КС-2, КС-3. (пункт 5.4. договора) 

При выполнении работ по договору предусматривается выплата подрядчику аванса в размере 90% от стоимости материалов, что составляет 1 912 812 руб. 43 коп., без НДС, оплата осуществляется поэтапно. Оплатапоследующего аванса осуществляется только после факта поставки материалов на площадку по предыдущему авансу.

1-й этап: в размере 318 802 руб. 07 коп., без НДС, оплата осуществляется в течение 5 календарных дней с даты подписания настоящего договора.

2-й этап: 318 802 руб. 07 коп., без НДС, оплата осуществляется в течение 7 календарных дней с даты оплаты первого аванса.

3-й этап: 318 802 руб. 07 коп., без НДС, оплата осуществляется в течение 7 календарных дней с даты оплаты второго аванса.

4-й этап: 318 802 руб. 07 коп., без НДС, оплата осуществляется в течение 7 календарных дней с даты оплаты третьего аванса.

5-й этап: 318 802 руб. 07 коп., без НДС, оплата осуществляется в течение 7 календарных дней с даты оплаты четвертого аванса.

6-й этап: 318 802 руб. 07 коп., без НДС, оплата осуществляется в течение 7 календарных дней с даты оплаты пятого аванса.

Выплаченный аванс засчитывается в счёт оплаты за выполненные работы по первому акту сдачи-приёмки выполненных работ, либо, при недостаточности стоимости выполненных и принятых работ, по последующим актам до полного погашения аванса (пункт 5.5. договора).

Согласно пункту 2.1.8. подрядчик обязан оплачивать услуги генподрядчика по договору (координация работ выполняемых подрядчиком, сторожевая охрана и др.) в размере 4%, в том числе стоимость потребляемой электроэнергии, электроснабжение силового оборудования, электроосвещение рабочего места, теплоснабжения и водоотведения в размере 1% (приложение №2 к договору) от стоимости строительно-монтажных работ, указанной в пункте 5.1. договора.

В соответствии с пунктом 5.7. договора за услуги, оказываемые генподрядчиком подрядчику, согласно п.п.2.1.18., оплата осуществляется путём зачёта встречных однородных требований.

Истец обратился в суд с исковым заявлением сославшись на те доводы и обстоятельства, что в ходе исполнения договора им в адрес ответчика был перечислен аванс в размере 1 594 010 руб. 35 коп., а именно, платёжными поручениями: №3728 от 31.07.2019 в размере 318 802 руб. 07 коп., №3917 от 12.08.2019 в размере 318 802 руб. 07 коп., №4388 от 04.09.2019 в размере 318 802 руб. 07 коп., №4642 от 18.09.2019 в размере 318 802 руб. 07 коп., №1939 от 01.10.2019 в размере 318 802 руб. 07 коп. 

10.10.2019 ответчиком сданы работы на сумму 918 770 руб. 55 коп., что подтверждается справкой о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 10.10.2019. 

28.10.2019 истцом в адрес ответчика произведена оплата 318 802 руб. 07 коп. платёжным поручением №5549.

25.12.2019 ответчиком сданы работы на сумму 424 938 руб. 96 коп., что подтверждается справкой о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 25.12.2019. 

В соответствии с пунктом 2.1.18 истцом посчитаны генподрядные услуги в размере 48 876 руб. 81 коп. (36 750,83+12 125,98).

В связи с истечением срока выполнения работ установленного договором истец направил в адрес ответчика 28.01.2020 уведомление о расторжении договора (за 15 календарных дней до даты расторжения). 

28.03.2022, в соответствии с положениями статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ), истцом проведён зачёт однородного встречного требования с ответчиком на сумму 393 059 руб. 44 коп. 

01.04.2022 истец направил в адрес ответчика претензию №96 от 28.03.2022 с требованием о возврате недоработанного аванса в размере 224 920 руб. 28 коп. (1 594 010,35 – 918 770,55 + 318 802,07 – 424 938, 96 – 393 059,44 + 48 876,81), оплаты пени в соответствии с пунктом 8.4. договора и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Неисполнение ответчиком в добровольном порядке претензионных требований истца о возврате денежных средств послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

В соответствии со статьёй 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определённую работу и сдать её результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с частью 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несёт ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. 

В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий, за исключением случаев, установленных законом или предусмотренных договором, не допускается. 

Пунктом 3.1 статьи 70 АПК РФ предусмотрено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Материалами дела подтверждается факт перечисления денежных средств ответчику в размере 1 912 812 руб. 42 коп., частичное выполнение работ на сумму 1 343 709 руб. 51 коп., генподрядные услуги на сумму 48 876 руб. 81 коп., проведение зачёта на сумму 393 059 руб. 44 коп., доказательств встречного исполнения ответчиком на сумму 224 920 руб. 28 коп. в материалы дела не представлено, исковые требования по существу не оспорены, договор расторгнут. Учитывая изложенное, у ответчика отсутствуют основания для удержания спорной суммы денежных средств в связи с чем суд удовлетворяет исковые требования истца о взыскании с ответчика задолженности в размере 224 920 руб. 28 коп. 

В соответствии с частью 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

Согласно части 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признаётся определённая законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с пунктом 8.4. договора подряда, за нарушение сроков начала и/или окончания работ, по вине подрядчика, последний обязан по письменному требованию генподрядчика уплатить пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных работ по договору за каждый день просрочки.

В связи с неисполнением ответчиком своих обязательств, за период с 08.10.2019 по 10.10.2019 (4 782,03=1 594 010,35 х 0,1% х 3дня) , с 11.10.2019 по 25.12.2019 (51 318,22 = 675 239,80 х 0,1% х 76 дней), 26.12.2019 по 10.07.2020 (112 682,38 = 569 102, 91 х 0,1% х 198 дней) истцом начислена и предъявлена к взысканию сумма пени в размере 168 244 руб. 94 коп.

Период и размер начисленной пени судом проверен и признан правильным, сумму 168 244 руб. 94 коп. подлежит взысканию с ответчика.

В связи с расторжением договора и с несвоевременным возвратом денежных средств, истцом в порядке статьи 395 ГК РФ начислены и предъявлены к взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 29 705 руб. 99 коп. за период с 13.02.2020 по 31.03.2022. 

Период и размер начисленных процентов судом проверен и признан правильным, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 29 705 руб. 99 коп. также подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Судебные расходы распределяются в соответствии со статьёй 110 АПК РФ.     

На основании изложенного,   руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Спектр» (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «СМРстрой» (ОГРН 

<

***>) задолженность в размере 224 920 руб. 28 коп., пени в размере 168 244 руб. 94 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 29 705 руб. 99 коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 11 457 руб.

Обществу с ограниченной ответственностью «СМРстрой» выдать справку на возврат государственной пошлины в размере 1 809 руб., уплаченной по платёжному поручению №69579 от 24.06.2022.

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) в течение месяца после принятия.

Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья                                                                                        С.А. Исакова