Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-123130/2023

11 августа 2024 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  19 июня 2024 года.

Полный текст решения изготовлен  11 августа 2024 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сурков А. А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Семиным Д.А.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: :ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО" (197349, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ, УЛ ГАККЕЛЕВСКАЯ, Д. 21, ЛИТЕРА А, ОГРН: 

<

***>);

ответчик: :АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" (196211, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БАССЕЙНАЯ, Д. 73, К. 2 ЛИТЕР А, ОГРН: 

<

***>);

о взыскании,

при участии

- от истца: ФИО1 (доверенность от 21.09.2023);

- от ответчика: ФИО2 (доверенность от 29.12.2023);

установил:

Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго» (далее – Общество «Россети») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее – Арбитражный суд) с иском к акционерному обществу «Теплосеть Санкт-Петербурга» (далее – Общество «Теплосеть») о взыскании по Соглашению от 02.10.2020 № К-СПб-17446-20/10914-Э-20 (далее – Соглашение): 275 000 руб. штрафа.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования, представитель ответчика возражал против удовлетворения иска.

Изучив материалы дела, арбитражный суд установил, что Общества «Теплосеть» (заявитель) и «Россети» (собственник) заключили Соглашение в соответствии с которыми Заказчик обязался компенсировать все затраты Собственника, связанные с ликвидацией (частичной ликвидацией) следующих электросетевых объектов (далее -Имущество): 

-8120-8146/С/М 55-2/ (инв. № 42404487); 

-8120-8132/ (инв. № 42402242); 

-Ф.87-29/8120/ (инв. № 42400165); 

-Ф.87-41/8100/ (инв. № 42400166); 

-Ф.87-15/8140/ (инв. № 42400163); 

-Ф.87-19/8140/ (инв. № 42400164) 

путем оплаты выполнения работ по ликвидации (частичной ликвидации) и восстановлению   с   последующей   передачей   результата   выполненных   работ   по восстановлению Имущества Собственнику в объёме согласно Приложению № 1 к Соглашению, которое является неотъемлемой частью Соглашения. 

Согласно пункту 3.3 Соглашения Заказчик обязуется передать Собственнику результат выполненных работ по восстановлению Имущества в срок до 30.09.2023. 

Между тем, обязательство по передаче Собственнику результата выполненных работ по переустройству Имущества по состоянию на 24.11.2023 Заказчиком не исполнено, что привело к просрочке исполнения обязательств.

Согласно пункту 4.2 Соглашения в случае просрочки исполнения обязательства, предусмотренного пунктом 3.3 настоящего Соглашения в установленный срок, Заявитель уплачивает Собственнику штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый день просрочки.

В связи с нарушением обязательств по Соглашению в претензии от 10.10.2023 № ЛЭ/06-21/837 Общество «Россети» потребовало от Общества «Теплосеть» уплатить штраф в размере 275 000 руб.

Поскольку претензия была оставлена без удовлетворения, Общество «Россети» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Возражая против заявленных требований, ответчик указал следующее.

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» подписало с ООО «СТАРК-СПБ» (далее - Подрядчик) контракт от 24.06.2021 г. №21-1416 на выполнение работ по реконструкции распределительной сети Шлиссельбургская от тепловой камеры-1 до тепловой камеры-8 (распределительной сети ФИО3).

29.08.2023 г. ООО «СТАРК-СПБ» в рамках исполнения своих обязательств по Контракту передало в Невский РЭС филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Кабельная сеть» комплект документов для передачи переустроенного имущества на баланс ПАО «Россети Ленэнерго».

Таким образом, Ответчиком, в лице Подрядчика, досрочно передан Истцу результат выполненных работ по переустройству имущества Истца.

Замечаний на переданный ПАО «Россети Ленэнерго» комплект документов ни Ответчик, ни ООО «СТАРК-СПБ» не получали. 

10.11.2023 г. Ответчик направил в адрес Невского филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Кабельная сеть» письмо № 44/11696 о ходе рассмотрения документации. 

Невский РЭС филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Кабельная сеть» письмом от 06.12.2023 г. № КС/073-24/701 подтвердило фактическое выполнение работ по выносу сетей из зоны выполнения работ по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский район, по Шлиссельбургскому пр. от д. 31/1 до пр. Обуховской Обороны с пересечением ул. Дмитрия Устинова и Шлиссельбургского пр., а также тот факт, что пакет документов по передаче имущества для закрытия Соглашения находится на рассмотрении у ПАО «Россети Ленэнерго».

По мнению ответчика, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» не нарушило срок исполнения обязательства по передаче ПАО «Россети Ленэнерго» результата выполненных работ по переустройству имущества в рамках Соглашения, обязательства исполнены в пределах установленных Соглашением сроков. Основания для взыскания штрафа отсутствуют.

 Истец, в свою очередь, пояснил, что в нарушение условий соглашения о компенсации Ответчик не исполнил обязательства, установленные в пункте 3.3 Соглашения о компенсации от 02.10.2020 г. № К-СП6-17446-20/10914-Э-20, а именно: не передал истцу пакет документов, указанных в Перечне правоустанавливающих документов, что повлекло за собой неисполнение обязательства по передаче переустроенного имущества.

Оценив материалы дела в порядке, предусмотренном статьей 71 АПК РФ, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно пункту 4.2 Соглашения в случае просрочки исполнения обязательства, предусмотренного пунктом 3.3 настоящего Соглашения в установленный срок, Заявитель уплачивает Собственнику штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый день просрочки.

Факт нарушения ответчиком обязательств по Соглашению подтверждается материалами дела.

Надлежащие доказательства передачи документации по Соглашению ответчиком в материалы дела не представлено.

Таким образом, истец правомерно начислил штраф на неисполнение обязательств ответчиком по Соглашению. 

Судом проверен представленный истцом расчет штрафа и признан верным.

При указанном положении требования о взыскании штрафа надлежит удовлетворить.

В соответствии с пунктом 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с акционерного общества "Теплосеть Санкт-Петербурга" в пользу публичного акционерного общества "Россети Ленэнерго" 275 000 руб. штрафа, 8500 руб. в возмещение судебных расходов на уплату государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Сурков А. А.