Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

дело № А42-9131/2023

город Мурманск

24 сентября 2024 года

Руководствуясь статьями 167 – 170, 174, 176 АПК РФ, суд 

решил:

иск удовлетворить частично. 

Обязать ПАО «Мурманскпромстрой» (ИНН 

<

***>) в течение одного месяца со  дня вступления в силу решения суда безвозмездно устранить обнаруженные в пределах  гарантийного срока, установленного муниципальным контрактом от 22.12.2017 №  0349300000317000041-0171935-01, недостатки строительства, в части устройства кровли  многоквартирного дома в 

<

...>, кадастровый номер объекта 51:19:0030150:384 в том  числе:  

в осях 3-4/В-Г для устройства уклона кровли на площади 4,40 Х 2,80 м, снять  существующие слои покрытия кровли, минеральной ваты ISOVER ОЛ-ТОП-50 толщиной  50 мм, демонтировать уклонообразущий слой ISOVER Руф Н, затем выполнить монтаж  клиновидных теплоизоляционных плит, теплоизоляционных плит и двух слоев  кровельного покрытия;  

снять кровельный материал, выступающий над кровельным ковром с вертикальных  стенок вентиляционных шахт ВШ1-ВШ8, хризотилцементные листы, утеплитель,  оштукатурить вертикальные поверхности стен вентиляционных шахт ВШ1-ВШ8  цементно-песчаным раствором, с последующим устройством пароизоляционного слоя,  теплоизоляционного слоя, обшивкой хризотилцементными листами, устройством  водоизоляционного слоя;  

заменить плиту покрытия вентиляционной шахты ВШ7, выполнить  уклонообразующий слой из цементно-песчаного раствора, обработать праймером,  

выполнить устройство кровельного покрытия и установить капельники для защиты от  осадков;  

выполнить ремонт поверхности плит вентиляционных шахт ВШ1, ВШ2, ВШ5 -  ВШ6, ВШ8, снять верхний слой, зачистить поверхность железобетонных плит, выполнить  уклонообразующий слой из цементно-песчаного раствора, обработать праймером,  выполнить устройство кровельного покрытия и установить капельники для защиты от  осадков;  

выполнить ремонт кровельного покрытия в местах установки водосточной воронки в  осях 1-3/Б-В площадью 28,8 м2 (9,0 м Х 3,2 м), в осях 4-5/Б-В площадью 4 м2 (2,0 м Х 2,0  м) с полной заменой всех кровельных слоев (полный демонтаж всех слоев до плиты  покрытия, с последующим устройством новых). У водосточных воронок выполнить  дополнительный водоизоляционный ковер;  

оштукатурить откос в дверном проеме выхода на кровлю, на площади 0,52 м2; 

согласовать с проектировщиком изменение проектного решения устройства  вентиляционных каналов в осях B-Г/2-3.  

Взыскать с ПАО «Мурманскпромстрой» (ИНН 

<

***>) в пользу  Администрации городского поселения Зеленоборский Кандалакшского района (ИНН  

<

***>) 416000 рублей судебных расходов на оплату экспертизы.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с ПАО «Мурманскпромстрой» (ИНН 

<

***>) в федеральный бюджет  6000 рублей государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца после  его принятия.  

Судья В.В. Власов