4041/2017-286305(2) 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

Резолютивная часть решения

 

15 июня 2017 года. Дело № А56-90272/2016 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской  области  

решил:

обязать общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА-2000" в течение 30  дней с момента вступления решения суда в законную силу исполнить гарантийные  обязательства по государственному контракту от 08.07.2014 № ТР-16, а именно:  

1) по ул. Дворцовая от ул. Садовая до Октябрьского бульвара - устранить  разрушение а/б покрытия вокруг коверов на углу с ул. Академическая и с ул.  Пушкинская, просадку а/б покрытия вокруг колодцев на углу с ул. Малая, разрушение  шва сопряжения по всей длине тротуара;  

2) по ул. Конюшенная от ул. Садовая до Медвежьего пер, (г. Павловск) -  устранить застой воды на тротуаре у д. № 1,5,7, провал двух колодцев;  

3) по ул. Оранжерейная от ул. Садовой до ул. Железнодорожной - устранить  раскрытие швов сопряжения на перекрестке с ул. Малая и ул. Средняя;  

4) по ул. Саперская от ул. Гусарская до д. № 34 - устранить разрушение а/б  покрытия вокруг колодца.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ВЕГА-2000" в пользу  Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Дирекция  транспортного строительства" 50 000 руб. штрафа за нарушение сроков устранения  дефектов.  

Возвратить Санкт-Петербургскому государственному казенному учреждению  "Дирекция транспортного строительства" из федерального бюджета 5 000 руб. излишне  уплаченной государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия.  

Судья Стрельчук У.В.