РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

   17 июня 2024 года    

по делу № А33-24274/2023 Красноярск  

«17» июня 2024 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить. 

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, г. Красноярск) в течение одного месяца со дня вступления в законную силу  судебного акта по настоящему делу исполнить обязательства по договору об осуществлении  технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.5959.22 от 07.06.2022,  осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя –  «Опора двойного назначения», расположенного (который будет располагаться) по адресу:  

<

...> от ул. Дзержинского до ул. 9 Января, часть  земельного участка площадью 2 кв.м., с кадастровым номером 24:50:0000000:1581, в точке  присоединения:  

I точка присоединения максимальная мощность 15 кВт. Линия (0,4) Проектируемая Ячейка (0,4) руб. 13 резерв 

ТП ТП-169 ул. Диктатуры пролетар,18  Ячейка ПС яч. 38 в ст. ТП-1102  

ПС ПС № 4 «Городская» 110/6кВ 

Основной источник питания: ПС № 4 «Городская» 110/6кВ  Резервный источник питания: отсутствует,  

в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их  проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих  устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости  строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого  хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом  следующих характеристик:  

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт; - категория надежности третья; 

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое  присоединение 0,4 кВ;  

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств  отсутствует,  

включая мероприятия согласно Техническим условиям № 8000502823: 

- строительство ЛЭП 0,4 кВ от точки, указанной в пункте № 7 настоящих ТУ, до точки  присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы,  установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и  сечение провода определить проектом;  

- выполнить реконструкцию ТП-169 ул. Диктатуры пролетар, 18 с заменой  существующего силового трансформатора на силовой трансформатор большего номинала.  Объем необходимых мероприятий, параметры и характеристики оборудования определить  проектом.  

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в  соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков  электрической энергии» (утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012  

 № 442). 

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Инфраструктурные решения» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск)  

31 175,82 руб. неустойки по договору об осуществлении технологического присоединения к  электрическим сетям № 20.2400.5959.22 от 07.06.2022 за период с 09.12.2022 по 17.06.2024, с  18.06.2024 по день фактического исполнения обязательства из расчета 55,97 руб. за каждый  день просрочки, а также 8 000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины,  несение которых подтверждается платежным поручением от 15.08.2023 № 2523.  

Требование о взыскании судебной неустойки удовлетворить частично. 

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Инфраструктурные решения» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск)  

1 000 руб. судебной неустойки за каждый день просрочки исполнения решения суда по день  его фактического исполнения.  

В удовлетворении требования в остальной части отказать. 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в  течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья Н.А. Варыгина