28/2021-954(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-29513/2020

г. Новосибирск

11 января 2021 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой  

О.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  

заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

Департамента энергетики жилищного и коммунального хозяйства города  

(ОГРН 1075406030270), г. Новосибирск 

к обществу с ограниченной ответственностью "Союздорстрой" (ОГРН  

<

***>), г. Новосибирск 

об обязании исполнить гарантийные обязательства по муниципальному  

контракту № 01513000334917000037-0097039-01 от 07.07.2017, при участии: 

от истца: ФИО2 (доверенность от 08.12.2020, паспорт, диплом);  от ответчика: не явился, извещен,  

руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного  

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования Департамента энергетики жилищного и  

коммунального хозяйства города удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Союздорстрой" в  

срок до 15.06.2021 исполнить гарантийные обязательства по устранению  

дефектов работ по муниципальному контракту № 015130003349170000370097039-01 от 07.07.2017, а именно:  

- по ул. Лейтенанта ФИО3, д. 53: переустановить бортовые камни у  подъезда № 4; пролить битумом трещины в асфальтобетонном покрытии;  зачеканить швы между бортовыми камнями.  

- по ул. Лейтенанта ФИО3, д. 69-73: пролить битумом трещины в  асфальтобетонном покрытии на проезде и у выходов из подъездов; устранить  скопление воды возле контейнерной площадки; зачеканить швы между  бортовыми камнями.  

- по ул. Лейтенанта ФИО3, д. 77: зачеканить швы между бортовыми  камнями; устранить провал колодца напротив подъезда № 3; устранить полосу  неровного асфальтобетонного покрытия вдоль дома около бортовых камней и  газона.  

- по ул. Солидарности, д. 57: пролить битумом трещины в  асфальтобетонном покрытии на тротуаре; устранить просадку  асфальтобетонного покрытия на тротуаре; устранить выбоину на проезде;  зачеканить швы между бортовыми камнями.  

- по ул. Солидарности, д. 59: устранить скопление воды у подъезда № 4;  зачеканить швы между бортовыми камнями.  

- по ул. Солидарности, д. 61: пролить битумом трещины в  асфальтобетонном покрытии на проезде и тротуаре у входа в подъезд № 4;  зачеканить швы между бортовыми камнями.  

- по ул. Солидарности, д. 61а: пролить битумом трещины в  асфальтобетонном покрытии на проезде, устранить выбоины; зачеканить швы  между бортовыми камнями на проезде между многоквартирными домами №№  61 и 61а.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Союздорстрой"  (ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 6 000 рублей.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его  принятия.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух  месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Судья О.В. Суворова 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента Дата 15.04.2020 3:19:13

Кому выдана Суворова Ольга Викторовна