АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

                                 ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                                                               

РЕШЕНИЕ

 

г. Волгоград                                                                                    Дело № А12-35139/2017  

«22» декабря  2017 года         

       резолютивная часть решения оглашена 18.12.2017, решение в полном объеме изготовлено 22.12.2017        

 

        Арбитражный суд Волгоградской области в составе  судьи Смагоринской Екатерины Борисовны,   при ведении протокола судебного заседания  помощником судьи Грибовой В.О., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по  исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ВолгоПромСтрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 400078, 

<

...>/1) к Федеральному бюджетному учреждению «Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 400082, 

<

...>), Федеральному агентству морского и речного транспорта (125993, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) об изменении договора, 

          при участии в судебном заседании:

          от истца – ФИО1, представитель по доверенности от 01.09.2017 № 01/09.17, ФИО2,  представитель по доверенности от 12.12.2017 №01/12.17,

         от ответчика – ФИО3, представитель по доверенности от 20.12.2016 № ЮО-14-03/108,

                                                                УСТАНОВИЛ:

          общество с ограниченной ответственностью «ВолгоПромСтрой»  (далее – ООО «ВолгоПромСтрой», истец) обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к Федеральному бюджетному учреждению «Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей»  (далее – ФБУ  «Администрация «Волго-Дон») и Федеральному агентству морского и речного транспорта об изменении Государственный контракт № 0329100005913000773-к от 10.02.2014 на выполнение работ по объекту: «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала. II этап» 2 (второй этап). Пусковой комплекс реконструкция гидроузла № 7; пусковые комплексы V, III техническое перевооружение насосной станции №32 (агрегаты №№1,2), единая автоматизированная информационно-управляющая система (единая система диспетчеризации)» в части продления сроков выполнения работ до 20 июня 2019 года, а именно:

         - календарный план на выполнение работ по объекту «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала. II этап» 2 (второй этап). Пусковой комплекс реконструкция гидроузла № 7; пусковые комплексы V, III техническое перевооружение насосной станции №32 (агрегаты №№1,2), единая автоматизированная информационно-управляющая система (единая система диспетчеризации)»  (Приложение № 3 к Контракту) изложить в следующей редакции:

№ п/п

Перечень выполняемых работ

Сроки (периоды выполнения работ)

Примечание

Начало выполнения работ

Окончание выполнения работ

1.1            Реконструкция Гидроузла № 7

1.1.1

Разработка рабочей документации

10.02.2014

07.02.2017

1.1.2

Выполнение строительно-монтажных работ

01.08.2014

20.06.2019

1.2       Реконструкция Насосной станции № 32

1.2.1

Разработка рабочей документации

10.02.2014

07.02.2017

1.2.2

Выполнение строительно-монтажных работ

01.09.2014

20.06.2019

1.3           Единая система диспетчеризации

1.3.1

Разработка рабочей документации

01.01.2015

01.06.2015

1.3.2

Выполнение строительно-монтажных работ

02.06.2015

31.11.2015

Срок окончания работ по Контракту на выполнение работ по Объекту: 20.06.2019

        Истец поддержал исковые требования в полном объеме.

        Представитель ответчика ФБУ  «Администрация «Волго-Дон» возражений не заявил, представил письменное заявление о признании иска.

       Ответчик Федеральное агентство морского и речного транспорта согласно представленному отзыву против удовлетворения требований возражал.

       Исследовав материалы дела, выслушав представителей сторон, оценив фактические обстоятельства дела, суд приходит к следующему. 

       Как усматривается из материалов дела, между Федеральным агентством морского и речного транспорта (Росморречфлот, Государственный заказчик, Заказчик), в лице Федерального бюджетного учреждения «Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей» (Застройщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ВолгоПромСтрой» (Генподрядчик) заключен государственный контракт №0329100005913000773-K от 10.02.2014  (далее - Контракт) на выполнение работ по объекту: «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала. II этап». 2 (второй) этап. Пусковой комплекс реконструкция гидроузла №7; пусковые комплексы V, III техническое перевооружение насосной станции №32 (агрегаты №№1,2), единая автоматизированная информационно-управляющая система (единая система диспетчеризации) (далее - Объект).

        На основании Соглашения от 10.02.2014  №СГ-15 Застройщику переданы полномочия Государственного заказчика по заключению и исполнению от имени Росморречфлота государственных контрактов.

        В соответствии со статьей 2 Контракта Генподрядчик по поручению Заказчика обязуется выполнить собственными и/или привлеченными силами разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ на Объекте в соответствии с условиями Контракта и своевременно сдать результаты Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях настоящего Контракта.

       Работы по Контракту должны выполняться в строгом соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Техническим заданием (Приложение № 1 Контракту), в соответствии с Проектной документацией, Рабочей документацией, Расчетом цены Контракта (Приложение № 2 к Контракту) и Календарным планом выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту).

       Календарным планом выполнения работ установлен срок окончания работ по Объекту - 16 марта 2018 года.

       Техническим заданием к Контракту в рамках этапа технического перевооружения насосной станции №32 (НС-32) предусмотрена реконструкция системы электроснабжения НС-32, включающая в себя выполнение работ по строительству ОРУ-110/10 кВ.

      При строительстве ОРУ-110/10 кВ в соответствии с требованиями проектной документации по Объекту, прошедшей государственную экспертизу, трансформаторы силовые Т-1 ТДН- 16000/110 У1 16000 кВА, Т-2 ТДН-16000/110 У1 16000 кВА, входящие в состав оборудования 0РУ-110/10 кВ, были установлены на каретках на рельсы.

        15 февраля 2017 года инспектор Нижне-Волжского управления Ростехнадзора при осмотре оборудования ОРУ-110/10 кВ сделал заключение,  что электроустановка не отвечает требованиям «Правил устройства электроустановок», утвержденных приказом Минэнерго России от 20 июня 2003 г. № 242 (далее - ПУЭ), и не может быть допущена в эксплуатацию к проведению пуско-наладочных работ согласно графика ПНР.

        В целях устранения несоответствия ПУЭ были произведены работы по установке трансформаторов силовых непосредственно на фундамент без кареток (катков) и рельс в соответствии с требованиями ПУЭ.

       После установки силовых трансформаторов в соответствии с требованиями ПУЭ ФБУ «Администрация «Волго-Дон» направило в Нижне-Волжское управление Ростехнадзора заявление №СГСиЭ/06-14В/3303 от 30.05.2017  о выдаче разрешения на допуск к пусконаладочным работам смонтированного оборудования ОРУ-110/10 кВ, выполненного в рамках рабочей документации «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала. II этап». 2 (второй) этап. Пусковой комплекс реконструкция гидроузла №7; пусковые комплексы V, III техническое перевооружение насосной станции №32 (агрегаты №№1,2), единая автоматизированная информационно-управляющая система (единая система диспетчеризации).

       Письмом № 01-21/17676 от 27.06.2017 Нижне-Волжское управление Ростехнадзора отказало ФБУ «Администрация «Волго-Дон» в проведении осмотра и выдаче разрешения на допуск для проведения ПНР энергоустановки оборудования ОРУ-110/10 кВ НС-32 в связи с тем,  что в проектную документацию № ВД-9/30-03-02-1-КР-4.2.2 (том 4.2.2. Насосная станция № 32) не внесены соответствующие изменения в части способа установки трансформатора с последующей экспертизой изменений проектной документации. 

        В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации проектная документация по Объекту, в которую внесены изменения, подлежит государственной экспертизе.

       Внесение изменений в проектную документацию и последующее прохождение государственной экспертизы требует значительных временных затрат.

       Отсутствие разрешения Нижне-Волжского управления Ростехнадзора на допуск к пусконаладочным работам смонтированного оборудования ОРУ-110/10 кВ влечет невозможность выполнения последующих этапов работ по реконструкции системы электроснабжения НС-32, в связи с чем сроки их выполнения неизбежно смещаются.

        Кроме того,  истцом указано, что в рамках реконструкции гидроузла №7 Техническим заданием к Контракту предусмотрено выполнение работ реконструкции закрытого отводящего коллектора правой дренажной ванны.

        При выполнении указанных работ выявилось наличие в местах устройства отводящего коллектора грунтовых вод.

        Наличие указанного фактора не было учтено в проектной и рабочей документации, а также в Техническом задании.

        Комиссией, состоящей из представителей ФБУ «Администрация «Волго-Дон» и ООО «ВПС», был произведен визуальный осмотр выполненных работ по устройству закрытого отводящего коллектора правой дренажной ванны в результате которого выявлено следующее:

       -Гидрогеологические условия участка строительства характеризуются наличием 2-х постоянных водоносных горизонтов (как напорные, так и безнапорные воды). Ергенинский водоносный горизонт весьма водообилен. На это указывает значительный дебет (8-9 л/с), дренажного коллектора, представляющего собой 5 вертикальных скважин глубиной 20-25 м, с отводящей трубой диаметром 500 мм;

        -Закрытый коллектор создаст «барражный эффект» движению грунтовых вод в связи с тем, что отметка низа труб будет ниже отметок уровня грунтовых вод, о чем свидетельствуют результаты замеров уровня грунтовых вод;

        -Грунтовый поток будет «омывать» трубопровод. Проектная глубина заложения трубы от 3,4 до 4,5 метра. Фильтрационный поток, обходя трубопровод снизу и с боков, создаст повышенные градиенты напора (величиной более 1), что приведет к суффозии грунта.

        Комиссией сделано заключение что, вышеизложенные обстоятельства делают невозможным выполнение работ по проекту и требуют его доработки и составлен акт визуального осмотра выполненных работ по объекту: «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала. II этап». 2 (второй) этап. Пусковой комплекс реконструкция гидроузла №7» .

        Истец, обращаясь рассматриваемыми требованиями, полагает,  что данные обстоятельства являются  достаточными основаниями для удовлетворения заявленных требований.

         Между тем, указанные обстоятельства подлежат исследованию судом при рассмотрении спора  по  начислению  санкций за просрочку исполнения обязательств по Контракту и не имеют правового значения при рассмотрении данного спора, предметом которого является изменение сроков  выполнения работ по государственному контракту.

          Вместе с тем судом учтено следующее. 

          В соответствии со статьей 763 Гражданского кодекса РФ  и подрядные строительные работы, предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд. По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

            Пунктом 1 статьи 766 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что государственный или муниципальный контракт должен содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон.

          Как указано выше, календарным планом выполнения работ установлен срок окончания работ по Объекту - 16 марта 2018 года.

          После заключения Контракта, с учетом состава работ предусмотренных Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), распределения финансирования Объекта по годам реализации Контракта, определенного Расчетом цены Контракта (Приложение №2 к Контракту),  а также с учетом сроков выполнения работ, установленных Календарным планом выполнения работ (Приложение №3 к Контракту), ООО «ВолгоПромСтрой»  был разработан детализированный Календарный план-график на выполнение работ по Объекту, который был согласован ФБУ «Администрация «Волго-Дон».

          На момент заключения Контракта лимит финансирования Объекта, указанный в конкурсной документации, а также в Расчете цены Контракта (Приложение № 2 к Контракту) составлял: на 2015 год - 980 000 000 руб.; на 2016 год - 967 500 000 руб., под который календарный планом-графиком на выполнение работ по Объекту было предусмотрено выполнение определенных видов работ.

           В связи с изменениями, внесенными в Данные об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимого имуществ, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, финансируемых за счет бюджетных ассигнований, объем и стоимость выполняемых в 2015 году работ были уменьшены на 899 568 990 руб. и установлены в размере 80 431 010,00 руб. В связи с чем, 14 октября 2015 года между ФБУ «Администрация «Волго-Дон» и ООО «ВолгоПромСтрой»  было заключено Дополнительное соглашение №4 к Контракту.

         В соответствии с Данными об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимого имущества, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 2016 год, финансируемых за счет бюджетных ассигнований, объем и стоимость выполняемых в 2016 году работ были уменьшены на 745 653 000 руб.  и установлены в размере 221 847 000 руб.  В связи с этим, 01 марта 2016 года между ФБУ «Администрация «Волго-Дон» и ООО «ВолгоПромСтрой»  было заключено Дополнительное соглашение №5 к Контракту.

           При этом со стороны Государственного заказчика изменению подверглось только финансирование указанного Контракта, тогда как Календарный план выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту), а также Техническое задание (Приложение № 1 к Контракту) остались неизменными.

          Таким образом, в связи с сокращением объема финансирования выполнение в 2015, 2016 годах всех работ, запланированных Календарным планом-графиком на выполнение работ по Объекту на 2015, 2016 годы оказалось невозможным.

         Объем работ по Контракту, запланированных к выполнению на 2015, 2016 годы, был приведен в соответствие с доведенными лимитами финансирования

        Так, согласно указанному выше Календарному плану-графику на выполнение работ по Объекту на 2015, 2016 годы было запланировано выполнение в полном объеме следующих работ: устройство площадки под КПП; устройство лестницы; реконструкция верхней и нижней причальных эстакад, направляющих пал; реконструкция крепления откосов дамбы; реконструкция ремонтных затворов водопроводных галерей; реконструкция рабочих двухстворчатых ворот; реконструкция гальсбантных устройств, включая закладные части; реконструкция приспособлений для подъема ремонтных ворот нижней головы и верхней головы шлюза; реконструкция насосного оборудования для осушения камеры шлюза; реконструкция закладных частей с электрообогревом и опорно-ходовых узлов подъемно-опускных ворот верхней головы шлюза; реконструкция устройств майнообразования на гидроузле; реконструкция лестниц в камере шлюза; строительство поста охраны; строительство контрольно-пропускного пункта; установка комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа с испытанием и подключением; реконструкция резервного электроснабжения шлюза с установкой дизельгенератора с автоматическим запуском с пульта управления; реконструкция наружного освещения с заменой металлоконструкций опор наружного освещения шлюза, металлоконструкций светофоров, знаков «СТОП»; реконструкция электроснабжения внутриобъектовой связи; реконструкция защитного и информационного заземления; демонтаж и утилизация элементов электрооборудования не подлежащих дальнейшему использованию, восстановление интерьеров производственных помещений; реконструкция сети электроснабжения с учетом комплекса инженерно-технических средств обеспечения системы транспортной безопасности и единой системы диспетчеризации; монтаж комплексов инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности (системы безопасности и инженерные средства); устройство внешних сетей водоснабжения и водоотведения; пусконаладочные работы систем транспортной безопасности; устройство Единой системы диспетчеризации.

           Также на 2015, 2016 годы было запланировано начало и частичное выполнение следующих работ: ремонт разрушенного бетона голов и камеры шлюзы; реконструкция парапета камеры шлюза и верхней головы; ремонт штрабного бетона; реконструкция дренажной системы; реконструкция крепления подходных каналов; реконструкция остановочного пункта 305; дополнительные работы по проекту организации строительства; реконструкция механизма привода подъемно-опускных ворот; реконструкция грузоподъемных механизмов для разборки и ремонта механического оборудования; реконструкция регулятора бьефа; реконструкция механизма привода ремонтных двустворчатых ворот и ремонтных затворов водопроводных галерей; реконструкция зданий механизмов и управления; строительство модульного здания хозяйственно-бытового назначения со встроенным защитным сооружением; ремонт здания административно назначения на остановочном пункте № 305; электроснабжение очистных сооружений, артезианской скважины, пожарных насосов; реконструкция внешних сетей электроснабжения шлюза; реконструкция силовых кабелей; реконструкция освещения и отопления служебных и бытовых помещений; реконструкция электроснабжения и оборудования связанного с механическим оборудованием; благоустройство территории гидроузла № 7; организация земельного участка; пусконаладочные работы механического оборудования.

          Однако, в связи сокращением финансирования работ по Объекту в 2015, 2016 годах не выполнялись предусмотренные Календарным планом-графиком на выполнение работ по Объекту работы: реконструкция ремонтных затворов водопроводных галерей; строительство поста охраны; строительство контрольно-пропускного пункта; установка комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа с испытанием и подключением; реконструкция резервного электроснабжения шлюза с установкой дизельгенератора с автоматическим запуском с пульта управления; реконструкция наружного освещения с заменой металлоконструкций опор наружного освещения шлюза, металлоконструкций светофоров, знаков «СТОП»; реконструкция электроснабжения внутриобъектовой связи; реконструкция защитного и информационного заземления; демонтаж и утилизация элементов электрооборудования не подлежащих дальнейшему использованию, восстановление интерьеров производственных помещений; реконструкция сети электроснабжения с учетом комплекса инженерно-технических средств обеспечения системы транспортной безопасности и единой системы диспетчеризации; монтаж комплексов инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности (системы безопасности и инженерные средства); устройство внешних сетей водоснабжения и водоотведения; пусконаладочные работы систем транспортной безопасности; устройство Единой системы диспетчеризации; ремонт разрушенного бетона голов и камеры шлюзы; реконструкция парапета камеры шлюза и верхней головы; ремонт штрабного бетона; реконструкция крепления подходных каналов; дополнительные работы по проекту организации строительства; реконструкция грузоподъемных механизмов для разборки и ремонта механического оборудования; реконструкция регулятора бьефа; реконструкция механизма привода ремонтных двустворчатых ворот и ремонтных затворов водопроводных галерей; реконструкция зданий механизмов и управления; строительство модульного здания хозяйственно-бытового назначения со встроенным защитным сооружением; ремонт здания административно назначения на остановочном пункте № 305; электроснабжение очистных сооружений, артезианской скважины, пожарных насосов; реконструкция внешних сетей электроснабжения шлюза; реконструкция освещения и отопления служебных и бытовых помещений; реконструкция электроснабжения и оборудования связанного с механическим оборудованием; благоустройство территории гидроузла № 7; организация земельного участка; пусконаладочные работы механического оборудования.

        Необходимость выполнения указанных выше работ в последующие периоды неизбежно приводит к невозможности завершения работ по Контракту в установленный срок.

       Таким образом,  в  данном случае имеет место существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении Контракта.   

       Согласно части 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственные (муниципальные) контракты оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств.

         Пунктом 1 статьи 767 Гражданского кодекса РФ установлено, что при уменьшении соответствующими государственными органами или органами местного самоуправления в установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ. 

         Изменения условий государственного или муниципального контракта, не связанные с обстоятельствами, указанными в пункте 1 статьи 767 Гражданского кодекса Российской Федерации, в одностороннем порядке или по соглашению сторон допускаются в случаях, предусмотренных законом.

         Таким образом, Гражданским кодексом РФ прямо установлено право изменить сроки выполнения работ по государственному или муниципальному контракту при уменьшении в установленном порядке соответствующего бюджета.

         Кроме того, в силу положений пункта 4 статьи 451 Гражданского кодекса РФ  изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по решению суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях.

         ООО «ВолгоПромСтрой»  при заключении Контракта не могло предвидеть существенного изменения вышеуказанных обстоятельств. Выполнение работ в установленный Контрактом срок стало невозможным по не зависящим от истца причинам.

         При этом предмет Контракта является значимым для Заказчика, Заказчик не утратил интерес к результату работ, в связи с чем, расторжение контракта будет противоречить общественным и публичным интересам, а также приведет к нарушению интересов сторон, организации новых торгов, значительному увеличению срока окончания выполнения работ.

        Согласно пункту 2 статьи 451 Гражданского кодекса РФ в случае не достижения сторонами соглашения об изменении или расторжении договора при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, договор может быть изменен или расторгнут судом по требованию одной из сторон.

       Согласно статье 22 Контракта претензионный порядок досудебного урегулирования споров и разногласий, возникающих в ходе исполнения, является для Сторон обязательным. 

       Истцом  в  адрес  ответчика было направлено письмо № 213/17 от 10 августа 2017 года,  содержащее   обоснование невозможности исполнить Контракт без изменения его условий в связи  с  существенным изменением обстоятельств и предложение в срок до 23 августа 2017 года внести в Государственный контракт № 0329100005913000773-к от 10.02.2014 на выполнение работ по объекту: «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала. II этап». 2 (второй) этап. Пусковой комплекс реконструкция гидроузла №7; пусковые комплексы V, III техническое перевооружение насосной станции №32 (агрегаты №№ 1,2), единая автоматизированная информационно-управляющая система (единая система диспетчеризации) изменения в части продления сроков выполнения работ, указав датой окончания выполнения всех видов работ по Контракту - 20.06.2019 года, с заключением соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

       Письмом № ЮО-14-03/6250 от 11 сентября 2017 года «Администрация «Волго-Дон» отказалось вносить изменения в Контракт и заключать соответствующее дополнительное соглашение к Контракту, поскольку это противоречит Федеральному закону от 05.04.2013  №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

       Направление истцом предложения об изменении Контракта и получение отказа ответчика на указанное предложение подтверждают соблюдение истцом претензионного порядка урегулирования спора и подтверждают принятие им мер по урегулированию спора с ответчиком, предусмотренных пунктом 2 статьи 452 Гражданского кодекса РФ.

       Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, особенности и характер подлежащих выполнению работ,  взаимные интересы обеих сторон, а также то, что обязательства по Контракту сторонами выполняются, стороны в исполнении Контракта заинтересованы, прекращать договорные отношения не намерены, объект имеет социальное значение, расторжение   Контракта  повлечет  для  сторон  дополнительные  затраты, суд считает условие о сроках выполнения работ по Контракту подлежащим изменению.

       Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы доказательства, суд считает, что требования истца подлежат удовлетворению.

       Поскольку требования истца удовлетворены, его расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за подачу иска, подлежат возмещению за счет ответчика в соответствии с правилами статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

        На основании изложенного, руководствуясь статьями  110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд 

                                                                  РЕШИЛ: 

        Исковые требования удовлетворить.

        Изменить Государственный контракт № 0329100005913000773-к от 10.02.2014 на выполнение работ по объекту: «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала. II этап» 2 (второй этап). Пусковой комплекс реконструкция гидроузла № 7; пусковые комплексы V, III техническое перевооружение насосной станции №32 (агрегаты №№1,2), единая автоматизированная информационно-управляющая система (единая система диспетчеризации)» в части продления сроков выполнения работ до 20 июня 2019 года, а именно:

       - календарный план на выполнение работ по объекту «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Волго-Донского судоходного канала. II этап» 2 (второй этап). Пусковой комплекс реконструкция гидроузла № 7; пусковые комплексы V, III техническое перевооружение насосной станции №32 (агрегаты №№1,2), единая автоматизированная информационно-управляющая система (единая система диспетчеризации)»  (Приложение № 3 к Контракту) изложить в следующей редакции:

№ п/п

Перечень выполняемых работ

Сроки (периоды выполнения работ)

Примечание

Начало выполнения работ

Окончание выполнения работ

1.1            Реконструкция Гидроузла № 7

1.1.1

Разработка рабочей документации

10.02.2014

07.02.2017

1.1.2

Выполнение строительно-монтажных работ

01.08.2014

20.06.2019

1.2       Реконструкция Насосной станции № 32

1.2.1

Разработка рабочей документации

10.02.2014

07.02.2017

1.2.2

Выполнение строительно-монтажных работ

01.09.2014

20.06.2019

1.3           Единая система диспетчеризации

1.3.1

Разработка рабочей документации

01.01.2015

01.06.2015

1.3.2

Выполнение строительно-монтажных работ

02.06.2015

31.11.2015

Срок окончания работ по Контракту на выполнение работ по Объекту: 20.06.2019

       Взыскать с Федерального бюджетного учреждения «Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей» (400082, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  в пользу общества с ограниченной ответственностью «ВолгоПромСтрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 400078, 

<

...>/1) расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.

       Решение может быть обжаловано в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации через Арбитражный суд Волгоградской области.

             Судья                                                                                                     Е.Б. Смагоринская