Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ул. Мира, 27, г. Ханты-Мансийск, 628012, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А75-2725/2022

12 октября 2022 г.

г. Ханты-Мансийск

 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи  Гавриш С.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Департамента  муниципальной собственности администрации Советского района (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица:  16.01.2003, место нахождения: 628242, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

<

...> лет Пионерии, д. 10) к обществу с ограниченной ответственностью  «Сириус» (ОГРН 

<

***>, ИНН: 

<

***>, дата государственной регистрации  в качестве юридического лица: 12.10.2018, место нахождение: 628251, Ханты-Мансийский  автономный округ – Югра, Советский район, пгт. Малиновский, ул. Спортивная, д. 20,  кв. 1) об устранении строительных недостатков,  

руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 180, 181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Сириус» в течение  15 (пятнадцати) рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу устранить  недостатки в жилом доме № 6А по ул. Свердлова в пгт. Малиновский Советского района  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, а именно:  

1) Устранить недостатки, препятствующие обеспечению качества воды санитарно- эпидемиологическим требованиям, потребителям в жилом доме № 6А по ул. Свердлова  в пгт. Малиновский Советского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  путем установки системы очистки воды или подключения потребителя к центральным  сетям водоснабжения, углублениеяскважины или бурения в другом месте.  

2) Устранить деформации ендовых планок наружных на стыках между скатами  кровли и слуховых окон путем выполнения качественного крепления верхних ендовых  планок (свод правил CП 17.13330.2017 «Кровли»).  

3) Устранить не соответствие утепления чердачного перекрытия жилого дома путем  замены минералватного утеплителя 200 мм. на минералватный утеплитель согласно  проектной толщине - 250 мм.  

4) Выполнить установку снегозадержателей над крыльцами квартир №№ 1,2, 3, 4  (свод правил СП 17.13330.2017 «Кровли»).  

5) По кровле всего дома установить водосточную систему (п.9.1 свода правил СП  17.13330.2017 «Кровли», требования СП 54.13330, СП 56.13330, СП 118.13330 и других  сводов правил по проектированию конкретных зданий и сооружений).  

6) В квартире № 4:  6.1. Устранить промерзание входной двери; 

 6.2. Устранить причины скрипа пола по всему дому путем переборки  конструкции пола с применением более жестких материалов или конструктивных  решений, позволяющих повысить жесткость настила пола (свод правил СП 55.13330.2016  в актуализированной редакции СНиП 31-02-2001, ГОСТ 27751, СП 20.13330);  

 6.3. Провести замену лопнувшей плитки в ванной и туалете (свод правил СП  71.13330.2017 в актуализированной редакции СНиП 3.04.01-87);  

 6.4. Восстановить работоспособность вентиляции в котельной (в соответствии с  Проектом, раздел 18-045Д-Иос4, Том 5.4, 18-045Д-ИОС4.ТЧ, лист 3 и 1, 18-045-ИОС4.ГЧ,  лист 1 и 1);  

 6.5. В тамбуре, ванной и туалете устранить трещины с последующим  восстановлением внутренней отделки (свод правил СП 71.13330.2017 в  актуализированной редакции СНиП 3.04.01-87, раздел 7.5 «Производство малярных  работ», таблица 7.7 - «Требования к качеству малярных работ»);  

 6.6. Устранить деформацию пола при входе в зал путем переборки конструкции  пола с применением более жестких материалов или конструктивных решений,  позволяющих повысить жесткость настила пола, при входе в зал (свод правил СП  55.13330.2016 в актуализированной редакции СНиП 31-02-2001, ГОСТ 27751, СП  20.13330);  

 6.7. Устранить просадку пола в ванной комнате путем переборки конструкции  пола с применением более жестких материалов или конструктивных решений,  позволяющих повысить жесткость настила пола, в ванной комнате (свод правил СП  55.13330.2016 в актуализированной редакции СНиП 31-02-2001, ГОСТ 27751, СП  20.13330).  

7. В квартире № 3: 

 7.1. В ванной и туалете осуществить ремонт трещин с последующим  восстановлением внутренней отделки (свод правил СП 71.13330.2017 в  актуализированной редакции СНиП 3.04.01-87, раздел 7.5 «Производство малярных  работ», таблица 7.7 - «Требования к качеству малярных работ»);  

 7.2. Устранить причины скрипа пола в зале путем переборки конструкции пола с  применением более жестких материалов или конструктивных решений, позволяющих  повысить жесткость настила пола. (свод правил СП 55.13330.2016 в актуализированной  редакции СНиП 31-02-2001, ГОСТ 27751, СП 20.13330);  

 7.3. Восстановить работоспособность вентиляции в котельной (в соответствии с  Проектом, раздел 18-045Д-Иос4, Том 5.4, 18-045Д-ИОС4.ТЧ, лист 3 и 1, 18-045-ИОС4.ГЧ,  лист 1 и 1);  

 7.4. Устранить просадку пола в ванной комнате путем переборки конструкции  пола с применением более жестких материалов или конструктивных решений,  позволяющих повысить жесткость настила пола, в ванной комнате (свод правил СП  55.13330.2016 в актуализированной редакции СНиП 31-02-2001, ГОСТ 27751, СП  20.13330).  

8. В квартире № 2: 

8.1 Произвести замену лопнувшей плитки в ванной (свод правил СП 71.13330.2017 в  актуализированной редакции СНиП 3.04.01-87);  

8.2. В ванной и туалете устранить трещины с последующим восстановлением  внутренней отделки (свод правил СП 71.13330.2017 в актуализированной редакции СНиП  3.04.01-87, раздел 7.5 «Производство малярных работ», таблица 7.7 - «Требования к  качеству малярных работ»);  

 8.3. Устранить причины скрипа пола в коридоре и зале путем переборки  конструкции пола с применением более жестких материалов или конструктивных  решений, позволяющих повысить жесткость настила пола (свод правил СП 55.13330.2016  в актуализированной редакции СНиП 31-02-2001, ГОСТ 27751, СП 20.13330);  

8.4. Устранить промерзание входной двери; 

 8.5. Восстановить работоспособность вентиляции в котельной (в соответствии с  Проектом, раздел 18-045Д-Иос4, Том 5.4, 18-045Д-ИОС4.ТЧ, лист 3 и 1, 18-045-ИОС4.ГЧ,  лист 1 и 1).  

 9. В квартире № 1: 

 9.1. В коридоре, ванной и туалете устранить трещины с последующим  восстановлением внутренней отделки (свод правил СП 71.13330.2017 в  актуализированной редакции СНиП 3.04.01-87, раздел 7.5 «Производство малярных  работ», таблица 7.7 - «Требования к качеству малярных работ»);  

 9.2. Устранить причины скрипа пола путем переборка конструкции иола с  применением более жестких материалов или конструктивных решений, позволяющих  повысить жесткость настила пола (свод правил СП 55.13330.2016 в актуализированной  редакции СНиП 31-02-2001, ГОСТ 27751, СП 20.13330);  

 9.3. Произвести замену обоев в местах деформации (свод правил СП  71.13330.2017 в актуализированной редакции СНиП 3.04.01-87 пункт 7.6.15);  

 9.4. Восстановить работоспособность вентиляции в котельной (в соответствии с  Проектом, раздел 18-045Д-Иос4, Том 5.4, 18-045Д-ИОС4.ТЧ, лист 3 и 1, 18-045-ИОС4.ГЧ,  лист 1 и 1);  

 9.5. Устранить просадку пола в ванной комнате путем переборки конструкции  пола с применением более жестких материалов или конструктивных решений,  позволяющих повысить жесткость настила пола, в ванной комнате (свод правил СП  55.13330.2016 в актуализированной редакции СНиП 31-02-2001, ГОСТ 27751, СП  20.13330).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сириус» в доход  федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб. 00 коп.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Не вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Восьмой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная  жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного  документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

В силу статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам,  участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного  суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного  доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

 По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть  направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства  в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под  расписку.  

Судья С.А. Гавриш  

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 09.12.2021 2:12:50

Кому выдана Гавриш Светлана Александровна