ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10АП-4785/2024

Дело № А41-47646/23

22 мая 2024 года

г. Москва

 

Резолютивная часть постановления объявлена 15 мая 2024 года

Постановление изготовлено в полном объеме 22 мая 2024 года 

 

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего-судьи Иевлева П.А.,

судей Немчиновой М.А., Стрелковой Е.А.,

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Жидок Д.Ю.,

при участии в заседании:

от истца по делу - ООО "ЖИЛСТРОЙ-МО" – извещено, представитель не явился;

от ответчика по делу - ООО "ТЕХСТРОЙ" – извещено, представитель не явился; 

от третьего лица по делу - ПАО ГРУППА КОМПАНИЙ «САМОЛЕТ» – извещено, представитель не явился; 

от третьего лица по делу - ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЕТРОВИЧ» – извещено, представитель не явился; 

от третьего лица по делу - ООО «СТРОЙМАСТ» – извещено, представитель не явился; 

от третьего лица по делу - ООО «ЗАВОД ЭНЕРГОМАШ» – извещено, представитель не явился; 

от третьего лица по делу - ООО «АРГО» – извещено, представитель не явился; 

от третьего лица по делу - АО «ЭЛЕВЕЛ ИНЖЕНЕР» – извещено, представитель не явился; 

от третьего лица по делу - ООО «АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» – извещено, представитель не явился;

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу                                                          общества с ограниченной ответственностью "ТЕХСТРОЙ" на решение Арбитражного суда Московской области от 01 марта 2024 года по делу № А41-47646/23 по иску ООО "ЖИЛСТРОЙ-МО" к ООО "ТЕХСТРОЙ" о взыскании денежных средств, третьи лица: ПАО ГРУППА КОМПАНИЙ «САМОЛЕТ», ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЕТРОВИЧ», ООО «СТРОЙМАСТ», ООО «ЗАВОД ЭНЕРГОМАШ», ООО «АРГО», АО «ЭЛЕВЕЛ ИНЖЕНЕР», ООО «АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 

 

УСТАНОВИЛ:

ООО "ЖИЛСТРОЙ-МО" обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к ООО "ТЕХСТРОЙ" о взыскании суммы неосновательного обогащения (неотработанного аванса) по Договору подряда от 15.07.2021 № Ж-817-21 в размере 18 936 080 рублей 27 копеек, суммы убытков – компенсации расходов по устранению недостатков в выполненных работ по Договору подряда от 15.07.2021 № Ж-817-21 в размере 221 521 рублей 12 копеек.

Решением Арбитражного суда Московской области от 01 марта 2024 года исковые требования удовлетворены в полном объеме.

ООО "ТЕХСТРОЙ"» не согласилось с выводами суда, обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, по мотивам, изложенным в жалобе. 

Судебное заседание проведено в соответствии с нормами статей 121-123, 153, 156 АПК РФ, в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, в том числе публично путем размещения информации в картотеке арбитражных дел на сайте (www//kad.arbitr.ru) в соответствии с положениями ч. 6 ст. 121 АПК РФ.

Законность и обоснованность принятого решения проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном ст. ст. 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив апелляционную жалобу, материалы дела, суд апелляционной инстанции с учетом требований статьи 71 АПК РФ установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, между ООО «ЖИЛСТРОЙ-МО» (Генеральным подрядчиком) и ООО «ТехСтрой» (Подрядчиком) был заключен Договор подряда № Ж-817-21 от 15 июля 2021 г. (далее по тексту- «Договор») по выполнению комплекса работ по монтажу и пусконаладке внутренних систем электроснабжения, электроосвещения, молниезащиты и заземления в Жилом доме № 7 при осуществлении строительства объекта: «Комплексная жилая застройка с объектами инфраструктуры, Жилые дома № № 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20 по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, вблизи д. Путилково». 

В соответствии с пунктом 7.1.1. Договора, Подрядчик обязался выполнить все Работы в объемах, сроки, за цену и в соответствии с условиями, предусмотренными Договором, дополнительными соглашениями, в соответствии с утвержденной Генеральным подрядчиком Рабочей документацией, ГОСТ, СНиП, СП, разработанным Подрядчиком ППР и требованиями нормативных актов субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется строительство Объекта, Российской Федерации в области строительства и сдать результат выполненных Работ Генеральному подрядчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию Объекта капитального строительства. 

Согласно п. 4.1. Договора, стоимость Работ определена на основании Расчета сметной стоимости (Приложение № 2 к Договору) и составила в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 30 марта 2022 г. сумму в размере 16 670 755 (Шестнадцать миллионов шестьсот семьдесят тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 68 копеек, в том числе НДС. 

Руководствуясь п. 5.1 и Приложением № 6 к Договору, Генеральный подрядчик перечислил авансовые платежи, оплату за номинированные материалы и выполненные работы в размере 27 713 158 (Двадцать семь миллионов семьсот тринадцать тысяч сто пятьдесят восемь) рублей 95 копеек, в том числе НДС, о чем свидетельствуют платежные поручения № 10366 от 20.08.2021, № 10725 от 26.08.2021, № 11549 от 06.09.2021, № 12290 от 14.09.2021, № 149876 от 28.10.2021, №№ 149962, 149963 от 29.10.2021, № 2808 от 10.02.2022, №№ 4017, 4090 от 21.02.2022, №№ 4614, 4615 от 25.02.2022, №9035 от 08.04.2022, № 13797 от 23.05.2022, № 16093 от 07.06.2022. 

В свою очередь, Подрядчиком выполнены работы по Договору на сумму 16 670 755 (Шестнадцать миллионов шестьсот семьдесят тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 67 копеек, в т. ч. НДС, что подтверждается Актами о приемке выполненных работ (по ф. КС-2), Справками о стоимости работ (по ф. КС-3) № 1 от 27.09.2021, № 2 от 25.10.2021, № 3 от 15.12.2021. 

Согласно п. 9.4.1. Договора, Генеральный подрядчик произвел резервирование денежных средств в размере 5 (Пять) % от стоимости принятых по Акту о приемке выполненных работ строительно-монтажных работ (без учета стоимости номинированных и неноминированных материалов) для формирования гарантийного удержания. Согласно данным бухгалтерского учета, сумма Гарантийного удержания по Договору составила 506 900 (Пятьсот шесть тысяч девятьсот) рублей 99 копеек, в т. ч. НДС. 

08 декабря 2021 г. по письму Подрядчика № П-8-498 был произведен перенос авансового платежа с Договора подряда № Ж-204-21 от 15 марта 2021 г. на Договор подряда № Ж-817-21 от 15 июля 2021 г. на сумму 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС. 

01 июля 2022 г. между ООО «ЖИЛСТРОЙ-МО», ООО «ТЕХСТРОЙ» и ООО «СК «Молот» заключено Соглашение о зачете встречных однородных требований, в соответствии с п. 2.1. которого частично погашена задолженность ООО «ТЕХСТРОЙ» перед ООО «ЖИЛСТРОЙ-МО» по возврату незакрытого аванса по Договору подряда № Ж-817-21 от 15 июля 2021 г. на сумму 2 613 224 (Два миллиона шестьсот тринадцать тысяч двести двадцать четыре) рубля 00 копеек, в т. ч. НДС 

Задолженность Подрядчика по излишне уплаченным денежным средствам по Договору составляет 18 936 080 (Восемнадцать миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч восемьдесят) рублей 27 копеек, в том числе НДС Указанная сумма задолженности подтверждена Подрядчиком в п. 2.1. Соглашения о прекращении обязательств от 01 июля 2022 г. 

В соответствии с п. 7.1.15 Договора, при несвоевременном вывозе Подрядчиком мусора уполномоченные представители Генерального подрядчика и Подрядчика на Объекте оформляют соответствующий акт. При отказе представителя Подрядчика подписать указанный акт он оформляется в одностороннем порядке. В случае невывоза Подрядчиком мусора в течение суток с даты оформления указанного акта, Генеральный подрядчик вправе произвести вывоз мусора своими силами (или силами третьих лиц), при этом Г енеральный подрядчик вправе начислить на основании оформленного акта и удержать из любых причитающих Подрядчику платежей по Договору в безакцептном порядке штраф в двукратном размере суммы затрат Генерального подрядчика, связанных с вывозом мусора. 

Сумма штрафов за несвоевременный вывоз Подрядчиком мусора составила 294 000 (Двести девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек, что подтверждается Актами № 1503.6 от 15 марта 2022 г., № 1903.3. от 19 марта 2022 г., № 2303.1 от 23 марта 2022 г., № 3103.2 от 31 марта 2022 г. В выполненных Подрядчиком работах были обнаружены недостатки. 

В соответствии с п.п. 9.1.8 и 9.3.8 Договора, Генеральным подрядчиком были оформлены следующие рекламационные акты, в которых перечислены дефекты: 

Рекламационный акт от 03 марта 2022 г. 

Рекламационный акт от 24 июня 2022 г. 

Извещения о вызове для составления Рекламационных актов исх. № 01-05/1849 от 28.02.2022, исх. № 01-05/6253 от 20.06.2022 направлены в адрес Подрядчика по электронной почте в соответствии с п. 18.4. Договора. 

К выполнению работ по устранению недостатков/дефектов Подрядчик не приступал. 

В соответствии с и. 9.3.13 Договора, если Подрядчик своевременно не устраняет недостатки/дефекты в выполненных Работах, Генеральный подрядчик вправе привлечь для этого третьих лиц, либо самостоятельно исправить некачественно выполненные Подрядчиком работы с отнесением расходов на счет Подрядчика. 

Расходы, связанные с переделкой таких работ Генеральным подрядчиком или третьими лицами, оплачиваются/возмещаются Подрядчиком по выбору Генерального подрядчика: посредством оплаты на счет Генерального подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования от Генерального подрядчика с приложением документов, подтверждающих размер и основания понесенных расходов; посредством вычета из гарантийного удержания. 

Размер фактически понесённых Генеральным подрядчиком затрат по устранению дефектов и недостатков в объемах работ, выполненных Подрядчиком, составил 1 339 390 (Один миллион триста тридцать девять тысяч триста девяносто) рублей 86 копеек, в том числе НДС, что подтверждается следующими документами: 

Договор подряда № Ж-1161-22 от 11 апреля 2022 г. с ООО «СК «7 Холмов», Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) № 1 от 19.05.2022 на сумму 658 108 (Шестьсот пятьдесят восемь тысяч сто восемь) рублей 80 копеек, в т. ч. НДС, платежное поручение № 17593 от 15.06.2022; 

Договор подряда № Ж-2544-22 от 04 августа 2022 г. с ООО «СК «7 Холмов», Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) № 1 от 05.09.2022 на сумму 681 282 (Шестьсот восемьдесят одна тысяча двести восемьдесят два) рубля 06 копеек, в т. ч. НДС, платежное поручение № 40681 от 02.11.2022; 

Генеральный подрядчик вправе требовать возмещения расходов по устранению недостатков/дефектов в размере 1 339 390 (Один миллион триста тридцать девять тысяч триста девяносто) рублей 86 копеек, в том числе НДС, в т. ч. НДС, исходя из стоимости выполнения работ по устранению недостатков/дефектов привлеченными подрядными организациями. 

Поскольку работы по Договору выполнены Подрядчиком в полном объеме (в соответствии с Расчетом сметной стоимости в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 30 марта 2022 г.), Договор прекратил свое действие надлежащим исполнением. 

Между ООО «ЖИЛСТРОЙ-МО» (Генеральным подрядчиком) и ООО «ТехСтрой» (Подрядчиком) был заключен Договор подряда № Ж-681-21 от 15 июня 2021 г. (далее по тексту- «Договор») по выполнению комплекса работ по внутренней отделке жилых помещений и помещений общего пользования (без МОП Нго этажа) Жилого дома № 4 (секции 2, 3) при осуществлении Комплексной жилой застройки с объектами инфраструктуры, Жилые дома №№ 1,2,3,4,5,6 по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, вблизи д. Путилково. 

В соответствии с пунктом 7.1.1. Договора, Подрядчик обязался выполнить все Работы в объемах, сроки, за цену и в соответствии с условиями, предусмотренными Договором, дополнительными соглашениями, в соответствии с утвержденной Генеральным подрядчиком Рабочей документацией, ГОСТ, СНиП, СП, разработанным Подрядчиком ППР и требованиями нормативных актов субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется строительство Объекта, Российской Федерации в области строительства и сдать результат выполненных Работ Генеральному подрядчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию Объекта капитального строительства. 

Согласно п. 4.1. Договора, стоимость Работ определена на основании Расчета сметной стоимости (Приложение № 2 к Договору) и составила 2 785 318 (Два миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч триста восемнадцать) рублей 88 копеек, в том числе НДС. 

Подрядчиком выполнены работы по Договору на сумму 2 785 294 (Два миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч двести девяносто четыре) рубля 37 копеек, в т. ч. НДС, что подтверждается Актами о приемке выполненных работ (по ф. КС-2), Справками о стоимости работ (по ф. КС-3) № 1 от 10.08.2021, № 2 от 06.09.2021, № 3 от 20.12.2022 

Руководствуясь п. 5.1 и Приложением № 6 к Договору, Генеральный подрядчик перечислил оплату за выполненные работы в размере 1 882 492 (Один миллион восемьсот восемьдесят две тысячи четыреста девяносто два) рубля 75 копеек в том числе НДС, о чем свидетельствуют платежные поручения № 10798 от 26.08.2021, № 149017 от 20.102.2021. 

Согласно п. 9.4.1. Договора, Генеральный подрядчик произвел резервирование денежных средств в размере 5 (Пять) % от стоимости принятых по Акту о приемке выполненных работ строительно-монтажных работ (без учета стоимости номинированных и неноминированных материалов) для формирования гарантийного удержания. Согласно данным бухгалтерского учета, сумма Гарантийного удержания по Договору составила 94 059 (Девяносто четыре тысячи пятьдесят девять) рублей 77 копеек, в т. ч. НДС. 

Таким образом, согласно данным бухгалтерского учета: 

задолженность Генерального подрядчика по оплате выполненных работ по Договору составляет 808 741 (Восемьсот восемь тысяч семьсот сорок один) рубль 85 копеек, в том числе НДС 

Задолженность Генерального подрядчика по возврату зарезервированных денежных средств по Договору составляет 94 059 (Девяносто четыре тысячи пятьдесят девять) рублей 77 копеек, в т. ч. НДС. 

Поскольку работы по Договору выполнены Подрядчиком в полном объеме (в соответствии с Расчетом сметной стоимости), Договор прекратил свое действие надлежащим исполнением. 

Между ООО «ЖИЛСТРОЙ-МО» (Генеральным подрядчиком) и ООО «ТехСтрой» (Подрядчиком) был заключен Договор подряда № Ж-34-21 от 15 января 2021 г. (далее по тексту- «Договор») по выполнению комплекса работ по устройству отливов из оцинкованного профиля по цоколю Жилого дома № 5 при осуществлении Комплексной жилой застройки с объектами инфраструктуры, Жилые дома №№ 1,2,3,4,5, б по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, вблизи д. Путилково. В соответствии с пунктом 7.1.1. Договора, Подрядчик обязался выполнить все Работы в объемах, сроки, за цену и в соответствии с условиями, предусмотренными Договором, дополнительными соглашениями, в соответствии с утвержденной Генеральным подрядчиком Рабочей документацией, ГОСТ, СНиП, СП, разработанным Подрядчиком ППР и требованиями нормативных актов субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется строительство Объекта, Российской Федерации в области строительства и сдать результат выполненных Работ Генеральному подрядчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию Объекта капитального строительства. 

Согласно п. 4.1. Договора, стоимость Работ определена на основании Расчета сметной стоимости (Приложение № 2 к Договору) и составила 93 041 (Девяносто три тысячи сорок один) рубль 09 копеек, в том числе НДС. 

Подрядчиком выполнены работы по Договору на сумму 93 041 (Девяносто три тысячи сорок один) рубль 09 копеек, в т. ч. НДС, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ (по ф. КС-2), Справкой о стоимости работ (по ф. КС-3) № 1 от 24.06.2021. 

Руководствуясь п. 5.1 и Приложением № 6 к Договору, Генеральный подрядчик перечислил оплату за выполненные работы в размере 90 873 (Девяносто тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 96 копеек, в том числе НДС, о чем свидетельствует платежное поручение № 7566 от 14.07.2021. 

Согласно п. 9.4.1. Договора, Генеральный подрядчик произвел резервирование денежных средств в размере 5 (Пять) % от стоимости принятых по Акту о приемке выполненных работ строительно-монтажных работ (без учета стоимости номинированных и неноминированных материалов) для формирования гарантийного удержания. Согласно данным бухгалтерского учета, сумма Гарантийного удержания по Договору составила 2 167 (Две тысячи сто шестьдесят семь) рублей 13 копеек, в т. ч. НДС. 

Таким образом, согласно данным бухгалтерского учета: 

задолженность Генерального подрядчика по возврату зарезервированных денежных средств по Договору составляет 2 167 (Две тысячи сто шестьдесят семь) рублей 13 копеек, в т. ч. НДС. 

Задолженность Генерального подрядчика по оплате выполненных работ по Договору отсутствует. 

Поскольку работы по Договору выполнены Подрядчиком в полном объеме (в соответствии с Расчетом сметной стоимости), Договор прекратил свое действие надлежащим исполнением. 

Истец направил в адрес ответчика Уведомление о зачете-претензию (исх. № 01-12/ПР200 от 22.02.2023). 

В направленном Уведомлении был произведен зачет встречных однородных требований. Генеральный подрядчик имел задолженность в размере 1 411 869 (Один миллион четыреста одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей 74 копейки, а именно: 

по оплате выполненных работ по Договору подряда № Ж-681-21 от 15 июня 2021 г. в размере 808 741 (Восемьсот восемь тысяч семьсот сорок один) рубль 85 копеек, в том числе НДС: 

по возврату зарезервированных денежных средств по Договору подряда № Ж-681-21 от 15 июня 2021 г. в размере 94 059 (Девяносто четыре тысячи пятьдесят девять) рублей 77 копеек, в т. ч. НДС; 

по возврату зарезервированных денежных средств по Договору подряда № Ж-34-21 от 15 января 2021 г. в размере 2 167 (Две тысячи сто шестьдесят семь) рублей 13 копеек, в т. ч. НДС; 

по возврату зарезервированных денежных средств по Договору подряда № Ж-817-21 от 15 июля 2021 г. в размере 506 900 (Пятьсот шесть тысяч девятьсот) рублей 99 копеек, в т. ч. НДС. 

Подрядчик имел задолженность: 

по возврату неотработанного аванса по Договору подряда № Ж-817-21 от 15 июля 2021 г. в размере 18 936 080 (Восемнадцать миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч восемьдесят) рублей 27 копеек, в том числе НДС; 

по уплате штрафов за невывоз мусора по Договору подряда № Ж-817-21 от 15 июля 2021 г. в размере 294 000 (Двести девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек; 

по компенсации убытков - стоимости устранения недостатках в выполненных работах по Договору подряда № Ж-817-21 от 15 июля 2021 г. в размере 1 339 390 (Один миллион триста тридцать девять тысяч триста девяносто) рублей 86 копеек, в т. ч. НДС Генеральный подрядчик считает срок исполнения обязательств по выплате суммы зарезервированных денежных средств, указанной в п. 1.1. настоящего Уведомления, наступившим. 

На основании ст. ст. 410,421 ГК РФ, Генеральный подрядчик уведомил Подрядчика о зачете взаимных требований на сумму 1 411 869 (Один миллион четыреста одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей 74 копейки. 

В результате произведенного зачета: 

полностью погашена задолженность Генерального подрядчика перед Подрядчиком по оплате выполненных работ по Договору подряда № Ж-681-21 от 15 июня 2021 г. в размере 808 741 (Восемьсот восемь тысяч семьсот сорок один) рубль 85 копеек, в том числе НДС: 

полностью погашена задолженность Генерального подрядчика перед Подрядчиком по возврату зарезервированных денежных средств по Договору подряда № Ж-681-21 от 15 июня 2021 г. в размере 94 059 (Девяносто четыре тысячи пятьдесят девять) рублей 77 копеек, в т. ч. НДС; 

полностью погашена задолженность Генерального подрядчика перед Подрядчиком по возврату зарезервированных денежных средств по Договору подряда № Ж-34-21 от 15 января 2021 г. в размере 2 167 (Две тысячи сто шестьдесят семь) рублей 13 копеек, в т. ч. НДС; 

полностью погашена задолженность Генерального подрядчика перед Подрядчиком по возврату зарезервированных денежных средств по Договору подряда № Ж-817-21 от15 июля 2021 г. в размере 506 900 (Пятьсот шесть тысяч девятьсот) рублей 99 копеек, в т. ч. НДС; 

полностью погашена задолженность Подрядчика перед Генеральным Подрядчиком по уплате штрафов за невывоз мусора по Договору подряда № Ж-817-21 от 15 июля 2021 г. в размере 294 000 (Двести девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек; 

частично погашена задолженность Подрядчика перед Генеральным подрядчиком по компенсации убытков - стоимости устранения недостатков в выполненных работах на сумму 1 117 869 (Один миллион сто семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей 74 копейки, в т. ч. НДС. 

С момента поступления настоящего Уведомления в почтовое отделение Подрядчика зачет взаимных встречных требований считается состоявшимся. 

С момента поступления настоящего Уведомления в почтовое отделение Подрядчика: 

Указанная в п. 1.4 сумма, подлежит зачету; 

Задолженность Генерального Подрядчика перед Подрядчиком по Договору подряда № Ж-681-21 от 15 июня 2021 г. отсутствует. 

Задолженность Генерального Подрядчика перед Подрядчиком по Договору подряда № Ж-34-21 от 15 января 2021 г., отсутствует. 

Задолженность Генерального Подрядчика перед Подрядчиком по Договору подряда № Ж-817-21 от 15 июля 2021 г. отсутствует. 

После произведенного зачета задолженность Подрядчика перед Генеральным подрядчиком по Договору подряда № Ж-817-21 от 15 июля 2021 г. составляет 19 157 601 (Девятнадцать миллионов сто пятьдесят семь шестьсот один) рубль 39 копеек, в т. ч. НДС, а именно: 

по возврату неотработанного аванса по Договору в размере 18 936 080 (Восемнадцать миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч восемьдесят) рублей 27 копеек, в том числе НДС; 

по компенсации убытков - стоимости устранения недостатках в выполненных работах в размере 221 521 (Двести двадцать одна тысяча пятьсот двадцать один) рубль 12 копеек, в т. ч. НДС. 

Поскольку ответчик в добровольном порядке требование истца не исполнил, истец обратился с настоящим иском в суд.

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции правомерно руководствовался следующим.

Ответчик нарушил свои обязательства по Договору, что выразилось в ненадлежащем выполнении работ по Договору, что является противоправными действиями со стороны ответчика. Истец же надлежащим образом исполнял свои обязанности по Договору (произвел оплату, допустил ответчика на строительную площадку). 

Вина ответчика как субъекта предпринимательской деятельности презюмируется (п. 3 ст. 401 ГК РФ). 

Причинно-следственная связь между действиями ответчика и убытками истца выражается в том, что из-за ненадлежащего выполнения ответчиком работ по Договору истец вынужден был понести расходы на исправление допущенных ответчиком недостатков. 

Величина убытков подтверждается истцом предоставленными в материалы дела договорами на исправление недостатков, актами к этим договорам и платежными поручениями на общую сумму 221 521 рублей 12 копеек. Таким образом, Истцом доказаны все элементы убытков.

С учетом изложенного, суд первой инстанции правомерно удовлетворил исковые требования в заявленном размере.

Арбитражный апелляционный суд отмечает, что заявителем подана краткая апелляционная жалоба, которая не содержит каких-либо доводов, опровергающих правильность выводов суда первой инстанции.

Учитывая изложенное выше, апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, основанием для отмены принятого судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 01.03.2024 по делу № А41-47646/23 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. 

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа через Арбитражный суд Московской области в двухмесячный срок со дня его принятия.

 

Председательствующий cудья

 

П.А. Иевлев

 

Судьи

 

М.А. Немчинова

 

Е.А. Стрелкова