74/2022-118527(2) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 

http://www.chuvashia.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  резолютивная часть

Дело № А79-8405/2021

г. Чебоксары

22 сентября 2022 года

Арбитражный суд в составе: судьи Кисаповой Н.В.,  при ведении протокола судебного заседания  

секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрев в заседании суда дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью "Ремэкс-Плюс",  ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Россия 429950, г.Новочебоксарск,  Чувашская Республика, ул.Семенова д.15  

к некоммерческой организации "Республиканский фонд капитального ремонта  многоквартирных домов", ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Россия  428003, г. Чебоксары, Чувашская Республика, ул. Энгельса д.42а  

об устранении недостатков, 

участием в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных  требований относительно предмета спора Министерства строительства,  архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, ООО  «ИмиджСтройЭтика», общества с ограниченной ответственностью «Стройтест»  

при участии: от истца: ФИО2 по доверенности от 22.03.2021 

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 16.06.2021  

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Обязать некоммерческую организацию "Республиканский фонд  капитального ремонта многоквартирных домов" устранись недостатки,  допущенные при проведении капитального ремонта кровли многоквартирного  дома № 16 по ул. Молодежная г. Новочебоксарск, а именно в срок нe позднее  шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу провести  следующие работы:  

- выполнить узлы примыкания дымовых и вентиляционных труб в месте  прохождения дымовых и вентиляционных труб в количестве 12 штук согласно  

проекта шифр 104/16-СЭ-АС «Капитальный ремонт жилого дома по адресу 

<

...>.  

- выполнить узлы примыкания в месте прохождения канализационных  стояков в количестве 18 штук согласно проекта шифр 104/16-СЭ-АС «Капитальный  ремонт жилого дома по адресу 

<

...>  

-устранить сквозные отверстия в местах крепления растяжек над шестым  подъездом в количестве 2 штук.  

Взыскать с некоммерческой организации "Республиканский фонд  капитального ремонта многоквартирных домов" в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Ремэкс-Плюс» 65 902 (Шестьдесят пять тысяч девятьсот два)  руб.93 коп. расходов по внесудебной экспертизе, 6 000 (Шесть тысяч) руб.00 коп.  расходов по госпошлине.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний  Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого  арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух  месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления  арбитражного суда.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики –  Чувашии.  

Судья Н.В. Кисапова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 14.10.2021 5:07:54

 Кому выдана Кисапова Наталия Васильевна