100176_2057529 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А74-3831/2020

20 октября 2020 года

г. Абакан

 

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Н.Ю.Ишь при ведении  протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Е.Н.Арнгольд рассмотрел в  открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Министерства сельского  хозяйства и продовольствия Республики Хакасия (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к акционерному обществу «Центр-труд» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

об устранении недостатков по государственному контракту № Ф.2016.265687 от 23.09.2016,  взыскании 149 063 руб. 70 коп. штрафа, об обязании в случае неисполнения решения  возместить расходы истца по устранению выявленных дефектов.  

Руководствуясь статьями 102, 110, 166 – 171, 174, 176, 319 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

1. Удовлетворить иск: 

обязать акционерное общество «Центр-труд» в целях устранения выявленных недостатков в  рамках государственного контракта № Ф.2016.265687 от 23.09.2016 в срок - тридцать  календарных дней со дня вступления настоящего решения в законную силу безвозмездно  выполнить следующие работы:  

- устранить коррозию на столбах и прожилинах заборного ограждения;  

- устранить просадку грунта, в результате которой провалилась тротуарная плитка,  повело столбы заборного ограждения, заклинило калитку;  

- устранить протекание ветеринарного участка над входной дверью, в местах  примыкания потолочных плит к стенам в тамбуре;  

- устранить перегоревшие светильники Армстронг в количестве шести штук; - поменять замок на входной двери; - отремонтировать оторвавшиеся от стен оконные наличники; 

- отремонтировать разрушенный поверхностный слой отмостки здания.  

Предоставить в случае неисполнения ответчиком решения суда в указанный срок,  согласно части 3 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  право Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия  осуществить мероприятия по устранению выявленных недостатков c дальнейшим  возложением на акционерное общество «Центр-Труд» соответствующих расходов.  

2. Взыскать с акционерного общества «Центр-труд» в пользу Министерства сельского  хозяйства и продовольствия Республики Хакасия 149 063 (сто сорок девять тысяч шестьдесят  три) руб. 70 коп. штрафа.  

3. Взыскать с акционерного общества «Центр-труд» в пользу в доход федерального  бюджета 11 472 (одиннадцать тысяч четыреста семьдесят два) руб. государственной  пошлины.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный  

апелляционный суд в месячный срок с момента его принятия. Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия. 

Судья Н.Ю.Ишь