АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-2186/2020

г. Чебоксары

03 августа 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 28 июля 2020 года.

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Владимировой О.Е.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бондаревой Д.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 308213033300023, ИНН 

<

***>) 428031, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

к обществу с ограниченной ответственностью "Честрой" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 428003, 

<

...>, каб. 13,

о взыскании 834413 руб. 60 коп.,

при участии:

от истца: ФИО2 по доверенности от 13.02.2020 (сроком на три года),

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО1 обратился в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Честрой" о взыскании 834413 руб. 60 коп. долга за работы по утеплению и отделке фасада на объекте: "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест поз. 6 в микрорайоне, ограниченном улицами Эгерский бульвар, Л.Комсомола, Машиностроительный проезд, речка Малая Кувшинка, в городе Чебоксары" в рамках договора подряда от 25.04.2019 №11/19.

Представитель истца в заседании суда исковые требования поддержал.

Ответчик, извещенный надлежащим образом, в заседание суда не явился, письменный отзыв на иск представил. 

На основании статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие ответчика.

Выслушав объяснения представителя истца, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

25.04.2019 общество с ограниченной ответственностью "Честрой" (заказчик) и индивидуальный предприниматель ФИО1 (подрядчик) заключили договор подряда на выполнение работ №11/19, по условиям которого подрядчик по поручению заказчика принимает на себя обязательства по выполнению собственными силами и средствами работы - утепление и отделка фасада на объекте: "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест поз. 6 в микрорайоне, ограниченном улицами Эгерский бульвар, Л.Комсомола, Машиностроительный проезд, речка Малая Кувшинка, в городе Чебоксары" (далее - работы) в соответствии с условиями настоящего договора, заданием заказчика, технической документацией, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором стоимость.

В соответствии с пунктом 2.1 договора срок выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, и их сдача заказчику - 45 (Сорок пять) рабочих дней со дня поставки материалов.

Согласно пункту 5.1 договора в редакции дополнительного соглашения №1 от 15.11.2019 к договору от 25.04.2019 №11/19 ориентировочная стоимость работ составляет 2334413 руб. 60 коп., НДС не облагается.

Пунктом 5.2 договора предусмотрено, что оплата в размере 90% от стоимости работ, предусмотренной пунктом 5.1 договора, производится на основании акта сверки, подписанного сторонами не позднее 14 календарных днем после полного завершения работ, в том числе после устранения выявленных дефектов, на основании актов приемки выполненных работ, подписанных сторонами (КС-2); справок о стоимости выполненных работ, подписанных сторонами (КС-3), исполнительной документации на выполненный объем работ и др. Окончательная оплата в размере 10% от стоимости работ, предусмотренной пунктом 5.1 договора, оплачивается заказчиком не позднее 14 календарных дней с даты ввода объекта в эксплуатацию в установленном действующим законодательством порядке.

В п.п. 3.1.4 договора закреплена обязанность заказчика в установленные договором порядке и сроки оплатить выполненные работы подрядчиком.

Как следует из материалов дела, истец выполнил предусмотренные договором работы, что подтверждается актами о приемке выполненных работ от 25.06.2019 №1 на сумму 968000 руб., от 26.07.2019 №2 на сумму 806195 руб. 94 коп., от 15.11.2019 №3 на сумму 268399 руб., от 15.11.2019 №4 на сумму 291818 руб. 60 коп.

Ответчик свои обязательства по оплате выполненных работ не исполнил. Задолженность заказчика на момент подачи иска, по данным истца, составляла 834413 руб. 60 коп. Ответчику была направлена претензия от 12.12.2019 с требованием об оплате долга, ответ на которую не последовал.

Неоплата задолженности послужила основанием для обращения истца в суд с настоящим исковым заявлением.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств допускается в исключительных случаях, прямо указанных в законе.

В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Правоотношения, возникающие в связи с заключением договора подряда, регулируются главой 37 ГК РФ.

Из положений статьи 711 ГК РФ следует, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В силу статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Представленные истцом акты о приемке выполненных работ подписаны со стороны ответчика без замечаний по качеству, объемам и срокам выполнения работ. Фактическое выполнение работ, сумма долга ответчиком не оспорены.

В нарушение требований статьи 65 АПК РФ доказательства оплаты работ ответчиком суду не представлены.

На основании изложенного суд находит требование истца о взыскании долга в размере 834413 руб. 60 коп. правомерным и подлежащим удовлетворению.

Понесенные истцом расходы по уплате государственной пошлины суд в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации взыскивает с ответчика в пользу истца. 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Честрой" в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 834`413 (Восемьсот тридцать четыре тысячи четыреста тринадцать) руб. 60 коп. долга, 19`688 (Девятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят восемь) руб. расходов по государственной пошлине.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья

О.Е. Владимирова