401/2018-238615(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е

 

26 сентября 2018 года Дело № А33-17356/2018  

Красноярск 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 20 сентября 2018 года.  В полном объёме решение изготовлено 26 сентября 2018 года.  

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Мальцевой А.Н., рассмотрев в  

судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью  

«Производственно-коммерческое предприятие «ЯрЭнергоСервис» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, г. Красноярск) 

к обществу с ограниченной ответственностью «КрасКонстракшн» (ИНН 

<

***>,  

ОГРН 

<

***>, г.Красноярск) о взыскании задолженности, неустойки, в присутствии: от истца: ФИО1 – представителя по доверенности от 09.01.2018 № 1, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  

ФИО2, 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческое  предприятие «ЯрЭнергоСервис» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд  Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью  «КрасКонстракшн» (далее – ответчик) о взыскании 2 319 770 руб. 34 коп. задолженности по  договору субподряда от 14.07.2016 № 2/2016/20-Суб, 101 392 руб. 51 коп. неустойки.    

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 03.07.2018  возбуждено производство по делу.  

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, в  судебное заседание не явился. Согласно статье 156 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации судебное заседание проводится в его отсутствие.  

Представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.  

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для  рассмотрения спора, обстоятельства.  

Между истцом (субподрядчик) и ответчиком (генподрядчик) заключен договор  субподряда от 14.07.2016 № 2/2016/20-Суб (далее – договор), по условиям которого  субподрядчик обязуется по заданию генподрядчика собственными силами в установленные в  договоре сроки в соответствии с предоставленными генподрядчиком проектной  документацией, рабочими чертежами, утвержденными «к производству работ», а также  локальными сметами, составленными в ФСНБ - 2001 г. (в редакции 2014 г. с изменениями) и  переведенными в договорную цену, представленными субподрядчиком и утвержденными  генподрядчиком, или калькуляцией выполнить работы на объекте: «Гипермаркет  строительных и отделочных материалов, расположенный по адресу: г. Красноярск, ул.  

Калинина, 82» (далее - объект), и сдать их результат генподрядчику, а генподрядчик  обязуется принять и оплатить выполненные работы (пункт 1.1).  

Пунктом 1.2 договора предусмотрено, что наименование, виды и объем подлежащих  выполнению субподрядчиком работ, а также их стоимость, сроки выполнения, перечень  предоставляемых сторонами материалов определяется сторонами в дополнительных  соглашениях к договору. Каждое дополнительное соглашение является отдельным  соглашением, заключенным в рамках договора, не изменяет, не отменяет, не  приостанавливает действие предыдущих ни полностью, ни в части, если только в нем самом  или в более позднем дополнительном соглашении прямо не предусмотрено иное. В случае  если дополнительное соглашение к договору содержит условия иные, чем указаны в  договоре, стороны руководствуются в этой части условиями дополнительного соглашения.  

Согласно пункту 1.3 договора, фактически выполненный объем работ определяется в  актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справках о стоимости работ и затрат  (форма КС-3). Одновременно с формами КС-2, КС-3 субподрядчик предоставляет  подрядчику формы КС-2, КС-3 и счет-фактуры на материалы, переданные в порядке,  предусмотренном пунктом 4.7 договора.  

В силу пункта 2.1 договора, общая стоимость работ по договору определяется сторонами  в дополнительных соглашениях к договору.  

В случае, если фактически выполненный объем работ отличается от объема работ,  определенного в пункте 1.2 договора, то оплата работ производится пропорционально  фактически выполненному объему работ, подтвержденному подписанными сторонами  формами КС-2, КС-3 (пункт 2.2 договора).  

Стоимость ежемесячно выполняемых субподрядчиком работ в процессе строительства  определяется актами выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости  выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанными полномочными  представителями сторон (пункт 2.3 договора).  

Согласно пункту 3.1 договора, субподрядчик обязуется выполнить работы в сроки,  согласованные сторонами в дополнительных соглашениях к договору.  

Пунктом 4.1 договора установлено, что оплата работ, выполненных по договору,  производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика по  реквизитам, указанным в настоящем договоре.  

Платежи за выполненные работы производятся в размере 90% от стоимости  выполненных работ по договору в целях сохранения 10% суммы гарантийного удержания с  учетом пунктов 4.3 и 4.4 договора, в течение 30 календарных дней после подписания  сторонами форм КС-2, КС-3, предоставления субподрядчиком счета на оплату и счета- фактуры (пункт 4.2 договора).  

Пунктом 4.3 договора установлено, что уплата части суммы гарантийного удержания в  размере 7% от общей стоимости работ, осуществляется с зачетом всех ранее произведенных  платежей в течение 30 календарных дней после получения подрядчиком от уполномоченного  государственного или муниципального органа разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  Платеж производится при наличии в совокупности следующих условий:  

- отсутствие замечаний к выполненным работам со стороны подрядчика на момент  оплаты. Факт отсутствия замечаний фиксируется в акте по форме приложения,  предоставленном субподрядчиком и подписанным уполномоченными лицами подрядчика;  

- устранение субподрядчиком всех замечаний, выявленных в процессе приемки работ и  указанных в документах, направленных подрядчиком в адрес субподрядчика, а также в акте  приемки объекта в эксплуатацию, учитывая, что подрядчик, при наличии недостатков в  выполненных работах, не препятствующих эксплуатации объекта, вправе принять работы и  назначить субподрядчику срок для устранения выявленных недостатков. Устранение  субподрядчиком подтверждается подписанием сторонами акта об устранении замечаний и  недоделок (приложение № 4);  

- передача субподрядчиком подрядчику исполнительной документации в твёрдой копии  (4 экземпляра) и 1 (одного) комплекта в электронной форме.  

В силу пункта 4.4 договора, окончательный расчет - уплата части суммы гарантийного  удержания в размере 3% от общей стоимости работ - производится в течение 30 календарных  дней с момента выплаты генподрядчиком первой части гарантийного удержания (пункт 4.3  договора) при отсутствии к этому сроку не устраненных недостатков в выполненных  работах, а в случае наличия на этот момент не устраненных недостатков платеж  производится после их устранения.  

Субподрядчик обязался для реализации договора выполнить работы в сроки,  предусмотренные настоящим договором (пункт 5.1.1 договора), выполнить работы в  соответствии с условиями договора, требованиями действующего законодательства  Российской Федерации, Строительных норм и правил (СНиП), нормативных актов,  проектной и сметной документации (пункт 5.1.2 договора).  

Генподрядчик обязался принимать от субподрядчика выполненные работы и оплачивав  их в соответствии с разделом 4 договора (пункт 6.1.4 договора).  

Согласно пункту 8.7 договора, работы, выполняемые по договору, считаются принятыми  генподрядчиком после подписания им акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.  

 За нарушение сроков оплаты выполненных работ или услуг генподрядчик по  требованию субподрядчика уплачивает субподрядчику неустойку в размере 1/300 ставки  рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неоплаченных в срок работ и услуг, определенной в  соответствующем дополнительном соглашении, за каждый день просрочки, но не более 10%  от стоимости работ по соответствующему дополнительному соглашению (пункт 11.8  договора в редакции протокола согласования разногласий к протоколу разногласий от  14.07.2016).  

Пунктом 14.2 договора предусмотрено, что споры, возникающие в процессе исполнения  договора, решаются путем переговоров, в досудебном порядке. Претензионный порядок  является обязательным. Срок рассмотрения и ответа на претензию стороны установили в 10  рабочих дней с момента ее получения.  

В дополнительном соглашении от 14.07.2016 № 1 к договору стороны предусмотрели,  что субподрядчик обязуется собственными силами по заданию генподрядчика на условиях,  предусмотренных договором и настоящим соглашением выполнить, в соответствии с  проектом шифр 711.009.016ТС, выданным «в производство работ» работы по устройству  внутриплощадочных тепловых сетей на объекте «Гипермаркет отделочных и строительных  материалов «Леруа Мерлен», 

<

...> (далее – объект), и сдать их  результат генподрядчику, а генподрядчик обязуется принять результат выполненных работ и  оплатить его. В состав работ входит (в соответствии с локальным сметным расчетом,  который является неотъемлемым приложением к дополнительному соглашению): разработка  грунта с уплотнением основания под установку лотков, укладку трубопроводов, монтаж  трубопроводов теплотрассы с изоляцией их в соответствии с проектом, гидравлическое  испытание трубопроводов под давлением, лабораторные исследования воды положительного  заключения лаборатории, подключение теплотрассы к источнику теплоснабжения и  тепловому узлу в здании, выполнение пусконаладочных работ со сдачей всей  исполнительной документации и сдачей готовой теплотрассы органам надзора,  полномочным давать разрешение на подачу тепла, прочие работы, прямо не указанные в  дополнительном соглашении, но необходимые для выполнения работ по дополнительному  соглашению. Фактически выполненный объем работ определяется в актах о приемке  выполненных работ (форма КС-2) и справках о стоимости работ и затрат (форма КС-3) с  предъявлением счетов-фактур. Общая стоимость работ, включая стоимость материалов  поставляемых субподрядчиком по дополнительному соглашению, является твердой и  составляет 3 041 159 руб., и определяется локальным сметным расчетом № 1/1. Общая  стоимость работ включает в себя весь комплекс необходимых материалов, работ и услуг, а  также техники и механизмов, необходимых для выполнения работ, в том числе определенно  

не указанных в дополнительном соглашении и приложениях к нему, но необходимых для  выполнения условий дополнительного соглашения, если иное прямо не предусмотрено  дополнительным соглашением. Сроки выполнения работ по дополнительному соглашении:  начало выполнения работ - 10.11.2016, окончание выполнения работ - 12.12.2016.  

Сторонами согласован локальный сметный расчет № 1/1 к дополнительному соглашению  от 14.07.2016 № 1 к договору.  

В дополнительном соглашении от 30.09.2016 № 2 к договору (в редакции протокола  разногласий и протокола согласования разногласий к протоколу разногласий) стороны  установили, что субподрядчик обязуется собственными силами по заданию генподрядчика  на условиях, предусмотренных договором, настоящим дополнительным соглашением  выполнить, в соответствии с проектом шифр 18-15-ТМ (ИТП), 18-15-УУ-ТМ (УУТП) работы  по устройству монтажу и автоматизации индивидуального теплового пункта (ИТП) и узла  учета тепловой энергии (УУТП) на объекте: «Гипермаркет отделочных и строительных  материалов "Леруа Мерлен", 

<

...> (далее - объект), и сдать их  результат генподрядчику, а генподрядчик обязуется принять результат выполненных работ и  оплатить его. Состав работ определяется в соответствии с локальными сметными расчетами   № 2, 3, 4, которые являются неотъемлемыми приложениями к дополнительному соглашению,  включая: испытания всех видов трубопроводов и оборудования в установленном порядке,  подготовку и сдачу всех видов исполнительной документации, подтверждающих  соответствие выполненных работ проекту, организацию проведения экспертизы  промышленной безопасности с регистрацией в Ростехнадзоре (стоимость прохождения  экспертизы оплачивает генподрядчик), организация сдачи объекта в Ростехнадзор в части  теплоснабжения, прочие работы, прямо не указанные в настоящем дополнительном  соглашении, но необходимые для выполнения работ по настоящему дополнительному  соглашению. Фактически выполненный объем работ определяется в актах о приемке  выполненных работ (форма КС-2) и справках о стоимости работ и затрат (форма КС-3) с  предъявлением счетов-фактур. Общая стоимость работ, включая стоимость материалов  поставляемых субподрядчиком, по настоящему дополнительному соглашению составляет  7 040 479 руб. 44 коп. и определяется локальными сметными расчетами № 2,3,4. Сроки  выполнения работ: начало выполнения работ - 01.10.2016, окончание выполнения работ03.03.2017, пусконаладочные работы – с 13.03.2017 по 20.03.2017.  

Сторонами согласованы локальные сметные расчеты № 2, 3, 4 к дополнительному  соглашению от 30.09.2016 № 2 к договору.  

В дополнительном соглашении от 01.11.2016 № 2/1 к договору стороны установили, что  субподрядчик обязуется собственными силами по заданию генподрядчика на условиях,  предусмотренных договором, настоящим дополнительным соглашением выполнить  дополнительные работы по устройству и автоматизации индивидуального теплового пункта  (ИТП)и узла учета тепловой энергии (УУТП) на объекте: «Гипермаркет отделочных и  строительных материалов "Леруа Мерлен", 

<

...> (далее - объект),  и сдать их результат генподрядчику, а генподрядчик обязуется принять результат  выполненных работ и оплатить его. Состав работ определяется в соответствии с локальными  сметными расчетами № 1, 2, 3, которые являются неотъемлемыми приложениями к  дополнительному соглашению, включая: выполнение контроля сварочных соединений  согласно проекта, устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов, пуско- наладочные работы, организацию проведения экспертизы промышленной безопасности с  регистрацией в Ростехнадзоре, организация сдачи объекта в Ростехнадзор прочие работы,  прямо не указанные в настоящем дополнительном соглашении, но необходимые для  выполнения работ по настоящему дополнительному соглашению. Фактически выполненный  объем работ определяется в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справках о  стоимости работ и затрат (форма КС-3) с предъявлением счетов-фактур. Общая стоимость  работ, включая стоимость материалов поставляемых субподрядчиком, по настоящему  дополнительному соглашению составляет 480 947 руб. и определяется локальными  

сметными расчетами № 1, 2, 3. Сроки выполнения работ: начало выполнения работ01.11.2016, окончание выполнения работ - 30.05.2017.  

Сторонами согласованы локальные сметные расчеты № 1, 2, 3 к дополнительному  соглашению от 01.11.2016 № 2/1 к договору.  

В дополнительном соглашении от 25.01.2017 № 3 к договору (в редакции протокола  разногласий) стороны установили, что субподрядчик обязуется собственными силами по  заданию генподрядчика на условиях, предусмотренных договором, настоящим  дополнительным соглашением выполнить, в соответствии с проектом шифр 18-15-КМЗ, 18- 15-КЖ5 работы по изготовлению и монтажу металлоконструкций внутренних перегородок в  осях 1-12/Ж-К и 1-12/А-Б, металлоконструкций ГРЩ на объекте: «Гипермаркет отделочных  и строительных материалов "Леруа Мерлен", 

<

...> (далее -  объект), и сдать их результат генподрядчику, а генподрядчик обязуется принять результат  выполненных работ и оплатить его. В состав работ входит: изготовление  металлоконструкций согласно проекта, антикоррозийная обработка готовых изделий  грунтовкой ГФ-021 в 1 слой, толщина 40 мкм., доставка в зону монтажа, монтаж в  соответствии с проектом, подготовка всей необходимой исполнительной документации,  сдача совместно с генподрядчиком выполненных работ заказчику строительства, прочие  работы, прямо не указанные в настоящем дополнительном соглашении, но необходимые для  выполнения работ по настоящему дополнительному соглашению. Ориентировочный объем  работ указан в приложении № 1 к дополнительному соглашению. Фактически выполненный  объем работ определяется в актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справках о  стоимости работ и затрат (форма КС-3) с предъявлением счетов-фактур. Общая стоимость  работ, включая стоимость материалов поставляемых субподрядчиком, по настоящему  дополнительному соглашению составляет 587 400 руб. в соответствии с приложением № 1 к  договору. Сроки выполнения работ: начало выполнения работ - 25.01.2017, окончание  выполнения работ - 20.04.2017.  

В дополнительном соглашении от 15.02.2017 № 4 к договору (в редакции протокола  разногласий и протокола согласования разногласий к протоколу разногласий) стороны  установили, что субподрядчик обязуется собственными силами по заданию генподрядчика  на условиях, предусмотренных договором, настоящим дополнительным соглашением  выполнить, в соответствии с проектом шифр 18-15-КМЗ, работы по изготовлению и монтажу  металлоконструкций крепления трубопроводов ИТП, металлоконструкций перегородки в  осях 1-4/А-Б на объекте: «Гипермаркет отделочных и строительных материалов "Леруа  Мерлен", 

<

...> (далее - объект), и сдать их результат  генподрядчику, а генподрядчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить  его. Ориентировочный объем работ указан в приложении № 1 к дополнительному  соглашению. Фактически выполненный объем работ определяется в актах о приемке  выполненных работ (форма КС-2) и справках о стоимости работ и затрат (форма КС-3) с  предъявлением счетов-фактур. Общая стоимость работ, включая стоимость материалов  поставляемых субподрядчиком, по настоящему дополнительному соглашению составляет  78 000 руб. в соответствии с приложением № 1 к договору. Сроки выполнения работ: начало  выполнения работ - 15.01.2017, окончание выполнения работ - 15.03.2017.  

В дополнительном соглашении от 15.02.2017 № 5 к договору (в редакции протокола  разногласий) стороны установили, что субподрядчик обязуется собственными силами по  заданию генподрядчика на условиях, предусмотренных договором, настоящим  дополнительным соглашением выполнить, в соответствии с проектом шифр 18-15-КЖ5,  работы по монтажу полиэтиленовых труб кассовой зоны под прокладку электрокабелей на  объекте: «Гипермаркет отделочных и строительных материалов "Леруа Мерлен", 

<

...> (далее - объект), и сдать их результат генподрядчику, а  генподрядчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его.  Ориентировочный объем работ указан в приложении № 1 к дополнительному соглашению.  Фактически выполненный объем работ определяется в актах о приемке выполненных работ  

(форма КС-2) и справках о стоимости работ и затрат (форма КС-3) с предъявлением счетов- фактур. Общая стоимость работ, включая стоимость материалов поставляемых  субподрядчиком, по настоящему дополнительному соглашению составляет 80 999 руб. в  соответствии с локальным сметным расчетом, который является приложением к  дополнительному соглашению. Сроки выполнения работ: начало выполнения работ15.02.2017, окончание выполнения работ - 30.03.2017.  

В дополнительном соглашении от 01.06.2017 № 6 к договору стороны установили, что  субподрядчик обязуется собственными силами по заданию генподрядчика на условиях,  предусмотренных договором, настоящим дополнительным соглашением выполнить работы  по монтажу металлоконструкций крепления тепловых завес и монтажу тепловых завес на  объекте: «Гипермаркет отделочных и строительных материалов "Леруа Мерлен", 

<

...> (далее - объект), и сдать их результат генподрядчику, а  генподрядчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его.  Ориентировочный объем работ указан в приложении № 1 к дополнительному соглашению.  Фактически выполненный объем работ определяется в актах о приемке выполненных работ  (форма КС-2) и справках о стоимости работ и затрат (форма КС-3) с предъявлением счетов- фактур. Общая стоимость работ, включая стоимость материалов поставляемых  субподрядчиком, по настоящему дополнительному соглашению составляет 44 300 руб. в  соответствии с приложением № 1 к дополнительному соглашению. Сроки выполнения работ:  начало выполнения работ - 01.06.2017, окончание выполнения работ - 30.06.2017.  

В дополнительных соглашениях от 11.07.2017 № 7, от 15.07.2017 № 7/1 к договору  стороны установили, что субподрядчик обязуется собственными силами по заданию  генподрядчика на условиях, предусмотренных договором, настоящим дополнительным  соглашением выполнить работы по монтажу счетчиков систем наружной хозбытовой и  ливневой канализации, в том числе работы, прямо не указанные в настоящем  дополнительном соглашении, но необходимые для выполнения работ по настоящему  дополнительному соглашению на объекте: «Гипермаркет отделочных и строительных  материалов "Леруа Мерлен", 

<

...> (далее - объект), и сдать их  результат генподрядчику, а генподрядчик обязуется принять результат выполненных работ и  оплатить его. Фактически выполненный объем работ определяется в актах о приемке  выполненных работ (форма КС-2) и справках о стоимости работ и затрат (форма КС-3) с  предъявлением счетов-фактур. Общая стоимость работ, включая стоимость материалов  поставляемых субподрядчиком, по настоящему дополнительному соглашению составляет  45 397 руб. 92 коп. Сроки выполнения работ: начало выполнения работ - 11.07.2017,  окончание выполнения работ - 15.07.2017.  

В дополнительном соглашении от 30.08.2017 № 8 к договору стороны установили, что  субподрядчик обязуется собственными силами по заданию генподрядчика на условиях,  предусмотренных договором, настоящим дополнительным соглашением выполнить работы  по монтажу редуктора понижения давления в ИТП на объекте: «Гипермаркет отделочных и  строительных материалов "Леруа Мерлен", 

<

...> (далее - объект),  и сдать их результат генподрядчику, а генподрядчик обязуется принять результат  выполненных работ и оплатить его. Фактически выполненный объем работ определяется в  актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справках о стоимости работ и затрат  (форма КС-3) с предъявлением счетов-фактур. Общая стоимость работ, включая стоимость  материалов поставляемых субподрядчиком, по настоящему дополнительному соглашению  составляет 10 200 руб. Сроки выполнения работ: начало выполнения работ - 01.09.2017,  окончание выполнения работ - 15.09.2017.  

Сторонами подписаны акты о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости  выполненных работ и затрат (КС-3) от 12.12.2016 № 131 на сумму 2 731 698 руб. 82 коп., от  31.03.2017 № 14 на сумму 3 707 221 руб. 34 коп., от 31.03.2017 № 13 на сумму 98 627 руб. 94  коп., от 31.07.2017 № 57 на сумму 45 397 руб. 92 коп., от 19.07.2017 № 44 на сумму 77 849  руб. 45 коп., от 19.07.2017 № 41 на сумму 3 100 304 руб. 86 коп. (акты №№ 41/1, 41/2, 41/3,  

41/4, 41/5, 41/6), от 19.07.2017 № 43 на сумму 41 310 руб. 01 коп., от 19.07.2017 № 42 на сумму  562 860 руб., от 19.07.2017 № 45 на сумму 44 300 руб., от 15.09.2017 № 64 на сумму 10 200  руб., а также комиссионный акт выполненных работ от 18.12.2017.  

20.07.2017 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 24-308-34-2016.  

Ответчиком частичная оплата произведена платёжными поручениями: от 14.10.2016   № 949 в сумме 2 000 000 руб., от 01.11.2016 № 1038 в сумме 3 000 000 руб., от 23.12.2016   № 1262 в сумме 2 800 000 руб., от 19.03.2018 № 117 в сумме 300 000 руб.  

В претензии от 30.05.2018 № 258-18, направленной в адрес ответчика 06.06.2018,  согласно квитанции ФГУП «Почта России», истец просил ответчика оплатить 2 319 770 руб.  34 коп. долга за выполненные работы.  

При изложенных обстоятельствах истец обратился в суд с настоящим иском. 

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в  деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.  

Статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что гражданские  права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными  правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц. В том числе,  гражданские права и обязанности могут возникать из договоров и иных сделок,  предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных  законом, но не противоречащих ему.  

Согласно статьям 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу  обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора)  определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и  т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от  должника исполнения его обязанности. Обязательства должны выполняться надлежащим  образом в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона, иных правовых  актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового  оборота или иными предъявляемыми требованиями.  

Статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает  недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств.  

Из материалов дела следует, что требования истца основаны на договоре субподряда от  14.07.2016 № 2/2016/20-Суб и дополнительных соглашениях к нему, который по своей  правовой природе является договором строительного подряда, отношения сторон  регулируются его положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по  договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой  стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик  обязуется принять результат работы и оплатить его.  

Согласно частям 1, 2 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, по  договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок  построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные  работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения  работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного  подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе  жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных,  пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о  договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту  зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.  

Пунктом 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что  заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием  подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении  отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе  немедленно заявить об этом подрядчику.  

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом,  подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем  делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной (часть 4 статьи 753  Гражданского кодекса Российской Федерации).  

В части 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что оплата  выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном  сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного  подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ  производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.  

Согласно статье 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором  подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее  этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной  сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в  согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.  

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно  ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

Как следует из материалов дела, истцом приняты выполненные ответчиком работы по  договору стоимостью 10 419 770 руб. 34 коп., оплата ответчика составила 8 100 000 руб.  Таким образом, задолженность ответчика составила 2 319 770 рублей 34 копейки, в том  числе 1 041 977 руб. 03 гарантийное удержание.  

Учитывая изложенное, требование о взыскании 2 319 770 рублей 34 копейки долга за  выполненные работы заявлено обоснованно и подлежит удовлетворению.  

В соответствии с частью 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации,  исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием  имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими  способами, предусмотренными законом или договором.  

В соответствии с частью 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации,  неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная  сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или  ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По  требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.  

На основании пункта 11.8 договора в редакции протокола согласования разногласий к  протоколу разногласий от 14.07.2016, истец начислил и предъявил ко взысканию с ответчика  101 392 руб. 51 коп. пени на несвоевременную оплату по договору за период с 20.03.2018 по  30.06.2018 на сумму долга 1 267 793 руб. 31 коп. (без суммы гарантийного удержания).  

Расчет суммы неустойки судом проверен, признан верным. Расчет истцом произведен с  учетом фактических обстоятельств дела.  

В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору, требование  о взыскании неустойки, рассчитанной на основании пункта 11.8 договора в редакции  протокола согласования разногласий к протоколу разногласий от 14.07.2016, заявлено  истцом обосновано.  

Таким образом, требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме. 

Частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  установлено, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу  которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной  квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам,  участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети  «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).   

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут  быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства  заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.  

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КрасКонстракшн» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Производственно-коммерческое предприятие «ЯрЭнергоСервис» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) 2 421 162 рубля 85 копеек, из них:  

2 319 770 рублей 34 копейки основной долг, 101 392 рубля 51 копейка пени, а также 35 106  рублей расходов по оплате государственной пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд.  

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд  Красноярского края.  

Судья А.Н. Мальцева