Арбитражный суд Тамбовской области

392020 г. Тамбов, ул. Пензенская, 67/12

http://tambov.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А64-10251/2021

25 марта 2022года

г. Тамбов

Резолютивная часть решения объявлена 24.03.2022г.

В полном объеме решение изготовлено 25.03.2022г.

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи  Н.Ю. Макаровой 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску

Администрации Петровского сельсовета Петровского района Тамбовской области, с.Петровское Петровского района Тамбовской области (ИНН 

<

***>)

к ООО «Стандартстрой», г.Тамбов (ИНН 

<

***>)

о взыскании  76,25 руб., об обязании устранить недостатки 

при участии в судебном заседании

от истца: ФИО2, доверенность от 01.06.2021;

от ответчика:  не явился, извещен 

УСТАНОВИЛ:

Администрация Петровского сельсовета Петровского района Тамбовской области обратилась в Арбитражный суд Тамбовской области с исковым заявлением к ООО «Стандартстрой» о взыскании  76,25 руб., об обязании устранить недостатки. 

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания по настоящему делу, своего представителя в судебное заседание не направил. 

По правилам ст. 136 АПК РФ суд провел предварительное судебное заседание. Согласно ст.  137 АПК РФ суд завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в первой инстанции.

Истец в судебном заседании требования поддержал.

Рассмотрев материалы дела, суд установил.

01 октября 2020 г между администрацией Петровского сельсовета Петровского (рта Тамбовской области и ООО «Стандартстрой» был заключен муниципальный контракт №  0164200003020002527_220584   на  выполнение  работ  по  устройству тротуаров вдоль автомобильной дороги по ул.  ФИО3, ул. Пролетарская в с. Петровское.

Предмет контракта: Подрядчик обязуется в установленный контрактом срок выполнить работы по устройству тротуаров вдоль автомобильной дороги по ул. ФИО3, ул. Пролетарская в с. Петровское (далее - Работа) в соответствии со сметной документацией.

Пункт 3.1. Контракта установил срок завершения работ: работы должны быть выполнены с момента заключения контракта по 02 ноября 2020 г. (включительно).

Работы выполнены 20.11.2020 года.

20 ноября 2020 года Ответчиком было дано гарантийное письмо № 176 о том, что обязуется выполнить работы по планировке площадей обочин тротуара в количестве 1863 м2 до 15.05.2021 г.

Администрация Петровского сельсовета в адрес ответчика направила письмо № 14а от 11.06.2021  с просьбой: сообщить причины несоблюдения срока. Письмо ответчиком оставлено без ответа.

15 июля 2021 года в адрес Ответчика было направлено извещение № 276 о  невыполненных гарантийных обязательств, с просьбой  направить своего представителя для проведения обследования, фиксации недостатков, согласования порядка и сроков их устранения. Их представитель не явился.

12.08.2021 был составлен акт обследования, в котором зафиксировано, что не выполнены работы по планировке площадей обочин тротуара в количестве 1863 м.2.

Стоимость этих работ согласно смете - 1883,37 руб.

В адрес ответчика было направлено требование о том, что начиная с 16.05.2021 года им начисляется неустойка за просрочку исполнения гарантийных обязательств и потребовали исполнить обязательства, которые даны в гарантийном письме № 176 от 20.11.2020 г.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта (п. 8.1 Контракта).

В соответствии с ч. 6 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В соответствии с п. 8.3 Контракта, В случае просрочки исполнения поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (Подрядчику, Исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Размер пени  составляет 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Контракта, отдельного этапа исполнения контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств предусмотренных Контрактом, соответствующим отдельным этапом исполнения контракта и фактически исполненных Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем).

Неустойка (пеню) в  связи с просрочкой ответчиком исполнения обязательств, предусмотренных гарантийным письмом №179 от 20.11.2020, по состоянию на 24.11.2021 составила 76,25руб. 

Истец обратился в Арбитражный суд Тамбовской области с настоящим иском.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд считает заявленные требования подлежащими удовлетворению. При этом суд руководствовался следующим. 

Согласно ч. 1 ст. 4  АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим кодексом.

В силу  ст. 8  ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии со ст. ст. 307, 309  ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги, и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований и должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота и иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий согласно правилам статьи 310 ГК РФ не допускается.

Судом установлено, что 01 октября 2020 г между администрацией Петровского сельсовета Петровского (рта Тамбовской области и ООО «Стандартстрой» был заключен муниципальный контракт №  0164200003020002527_220584   на  выполнение  работ  по  устройству тротуаров вдоль автомобильной дороги по ул.  ФИО3, ул. Пролетарская в с. Петровское.

Исходя из правовой природы отношений, вытекающих из Контракта, к возникшему спору подлежат применению нормы главы 37 Гражданского кодекса РФ о договорах подряда, а также Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В соответствии с п. 8 ст. 3 Федерального закона N 44-ФЗ (в редакций, действовавшей на момент спорных правоотношения), под государственным или муниципальным контрактом понимается договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

К отношениям по государственным или муниципальным контрактам на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд в части, не урегулированной Кодексом, применяется закон о подрядах для государственных или муниципальных нужд (статья 768 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Согласно статье 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) выполнить определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договорах.

В соответствии с п. 1 ст. 740 ГК РФ, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Статьей 746 ГК РФ установлено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

На основании части 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Пункт 3.1. Контракта установил срок завершения работ: работы должны быть выполнены с момента заключения контракта по 02 ноября 2020 г. (включительно).

Работы выполнены 20.11.2020 года.

20 ноября 2020 года Ответчиком было дано гарантийное письмо № 176 о том, что обязуется выполнить работы по планировке площадей обочин тротуара в количестве 1863 м2 до 15.05.2021 г.

Администрация Петровского сельсовета в адрес ответчика направила письмо № 14а от 11.06.2021  с просьбой: сообщить причины несоблюдения срока. Письмо ответчиком оставлено без ответа.

15 июля 2021 года в адрес Ответчика было направлено извещение № 276 о  невыполненных гарантийных обязательств, с просьбой  направить своего представителя для проведения обследования, фиксации недостатков, согласования порядка и сроков их устранения. Их представитель не явился.

12.08.2021 был составлен акт обследования, в котором зафиксировано, что не выполнены работы по планировке площадей обочин тротуара в количестве 1863 м.2.

Стоимость этих работ согласно смете - 1883,37 руб.

В адрес ответчика было направлено требование о том, что начиная с 16.05.2021 года им начисляется неустойка за просрочку исполнения гарантийных обязательств и потребовали исполнить обязательства, которые даны в гарантийном письме № 176 от 20.11.2020 г.

Согласно пункту 1 статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока.

В силу пункта 2 статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Как следует из материалов дела, 12.08.2021 был составлен акт обследования, в котором зафиксировано, что не выполнены работы по планировке площадей обочин тротуара в количестве 1863 м.2.

Ответчик не представил возражений по недостаткам. 

В связи с чем, суд считаем возможным удовлетворить требовании истца и обязать  ответчика в течении 70 календарных дней с момента вступления в законную силу решения суда настоящему делу безвозмездно устранить недостатки по муниципальному контракту № 0164200003020002527_220584 на выполнение работ по устройству тротуаров вдоль автомобильной дороги по ул. ФИО3, ул. Пролетарская в с. Петровские от 01 октября 2020, а именно: выполнить работы по планировке площадей обочин тротуара в количестве 1863 м2, согласно п.28 раздела 4 локального сметного расчета,  являющегося  приложением  к  муниципальному  контракту № 0164200003020002527_220584. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта (п. 8.1 Контракта).

В соответствии с ч. 6 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В соответствии с п. 8.3 Контракта, В случае просрочки исполнения поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Муниципальный заказчик направляет поставщику (Подрядчику, Исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Размер пени  составляет 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Контракта, отдельного этапа исполнения контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств предусмотренных Контрактом, соответствующим отдельным этапом исполнения контракта и фактически исполненных Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем).

Неустойка (пеню) в  связи с просрочкой ответчиком исполнения обязательств, предусмотренных гарантийным письмом №179 от 20.11.2020, по состоянию на 24.11.2021 составила 76,25руб. 

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного права. 

В силу пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными залогом или договором.

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

Неустойка является одним из способов обеспечения исполнения обязательств, средством возмещения кредитору потерь, вызванных нарушением должником своих обязательств.

В соответствии со статьями 329 - 331 Гражданского кодекса РФ ответственность в виде неустойки за нарушение обязательств наступает в случае, если неустойка предусмотрена условиями договора или законом. При этом соглашение о применении неустойки должно быть достигнуто в письменном виде. 

Расчет неустойки судом проверен и признан арифметически верным

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (пункт 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Ответчик, расчет неустойки не оспорил, контррасчет не представил.

В соответствии с ч.2 ст. 65 АПК РФ обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права. Представленные по делу и исследованные судом доказательства и установленные обстоятельства, согласно заявленных оснований, предмета иска, суд находит достаточными для разрешения спора по существу.

По изложенным обстоятельствам и на основании указанных норм закона требования по иску правомерны.

Согласно ст. 110 АПК РФ судебные расходы по госпошлине подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 102, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, 

 

СУД  РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Стандартстрой», 

<

...> (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации 21.08.2014) в пользу истца 

<

...> (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации  18.01.2006) неустойку (пеню) в  связи с просрочкой ответчиком исполнения обязательств, предусмотренных гарантийным письмом №179 от 20.11.2020, по состоянию на 24.11.2021в размере 76,25руб.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Стандартстрой», 

<

...> (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации 21.08.2014) обязать  в течении 70 календарных дней с момента вступления в законную силу решения суда настоящему делу безвозмездно устранить недостатки по муниципальному контракту № 0164200003020002527_220584 на выполнение работ по устройству тротуаров вдоль автомобильной дороги по ул. ФИО3, ул. Пролетарская в с. Петровские от 01 октября 2020, а именно: выполнить работы по планировке площадей обочин тротуара в количестве 1863 м2, согласно п.28 раздела 4 локального сметного расчета,  являющегося  приложением  к  муниципальному  контракту № 0164200003020002527_220584.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Стандартстрой», 

<

...> (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации 21.08.2014) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 8000руб.

Истцу (по заявлению), налоговому органу выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу.

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Тамбовской области.

 

Судья                                                                        Макарова Н.Ю.