Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-5289/2017

г. Хабаровск

21 июня 2017 года

Арбитражный  суд  Хабаровского  края  в  составе  судьи Е.Е. Яцышиной,

рассмотрев  в порядке упрощенного производства дело 

по иску краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» имени А.К. Пиотровича Министерства здравоохранения Хабаровского края (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, место нахождения: 680003, 

<

...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Новые технологии» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, место нахождения: 170007, 

<

...>)

овзыскании неустойки  в сумме взыскании 332 718 руб. 76 коп.,         

установил:

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» имени А.К. Пиотровича Министерства здравоохранения Хабаровского края обратилось в арбитражный суд Хабаровского края к обществу с ограниченной ответственностью «Новые технологии» с иском о взыскании неустойки в сумме 332 718 руб. 76 коп. за просрочку поставки товара по товарной накладной №25 от 06.10.2016 за период с 07.09.2016 по 08.11.2016  в рамках контракта №103ЭА/2016 от 08.07.2016.

Определением от 24.04.2017 иск принят к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Изучив материалы дела, доводы истца, изложенные в иске, с учетом отсутствия возражений со стороны ответчика, суд принял решение об удовлетворении иска в полном объеме. 

Резолютивная часть решения от 13.06.2017 была размещена на официальном сайте арбитражного суда Хабаровского края в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

      Согласно ст. 229 АПК РФ суд составляет мотивированное решение. 

      08.07.2016 между истцом (Заказчик) и ответчиком (Поставщик) заключен контракт №103ЭА/2016, предметом которого является поставка дизельной генераторной установки в контейнерном исполнении (далее - товар) в соответствии со спецификацией (Приложение №1) для нужд краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» имени А.К. Пиотровича министерства здравоохранения Хабаровского края (п.1.1.). 

Цена контракта составляет 1 760 416 руб. 72 коп. (п.2.1).

В соответствии с пунктом 5.1 контракта поставка товара осуществляется в течение 60 дней с момента заключения контракта: монтаж и пробный запуск товара с подписанием акта приема-передачи товара – в течение 10 дней  с момента поставки; наладка, ввод в эксплуатацию товара, инструктаж специалистов заказчика, осуществляющих использование товара осуществляется в течение 20 дней по заявке заказчика после подведения сетей, но не позднее 01.12.2016.

Согласно пункта 9.3.1 контракта, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срок4а исполнения обязательства и устанавливается в размере не менее, чем 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком, и определяется по формуле:

П= (Ц-В)хС, где:

Ц – цена контракта,

В- стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товара,

С- размер ставки.

Ответчик  поставил истцу товар по товарной накладной №25 от 06.10.2016 на сумму 1 760 416 руб. 72 коп., однако фактически товар был поставлен 08.11.2016, о чем свидетельствует отметка о получении в указанной накладной. Просрочка поставки товара составил 63 календарных дня.

Истец направил в адрес ответчика претензии 05.12.2016 исх.№01.01-17/1932 и 25.01.2017 исх.№01.01-17/101 с требованием оплатить неустойку в сумме 332 718 руб. 76 коп. за нарушение срока поставки, ответа на претензии не представлено.

Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения с иском в суд.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Статьей 329 ГК РФ установлена возможность обеспечения исполнения обязательств неустойкой.

Обязанность по уплате неустойки предусмотрена статьей 330 ГК РФ и пунктом 9.3.1 контракта. 

Поскольку материалами дела подтверждается нарушение ответчиком согласованного при заключении контракта срока поставки, требование о взыскании неустойки является обоснованным.

Неустойка рассчитана с учетом условия договора о сроке поставки, согласованного в п. 5.1, за период с 07.09.2016 по 08.11.2016, расчет проверен судом, не оспорен ответчиком и принимается за основу при принятии решения.

Судебные  расходы  в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению  на ответчика, при этом судом учитывается, что государственная пошлина оплачена истцом в полном объеме при обращении в суд. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-170, 176, 226-229  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд Хабаровского края

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества  с ограниченной «Новые технологии» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, место нахождения: 170007, 

<

...>)  в пользу краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» имени А.К. Пиотровича Министерства здравоохранения Хабаровского края (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, место нахождения: 680003, 

<

...>) неустойку в сумме 332 718 руб. 76 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в сумме 9654 руб. Всего взыскать – 42 372 руб. 76 коп.

        Решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати  дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае составления мотивированного решения  оно вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

         Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в полном объеме.

       Жалоба подается через Арбитражный суд Хабаровского края.

 

                          Судья                                     Е.Е. Яцышина