Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) 

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-5367/2022

19 октября 2022 года

город Якутск

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Семёновой У. Н., при  

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Никодимовой М.А., рассмотрев  

в судебном заседании дело по исковому заявлению Муниципального казенного учреждения  

"Главстрой" Городского округа "Город Якутск" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к  

обществу с ограниченной ответственностью "ДорСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) об обязании устранить недостатки. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить полностью. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Дорстрой" (ИНН 

<

***>,  

ОГРН 

<

***>) безвозмездно устранить недостатки работ по муниципальному контракту  

от 19.05.2020 № КР-04/2020 на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт  

автомобильных дорог городской агломерации ГО «город Якутск» в срок до 30.06.2023: 

- «Капитальный ремонт Окружного шоссе на участке от ул.Жорницкого до  

Вилюйского тракта (2-я очередь)»: ПК2+070: Восстановить дорожный бордюрный камень; ПК 8+015: Вывезти бурт; 

ПК 8 +040: Демонтаж габиона, провести подготовительные работы, основание под  

габионы, осуществить укладку габионов; ПК 10+015: Убрать строительный мусор; ПК 10+085: Убрать строительный мусор; 

ПК 13+080: Провести досыпку растительной землей, сделать планировку, сделать посев  

трав; ПК 13+090: Убрать строительный мусор; 

ПК 14+00: Провести досыпку растительной землей, сделать планировку, сделать посев  

трав; ПК 16+005: Заделать отверстие асфальтобетонной смесью; 

ПК 19+024: Демонтаж габиона, провести подготовительные работы, основание под  

габионы, осуществить укладку габионов. Залить битумом; ПК 22+015: Убрать остаток опоры, заделать отверстие асфальтобетоном; ПК 25+00: Заделать отверстие асфальтобетоном; 

ПК 28+030: Демонтаж габиона, провести подготовительные работы, основание под  

габионы, осуществить укладку габионов; ПК 32+080: Демонтировать ограждения; 

ПК 34+050: Демонтаж габиона, провести подготовительные работы, основание под  

габионы, осуществить укладку габионов; ПК 35+050: Убрать бурт; ПК 38+050: Восстановить асфальтобетонное покрытие; ПК 41 +00: Заделать отверстие асфальтобетоном; Транспортное кольцо Вилюйский тракт: Восстановить дорожный бордюрный камень; ПК 41+050: Убрать строительный мусор; ПК 32+050: Восстановить откосы; 

ПК 31+050: Демонтаж габиона, провести подготовительные работы, основание под  

габионы, осуществить укладку габионов. Залить битумом; 

ПК 28+04: Демонтаж габиона, провести подготовительные работы, основание под  

габионы, осуществить укладку габионов; 

ПК 27+050: Демонтаж габиона, провести подготовительные работы, основание под  

габионы, осуществить укладку габионов; ПК 26+060: Восстановить асфальтобетонное покрытие; ПК 25+050: Убрать строительный мусор, восстановить бордюр; ПК 24+060: Заделать отверстие асфальтобетоном; ПК 24+00: Восстановить дорожные стойки и знаки. Убрать строительный мусор; ПК 10+015: Восстановить крышку колодца и отсыпать; ПК 8+040: Выполнить paботы по проекту по поднятию или опусканию трубы; ПК 7+050: Убрать строительный мусор; 

ПК (ул. Космонавтов) на съезд с Окружного шоссе: Заглубить стойку под знак пешеход  ПК 1+070: Заделать отверстие асфальтобетоном.  

- «Капитальный ремонт ул. Курнатовского на участке от ул. Пилотов до ФИО1  

Юряхского шоссе»: 

ПК 2+005 (слева): Демонтировать покрытие, основание, осуществить устройство  

основания и покрытия; 

ПК 2+020 (слева): Демонтировать асфальтобетонное покрытие, основание, осуществить  

устройство основания и покрытия; 

ПК 2+050 (слева): Демонтировать асфальтобетонное покрытие, основание, осуществить  

устройство основания и асфальтобетонного покрытия; ПК 2+055 (слева): Демонтаж и новое устройство асфальтобетонного покрытия; ПК 3+050: Заменить крышку лотка; 

ПК 5+080 (слева): Демонтировать покрытие, основание, осуществить устройство  

основания и покрытия; ПК 7+015: Убрать строительный мусор; 

ПК 7+020 (слева): Демонтировать остаток опоры, заделать отверстие асфальтобетоном;  ПК 11+090: Демонтировать покрытие, основание, осуществить устройство основания и  

покрытия; ПК 6+050: Убрать строительный мусор; ПК 6+00: Заделать отверстие асфальтобетоном; ПК 5+050: Заделать отверстие асфальтобетоном. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ДорСтрой" (ИНН 

<

***>,  

ОГРН 

<

***>) в пользу Муниципального казенного учреждения "Главстрой"  

Городского округа "Город Якутск" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 6 000 рублей  

расходов по оплате государственной пошлины. 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока  

со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  

жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  

принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления  его в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через  арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана  посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в  информационно – телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.  

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о  времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте  Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.  

Судья Семёнова У. Н. 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 29.12.2021 22:20:28Кому выдана Семенова Ульяна Николаевна