312/2022-108007(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;  

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-15956/2021

город Саратов

19 мая 2022 года

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-171, 176, 177 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Д2» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>), город Нижний Новгород, в течение 30 дней со дня вступления в законную  силу решения суда по настоящему делу устранить нарушения, допущенные при проведении  работ по государственному контракту № 0860500000220000031 от 23.06.20, выполнив на  площади 16928 кв.м следующие работы:  

- прополку цветников без применения полотиков; - рыхление цветников ручным инструментом; 

- посадку многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов.  

Количество многолетних луковичных с учетом заявленной плотности по проекту  «Озеленение»:  

- тюльпан ботанический (виды) - 507 840 шт. - крокус ботанический (виды) - 338 560 шт. - смесь мелколуковичных (сцилла сибирская, хионодокса) -507 840 шт. 

Общее количество многолетних растений с учетом заявленной плотности по проекту  «Озеленение» - 270 848 шт.  

Многолетние растения 

 № 

 

Количество  

 

№ 

Количество,  

 

Наименование 

в группе,  

Количество, шт. 

п/п 

группы 

шт/кв.м.  

 

шт. 

 

1 

1 

Овсяница сизая 

3 

50784  

50784 

2 

2 

Шалфей дубравный (сорта)  

2 

33856  

11285 

3 

Шалфей дубравный (сорта)  

 

11285 

 

4 

Шалфей дубравный (сорта)  

 

11285 

5 

3 

Нивяник обыкновенный 

2 

33856  

8464 

6 

Астра виды 

 

8464 

 

7 

Флокс шиловидный 

 

8464 

8 

Ясколка Биберштейна. 

 

8464 

9 

Флокс шиловидный 

 

3762 

10 

Котовник Фассена (сорта) 

 

3762 

 

11 

Вероника длиннолистная 

 

3762 

12 

Кровохлебка лекарственная  

 

3762 

 

4 

2 

33856  

 

13 

Синеголовник плосколистный  

 

3762 

14 

Синеголовник плосколистный  

 

3762 

 

15 

Шалфей дубравный (сорта)  

 

3762 

16 

Физостегия виргинская 

 

3762 

17 

Тимьян (виды) ползучий 

 

3762 

18 

5 

Иссоп лекарственный 

1 

16928  

5643 

19 

Полынь ФИО1 

 

5643 

 

20 

Физостегия Виргинская 

 

5642 

21 

6 

Гипсофила метельчатая 

1 

16928  

5643 

22 

Лилейник гибридный 

 

5643 

 

23 

Гипсофила метельчатая 

 

5642 

24 

Гвоздика (виды) 

 

3386 

25 

Зверобой продырявленный  

 

3386 

 

7 

1 

16928  

 

26 

Кошачья лапка 

 

3386 

27 

Примула (виды) 

 

3386 

 

28 

Прострел обыкновенный 

 

3384 

29 

Василек 

 

996 

30 

Душица обыкновенная 

 

996 

 

31 

Флокс шиловидный 

 

996 

32 

Лихнис халцедонский 

 

996 

 

33 

Тимьян (виды) 

 

996 

34 

Чистец 

 

996 

 

35 

Армерия приморская 

 

996 

36 

8 

Примула (сорта) 

1 

16928  

996 

37 

Иссоп лекарственный 

 

996 

 

38 

Флокс шиловидный 

 

996 

39 

Вербейник монетчатый (точечный) 

 

996 

40 

Бузульник 

 

996 

41 

 Очиток сорта 

 

996 

42 

Буквица лекарственная 

 

996 

43 

Чистец 

 

996 

44 

Чистец 

 

996 

45 

Ирис 

 

992 

46 

9 

Лук сорта 

1 

16928  

5643 

47 

Мята (виды) 

 

5643 

 

48 

Очиток видный 

 

5642 

49 

10 

Флокс шиловидный 

16928  

5643 

50 

Флокс шиловидный 

 

5643 

 

1 

 

51 

Тысячелистник (сорта) 

 

5642 

52 

Буквица лекарственная 

16928  

1302 

53 

Ирис 

 

1302 

 

54 

Овсяница сизая 

 

1302 

55 

Овсяница сизая 

 

1302 

 

56 

Тимьян (виды) 

 

1302 

 

57 

Овсяница сизая 

 

1302 

58 

Овсяница сизая 

 

1302 

 

11 

1 

 

59 

Овсяница сизая 

 

1302 

 

60 

Чистец (виды) 

 

1302 

 

61 

Вероника (виды) 

 

1302 

62 

Лихнис халцедонский 

 

1302 

63 

Нивяник обыкновенный 

 

1302 

64 

Мята (виды) 

 

1304 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Д2» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>), город Нижний Новгород в рамках гарантийных обязательств устранить  выявленные недостатки на объекте: «Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина (1-ый  этап)», Саратовская область, Энгельсский район» по государственному контракту   № 0860500000220000031 от 23 июня 2020 года, в течении 30 дней со дня вступления в  законную силу решения суда по настоящему делу, а именно:  

произвести замену Дуба Черешчатого в количестве 14 шт. и Вишни степной – 53 шт. путем  выполнения следующих работ:  

1) удаление корневых комов спиленных дубов черешчатых,  

2) подготовка посадочных ям в соответствии с проектом (с помощью  механизированных процессов либо вручную лопатами),  

3) выравнивание и зачистка стенок и дна посадочных ям лопатами вручную, 

4) складирование запаса, либо плодородного слоя почвы, имевшегося на объекте, либо  многокомпонентного искусственного почвогрунта заводского изготовления для засыпки  корневой системы,  

5) взрыхление дна посадочной ямы на глубину до 15-20 см,  

6) насыпка по поверхности дна «подушки» из слоя рыхлой  почвы/многокомпонентного искусственного грунта толщиной 25 см,  

7) выравнивание и трамбовка «подушки», 

8) центр ямы отмечается небольшим колышком для центрирования растения при  посадке,  

9) составление актов на скрытые работы, контрольные замеры размеров ям с учетом  высоты корневой шейки растения над проектной поверхностью в пределах 3-4 см с расчетом  на последующую усадку после посадки,  

10) установка дерева с комом с помощью автокрана в посадочное место, 

11) засыпка ямы растительной землей слоями (30 см) с послойным уплотнением земли  вокруг кома до его верхней части: ком тщательно снизу и со всех сторон подбивают  растительной землей во избежание образования пустот, ведущих к просадкам и наклону  растения,  

12) устройство поливочной лунки площадью, равной площади сечения посадочной  ямы: по краям лунки устраивают земляной валик 10-20 см с целью устранения растекания  воды при поливе; поливочная лунка должна сохраняться не менее 2 лет после посадки,  

13) полив посаженного дерева по поливочным нормам до полного насыщения  посадочного места влагой (до 200 л на дерево), устранение промоин после полива подсыпкой  земли и легкой трамбовкой, мульчирование лунки мульчирующим материалом,  

14) оправка и укрепление посаженных растений с помощью специальных растяжек с  регуляторами или ипециальных анкерных креплений внутри ямы,  

15) во избежание повреждения деревьев с высоким штамбом стволы оборачивают  обвязкой из тростника либо легкого нетканого материала. Такая обвязка обеспечивает  изоляцию от тепловых нагрузок на ствол в летнее время и от морозов – в зимнее,  

16) для стимулирования роста корневой системы посаженных растений и улучшения  их приживаемости в послепосадочный период рекомендуется применять биостимуляторы  (гетероауксин, свентовит, «Биоплекс», ФИО2 и др.) и вносить в приствольный круг  дерева споры микоризнообразующих грибов (препараты MycoGrow, Mykoplant Substrate и  др.); а по периметру приствольного круга – комплексные удобрения, содержащие кроме  основных элементов питания микроэлементы (например, в виде таблеток).  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Д2» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>), город Нижний Новгород в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 6 000 руб.  

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Исполнительный лист выдать взыскателю после вступления решения в законную  силу.  

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в апелляционную или  кассационную инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35 раздела VI  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Соответствующая жалоба  подается через принявший решение в первой инстанции арбитражный суд.  

Направить копии решения арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в  соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации.  

Судья А.В. Кузьмин 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 15.12.2021 9:55:51

 Кому выдана Кузьмин Андрей Викторович