288/2020-44322(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00, www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А81-2486/2020

г. Салехард

13 октября 2020 года

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи  Чалбышевой И.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по  исковому заявлению Муниципального казённого учреждения "Управление  коммунального заказа" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью "ТюменьСтройИнвест" (ИНН: 

<

***>)  

об обязании произвести действия, при участии в судебном заседании: стороны извещены, не явились, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «ТюменьСтройИнвест»  (625048, 

<

...>,  ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 19.10.2012, ИНН: 

<

***>, КПП:  720301001) устранить выявленные дефекты выполненных работ в рамках гарантийных  обязательств по муниципальному контракту № Ф.2018.336023/220-18/ЭА от 16 июля  2018 по объекту «МБДОУ «ДС «Солнышко», ул. Пионерская, д.40, г. Муравленко»,  

а именно: 

1. выполнить работы по замене дефектной (потрескавшейся) керамической  плитки в групповых помещениях:  

- «Ромашки» помещение № 107 в количестве 15 шт. площадью 0,9 м2,  

- «Теремок» помещение № 134 в количестве 3 шт. площадью 0,18 м2,  помещение № 132 в количестве 1 шт. площадью 0,06 м2,  

- «Колобки» помещение № 65 в количестве 13 шт. площадью 0,78 м2,  

- «Родничок» помещение № 9 в количестве 5 шт. площадью 0,3 м2; - «Красная шапочка» помещение 126 в количестве 9 шт. площадью 0,54 м2. 

2. Выполнить работы по устранению трещин в стене над дверным проемом в  

групповых помещениях: - «Ромашки» помещение № 107, - «Золотой ключик» помещения № 101, № 99, - «Лесная сказка» помещения № 142, № 141, - «Теремок» помещение № 133, - «Красная шапочка» помещения № 124, № 128, - «Золотая рыбка» помещение № 73, - «Чебурашки» помещения № 82, № 79, - «Колокольчики» помещение № 12. 3. Выполнить работы по устранению трещин в стене в групповых помещениях: - «Ромашки» помещение № 105, - «Лесная сказка» помещения № 142, № 137, № 133, № 130, - «Красная шапочка» помещения № 126, - «Колобки» помещение № 64, - «Золотая рыбка» помещения № 68, № 74, № 73, № 71, - «Чебурашки» помещения № 77, № 82, - «Родничок» помещения № 9, № 8, № 13,7, - «Матрешки» помещение № 23. 

4. Выполнить работы по устранению трещин в углу стены в групповых  

помещениях: - «Золотой ключик» помещение № 99, - «Улыбка» помещение № 89, - «Лесная сказка» помещения № 143, № 137, - «Колобки» помещение № 69. 

5. Выполнить работы по устранению дефектов (вздутие, отклеивание отдельных  

участков линолеумного покрытия) напольного покрытия в групповых помещениях: - «Улыбка» помещение № 89, - «Родничок» помещение № 13. 

6. В помещении № 130 группы «Теремок» выполнить работы по устранению  

дефектов - отслоение (осыпание) штукатурного слоя от поверхности стены в объёме  

0,04 м2, а именно: 

- произвести зачистку дефектных участков в местах отслоения штукатурного  

слоя, - произвести оштукатуривание дефектных участков, 

- выполнить шпаклевание, грунтовку и покраску дефектных участков.  

7. В помещении № 23 группы «Матрешки» выполнить работы по устранению  

дефектов - осыпание лакокрасочного покрытия вдоль трещины в стене и отслаивание  

лакокрасочного покрытия от основания стены, а именно: 

- произвести зачистку участка в местах осыпания, отслаивания лакокрасочного  

покрытия, 

- выполнить работы по грунтованию, зачистке участков осыпания, отслаивания  

лакокрасочного покрытия, 

- произвести окрашивание подготовленных участков. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТюменьСтройИнвест»  (625048, 

<

...>,  ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 19.10.2012, ИНН: 

<

***>, КПП:  720301001) 6 000 руб. государственной пошлины в доход федерального бюджета.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  течение месяца со дня его принятия (изготовления его в полном объеме) путем подачи  апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.  

Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения  формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет»  http://yamal.arbitr.ru.  

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного  производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно  получить соответственно на интернет-сайте Восьмого арбитражного апелляционного  суда http://8aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Западно-Сибирского округа  http://faszso.arbitr.ru.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного  документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в  соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется  лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте  арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в  режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут  быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего  ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или  вручены им под расписку.  

И.В. Чалбышева

Судья 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 30.06.2020 9:52:50

Кому выдана Чалбышева Ирина Владимировна