АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000

 

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А13-2706/2023

город Вологда

27 февраля 2024 года

 

Резолютивная часть решения  объявлена 22 февраля 2024 года. 

Текст решения в полном объеме изготовлен 27 февраля 2024 года. 

 

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Соколовой Л.А. при ведении протокола судебного заседания  секретарем  судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном онлайн-заседании материалы дела по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Вектор» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства и ремонтов» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 37 768 117 руб. 41 коп.,

при участии от истца – ФИО2 по доверенности от 09.01.2024, от ответчика – ФИО3 по доверенности от 09.01.2024,  

 

у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Вектор» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, далее – Общество, ООО «СК «Вектор»)  обратилось с иском в Арбитражный суд Вологодской области к муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства и ремонтов» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, далее –Управление, МКУ «УКСиР») о взыскании 40 349 644 руб. 04 коп. задолженности за работы по выносу и переустройству инженерных сетей.

Исковые требования истец основывает на статьях 309, 310, 333, 763, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). 

Определением от 03 августа 2023 года судом принято уточнение исковых требований от 24.07.2023, о взыскании с ответчика 37 768 735 руб. 65 коп. задолженности за работы по выносу и переустройству инженерных сетей, коммуникаций и строений с владельцами попадающего на территорию застройки объекта имущества: ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети», АО «Газпром газораспределение Вологда».

Определением суда от 11 сентября 2023 года по делу назначена судебная экспертиза, проведение которой поручено экспертам общества с ограниченной ответственностью «Вологодский центр комплексного проектирования и обследования»: ФИО4, ФИО5, ФИО6 (160034, 

<

...> подъезд 3, офис), производство по делу приостановлено.

          От общества с ограниченной ответственностью «Вологодский центр комплексного проектирования и обследования» 10 января 2024 года в суд поступило заключение эксперта и возвращены материалы дела.

          В судебном заседании 08 февраля 2024 года производство по делу возобновлено.

Истец в ходатайстве об уточнении иска от 06.02.2024 и его представитель в судебном заседании просили взыскать с ответчика 37 768 117 руб. 41 коп. задолженности на основании заключения экспертизы.

Судом уточнение иска в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) принято.

Управление в отзыве на иск и его представитель в судебном заседании оставили решение по спору на усмотрение суда. 

В судебном заседании 08.02.2024 в порядке  статьи 163 АПК РФ судом объявлялся перерыв до 11 час. 50 мин. 19.02.2024. Информация о перерыве размещена на официальном сайте суда в сети Интерне.

В судебном заседании 19.02.2024 судом объявлялся перерыв до 13 час.  30 мин. 22.02.2024. Информация о перерыве размещена на официальном сайте суда в сети Интернет. 

От истца в суд поступило заявление, в котором Общество просит суд отнести на истца судебные расходы по делу.

Дело рассмотрено в порядке статьи 156 АПК РФ.

Исследовав материалы дела, заслушав представителей истца и ответчика, арбитражный суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению.

Как следует из материалов дела, между Обществом (подрядчик) и Управлением (заказчик) заключен муниципальный контракт № 16-06-03/101-2021 (идентификационный код закупки – 213352818010035280100100200014211414) на «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Северная объездная дорога» (далее - контракт), согласно условиям которого  подрядчик принимает на себя обязательства  по выполнению подрядных работ по строительству объекта, а заказчик обязался принять и оплатить указанные работы. 

Стоимость работ составила 503 896 130 руб. (пункт 2.2. контракта).

Пунктом 3.1. контракта установлены сроки выполнения работ по контракту: начало - с даты заключения контракта, окончание - 31 ноября 2022 года.

Промежуточные сроки выполнения работ устанавливаются Графиком выполнения  работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту, пункт 3.2 контракта).

Место выполнения работ указано в пункте 3.3 контракта: Вологодская обл., г. Череповец, территория Череповецкого муниципального района, территория села Ясная Поляна. Начало трассы ПК 0+00.00 расположен на оси пересечения с автомобильной дорогой Кирилловское шоссе км 5+126/ км 0+874.Конец трассы ПК24+57.78 расположен на оси улицы Северное шоссе. Протяженность трассы 2.458 км.

В соответствии с пунктом 6.1 контракта расчеты за фактически выполненные за отчетный период работы производятся на основании  справки о стоимости выполненных работ и затрат за отчетный период  (форма КС-3) с расшифровкой физических объемов по акту о приемке выполненных работ за отчетный период  (форма КС-2), счета-фактуры (счета) в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Окончательный расчет за выполненные работы по настоящему Контракту производится после полного завершения работ по Контракту, уплаты Подрядчиком Заказчику неустойки (пени, штрафа), определенных разделом 12 настоящего Контракта,  на основании  справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с расшифровкой физических объемов по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), счета-фактуры (счета) с зачетом всех ранее произведенных платежей в течение 30 (тридцати) дней  с даты подписания Заказчиком Акта приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию выполненных строительством автомобильных дорог и дорожных сооружений.

Пунктом 1.3 контракта установлена обязанность подрядчика завершить все работы по объекту и сдать в установленном порядке объект, пригодный к эксплуатации, в сроки, установленные настоящим контрактом.

Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, результатам выполняемых работ, и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ по объекту потребностям заказчика (в том числе наименования, характеристики, виды, объемы работ) установлены в Описании объекта закупки (Техническом задании) (Приложение № 1 к настоящему Контракту) (пункт 1.4 контракта).

Пунктом 4.2.39 контракта предусмотрена обязанность подрядчика заключить договоры на вынос и переустройство инженерных сетей, коммуникаций и строений с владельцами попадающего на территорию застройки имущества. По окончании работ по выносу и переустройству инженерных сетей, коммуникаций и строений Подрядчик предоставляет Заказчику документы, выданные владельцами инженерных сетей, коммуникаций и строений о соблюдении технических условий, норм и требований (справку о выполнении технических условий), все оформленные и подписанные владельцами переустраиваемых объектов акты выполненных работ, акты перехода эксплуатационной ответственности и рисков, контрольную и исполнительную документацию и съемку, схемы расположения объекта на занимаемом им земельном участке, технические планы, по требованию его владельца, иную необходимую документацию для сдачи объекта в эксплуатацию и получения разрешения на его ввод, если такое требование содержится в выданных владельцем переустраиваемого объекта технических требованиях или необходимо для передачи объекта по действующему законодательству.

Перечень инженерных сетей предусмотрен в Приложении № 1 к договору (Техническое задание), а именно: 

Подрядчик обязан заключить договоры на вынос и переустройство инженерных сетей, коммуникаций и строений с владельцами попадающего на территорию застройки объекта имущества: 

1.1.         Вынос сетей газоснабжения АО «Газпром газораспределение Вологда»;

1.2     Переустройство ВЛ-10кВ на ТП ОГК «Северный».

1.3           Переустройство кабельных линий связи ПАО «Ростелеком». 

1.4           Переустройство кабельных линий связи ООО «Газпром трансгаз Ухта».

1.5           Переустройство кабельных линий связи АО «Апатит».

1.6           Переустройство кабельной линии КЛ-10 кВ ООО «ЧэСК». 

1.7.         Переустройство ВЛ-220кВ. ПАО «ФСК ЕЭС» филиал МЭС Центра.

1.8.         Переустройство ВЛ-110кВ ПАО «МРСК Северо-Запада». 

1.9.         Переустройство ВЛ-10кВ «Газовая 1» и «Газовая 2» ООО «Газпром газомоторное топливо». 

Сметой контракта предусмотрена компенсация за осуществление переустройства сетей:

№ п/п

Наименование смет, разделов, пунктов

Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ

Единица изм-ния

Кол-во 

Цена без НДС, руб

единицы

всего

19

Смета № 01-01-02

Переустройство ВЛ 10кВ ОГК Северный

комплекс

1

210 068

 

210 068

20

Смета № 01-01-03

Переустройство ВЛ 10кВ Газпром газомоторное топливо

комплекс

1

485 327

485 327

21

Смета № 01-01-04

Переустройство сетей связи Газпром Трансгаз-Ухта

комплекс

1

863 460

863 460

22

Смета № 01-01-05

Переустройство сетей связи ФосАгро АО Апатит

комплекс

1

673 260

673 260

23

Смета № 01-01-06

Переустройство сетей связи Ростелеком

комплекс

1

1 424 544

1 424 544

24

письмо

Вынос участков ГВД д.700мм "Газопровод-отвод ГРС-2 "Череповец"-ОАО "Северсталь"

комплекс

1

36 541 527

36 541 527

25

письмо

Переустройство объектов электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада Северсталь"

комплекс

1

34 521 252

34 521 252

26

письмо

Переустройство объектов электроэнергетики ПАО "ФСК ЕЭС"

комплекс

1

40 522 410

40 522 410

27

расчет

Реконструкция кабельной линии 10кВ ООО "ЧэСК" (съезд на ул. Энергетиков)

комплекс

1

1 136 727

1 136 727

 

Итого

 

 

116 378 575

 

НДС

 

 

23 275 715

 

Всего компенсаций

 

 

139 654 290

В рамках исполнения данных обязательств Обществом и публичным акционерным обществом «Федеральная сетевая компания - Россети» (далее – ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети», (ранее ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы») заключено соглашение о компенсации от 22 ноября 2021 года № 871680.

ООО «СК «Вектор» и ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети» также заключено дополнительное соглашение № 2 к соглашению о компенсации № 871680. По результатам выполненного обществом с ограниченной ответственностью «Роосконсалтгруп» отчета № 0-2227 от 16.12.2022 об оценке рыночной стоимости права требования возмещения убытков и затрат, возникших при переустройстве объектов, определен окончательный размер денежной компенсации по переустройству сетей и составляет 66 211 782 руб. 04 коп. (без НДС 20%).

Письмом от 10.02.2023 № 36-ПО/СКВ истец обратился к МКУ «УКСиР» с просьбой компенсировать понесенные затраты в рамках исполнения контракта. 

Письмом от 16.02.2023 № 16-01/10/244 истцу отказано в оплате и предложено для урегулирования данного вопроса обратиться в Арбитражный суд Вологодской области.

Работы по переустройству сетей выполнены в полном объеме в соответствии с требованиями проектной документации. Справка о выполнении технический условий, подтверждающая выполнение предоставлена МКУ «УКСиР».

Заказчиком осуществлен платеж компенсации за осуществление переустройства объектов электроэнергетики ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети», которая составляет 48 626 892 руб. (в том числе НДС 20%).

Стоимость затрат по переустройству объекта собственника превысило изначально заложенную в смету контракта сумму на 25 689 372 руб. 04 коп. (без НДС 20%).

Также в рамках исполнения обязательств (пункт 1.1 Технического задания), ООО «СК «Вектор» и акционерным обществом «Газпром газораспределение Вологда» (далее – АО «Газпром газораспределение Вологда») заключено соглашение о проведении реконструкции в имущественной форме от 14 октября 2021 года № 6.

В рамках соглашения ООО «СК «Вектор» выполнило комплекс мероприятий по реконструкции Объекта ГРС: «Вынос участков ГВД д.700мм «Газопровод-отвод ГРС-2 «Череповец» - ОАО «Северсталь», на общую сумму  58 510 104 руб. (включая НДС 20%).

Данная стоимость работ утверждена собственником сетей АО «Газпром газораспределение Вологда».

Письмом от 29.11.2022 № 539-ПО/СКВ ООО «СК «Вектор» обратилось в МКУ «УКСиР» за компенсацией затрат превышающую сумму, предусмотренную контрактом на выполнение реконструкции объекта АО «Газпром газораспределение Вологда», просило принять и подписать акты КС-2 № 12 от 21 июля 2022 года и справки КС-3 № 12 от 21 июля 2022 года.

Ответным письмом от 09.12.2022 № 16-01-10/1625 заказчик отказал в осуществлении денежной компенсации.

Кроме того, АО «Газпром газораспределение Вологда» и ООО «СК «Вектор» заключены договоры на оказание услуг по техническому надзору и проверке ИТД от 08.02.2022 № 29/16-001294 и от 28.03.2022 № 29/16-001296.

Услуги оказаны, расчеты произведены, что подтверждается платежными поручениями от 10.02.2022 № 955 на сумму 51 949 руб. 97 коп., от 12.04.2022 № 3041 на сумму 121 929 руб. 69 коп., подписанными сторонами УПД № 76169 от 23 ноября 2022 года, УПД № 76170 от 23 ноября 2022 года.

Также АО «Газпром газораспределение Вологда» и ООО «СК «Вектор» заключен договор подряда от 15.06.2022 № 15-9/19-000283 с целью присоединения реконструируемого участка сети газораспределения к действующему линейному объекту с дополнительным соглашением от 28.06.2022. 

Услуги оказаны, расчеты произведены, что подтверждается подписанным сторонами УПД № 56838 от  20 июля 2022 года и платежными поручениями от 23.06.2022 № 5547 на сумму 5 181 090 руб. и от 10.08.2022 № 17942 на сумму 409 779 руб. 87 коп.

Работы на перекладку (перенос) газопровода выполнены в полном объеме, в соответствии с техническими условиями построенного объекта капитального строительства. Справка о соответствии технических условий выдана АО «Газпром газораспределение Вологда».

Кроме того, приемочной комиссией подписан акт приемки законченного строительством объекта сети газораспределения и строительный паспорт подземного газопровода.

Заказчиком был осуществлен платеж компенсации за осуществление реконструкции линейного объекта газоснабжения собственника, которая составляет 43 849 832 руб. 

Стоимость работ по реконструкции объекта собственника со всеми затратами превысило изначально заложенную в смету контракта на 14 660 272 руб. (с учетом НДС 20%).

Таким образом, ООО «СК «Вектор» были понесены расходы на выполнение работ по выносу, переносу, переустройству на общую сумму 132 826 367 руб. 44 коп. (в том числе НДС 20 %), в то время как обязательство по оплате было исполнено МКУ «УКСиР» частично на сумму 92 476 724 руб. 40 коп. (в том числе НДС 20%), которая была заложена в смете, являющейся неотъемлемой частью муниципального контракта.

В связи тем, что МКУ «УКСиР» отказалось возместить Обществу затраты в превышающей смету части, ООО «СК «Вектор» обратилось в суд с настоящим иском.

Согласно положениям статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В пункте 1 статьи 746 ГК РФ установлено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В пункте 1 статьи 711 ГК РФ установлено, что заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

В силу пункта 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

В пункте 6.1 статьи 19 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 257-ФЗ) указано, что условия переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации в границах полос отвода автомобильных дорог в случае реконструкции или капитального ремонта таких автомобильных дорог определяются договорами, заключаемыми владельцами этих инженерных коммуникаций с владельцами автомобильных дорог.

Существенные условия договоров, заключаемых владельцами инженерных коммуникаций с владельцами автомобильных дорог в случае прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации в границах полос отвода автомобильных дорог, определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области связи, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений (пункт 6.2 статьи 19 Закона № 257-ФЗ)

На основании части 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации положения настоящей статьи применяются при реконструкции, капитальном ремонте существующих линейных объектов, в том числе сетей инженерно-технического обеспечения (за исключением объектов электросетевого хозяйства высшим классом номинального напряжения 110 кВ и выше, а также существующих линейных объектов, сетей инженерно-технического обеспечения, критерии определения и (или) виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации), их частей (далее в настоящей статье - существующие линейные объекты), в связи с планируемым строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом: 1) линейных объектов транспортной инфраструктуры федерального значения, транспортной инфраструктуры регионального значения или транспортной инфраструктуры местного значения при наличии утвержденного в соответствии с частью 12.12 статьи 45 настоящего Кодекса проекта планировки территории;

В соответствии с частью 2 статьи 52.2 Градостроительного Кодекса Российской Федерации условия осуществления реконструкции, капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства высшим классом номинального напряжения 110 кВ и выше, а также существующих линейных объектов, сетей инженерно-технического обеспечения, критерии определения и (или) виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации, условия осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта не указанных в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи объектов капитального строительства, предусматривающие изменение местоположения существующих линейных объектов, определяются по соглашению сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с частями 10,11 статьи 52.2 Градостроительного Кодекса Российской Федерации реконструкция, капитальный ремонт существующего линейного объекта, а также при необходимости архитектурно-строительное проектирование в целях таких реконструкции, капитального ремонта осуществляется в соответствии с договором, заключаемым правообладателем существующего линейного объекта с застройщиком или техническим заказчиком с учетом требований настоящей статьи. Договор заключается с правообладателем существующего линейного объекта в обязательном порядке в соответствии с гражданским законодательством. Застройщик, технический заказчик вправе обратиться к правообладателю существующего линейного объекта, сети инженерно-технического обеспечения в целях заключения договора в течение срока действия технических требований и условий.

Предусмотренное пунктом 6 части 12 настоящей статьи возмещение осуществляется в денежной и (или) в натуральной формах. Порядок определения формы возмещения устанавливается Правительством Российской Федерации. В случае возмещения в денежной форме выполнение работ по реконструкции, капитальному ремонту существующих линейных объектов обеспечивается правообладателями таких объектов. В случае возмещения в натуральной форме выполнение указанных работ обеспечивается застройщиками, техническими заказчиками.

В соответствии с Правилами «Определения формы возмещения затрат, возникших в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом существующих линейных объектов», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 « 1010 (далее - Правила) устанавливается порядок определения формы возмещения застройщиком или техническим заказчиком затрат, возникших в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом существующих линейных объектов их правообладателям в связи с планируемым строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом объектов капитального строительства, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 52.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

На основании пункта 2 затраты, указанные в пункте 1 настоящих Правил, возмещаются застройщиком, техническим заказчиком в соответствии с частью 13 статьи 52.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации в денежной и (или) натуральной формах.

Определение формы возмещения затрат осуществляется правообладателем существующих линейных объектов после получения предложения застройщика, технического заказчика об определении формы возмещения затрат, направленного в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил, с учетом содержания выданных застройщику, техническому заказчику правообладателем существующих линейных объектов технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению при архитектурно-строительном проектировании в целях реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов (далее -технические требования и условия), а также предусмотренных проектной документацией сроков начала и завершения строительства, реконструкции или капитального ремонта объектов капитального строительства, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 52.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, утвержденных схем и программ перспективного развития электроэнергетики, схем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения и размещения сетей связи, утвержденных инвестиционных программ правообладателей сетей инженерно-технического обеспечения, за исключением случая, установленного абзацем вторым настоящего пункта.

При наличии оснований, предусмотренных пунктами 6 и 7 настоящих Правил, определение формы возмещения затрат осуществляется застройщиком, техническим заказчиком.

Фактически при вступлении в договорные отношения ООО «СК «Вектор» и МКУ «УКСиР» не располагали данными о несоответствии смете контракта фактических расходов по осуществлению переустройства инженерных сетей.

Указанные несоответствия, исходя из специфики рассматриваемого контракта и соглашений с правообладателями сетей по возведению нового объекта строительства, стали известны непосредственно в ходе выполнения работ.

Невыполнение указанных работ по выносу и переустройству инженерных сетей, на условиях и по ценам правообладателей сетей, либо их приостановка при исполнении контракта, создало бы невозможность выполнения строительно-монтажных работ по объекту: «Северная объездная дорога».

Таким образом, выполнение контракта истцом без проведения работ по выносу и переустройству инженерных сетей, на условиях и по ценам правообладателей сетей, нарушало требования положения пункта 2 статьи 721 ГК РФ, который определяет, что если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.

Стоимость компенсации, определенная в 2019 году, по выносу и переустройству инженерных сетей занижена на период 2021-2022 года. 

Кроме того, достигнуть конечный результат по исполнению контракта стало возможным только после заключения соглашений на вынос и переустройство инженерных сетей, с указанием стоимости возмещения затрат правообладателям существующих линейных объектов, что позволило ввести в эксплуатацию социально значимый объект в рамках реализации муниципальных программ по благоустройству.

При таких обстоятельствах полагаем, что выполнение работ по выносу и переустройству инженерных сетей, с увеличением стоимости затрат их правообладателей, без заключения между заказчиком и подрядчиком соответствующего соглашения к контракту не являлось нарушением, которое влечет за собой отказ в их оплате, поскольку ООО «СК «Вектор» действовало как разумный и добросовестный участник гражданского оборота.

Подрядчик действовал с соблюдением интересов заказчика.

Кроме того, цена контракта составляет 503 896 130 руб., увеличение стоимости затрат по выносу и переустройству инженерных сетей не превышает 10% его стоимости.

Поскольку заказчик обязал подрядчика заключить договоры на вынос и переустройство инженерных сетей, коммуникаций и строений с владельцами попадающего на территорию застройки объекта имущества, а также согласовал действия по проведению по выносу и переустройству инженерных сетей необходимых для завершения строительства объекта и надлежащего исполнения контракта, а также принял у истца окончательный результат без замечаний, обязательства, выполненные истцом в рамках контракта, должны быть оплачены ответчиком.

Из материалов дела усматривается, что подрядчиком в адрес ответчика направлены письма, где указано на выявление работ, стоимость которых превысила смету, но они необходимы для производства работ. Данные обстоятельства сторонами не оспариваются. 

Ответчик в отзыве на иск не отрицал необходимости несения истцом дополнительных затрат для надлежащего исполнения контракта. В связи с невозможностью самостоятельно изменить стоимость не включенных в заключенный контракт затрат, во внесудебном порядке удовлетворить требования подрядчика заказчик отказался; решение по спору оставил на усмотрение суда.

Согласно материалам дела предъявленная ответчику сумма дополнительно понесенных затрат составила 37 768 117 руб. 41 коп. 

Указанная сумма затрат подтверждена экспертным заключением по результатам проведения судебной экспертизы, проведение которой судом поручено обществу с ограниченной ответственностью «Вологодский центр комплексного проектирования и обследования». 

Эксперты ФИО4 и ФИО5, проверив в ходе проведения судебной экспертизы, достоверность сметной стоимости выполнения работ по переустройству инженерных сетей, коммуникаций и строений по заключенному соглашению о компенсации от 22 ноября 2022 года № 871680 в рамках муниципального контракта на «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Северная объездная дорога», подтвердили её достоверность, с малейшими замечаниями.

С учетом указанных в экспертном заключении замечаний, истец уточнил размер исковых требований, уменьшив его до 37 768 117 руб. 41 коп.

Исполнение обязательств по контракту в полном объеме состоялось, стороны данный факт подтвердили.

Формальный отказ в удовлетворении требований по причине отсутствия правовых оснований для оплаты стоимости в данном случае противопоставляется публичным интересам. 

При таких обстоятельствах исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме. 

В связи с тем, что истец заявил о возложении на него судебных расходов по делу, расходы истца, связанные с проведением экспертизы и уплатой государственной пошлины, распределению не подлежат. 

Руководствуясь статьями 110,  167 – 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области 

 

р е ш и л:

взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонтов» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Вектор» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)) 37 768 117 руб. 41 коп. задолженности.

Решение суда может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.

 

Судья                                                                                                      Л.А. Соколова