13/2018-46785(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00, 

 www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

Дело № А81-5421/2018

г. Салехард

27 сентября 2018 года

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи Крылова  

А.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  рассмотрев дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью  «СтройТрансКом» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) к Обществу с  ограниченной ответственностью «Стройгазком» (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>) о взыскании 16 870 900 рублей 60 копеек,,  при участии в судебном заседании:  

от истца : представитель не явился, извещен н/о, от ответчика : представитель не явился, извещен н/о, 

установил:

в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа поступило исковое  заявление Общества с ограниченной ответственностью «СтройТрансКом» к Обществу с  ограниченной ответственностью «Стройгазком» о взыскании неустойки за нарушение  сроков по договору подряда от 30.06.2017 № 48 за период с 30.09.2017 по 31.05.2018 в  размере 16 870 900 рублей 60 копеек.  

 Представители сторон в предварительное судебное заседание не явились,  ответчик исковые требования не оспорил, отзыв не представил.  

По утверждению истца, ответчиком частично выполнены работы, что  подтверждается подписанными с обоих сторон акты выполненных работ по форме КС-3  и справки о стоимости выполненных работ и затрат:  

- за сентябрь м-ц 2017г., на сумму 690 506 руб. 37 коп. - за июль м-ц 2017г., на сумму 584537 руб. 84 коп.; - за август м-ц 2017г., на сумму 575 371 руб. 72 коп. 

Общая сумма выполненных работ составляет: 1 850 417,00 руб.   Следовательно, работы не выполнены ответчиком на общую сумму: 14 734 415  руб.  

 В случае нарушения сроков выполнения Работ, на срок до 15 (пятнадцати)  календарных дней (включительно). Подрядчик вправе предъявить Субподрядчику  неустойку в размере 0,2 % от стоимости просроченных Работ за каждый день  просрочки исполнения обязательств. При нарушении сроков выполнения Работ, на  срок более 15 (пятнадцати) календарных дней, Подрядчик вправе предъявить  Субподрядчику неустойку в размере 0,5 % от стоимости просроченных Работ за  каждый день просрочки исполнения обязательств.  

Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика неустойки за нарушение  

сроков по договору подряда от 30.06.2017 № 48 за период с 30.09.2017 по 31.05.2018 в  размере 16 870 900 рублей 60 копеек.  

Лица, участвующие в деле, извещены надлежащим образом о принятии заявления  к производству и возбуждении производства по делу.  

Копии определения суда о принятии искового заявления, о назначении  предварительного судебного заседания, направлено ответчику по адресу, указанному в  исковом заявлении, договоре и сведениях из ЕГРЮЛ. Согласно сведений ФГУП «Почта  России» определения вернулись с отметкой «за истечением срока хранения».   В соответствии с пунктом 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской  Федерации (далее - ГК РФ) заявления, уведомления, извещения, требования и иные  юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско- правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с  момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.  

В силу пункта 33 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных  Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2005 N 221 (далее -  Правила оказания услуг почтовой связи), почтовые отправления доставляются в  соответствии с указанными на них адресами или выдаются в объектах почтовой связи.  Извещения о регистрируемых почтовых отправлениях опускаются в почтовые  абонентские ящики в соответствии с указанными на них адресами, если иное не  определено договором между оператором почтовой связи и пользователем услугами  почтовой связи.  

Особенности оказания услуг почтовой связи в отношении почтовой  корреспонденции разряда "Судебное" установлены Особыми условиями приема,  вручения, хранения и возврата почтовых отправлений разряда "Судебное" (приложение  N 1 к приказу федерального государственного предприятия "Почта России" от  31.08.2005 N 343).  

В соответствии с пунктами 3.2 - 3.4 и 3.6 Особых условий приема, вручения,  хранения и возврата почтовых отправлений разряда "Судебное" заказные письма разряда  "Судебное" доставляются и вручаются лично адресату под расписку в извещении. При  отсутствии адресата такие письма могут вручаться совместно проживающим  совершеннолетним членам семьи. При отсутствии адресата и совершеннолетних членов  его семьи в ячейке абонентского почтового шкафа или в почтовом абонентском ящике  оставляются извещения с приглашением адресата на объект почтовой связи для  получения почтового отправления. При неявке адресатов за почтовыми отправлениями  разряда "Судебное" в течение трех рабочих дней после доставки первичных извещений  им доставляются и вручаются под расписку вторичные извещения. Не врученные  адресатам заказные письма разряда "Судебное" возвращаются по обратному адресу по  истечении семи дней со дня их поступления на объект почтовой связи.  

Конверт содержит отметки о вторичном извещении ответчика. 

При таких обстоятельствах суд признаёт извещения ответчика о принятии  искового заявления и рассмотрении дела надлежащим.  

Истец в судебное заседание не явился, заявленные требования не изменил. Ответчик исковые требования не оспаривает. 

Принимая во внимание, что дело готово к судебному разбирательству, характер  спорного правоотношения определен, обстоятельства, имеющие значение для  правильного рассмотрения дела выяснены, доказательства представлены, о времени и  месте предварительного судебного заседания стороны извещены надлежащим образом,  суд, рассматривает настоящее дело в судебном заседании арбитражного суда первой  инстанции.  

Учитывая, что неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле, извещенных  надлежащим образом не является препятствием к рассмотрению дела в соответствии со  

статьями 123 и 156 АПК РФ суд рассматривает дело по существу в отсутствие сторон по  имеющимся документам.  

Ответчик о причинах неявки не сообщил, ходатайств не заявил.  

Как следует из материалов дела, между ООО «СтройТрансКом» и ООО  «СтройГазКом» заключен договор подряда от 30 июня 2017 N 48.  

В соответствии с условиями договора Ответчик-Субподрядчик принял на себя  обязательства по выполнению достройке (благоустройству) следующих Объектов:  

- Сооружения очистные канализационные (КОС). Площадка (Ин. № АА8758); 

- База промысловая опорная (БПО). Площадка (Инв. № АА8628);  - Комплекс энергетический (КЭ). Площадка (Инв. № АА8902);  - Сооружения водозаборные (ВС). Площадка (Инв. № АА9073);  - Депо пожарное (ДП). Площадка (Инв. № АА8691);  

и строительству (благоустройству) следующих Объектов:  - Парк резервуарный (ПР). Площадка;  

- Станция насосная системы поддержания пластового давления (ППД). Площадка,  расположенных на Стройке: «Обустройство Яро-Яхинского НГКМ на период ОПР»  

Пунктом 4.1. Договора установлена стоимость работ и сроки выполнения работ с  26.04.2017г. Срок окончания основных Работ: 25.09.2017г.  

Общая стоимость договора является твердой и составляет 16 584 831 руб. 52 коп.  Сумма договора включает в себя стоимость всех затрат Субподрядчика, необходимых  для надлежащего выполнения своих обязательств по договору.  

Работы по настоящему Договору должны быть выполнены Субподрядчиком и  сданы Подрядчику в срок, указанный в п. 4.1. настоящего Договора. Указанная дата  является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения  сроков выполнения Работ.  

По условиям договора, Субподрядчик обязан выполнить своими 

и/или привлеченными силами и средствами, все Работы, являющиеся предметом  Договора в объемах, предусмотренных Договором, с соблюдением требований  проектной документации (РД) (в соответствующих случаях Техническим заданием  Подрядчика), в полном соответствии со СНиП и иными действующими в РФ  нормативными документами, подлежащими применению при выполнении Работ по  Договору, и сдать их Подрядчику.  

Пунктом 4.3. Договора, датой завершения Работ по настоящему Договору (за  исключением Работ, выполняемых в течении гарантийного срока) является дата  подписания (без замечаний) отдельно по каждому Объекту Акта сдачи - приёмки  законченного строительством объекта по форме КС-11 (по объектам строительства),  либо Акта по итогам выполненных работ, связанных с ремонтом, реконструкцией,  модернизацией объектов и предметов учета основных средств по форме ОС-3 (по  достраиваемым объектам).  

Субподрядчик, согласно п. 14.3 договора, обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней  после завершения строительства Объекта предоставить Подрядчику оформленные  надлежащим образом следующие документы (отдельно по каждому Объекту):  

• Акт приемки законченного строительством Объекта, подготовленный по  форме КС-11 (по объектам строительства), либо Акта по итогам выполненных работ,  связанным с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов и предметов учета  основных средств по форме ОС-3 (по достраиваемым объектам), подписанный  представителями Субподрядчика и Подрядчика в 4-х подлинных экземплярах;  

• Документ, подтверждающий соответствие параметров построенного  Объекта капитального строительства проектной документации;  

• Документы, подтверждающие соответствие построенного Объекта техническим  условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию  сетей инженерно-технического обеспечения;  

• Оригинал Акта приема-передачи от Субподрядчика Подрядчику подписанного  комплекта Исполнительной документации (оригинал и копия);  

• Оригинал подписанного Акта приема-передачи неиспользованных  материалов и оборудования (при наличии таковых);  

• Акт сверки взаиморасчетов по выполненным Работам, подписанный  Подрядчиком и Субподрядчиком в 2-х экземплярах;  

• Акты использованных материалов, подписанные Подрядчиком и  Субподрядчиком в 2-х экземплярах.  

В соответствии с п. 13.4 Договора субподряда, Субподрядчик несет  ответственность за нарушение сроков выполнения Работ. В случае не выполнения  требований, указанных в п.14.3. настоящего Договора, в согласованный с Подрядчиком  срок. Субподрядчик считается нарушившим сроки выполнения Работ и несет  ответственность в соответствии с п. 13.6. настоящего Договора.  

Субподрядчиком частично выполнены работы, чем подтверждается  подписанными с обеих сторон акты выполненных работ по форме КС-3 и справки о  стоимости выполненных работ и затрат:  

- за сентябрь м-ц 2017г., на сумму 690 506 руб. 37 коп. - за июль м-ц 2017г., на сумму 584537 руб. 84 коп.; - за август м-ц 2017г., на сумму 575 371 руб. 72 коп. 

Общая сумма выполненных работ составляет: 1 850 417,00 руб.  Работы не выполнены Субподрядчиком на общую сумму: 14 734 415 руб.  

В случае нарушения сроков выполнения Работ, на срок до 15 (пятнадцати)  календарных дней (включительно). Подрядчик вправе предъявить Субподрядчику  неустойку в размере 0,2 % от стоимости просроченных Работ за каждый день просрочки  исполнения обязательств. При нарушении сроков выполнения Работ, на срок более 15  (пятнадцати) календарных дней, Подрядчик вправе предъявить Субподрядчику  неустойку в размере 0,5 % от стоимости просроченных Работ за каждый день просрочки  исполнения обязательств.  

Размер неустойки составил за период с 30.09.2017 по 31.05.2018 сумму в размере  16 870 900 рублей 60 копеек.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской  Федерации (далее - ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется  выполнить по заданию другой стороны (Заказчика) определенную работу и сдать ее  результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.  

В соответствии со ст. 307, 309-310 Гражданского кодекса РФ, обязательства  должны были быть исполнены ответчиком надлежащим образом и в соответствии с их  условиями, а также требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения  обязательств и одностороннее изменение их условий не допускаются.  

В силу ст. 12 ГК РФ, защита гражданских прав осуществляется, в частности,  путем присуждения к исполнению обязанности в натуре, а также взыскания неустойки.  

Согласно статье 330 ГК РФ в случае ненадлежащего исполнения обязательства, в  том числе при просрочке исполнения, должник обязан уплатить кредитору неустойку,  определенную законом или договором.  

Договор ответчиком не исполнен. 

Просрочка исполнения договорных обязательств ответчиком установлена и  подтверждается материалами дела.  

Расчёт суммы пени ответчиком не оспаривается. 

В силу части 1 статьи 333 ГК РФ если подлежащая взысканию неустойка явно  несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.  Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую  деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о  таком уменьшении.  

При этом такое заявление, как указанно в пункте 71 Постановления Пленума  Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами  некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности  за нарушение обязательств" (далее - Постановление N 7), должно быть обоснованным.  

Ответчик не просит уменьшить размер неустойки. Требование о снижении  размера неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской  Федерации (далее - ГК РФ) ответчиком не заявляется.  

Согласно части 2 статьи 1, статьи 421 ГК РФ граждане и юридические лица  приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе.  Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в  определении любых не противоречащих законодательству условий договора. Условия  договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание  соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.  

Истец рассчитал неустойку в соответствии с условиями договора подряда от  30.06.2017 № 48.  

Таким образом, принимая во внимание изложенные разъяснения Верховного Суда  Российской Федерации, учитывая, что ответчиком доказательств, подтверждающих  явную несоразмерность неустойки последствиям нарушенного обязательства, получения  истцом необоснованной выгоды при ее взыскании, наличия исключительного  обстоятельства, позволяющего уменьшить размер заявленной к взысканию неустойки в  нарушение части 1 статьи 65 АПК РФ в материалы дела не представлено, суд приходит к  выводу об отсутствии оснований для снижения неустойки.  

Проверив правильность расчета пени, суд установил, что расчет произведен  правильно. Пени в размере 16 870 900 рублей 60 копеек подлежат взысканию с  ответчика в пользу истца.  

 В соответствии с абзацем третьим подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 НК РФ не  подлежит возврату уплаченная государственная пошлина при добровольном  удовлетворении ответчиком требований истца после обращения последнего в  арбитражный суд и вынесения определения о принятии искового заявления к  производству.  

 В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы относятся на ответчика в  полном объеме.  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд   

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Стройгазком» (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной  ответственностью «СтройТрансКом» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  неустойку за нарушение сроков по договору подряда от 30.06.2017 № 48 за период с  30.09.2017 по 31.05.2018 в размере 16 870 900 рублей 60 копеек, расходы по оплате  государственной пошлины в сумме 107 355 рублей.  

 Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия (изготовления  его в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.  

 В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного  документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в  соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, что решение, выполненное в форме электронного документа, направляется  лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте  

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме  ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

 По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть  направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в  арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под  расписку.  

Судья 

 А.В. Крылов