АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

г. Пенза Дело № А49-12782/2016  

“ 24 ” июля 2017 г. 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи Лавровой И.А.  

рассмотрел в судебном заседании дело по иску Государственного казенного  учреждения «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской  области»  

к обществу с ограниченной ответственностью «СураСтрой» 

об устранении недостатков выполненных работ. 

 Руководствуясь статьями 110, 130, 167-170 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Государственного казенного учреждения  «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» в  части понуждения общества с ограниченной ответственностью «СураСтрой»  устранить недостатки подрядных работ (затекание воды в насосную станцию,  восстановление керамической плитки на полу здания насосной станции с  тротуарной плитки (часть помещения при входе) на керамическую и с  ленолеума (бытовая комната и санузел) на керамическую, восстановление  площадки из монолитной железобетонной плиты с покрытием половой  керамической плиткой с решетчатой металлической площадки) выделить в  отдельное производство.  

 Исковые требования Государственного казенного учреждения  «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области»  удовлетворить частично, расходы по госпошлине отнести на ответчика.  

 Понудить общество с ограниченной ответственностью «СураСтрой» в  течение одного месяца с даты вступления настоящего решения в законную силу  устранить недостатки работ, допущенные при выполнении государственного  контракта от 02 декабря 2013 года № 0155200002213003315-0234940-02,  заключённого с Государственным казенным учреждением «Управление  строительства и дорожного хозяйства Пензенской области», а именно:  

 - устранить деформацию (проседание столбов) ограждения из профлиста,  

 - устранить неплотное примыкание друг к другу бордюров на дорожке,  ведущей в насосную станцию,  

 - устранить просадку отмостки насосной станции,   - устранить трещину на фасаде здания насосной станции,  

 - восстановить керамический плинтус в местах его отслоения,  - убрать строительный мусор из резервуаров. 

 В удовлетворении остальной части иска отказать.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СураСтрой» в  пользу Государственного казенного учреждения «Управление строительства и  дорожного хозяйства Пензенской области» расходы по государственной  пошлине в сумме 6000 руб. 00 коп.  

 Решение Арбитражного суда Пензенской области может быть  обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Одиннадцатый  арбитражный апелляционный суд путём подачи апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Пензенской области.  

Судья И.А. Лаврова