Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-89364/2020

17 июля 2021 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена 16 июня 2021 года. Полный текст решения изготовлен 17 июля 2021 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области                                в составе: 

судьи Рагузиной П.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: МКУ «Единая служба заказчика» ВР ЛО (188640, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>)

ответчик: ООО ГК «СТК» (198207, Санкт-Петербург, ул. Зины ФИО2, д. 27 лит. А пом. 7Н, ОГРН: 

<

***>)

третье лицо: МОБУ «СОШ «ЯНИНСКИЙ ЦО» (188689, Ленинградская область,  городской  

<

...>, ОГРН: 

<

***>)

при участии

от истца: ФИО3 (доверенность от 22.04.2021)

от ответчика: не явился (извещен)

от третьего лица: не явился (извещен)

установил:

Муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика» Всеволожского района Ленинградской области обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью Группа компаний «Строительные технологии комфорта».

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Янинский центр образования».

В процессе рассмотрения спора истец в судебных заседаниях от 09.06.2021 и от 16.06.2021 заявлял об уточнении исковых требований, просил следующее:

1. взыскать с ответчика 1 723 477 руб.;

2. обязать ответчика безвозмездно выполнить гарантийные обязательства по муниципальному контракту № 34/03-02/0145300005214000024-0238349-06 от 02.10.2014, согласно Акту № 7.1, а именно:

- в помещении № 1.5.01. - установить новую дверь аварийного выхода, заделать трещину на стене;

- в  помещении № 1.5.03. - заделать трещину на уличной стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 1.5.04. - установить новую дверь аварийного выхода, заделать трещину на стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 1.5.07. - заделать трещины на стенах; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 1.5.06. - заделать трещину; переложить кафельную плитку (отходит) от стены;

- в помещении № 1.5.08. - заделать трещину на стене со стороны буфетной; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 1.1.03. - установить новую дверь аварийного выхода; заделать трещины на стенах; выполнить улучшенную окраску стен;

- в помещении № 1.1.01. - заделать трещины на стенах; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 1.1.02 - заделать трещины на стенах; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 1.1.04 - установить новую дверь аварийного выхода;

- в помещении № 1.1.06 - заделать трещины на стенах; переложить кафельную плитку (лопнула кафельная плитка);

- в помещении № 1.1.01. - заделать трещины на стенах; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 1.3.02. - установить новую дверь аварийного выхода;

- в помещении № 1.3.04. - заделать трещины на стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 1.3.08. - установить новую дверь аварийного выхода; заделать трещину на стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 1.2.06. - заделать трещину на стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 1.2.07. - заделать трещины на стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 1.4.04. - устранить протечку фасада; заделать трещины на стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 1.4.02. - заделать трещины на стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 1.4.01. - выполнить герметизацию потолочного шва между уличной стеной и потолком; выполнить улучшенную окраску потолка;

- в помещении № 2.6.01. - установить новую дверь аварийного выхода;

- в помещении № 2.6.02. - заделать трещины на стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 2.5.05.- заделать трещины на стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 2.6.07. - заделать трещины на стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 2.5.01. - заделать трещины на стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 2.5.03. - выполнить герметизацию под подоконником; заделать трещины па стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 2.5.04 - заделать трещины па стене; переложить плитку.

- в помещении № 2.5.05 - заделать трещины на стене; переложить плитку;

- в помещении № 2.5.06 - заделать трещины на стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 2.4.01 - заделать трещины на стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 2.4.02 - заделать трещины на стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 2.4.03 - заделать трещины на стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 2.4.06 - заделать сквозную трещину с раздевалкой; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 2.2.01 - заделать трещины на стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 2.2.02 - заделать трещины на стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 2.2.03 - заделать сквозную трещину; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 2.2.05 - выполнить перекладку кафельной плитки;

- в помещении № 2.3.01. - заделать трещины на стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 2.3.02. - заделать трещины на стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 2.6.01 - выполнить работы по ремонту цементной стяжки пола с заменой линолеума; заделать трещины на стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 2.6.05. - заделать трещины на стене, выполнить перекладку кафельной плитки выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 2.7.01 - заделать трещины на стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 2.7.05. - заделать трещины на стене, выполнить перекладку кафельной плитки; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 2.7.06. - заделать трещины на стене, выполнить перекладку кафельной плитки; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 2.7.07 - заделать трещины на стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 1.9. - отрегулировать по всем помещениям пищеблока неплотно прижимающиеся фрамуги окон;

- в помещении № 1.9.10 - выполнить ремонт вытяжной вентиляции; заделать трещины между коридором 1.9.15. - выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 1.9.21. - заделать трещины между коридором 1.9.02 и загрузочным тамбуром 1.9.01. - выполнить улучшенную окраску стен;

- в помещении № 1.9.18 - выполнить перекладку кафельной плитки; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 1.9.09 - заделать трещины по стене с коридором 1.10.04; выполнить улучшенную окраску стены; выполнить перекладку кафельной плитки;

- в помещении № 2.8.02. - устранить горизонтальные трещины (сквозные с групповыми помещениями), устранить трещины на полу в проемах дверей (кафельная плитка треснула), заменить плитку;

- в помещении № 2.8.02 (коридор 2 этажа) - устранить протечки кровли и герметизацию крыши; выполнить улучшенную окраску стен; выполнить перекладку фасадной плитки по периметру здания; выполнить перекладку дорожного покрытия из брусчатки вокруг здания с заменой основания.

Уточнение исковых требований принято арбитражным судом частично, только а части неимущественных требований.

В принятии к рассмотрению требования о взыскании 1 723 477 руб. судом отказано, так как такое дополнение требования противоречило положениям статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Требование о взыскании 1 723 477 руб. не было указано истцом в исковом заявлении, принятом к производству арбитражного суда.

Истцом было заявлено новое требование.

В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

По мнению суда, требование о взыскании денежных средств является самостоятельным, поскольку имеет не только новый предмет иска, но и основание иска.

Поскольку одновременное изменение предмета иска и его основания положениями Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не предусмотрено, суд первой инстанции отказал истцу в дополнении требований по настоящему спору требованием о расторжении договора.

Суд указал истцу на возможность предъявления самостоятельного иска.

Более того, доказательства соблюдения обязательного претензионного порядка урегулирования спора с ответчиком суду не представлены.

Ответчик и третье лицо извещены надлежащим образом о времени и месте судебного заседания  согласно требованиям статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Ответчик отзыв на исковое заявление не представлял, своего представителя в судебные заседания не направлял.

Суд полагает возможным рассмотреть настоящее дело в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по имеющимся в материалах дела доказательствам

Исследовав материалы настоящего дела, оценив собранные по делу доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд установил следующее.

В соответствии с заключенным между истцом и ответчиком муниципальным контрактом № 34/03-02/0145300005214000024-0238349-06 от 02.10.2014 ответчик (подрядчик) обязался выполнить работу по строительству детского сада на 220 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Янино-1.

13.10.2017 выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 47-RU 47504303-68/14-2014.

Согласно пункту 4.2.16 контракта подрядчик обязан обеспечить соответствие объекта (его отдельных частей, установленного оборудования) условиям контракта о качестве в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 3 года с момента ввода объекта в эксплуатацию.

Согласно пункту 1 статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве.

 Как следует из статьи 722 Гражданского кодекса Российской Федерации гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы.

Пунктом 1 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, соразмерного уменьшения установленной за работу цены или возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда.

Согласно пункту 1 статьи 754 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства, в том числе таких, как производственная мощность предприятия.

В соответствии с пунктом 2 статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Данная норма предусматривает презумпцию вины подрядчика за недостатки (дефекты) выполненных работ в пределах гарантийного срока.

Материалами дела подтверждается наличие недостатков выполненных ответчиком работ, выявленных в пределах гарантийного срока.

Вопреки требованиям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательств обратного ответчик суду не представил, как и доказательств того, что возникновение выявленных дефектов связано с обстоятельствами, за которые ответчик ответственности не несет.

Материалами дела подтверждается некачественное выполнение работ.

Оценив с соблюдением положений статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации собранные по делу доказательства и руководствуясь частью 2 статьи 9 и частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Российской Федерации, суд приходит к выводу о наличии в материалах дела достаточных, относимых и допустимых доказательств для удовлетворения требований истца.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

решил:

Обязать общество с ограниченной ответственностью Группа компаний «Строительные технологии комфорта» в течение одного месяца с момента вступления решения суда по делу № А56-89364/2020 в законную силу безвозмездно за свой счет выполнить гарантийные обязательства по муниципальному контракту № 34/03-02/0145300005214000024-0238349-06 от 02.10.2014, согласно Акту № 7.1, а именно:

- в помещении № 1.5.01. - установить новую дверь аварийного выхода, заделать трещину на стене;

- в  помещении № 1.5.03. - заделать трещину на уличной стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 1.5.04. - установить новую дверь аварийного выхода, заделать трещину на стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 1.5.07. - заделать трещины на стенах; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 1.5.06. - заделать трещину; переложить кафельную плитку (отходит) от стены;

- в помещении № 1.5.08. - заделать трещину на стене со стороны буфетной; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 1.1.03. - установить новую дверь аварийного выхода; заделать трещины на стенах; выполнить улучшенную окраску стен;

- в помещении № 1.1.01. - заделать трещины на стенах; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 1.1.02 - заделать трещины на стенах; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 1.1.04 - установить новую дверь аварийного выхода;

- в помещении № 1.1.06 - заделать трещины на стенах; переложить кафельную плитку (лопнула кафельная плитка);

- в помещении № 1.1.01. - заделать трещины на стенах; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 1.3.02. - установить новую дверь аварийного выхода;

- в помещении № 1.3.04. - заделать трещины на стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 1.3.08. - установить новую дверь аварийного выхода; заделать трещину на стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 1.2.06. - заделать трещину на стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 1.2.07. - заделать трещины на стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 1.4.04. - устранить протечку фасада; заделать трещины на стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 1.4.02. - заделать трещины на стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 1.4.01. - выполнить герметизацию потолочного шва между уличной стеной и потолком; выполнить улучшенную окраску потолка;

- в помещении № 2.6.01. - установить новую дверь аварийного выхода;

- в помещении № 2.6.02. - заделать трещины на стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 2.5.05.- заделать трещины на стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 2.6.07. - заделать трещины на стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 2.5.01. - заделать трещины на стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 2.5.03. - выполнить герметизацию под подоконником; заделать трещины па стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 2.5.04 - заделать трещины па стене; переложить плитку.

- в помещении № 2.5.05 - заделать трещины на стене; переложить плитку;

- в помещении № 2.5.06 - заделать трещины на стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 2.4.01 - заделать трещины на стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 2.4.02 - заделать трещины на стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 2.4.03 - заделать трещины на стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 2.4.06 - заделать сквозную трещину с раздевалкой; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 2.2.01 - заделать трещины на стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 2.2.02 - заделать трещины на стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 2.2.03 - заделать сквозную трещину; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 2.2.05 - выполнить перекладку кафельной плитки;

- в помещении № 2.3.01. - заделать трещины на стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 2.3.02. - заделать трещины на стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 2.6.01 - выполнить работы по ремонту цементной стяжки пола с заменой линолеума; заделать трещины на стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 2.6.05. - заделать трещины на стене, выполнить перекладку кафельной плитки выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 2.7.01 - заделать трещины на стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 2.7.05. - заделать трещины на стене, выполнить перекладку кафельной плитки; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 2.7.06. - заделать трещины на стене, выполнить перекладку кафельной плитки; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 2.7.07 - заделать трещины на стене; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 1.9. - отрегулировать по всем помещениям пищеблока неплотно прижимающиеся фрамуги окон;

- в помещении № 1.9.10 - выполнить ремонт вытяжной вентиляции; заделать трещины между коридором 1.9.15. - выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 1.9.21. - заделать трещины между коридором 1.9.02 и загрузочным тамбуром 1.9.01. - выполнить улучшенную окраску стен;

- в помещении № 1.9.18 - выполнить перекладку кафельной плитки; выполнить улучшенную окраску стены;

- в помещении № 1.9.09 - заделать трещины по стене с коридором 1.10.04; выполнить улучшенную окраску стены; выполнить перекладку кафельной плитки;

- в помещении № 2.8.02. - устранить горизонтальные трещины (сквозные с групповыми помещениями), устранить трещины на полу в проемах дверей (кафельная плитка треснула), заменить плитку;

- в помещении № 2.8.02 (коридор 2 этажа) - устранить протечки кровли и герметизацию крыши; выполнить улучшенную окраску стен; выполнить перекладку фасадной плитки по периметру здания; выполнить перекладку дорожного покрытия из брусчатки вокруг здания с заменой основания.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Группа компаний «Строительные технологии комфорта» в пользу муниципального казенного учреждения «Единая служба заказчика» Всеволожского района Ленинградской области 6000 руб. судебных расходов по государственной пошлине.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.

Судья Рагузина П.Н.