АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00, 

 www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А81-9830/2023

г. Салехард

25 сентября 2024 года

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи  Е.В. Антоновой, при ведении протокола судебного заседания секретарем И.А. Севли,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  муниципального казённого учреждения «Управление коммунального заказа»  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью «ПРАЙД» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) о понуждении  к надлежащему исполнению муниципального контракта и взыскании неустойки и  штрафа, с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора Союза «Саморегулируемая  организация «Организация профессиональных участников строительного рынка»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),  

при участии в судебном заседании: от истца – ФИО1, доверенности от 17.07.2024 (диплом), от ответчика - представитель не явился, от третьего лица – представитель не явился, 

руководствуясь требованиями статей 110, 167-171 Арбитражного процессуального  кодекса РФ,  

РЕШИЛ:

исковые требования муниципального казённого учреждения «Управление  коммунального заказа» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПРАЙД» (628260,  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

...>; дата регистрации 13.12.2013; ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу  

 

муниципального казённого учреждения «Управление коммунального заказа» (629601,  Ямало-Ненецкий автономный округ, 

<

...>; дата  регистрации 19.09.2001; ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) неустойку (пени) за  нарушение установленных муниципальным контрактом № 22-44/ЭК от 04.04.2022 на  выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «МБУ ДО «Детская музыкальная  школа» конечных сроков выполнения работ за период с 03.06.2023 по 26.08.2024 в  размере 10 403 632 рублей 48 копеек, штраф за неисполнение обязательств,  предусмотренных муниципальным контрактом № 22-44/ЭК от 04.04.2022 на  выполнение работ по капитальному ремонту объекта: «МБУ ДО «Детская музыкальная  школа» в размере 560 517 рублей 15 копеек. Всего взыскать 10 964 149 рублей  63 копейки.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПРАЙД»  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 77 821 рубля.  

Решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощённого  производства может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого  автономного округа в срок, не превышающий десяти дней со дня его принятия.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного  документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в  соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, что решение, выполненное в форме электронного документа, направляется  лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте  арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в  режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут  быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего  ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или  вручены им под расписку.  

Е.В. Антонова

Судья