АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-6703/19

г. Уфа

30 мая 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена              30.05.2019

Полный текст решения изготовлен                       30.05.2019

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Фазлыевой З.Г., при ведении протокола секретарем судебного заседания Ибрагимовой А.Г., рассмотрев дело по иску

ООО НПФ "ВЕКТОР" (ИНН 0274136290, ОГРН 1090280003263)

к ООО "СМУ "ЭНЕРГОСПЕЦСТРОЙ" (ИНН 0277124461, ОГРН 1120280038207)

о взыскании 776 101 руб. 55 коп. долга, 11 893 руб. 65 коп. пеней

при  участии  в  судебном  заседании: 

от истца – ФИО2 по доверенности  3ДОВ/01/19 от 11.04.2019;

ответчик явку своего представителя  в судебное заседание не обеспечил, извещен по правилам ст.ст. 121-123 АПК РФ, в том числе путем публичного размещения информации на официальном сайте суда в сети Интернет,

        ООО НПФ "ВЕКТОР" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к ООО "СМУ "ЭНЕРГОСПЕЦСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 776 101 руб. 55 коп. долга, 11 893 руб. 65 коп. пеней.

        Ответчик явку представителя в судебное заседание не обеспечил, о времени  и  месте  судебного  разбирательства  извещен надлежаще по адресу:  

<

...> корпус блок 4Б, почтовое отправление  №45097633495078   ответчиком   получено   19.03.2019.

        Согласно статье 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных доказательств, которые арбитражный суд предложил представить лицам, участвующим в деле, а также при неявке истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.

 В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик несет риск наступления последствий за несвоевременное совершение процессуальных  действий.

 В соответствии с п.3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

        Дело рассмотрено  в  отсутствие  представителя  ответчика.

        Исследовав представленные доказательства, суд

                                         УСТАНОВИЛ:

         Предметом    иска   истцом  определено   требование  о взыскании 776 101 руб. 55 коп. основного долга,  11 893 руб. 65 коп. пеней.

         В обоснование  иска  истцом  приведены  следующие  обстоятельства.

 Между Истцом (Подрядчик) и Ответчиком (Заказчик) 10.09.2018г. был заключен  контракт  №Д-2018-92708-СМУ, в соответствии с которым Истец принял на себя обязательство выполнить работы на объекте «21-ИП-111-022880 «СПРС МН Уралсибнефтепровод.Строительство», а Заказчик принял на себя обязательство принять результат выполненных работ и оплатить их стоимость.

Согласно п.п.3.1 - 3.2 контракта  Подрядчик в установленные Контрактом сроки и в счет Контрактной цены выполнит за свой риск, своими силами и силами согласованных Заказчиком Субподрядных организаций, все Работы и услуги в объеме, определённом настоящим Контрактом и Рабочей документацией, и выполнит все иные требования, установленные Контрактом.

В рамках выполнения Работ и услуг по Объекту: 21-ИП-111-022880 «СПРС МП Уралсибнефтепровод. Строительство»   Заказчик поручает, а Подрядчик в счет Контрактной цены в соответствии с требованиями Контракта, Рабочей документацией и Регламентов Основного Заказчика (в том числе с учетом их изменений в период Срока действия Контракта) обязуется осуществить следующее (включая, но не ограничиваясь):

- получение всех необходимых разрешений и допусков к производству Работ в соответствии с условиями Контракта, требованиями Регламентов Основного Заказчика и нормативно-правовых актов Российской Федерации;

- выполнение строительно-монтажных работ, в том числе сооружение/демонтаж Временных зданий и сооружений;

- поставку всех Материалов и Оборудования, необходимых для выполнения Работ и услуг по Контракту (за исключением Материалов и Оборудования, входящих в поставку Заказчика и указанных в Приложении 6);

- приемку, вывоз до мест складирования Материалов и Оборудования поставки Заказчика согласно проекту организации строительства, хранение Материалов и  Оборудования поставки Заказчика на собственных и/или арендованных складам/площадках складирования, вывоз на Объект Материалов и Оборудования поставки Заказчика.

       В соответствии с п.п.6.1.1-6.1.2. контракта Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в сумме 4 486 017,27 руб. (четыре миллионачетыреста восемьдесят шесть тысяч семнадцать рублей 27 копеек), в том числе НДС (18%) - 807 483,10 руб. (восемьсот семь тысяч четыреста восемьдесят три рубля 10 копеек), в следующем порядке:

- Заказчик перечисляет Подрядчику первую часть аванса в сумме 1 495 339,09 руб. (Один миллион четыреста девяносто пять тысяч триста тридцать девять рублей 09 копеек), в том числе НДС (18%) - 269 161,03 руб. (двести шестьдесят девять тысяч сто шестьдесят один рубль 03 копейки), в месяце,согласно Приложению 1, но в любом случае в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты предоставления Подрядчиком Заказчику счета на оплату  на   сумму   первой   части   аванса  в   Соответствии  с Приложением 1 «Распределение  Контрактной цены и График объемов финансирования»;

Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты поступления на расчетный счет первой части аванса предоставляет Заказчику счет-фактуру на сумму первой части аванса.

- Заказчик перечисляет Подрядчику вторую часть аванса в сумме 2 990  78,18 руб. (два миллиона девятьсот девяносто тысяч шестьсот семьдесят восемь рублей 20 копеек), в том числе НДС (18%) - 538 322,07 руб. (пятьсот тридцать восемь тысяч триста двадцать два рубля 07 копеек), в месяце,согласно Приложению 1, но в любом случае в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты предоставления Подрядчиком Заказчику счета на оплату  на  сумму  второй  части  аванса  в  соответствии с  Приложением 1 «РаспределениеКонтрактной цены и График  объемов финансирования»;

Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты поступления на расчетный счет второй части аванса предоставляет Заказчику счет-фактуру на сумму второй части аванса.

Обязательства Заказчика по перечислению авансовых платежей в порядке, предусмотренном пунктом 6.1.1. являются встречными по отношению к обязательству Подрядчика по предоставлению документов,  предусмотренных соответствующими пунктами.

Согласно п.29.15 контракта  в случае, если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные в Статье 6 Контракта, на срок свыше 30 (тридцати) календарных дней, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплатыцени в размере 1/360 двойной ключевой ставки, установленной Банком России на дату предъявления требования от суммы задержанного/просроченного  платежа за каждый день просрочки, но не более 5 % (пяти  процентов) от суммы задержанного/просроченного платежа.

Свои обязательства по вышеуказанному договору Истец выполнил в полном объеме и надлежащим образом.

Так за период с сентября по ноябрь 2018 года Истец выполнил объем работ на общую сумму 1 523 771 руб. 10 коп., что подтверждается  актами о приемке выполненных работ (КС-2) и справками о стоимости выполненных (КС-3).  Подписание сторонами указанных документов означает отсутствие каких-либо разногласий, как по вопросу объема выполненных работ так и по их стоимости.

В рамках договора Ответчик перечисли Истцу аванс в сумме                                747 669 руб. 55 коп., что подтверждается платежным поручением №1155 от 19.09.2018г.

Таким образом, задолженность Ответчика перед Истцом за выполненные работы составляет  776 101 руб. 55 коп. (= 1 523 771 руб. 10 коп. - 747 669 руб. 55 коп.)

Пунктом 6.3. контракта  установлено, что оплата за выполнение работ производится Заказчиком в течение 50 календарных дней с момента подписания соответствующих документов.

Выполнение работ на объекте было завершено 26.11.2016г., следовательно,  оплата должна была быть произведена в срок не позднее 15.01.2019г.

Основанием для возникновения обязательства Заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ Заказчику. Подобной позиции придерживается и судебная практика (п.8 Информационного письма Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от24 января 2000 года № 51).

Пунктом 29.15 договора также установлено, что в случае, если Заказчик нарушил условия оплаты, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пеней в размере 1/360 двойной ключевой ставки, установленной ЦБ РФ за каждый день просрочки.

В целях досудебного урегулирования спора Истец направил в адрес Ответчика претензию (исх. № 57 от 11.02.2019г.) с требованием погасить имеющуюся  задолженность, однако,  задолженность до настоящего времени Ответчиком не погашена.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона либо в соответствии с обычаями делового оборота.

       Исследовав  изложенные обстоятельства дела, оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд приходит к следующему.

Согласно п.1 ст.432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В гл.37 Гражданского кодекса Российской Федерации перечислены разновидности договоров подряда. В частности, в § 1 данной главы перечислены общие положения о договоре подряда, которые должны применяться при заключении договоров данного вида, за теми исключениями, которые характерны для их отдельных видов договоров.

Статьей 702 Гражданского кодекса  Российской Федерации  установлено: по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить ее. В ч.2 данной статьи установлено, что к отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Гражданского кодекса  Российской Федерации  по этим видам договоров.

В силу пункта 1 статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

В соответствии со ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии со ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии со ст.746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором. При отсутствии таких условий  в договоре, оплата производится в соответствии со ст.711 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со ст.753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Истец обязательства по договору исполнил надлежащим образом, что подтверждается представленными в материалы дела актами о приемке выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ и затрат.   

Работы приняты ответчиком  без замечаний относительно объема, сроков, качества и стоимости работ. 

Справки  о стоимости выполненных работ и затрат, акты о приемке выполненных работ содержат подписи представителей сторон, а также информацию об объекте, наименовании и объемах работ, их стоимости. Данные документы подписаны представителями обеих сторон без замечаний и возражений по объемам и стоимости выполненных работ, их качеству, скреплены печатями истца и ответчика, что свидетельствуют о выполнении работ подрядчиком (истцом), принятии их результата заказчиком (ответчиком). 

Факт выполнения истцом работ по договору  подтвержден материалами дела и сторонами не оспаривается. 

Согласно п.1 ст.65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основание своих требований и возражений.

Как определено в статье 9  Федерального закона от 21 ноября 1996 года N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами.

Таким образом, факт исполнения обязательства ответчика перед истцом, в данном случае - факт оплаты должен подтверждаться соответствующими платежными документами бухгалтерского учета, содержащими идентифицирующие признаки хозяйственной операции.

Ответчик не представил суду документов, подтверждающих факт исполнения обязательств перед истцом по оплате выполненных работ.

Аванс в сумме 747 669 руб. 55 коп.  подтверждается платежным поручением №1155 от 19.09.2018г.

Задолженность Ответчика перед Истцом за выполненные работы составляет  776 101 руб. 55 коп. (= 1 523 771 руб. 10 коп. - 747 669 руб. 55 коп.)

        При изложенных обстоятельствах, исковые требования о взыскании 776 101 руб. 55 коп. долга   подлежат  удовлетворению.

 

         В состав материально-правового требования по настоящему делу включено также требование о взыскании с ответчика неустойки за нарушение принятых обязательств.

В силу статей 330, 331 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, которую должник обязан уплатить кредитору в случае ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. 

         Если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода (п. 1 ст. 314 ГК РФ).

 

Согласно п.29.15 контракта  в случае, если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные в Статье 6 Контракта, на срок свыше 30 (тридцати) календарных дней, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплатыцени в размере 1/360 двойной ключевой ставки, установленной Банком России на дату предъявления требования от суммы задержанного/просроченного  платежа за каждый день просрочки, но не более 5 % (пяти  процентов) от суммы задержанного/просроченного платежа.

Размер пеней подлежащих уплате определяется следующим образом:

Количество дней просрочки - 42 (с 15.01.2019г. по 26.02.2019г.)

Сумма основного долга (без НДС) - 657 713 руб. 18 коп.

Двойная ставка рефинансирования ЦБ РФ - 15,5 %

Следовательно,  размер пеней,  подлежащий уплате,   составляет 11 893 руб. (= 657 713 руб. 18 коп. * 15,5% / 360 * 42).

   Поскольку ответчиком не подавалось соответствующее мотивированное заявление о снижении размера неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, не заявлялись возражения относительно чрезмерности суммы неустойки и несоответствия ее размера последствиям неисполнения обязательства, основания для уменьшения неустойки в порядке ст.333 ГК РФ   у суда отсутствуют.

        Таким  образом, подлежит взысканию с ответчика в пользу истца неустойка в размере  11 893 руб. 65 коп. за период с  15.01.2019 по 26.02.2019. 

  В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ООО НПФ "ВЕКТОР" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить.

Взыскать с ООО "СМУ "ЭНЕРГОСПЕЦСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ООО НПФ "ВЕКТОР" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 776 101 руб. 55 коп. сумму основного долга, 11 893 руб. 65 коп. пени, 18 759 руб. 90 коп. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

  Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

  Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

   Судья З.Г. Фазлыева