1 2111264_6664499  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

Резолютивная часть

Дело № А07-41223/2022

г. Уфа

21 августа 2023 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Кузнецова Д.П., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Администрации  муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  "Уфимская газовая компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании  предоставить исполнительную документацию по выполненному и оплаченному объему  работ на сумму 70 121 409,74 рублей, взыскании штрафа в размере 3 049 801 руб. 12 коп.  

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования Администрации муниципального района Альшеевский район  Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить  частично.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Уфимская газовая компания"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) предоставить Администрации муниципального  района Альшеевский район Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) исполнительную документацию по выполненному и оплаченному объему  работ на сумму 70 121 409,74 рублей:  

1) перечень организаций, участвовавших в строительстве Объекта, с указанием  видов выполненных ими работ, реквизитов, лицензий либо свидетельств на право их  производства и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно  ответственных за выполнение этих работ;  

2) ведомость проведенных контрольных измерений и испытаний, характеризующих  качество строительных работ;  

3) гарантийный паспорт установленного образца; 

4) комплект исполнительной документации в соответствии со СНИП III (Приемка  работ);  

5) справка об устранении недоделок, выявленных рабочей комиссией; 

6) фотоматериалы на бумажном носителе и в электронном виде и в объеме не менее  трёх фотографий во время производства работ (с основными технологическими  операциями);  

7) сертификаты соответствия, паспорта и другие документы, подтверждающие  

качество материалов, которые используются при производстве работ, оборудования и  

комплектующих изделий, использованных при производстве работ; 

8) паспорта приборов учета ресурсов, подтверждающих дату выпуска не ранее года  

их монтажа; 9) акт геодезической разбивки; 10) общий журнал производства работ; 11) акты освидетельствования скрытых работ с приложениями; 

12) акты промежуточной приемки ответственных конструкций с приложениями (при  

необходимости); 

13) протоколы лабораторных испытаний, паспорта, сертификаты соответствия,  

санитарно-эпидемиологические заключения на применяемые строительные материалы и  

конструкции; 14) исполнительные схемы; 

15) протоколы испытаний трубопроводов, проб образцов бетонных смесей;  16) журнал входного контроля качества материалов и конструкций;  

17) акты уплотнения грунтов, основания; 18) опись исполнительной документации. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Уфимская газовая  

компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Администрации  

муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) штраф в размере 3 049 801 руб. 12 коп.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  

ходатайству взыскателя. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Уфимская газовая  

компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета  

сумму государственной пошлины в размере 40 049 рублей 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный  

суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме)  

через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы  

можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда  

www.18aas.arbitr.ru. 

Судья Д.П. Кузнецов