54_3788447  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации резолютивная часть Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-5669/2021

г. Белгород

18 августа 2022 года

Арбитражный суд Белгородской области  

в составе судьи Ивановой Л. Л. 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи  помощником судьи Котенко Е.В.  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "СК  "ВОСХОД" (ИНН 

<

***>, ОГРН

<

***>)  

к ФОНДУ ЖКХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  третьи лица: ООО «Эра-КапиталСтрой», ООО «СМУ-7»  

об обязании устранить недостатки капитального ремонта, при участии в судебном заседании: от истца: представитель ФИО1, по доверенности № 1/2021 от 12.03.2021 г., от ответчика: представитель ФИО2, по доверенности № 4 от 11.01.2021 г., от третьих лиц: не явился, извещен, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1.Исковые требования ООО "СК "ВОСХОД" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) удовлетворить.  

 2. Обязать ФОНД ЖКХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в течение 3-х месяцев с момента вступления в законную силу устранить  следующие недостатки выполненных работ по капитальному ремонту кровли МКД по  адресу 

<

...> и 

<

...>:  

 - выполнить работы по полной замене кровельного покрытия.  

 3. Обязать ФОНД ЖКХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в течение 3-х месяцев с момента вступления в законную силу устранить  следующие недостатки выполненных работ по капитальному ремонту МКД по адресу  

<

...>:  

- выполнить пандусы в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012  Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (п.4.1.14,  п.4.1.15, п.5.13, п. 5.2.15);  

- заменить навес над ступенями крылец 1-го и 2-го подъездов посредством его  увеличения на 1 метр;  

- установить водосточную систему (водосток) для отвода воды от площадки и  ступеней 1-го и 2 -го подъездов;  

- произвести замену поручней входных групп 1-го и 2-го подъездов с установкой  накладок на поручни;  

- произвести ремонт ступеней 1-го и 2-го подъездов с заменой бетонного  основания и укладкой повторно тротуарной плитки.  

4.Взыскать с ФОНДА ЖКХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в пользу ООО "СК "ВОСХОД" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) 25 000 руб. 00 коп. расходов на оплату судебной экспертизы и 6 000 руб.  00 коп. расходов на оплату государственной пошлины.  

5.Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.  

Судья Иванова Л. Л.