100217_2697911  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

№ А74-2943/2023

29 ноября 2023 года

г. Абакан

 

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи С.М. Тропиной, при ведении  протоколирования с использованием средств аудиозаписи и составлении протокола  секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрел в открытом судебном  заседании дело по исковому заявлению государственного казённого учреждения Республики  Хакасия «Управление капитального строительства» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная  фирма» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 93 623 руб. 31 коп. неустойки  за нарушение срока окончания работ по государственному контракту от 01.03.2022   № 2022.03.  

Руководствуясь статьями 110, 169-171, 176, 180, 319 Арбитражного процессуального  кодекса РФ, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

1. Иск удовлетворить частично: взыскать с общества с ограниченной  ответственностью «Ремонтно-строительная фирма» в пользу государственного казённого  учреждения Республики Хакасия «Управление капитального строительства» 84 260  (восемьдесят четыре тысячи двести шестьдесят) руб. 98 коп. неустойки за нарушение срока  окончания работ по государственному контракту от 01.03.2022 № 2022.03 за период с  21.12.2022 по 29.12.2022, а также 3 370 (три тысячи триста семьдесят) руб. 50 коп. расходов  по уплате государственной пошлины.  

Отказать в удовлетворении остальной части иска. 

2. Возвратить государственному казённому учреждению Республики Хакасия  «Управление капитального строительства» из федерального бюджета 4 605 (четыре тысячи  шестьсот пять) руб. государственной пошлины, уплаченной платежным поручением от  27.04.2023 № 70794.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный  апелляционный суд в месячный срок с момента его принятия.  

Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия. 

Судья С.М. Тропина