АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

153022, г. Иваново, ул. Б. Хмельницкого, 59-Б

http://ivanovo.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

 

Дело № А17-3575/2024

г. Иваново

06 августа 2024 года

Решение путем подписания резолютивной части решения принято 09 июля 2024 года.

 

Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Удальцовой О.Ю., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Энергосистема» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) о взыскании 965 386 руб. 50 коп.,

установил:

некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области» (далее - Истец, Фонд, Заказчик) обратилось в Арбитражный суд Ивановской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Энергосистема» (далее - Ответчик, Общество, Подрядчик) о взыскании 965 386 руб. 50 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договорам оказания услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов №272/2023 от 03.03.2023, №273/2023 от 03.03.2023, №286/2023 от 10.05.2023, №292/2023 от 13.07.2023 (далее - Договоры). Исковые требования основаны на положениях статей 12, 307, 309, 708 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы несвоевременным исполнением Ответчиком принятого на себя обязательств по выполнению работ.

Определением от 23.04.2024 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства. С ходатайством от 20.05.2024 Фонд представил дополнительные документы. Общество отзыв на исковое заявление не представило. Определением от 21.06.2024 продлен процессуальный срок для представления документов, участвующие в деле лица вызваны в судебное заседание, предложено представить дополнительные пояснения и документы. От Истца поступили письменные пояснения от 09.07.2024. От Ответчика отзыва на исковое заявление не поступило. Лица, участвующие в деле, в судебное заседание 09.07.2024 явку представителей не обеспечили. В порядке главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судом без вызова сторон, после истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и иных документов. Решение принято 09.07.2024 путем подписания резолютивной части решения. Ответчик 01.08.2024 подал апелляционную жалобу, что в силу положений части 2 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правовой позиции, изложенной в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №1, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 10.06.2020 (Разъяснения по вопросам, возникающим в судебной практике - ответ на вопрос №1), влечет необходимость составить мотивированное решение.

Ознакомившись с представленными по делу документами, арбитражный суд установил, что Фонд (Заказчик) и Общество (Подрядчик) заключили Договоры, по условиям которого первый поручает, а второй принимает на себя следующие обязательства: оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, в соответствии с Перечнем объектов капитального ремонта - Приложение №1 к настоящему договору; оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов по Объектам, указанным в Приложении №1 к настоящему Договору, в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком проектной и (или) сметной документацией, а равно выполнение работ в соответствии с переданной Заказчиком Подрядчику проектной (при наличии) и (или) сметной документацией (при наличии) (пункт 2.1 Договоров).

Приложением №1 к договору №292/2023 сторонами согласованы перечень объектов капитального ремонта: Родниковский муниципальный район, улица Кирова, 4, 8; улица 8 Марта, 1; улица Комсомольская, 1; улица Центральная, 4, микрорайон Шагова, 4; микрорайон 60 лет Октября, 5; вид работ: капитальный ремонт крыши и стоимость выполнения работ.

Дополнительным соглашением к Договору №292/2023 от 31.07.2023 Заказчик и Подрядчик заключили соглашение о том, что с даты подписания дополнительного соглашения приостановлены сроки выполнения работ по капитальному ремонту крыши в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: 

<

...>, до уведомления Заказчиком.

Приложением №1 к договору №286/2023 сторонами согласованы перечень объектов капитального ремонта: городской округ Иваново, улица Рабфаковская, 8к7, улица Собинова, 61; улица Пятой Ударной Армии, 2кр7; улица 2-я Чайковская, 24; улица 2-я Лагерная, 42; проспект Строителей, 120; городской округ Шуя, переулок 5-й Лежневский, 4; 

<

...>; Родниковский муниципальный район, улица Невская, 13; Комсомольский муниципальный район, улица Свердлова, 11; вид работ: капитальный ремонт крыши и стоимость выполнения работ.

Приложением №1 к договору №273/2023 сторонами согласованы перечень объектов капитального ремонта: Приволжский муниципальный район, улица Дружбы, 7; улица Льнянщиков, 19; улица Революционная, 112; Фурмановский муниципальный район, улица Хлебникова, 2; улица Крестьянская, 7; вид работ: капитальный ремонт крыши и стоимость выполнения работ.

Дополнительным соглашением №1 к Договору подряда №273/2023 от 03.03.2023 Заказчик и Подрядчик заключили соглашение о том, что в связи с неблагоприятными погодными условиями для проведения работ по капитальному ремонту мягкой кровли, Стороны приняли решение приостановить сроки выполнения работ до момента уведомления Заказчиком.

Дополнительным соглашением к Договору №273/2023 от 23.10.2023 Заказчик и Подрядчик заключили соглашение о том, что в связи с разрешением обстоятельств об обеспечении допуска на объект для производства работ по техническому обследованию и выполнению строительно-монтажных работ по капитальному ремонту крыши многоквартирных домов продлить сроки выполнения работ по Договору в отношении многоквартирных домов, расположенных по адресам: 

<

...> 

<

...>, с даты подписания настоящего дополнительного соглашения на 35 (тридцать пять) календарных дней.

Приложением №1 к договору №272/2023 сторонами согласованы перечень объектов капитального ремонта: городской округ Иваново, улица Ташкентская, 79; городской округ Кохма, улица Владимирская, 26; улица Кочетовой, 42; городской округ Вичуга, улица Филипенсковская, 6; улица Володарского, 104; вид работ: капитальный ремонт фасада и стоимость выполнения работ.

Дополнительным соглашением к Договору №272/2023 от 17.10.2023 Заказчик и Подрядчик заключили соглашение о том, что в связи с разрешением обстоятельств об обеспечении допуска на объект для производства работ по техническому обследованию и выполнению строительно-монтажных работ по капитальному ремонту крыши многоквартирных домов продлить сроки выполнения работ по Договору в отношении многоквартирных домов, расположенных по адресам: 

<

...>; 

<

...>, с даты подписания настоящего дополнительного соглашения на 35 (тридцать пять) календарных дней.

Срок начала работ по договору №292/2023: с момента заключения Договора, 13 июля 2023 года (пункт 3.1 Договора №292/2023).

Срок окончания выполнения работ: не позднее 80 (восьмидесяти) календарных дней с момента начала выполнения работ по Договору. При этом Подрядчик обязуется соблюдать сроки окончания отдельных этапов работы определенные планом-графиком оказания услуг (Приложение №3) и Графиком производства строительно-монтажных работ (Приложение №4), утвержденным в соответствии положениями Договора и являющимся его неотъемлемой частью (пункт 3.2 Договора).

Предельные сроки начала и завершения Подрядчиком работ на оказание услуг и(или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов определяются Приложением №4 к настоящему Договору (пункт 3.5 Договора).

Срок начала работ по договору №286/2023: с момента заключения Договора, 10 мая 2023 года (пункт 3.1 Договора №286/2023); по договору №273/2023 от 03.03.2023 - с момента заключения Договора, 03.03.2023 (пункт 3.1. Договора №273/2023), по договору №272/2023 от 03.03.2023 – с момента заключения Договора, 03.03.2023 (пункт 3.1. Договора №272/2023).

Срок окончания выполнения работ: не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента начала выполнения работ по Договору. При этом Подрядчик обязуется соблюдать сроки окончания отдельных этапов работы определенные планом-графиком оказания услуг (Приложение №3) и Графиком производства строительно-монтажных работ (Приложение №4), утвержденным в соответствии положениями Договора и являющимся его неотъемлемой частью (пункт 3.2 Договоров №286/2023, №273/2023, №272/2023).

Передача Заказчику результатов выполненных работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов осуществляется по Акту КС-2 и составлением Подрядчиком справки КС-3. Акт приемки работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов КС-2 кроме подрядчика и Заказчика должен быть утвержден комиссией, созданной в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – Комиссия), и согласованного в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации (пункт 8.1.2 Договоров). 

Приемка выполненных работ производится после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной (проектной - при наличии) документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с требованиями настоящего договора. Приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), утвержденному Заказчиком и уведомленными Заказчиком и присутствующими на приемке членами Комиссии (пункт 8.2.1 Договоров).

За невыполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, сроков выполнения работ, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе сверх возмещения убытков потребовать у Подрядчика уплаты неустойки в размере 1/130 (одной сто тридцатой) действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банк Российской Федерации от стоимости работ (этапов работ) по каждому из объектов указанной в Приложении №1 к Договору по каждому типу выполняемых работ, по которому Подрядчиком допущено невыполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, сроков выполнения работ за каждый день просрочки неисполненного обязательства, начиная со дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, включая срок исполнения его этапа (пункт 12.4 Договоров).

Для приемки выполненных работ Подрядчик оформил акты о приемке выполненных работ формы №КС-2 от 21.11.2023 по многоквартирному жилому дому №4 по улице Кирова, №8 по улице Кирова, №1 по улице 8 Марта, №1 по улице Комсомольская, от 05.12.2023 дому №5 микрорайона 60 лет Октября, от 24.11.2023 дому №4 по улице Центральная Родниковского муниципального района, от 01.12.2024 дому №8к7 по улице Рабфаковская городского округа Иваново, от 07.12.2024 дому №2 по улице Хлебникова Фурмановского муниципального района, от 23.11.2023 дому №19 улице Льнянщиков Приволжского муниципального района, от 01.12.2023 дому №26 по улице Владимирская городского округа Кохма, от 01.12.2023 дому №79 по улице Ташкентская городского округа Иваново, и справки формы №КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат от указанных дат.

Помимо указанных документов контрагентами подписаны комиссионные, в составе представителей Заказчика, Подрядчика, организации, осуществляющей строительный контроль, органа местного самоуправления, Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области, организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, и представителей собственников помещений многоквартирных домов, акты приемки выполненных работ от 27.10.2023 по многоквартирному жилому дому №4 по улице Кирова, дому №8 по улице Кирова, дому №1 по улице 8 Марта, дому №1 по улице Комсомольская, от 28.11.2023 дому №5 микрорайона 60 лет Октября, от 10.11.2023 дому №4 по улице Центральная, от 17.11.2023 дому №8 корпус 7 по улице Рабфаковская, от 29.11.2023 дому №2 по улице Хлебникова, от 13.11.2023 дому №19 по улице Льнянщиков, от 17.11.2023 дому №26 по улице Владимирская, от 20.11.2023 дому №79 по улице Ташкентская; комиссиями сделаны заключения, что замечания и недостатки по капитальному ремонту со стороны приемной комиссии отсутствуют, капитальный ремонт фасада приемной комиссией принят в полном объеме. 

Соответствующими платежными поручениями Заказчик оплатил Подрядчику стоимость выполненных работ.

Полагая, что работы по Договорам выполнены с просрочкой, Фонд первоначально претензиями от 13.12.2023 №3516 и от 30.11.2023 за №3387 предложил Обществу уплатить неустойку за ненадлежащее исполнение обязательства, затем, не получив какого-либо ответа и оплаты обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании 965 386 руб. 50 коп. санкций.

Оценив вышеизложенные обстоятельства, арбитражный суд принял судебный акт исходя из следующего.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства возникают, в том числе из договоров.

Обязательство Ответчика по оплате выполненных работ основано на Контракте. Сведений о признании его незаключенным или недействительным в установленном законом порядке суду не представлено. 

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором (пункты 1 и 2 статьи 708 указанного Кодекса).

В рассматриваемых отношениях пунктами 3.1, 3.2 договору №272/2023 срок начала работ: с момента заключения Договора - 03.03.2023 - и срок окончания выполнения работ - не позднее 180 календарных дней с момента начала выполнения работ по Договору; дополнительным соглашением от 03.03.2023 работы приостановлены до 04.04.2023 (уведомление истца от 04.04.2023) сроком на 32 дня; дополнительным соглашением от 17.10.2023 работы по договору продлены на 35 дней. Таким образом, последний срок выполнения работ приходился на 05.11.2023.

По договору №273/2023 срок начала работ: с момента заключения Договора - 03.03.2023 - и срок окончания выполнения работ - не позднее 180 календарных дней с момента начала выполнения работ по Договору; дополнительным соглашением от 03.03.2023 работы приостановлены до 04.04.2023 (уведомление истца от 04.04.2023) сроком на 32 дня; дополнительным соглашением от 23.10.2023 работы по договору продлены на 35 дней. Таким образом, последний срок выполнения работ приходился на 05.11.2023.

По договора №286/2023 установлен срок начала работ: с момента заключения Договора - 10.05.2023 - и срок окончания выполнения работ - не позднее 180 календарных дней с момента начала выполнения работ по Договору. Таким образом, последний срок выполнения работ приходился на 06.11.2023.

По договору №292/2023 срок начала работ: с момента заключения Договора - 13.07.2023 - и срок окончания выполнения работ - не позднее 80 календарных дней с момента начала выполнения работ по Договору. Таким образом, с учетом установленных Договорами сроков, последний срок выполнения работ приходился на 01.10.2023. В отношении дома №4 по улице Центральная деревни Малышево: с учетом дополнительного соглашения от 31.07.2023 и уведомления от 18.08.2023 - период приостановки выполнения работ составил - 18 дней; согласно уведомлению от 18.08.2023 Подрядчик обязан был возобновить выполнение работ в течение трех дней, то есть с 23.08.2023, работы должны быть завершены не позднее 24.10.2023. 

В статьях 307, 309, 310, 314 Гражданского кодекса Российской Федерации отражено, что в договорном обязательстве должник обязан совершить в пользу кредитора определенное действие, а кредитор вправе требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с его условиями, требованиями закона, иных правовых актов, в том числе, в предусмотренный обязательством или законом срок либо в разумный срок. Односторонний отказ от исполнения обязательства недопустим, за исключением предусмотренных законом случаев. 

Суд отмечает, что разрешение спора производится судом путем сопоставления и анализа представленных сторонами доказательств, поэтому на результат рассмотрения дела влияет процессуальное поведение сторон в процессе. В силу действующих процессуальных норм арбитражный процесс осуществляется на основе состязательности и равенства сторон, при этом каждая из сторон в обоснование своей процессуальной позиции предоставляет доказательства. Бремя доказывания тех или иных фактов, установленное статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, возлагается на ту сторону спора, которая имеет для этого объективные возможности и, исходя из особенностей рассматриваемых правоотношений, обязана представлять соответствующие доказательства в обоснование своих требований и возражений.

Факт выполнения работ по Договорам подтверждается двухсторонними актами о приемке выполненных работ. 

Как указал Истец, работы выполнены Ответчиком с нарушением установленного Договорами срока, а именно: 27.10.2023 по домам №№4,8 по улице Кирова, по дому №1 по улице 8 Марта, по дому №1 по улице Комсомольская, 28.11.2023 по дому №5 микрорайона 60 лет Октября, 10.11.2023 по дому №4 по улице Центральная, 17.11.2023 по дому №8к7 по улице Рабфаковская, 29.11.2023 по дому №2 по улице Хлебникова, 13.11.2023 по дому №19 по улице Льнянщиков, 17.11.2023 по дому №26 по улице Владимирская, по дому №79 по улице Ташкентская, что подтверждается актами приемки выполненных работ. 

Нарушение Обществом срока выполнения работ в рамках Договоров Ответчиком по существу не оспаривается. Спор в части сроков сдачи работ между сторонами отсутствует.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательства может обеспечиваться неустойкой. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В пункте 60 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности при просрочке исполнения, законом или договором может быть предусмотрена обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму (неустойку), размер которой может быть установлен в твердой сумме - штраф или в виде периодически начисляемого платежа - пени (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В пунктах 12.4 Договоров стороны согласовали, что за невыполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, сроков выполнения работ, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе сверх возмещения убытков потребовать у Подрядчика уплаты неустойки в размере 1/130 (одной сто тридцатой) действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банк Российской Федерации от стоимости работ (этапов работ) по каждому из объектов указанной в Приложении №1 к Договору по каждому типу выполняемых работ, по которому Подрядчиком допущено невыполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, сроков выполнения работ за каждый день просрочки неисполненного обязательства, начиная со дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, включая срок исполнения его этапа.

Поскольку работы выполнены Ответчиком с нарушением срока, предусмотренного условиями Договоров, Истец обоснованно предъявил к своему контрагенту требование о взыскании неустойки.

По расчету Фонда размер неустойки составил 965 386 руб. 50 коп. Период начисления пени, ставка Обществом не оспорены. Расчет санкций судом проверен, признан обоснованным и арифметически верным.

Поскольку представленными в материалы дела документами подтвержден факт несвоевременного исполнения обязательства по выполнению работ, а также учитывая, что доказательств оплаты истребуемой суммы неустойки Ответчиком суду не представлено, исковые требования подлежат удовлетворению.

По результатам рассмотрения спора судебные расходы Истца по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на Ответчика

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Энергосистема» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 965 386 руб. 50 коп. неустойки за период с 02.10.2023 по 17.11.2023 за нарушение сроков выполнения работ по договорам оказания услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов №272/2023 от 03.03.2023, №273/2023 от 03.03.2023, №286/2023 от 10.05.2023, №292/2023 от 13.07.2023 и 22 308 руб. судебных расходов.

Возвратить некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) из федерального бюджета 944 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению №1561 от 28.03.2024 на 23 252 руб.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Исполнительный лист подлежит выдаче после вступления решения суда в законную силу по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. До вступления решения в законную силу исполнительный лист выдается по заявлению взыскателя.

В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении пятнадцатидневного срока, установленного для подачи апелляционной жалобы.

Решение (резолютивная часть), выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, в соответствии со статьями 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Решение арбитражного суда первой инстанции, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в Арбитражный суд Волго-Вятского округа по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области.

Пересмотр в порядке кассационного производства решения арбитражного суда в Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации производится в порядке и сроки, предусмотренные статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Кассационная жалоба в этом случае подается непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации.

 

Судья                                                                                                      Удальцова О.Ю.