Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-35895/2020

28 сентября 2020 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  10 сентября 2020 года.

Полный текст решения изготовлен  28 сентября 2020 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи Сергеевой О.Н. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "БАЗИС" (адрес:  Россия 199106, Санкт-Петербург, линия 26-я В.О., дом 5 корпус 4 лит д, ОГРН: 

<

***>);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ПЕТРОБАЛТ" (адрес:  Россия 199106, Санкт-Петербург, ул КАРТАШИХИНА, ДОМ 1-3, ЛИТЕР А, КАБИНЕТ 306, ОГРН: 

<

***>);

третье лицо:  

о взыскании 2 341 280 руб. 65 коп. 

при участии

- от истца: Медик О.С. по доверенности от 09.07.2019

- от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом 

установил:

ООО "БАЗИС" предъявило иск о взыскании с ООО ПКБ "ПЕТРОБАЛТ" 2 341 280 руб. 65 коп. задолженности по оплате выполненных работ на основании договоров №171002-01 от 02.10.17, №1/01-2019 от 08.05.19, 171101-01 от 01.11.17 и 190606-01от 08.07.19.

Ответчик отзыв не представил.

Дело рассматривается без участия ответчика на основании ст. 156 АПК РФ.

Судом установлено:

Между ООО "БАЗИС" (Истец) и ООО ПКБ "ПЕТРОБАЛТ" (Ответчик) был заключён договор №171002-01 от 02 октября 2017г. В соответствии с которым ООО "БАЗИС" выступил «Исполнителем», а ООО ПКБ "ПЕТРОБАЛТ" «Заказчиком». 

Согласно пункту 1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по техническому сопровождению рабочей конструкторской документации (РКД) по электротехнической специализации ледокола проекта 22600 в объеме магистральных чертежей, чертежей установки электрооборудования и прокладки кабеля 1,2,3,4,5,6 и 7 строительных районов в процессе строительства, а Заказчик обязуется оплатить указанные работы. 

За выполнение работ по Договору, Заказчик ежемесячно перечисляет Исполнителю 320000,00руб., включая НДС (18%) - 48 813,56 рублей. (пункт 2.1.) Оплата выполненных работ Исполнителя производится Заказчиком ежемесячно на основании Акта сдачи-приемки с приложением Перечня выполненных в отчетном месяце работ, подписанных Заказчиком и Исполнителем, а также счета и счета - фактуры Исполнителя, в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Акта сдачи- приемки. (пункт 3.1.) 

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2019 г. (пункт 4.1.) 

Во исполнение договора №171002-01 от 02 октября 2017г. Исполнитель осуществлял работы по техническому сопровождению рабочей конструкторской документации (РКД) по электротехнической специализации ледокола проекта 22600 в объеме магистральных чертежей, чертежей установки электрооборудования и прокладки кабеля 1,2,3,4,5,6 и 7 строительных районов в процессе строительства. 

Работы в соответствии с договором выполнены в полном объёме.  Между ООО "БАЗИС" (Истец) и ООО ПКБ "ПЕТРОБАЛТ" (Ответчик) подписаны Акты сдачи - приёмки выполненных работ № 4 от 31.01.2019г., № 24 от 28.02.2019г., №41 от 31.03.2019г., №56 от 30.04.2019г., № 75 от 31.05.2019г., №88 от 30.06.2019г., № 101 от 31.07.2019г., №114 от 31.08.2019г., №124 от 30.09.2019г., №134 от 31.10.2019г., №147 от 30.11.2019г., №156 от 31.12.2019г. 

Таким образом, ООО "БАЗИС" (Истец) выполнил взятые на себя по договору №171002-01 от 02 октября 2017г. обязательства в полном объёме в отличии от ООО ПКБ "ПЕТРОБАЛТ" (Ответчик), который работы принял однако оплату не осуществил в полном объёме, осуществив оплату 01.03.2019г. в сумме 960 000 руб., 21.03.2019г. в сумме 320 000 руб., 08.04.2019г. в сумме 320 000 руб., 01.08.2019г. в сумме 320 000 руб., 04.10.2019г. в сумме 320 000 руб., 25.10.2019г. в сумме 150 000 руб., 06.11.2019г. в сумме 1 000 000 руб., 23.12.2019г. в сумме 666 798,64 руб., 19.02.2020г. в сумме 320 000 руб., 25.03.2020г. в сумме 800 000 руб. Задолженность ООО ПКБ "ПЕТРОБАЛТ" (Ответчик) перед ООО "БАЗИС" (Истец) по договору №171002-01 от 02 октября 2017г. составляет 583 201,36 руб. 

Также между ООО "БАЗИС" (Истец) и ООО ПКБ "ПЕТРОБАЛТ" (Ответчик) был заключён договор №1/01-2019 от 08 мая 2019г. В соответствии с которым ООО "БАЗИС" выступил «Исполнителем», а ООО ПКБ "ПЕТРОБАЛТ" «Заказчиком». 

Согласно пункта 1.1. договора Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется произвести работу по оформлению рабочей конструкторской документации (далее - РКД) по установке электрооборудования и прокладке кабеля на судне проекта 17041 (ST116XE) строящегося на ПАО "Выборгский судостроительный завод" (завод-строитель), выполненную по Договору в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы. Исполнитель обязуется осуществлять в процессе строительства головного судна, без изменения стоимости договора, корректировку выпущенного РКД в случаях выявления ошибок. 

Стоимость работ по оформлению Документации определяется Протоколом согласования цены (Приложение №5 к Договору) в соответствии с Калькуляциями статей затрат (Приложение №4 к Договору) и составляет 2 537 044,84 руб. (два миллиона пятьсот тридцать семь тысяч сорок четыре руб. 84 коп.), в том числе НДС 20% - 422 840,81 рублей. (пункт 2.1. договора) 

Оплата работ производится Заказчиком поэтапно в соответствии с Ведомостью исполнения (Приложение №3 к Договору) на основании двухсторонних Актов сдачи-приемки работ этапа, счетов, выставленных Исполнителем, путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Исполнителя. (пункт 2.2. договора) Порядок оплаты: Заказчик, в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней с даты подписания настоящего Договора, перечисляет аванс Исполнителю в размере 750 000,00 руб. (семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 20% - 125 000,00 рублей. (пункт 2.3.1. договора ) 

Погашение аванса производится пропорционально последующим этапам оплат, предусмотренных настоящим Договором. (пункт 2.3.2.) Окончательная оплата работ производится Заказчиком поэтапно на основании счетов, выставленных Исполнителем согласно Ведомости исполнения (Приложение №3 к Договору), в срок не позднее 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ. (пункт 2.3.3.) 

Во исполнение договора №1/01-2019 от 08 мая 2019 исполнитель произвел работы по оформлению рабочей конструкторской документации (далее - РКД) по установке электрооборудования и прокладке кабеля на судне проекта 17041 (ST116XE) строящегося на ПАО "Выборгский судостроительный завод" (завод-строитель), выполняя по Договору в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к настоящему Договору). В объёме работ определённом Техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к настоящему Договору). Работы в соответствии с договором выполнены в полном объёме.  Между ООО "БАЗИС" (Истец) и ООО ПКБ "ПЕТРОБАЛТ" (Ответчик) подписаны Акты сдачи - приёмки выполненных работ № 90 от 05.07.2019г., № 110 от 30.08.2019г., №162 от 30.12.2019г. 

Таким образом, ООО "БАЗИС" (Истец) выполнил взятые на себя по договору №1/01-2019 от 08 мая 2019г. обязательства в полном объёме в отличии от ООО ПКБ "ПЕТРОБАЛТ" (Ответчик) который работы принял однако оплату не осуществил в полном объёме, осуществив оплату 20.01.2020г. в сумме 1 259 221,80 руб. Задолженность ООО ПКБ "ПЕТРОБАЛТ" (Ответчик) перед ООО "БАЗИС" (Истец) по договору №1/01-2019 от 08 мая 2019г. составляет 959 984,77 руб. 

Также между ООО "БАЗИС" (Истец) и ООО ПКБ "ПЕТРОБАЛТ" (Ответчик) был заключён договор №171101-01 от 01 ноября 2017г. В соответствии, с которым ООО "БАЗИС" выступил «Исполнителем», а ООО ПКБ "ПЕТРОБАЛТ" «Заказчиком». Согласно пункта 1.1. договора Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется произвести работу по оформлению трехмерной модели трасс магистральных кабелей, а так же разработке схемы магистральных трасс Э7 и чертежей установки магистральных трасс в 1, 2, 3, 4, 5 и 6 строительных районах судна проекта ST116 в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к настоящему Договору). 

Стоимость работ по оформлению Документации определяется Протоколом согласования цены (Приложение №4) в соответствии с Калькуляцией статей затрат (Приложение №5) составляет 1 208 446,46 руб. (один миллион двести восемь тысяч четыреста сорок шесть рублей 46 копеек), в том числе НДС 18% - 184 339,29 рублей. (пункт 2.1. договора) Оплата работ производится Заказчиком поэтапно в соответствии с Ведомостью исполнения (Приложение №3 к Договору) на основании счетов, выставленных Исполнителем, путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Исполнителя. (пункт 2.2. договора) 

Порядок оплаты: Заказчик, в срок не позднее пяти банковских дней с даты подписания настоящего Договора перечисляет аванс Исполнителю в размере 240 000,00 руб. (двести сорок тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 36 610,17 рублей. (пункт 2.3.1. договора) Погашение аванса производится пропорционально последующим этапам оплат, предусмотренных настоящим Договором. (пункт 2.3.2. договора) Окончательная оплата работ производится Заказчиком поэтапно в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ по этапу. (пункт 2.3.3. договора) Во исполнение договора №171101-01 от 01 ноября 2017г. 

Исполнитель выполнил работы по оформлению трехмерной модели трасс магистральных кабелей, а так же разработке схемы магистральных трасс Э7 и чертежей установки магистральных трасс в 1, 2, 3, 4, 5 и 6 строительных районах судна проекта ST116 в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к настоящему Договору). Работы в соответствии с договором выполнены в полном объёме.  Между ООО "БАЗИС" (Истец) и ООО ПКБ "ПЕТРОБАЛТ" (Ответчик) подписаны Акты сдачи - приёмки выполненных работ № 22 от 30.05.2019г., № 111 от 30.08.2019г. 

Таким образом, ООО "БАЗИС" (Истец) выполнил взятые на себя по договору №171101-01 от 01 ноября 2017г. обязательства в полном объёме в отличии от ООО ПКБ "ПЕТРОБАЛТ" (Ответчик) который работы принял однако оплату не осуществил в полном объёме, осуществив оплату в сумме 240 000 руб. Задолженность ООО ПКБ "ПЕТРОБАЛТ" (Ответчик) перед ООО "БАЗИС" (Истец) по договору №171101-01 от 01 ноября 2017г. составляет 498 094,52 руб. 

Также между ООО "БАЗИС" (Истец) и ООО ПКБ "ПЕТРОБАЛТ" (Ответчик) был заключён договор №190606-01 от 08 июля 2019г. 

В соответствии с которым ООО "БАЗИС" выступил «Исполнителем», а ООО ПКБ "ПЕТРОБАЛТ" «Заказчиком». Согласно пункта 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется произвести работу по корректировке проектной документации судна в постройке (далее ПДСП) для строительства промыслового судна ярусного лова краба проекта 03070 заказ № 403 (далее Судно) по электротехнической части по результатам разработки рабочей конструкторской документации (далее - РКД). 

Стоимость работ по корректировке ПДСП составляет 300 000,00 руб. (триста тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 20% - 50 000,00 рублей. (пункт 2.1. договора) Оплата работ производится Заказчиком авансовым платежом на счет Исполнителя в срок не позднее 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания настоящего Договора. (пункт 2.2. договора) 

Во исполнение договора №190606-01 от 08 июля 2019г. Исполнитель выполнил работы по корректировке проектной документации судна в постройке (далее ПДСП) для строительства промыслового судна ярусного лова краба проекта 03070 заказ № 403 (далее Судно) по электротехнической части по результатам разработки рабочей конструкторской документации. Работы в соответствии с договором выполнены в полном объёме. О чем между ООО "БАЗИС" (Истец) и ООО ПКБ "ПЕТРОБАЛТ" (Ответчик) подписаны Акты сдачи - приёмки выполненных работ № 107 от 02.08.2019г. 

ООО "БАЗИС" (Истец) выполнил взятые на себя по договору №190606-01 от 08 июля 2019г. обязательства в полном объёме в отличии от ООО ПКБ "ПЕТРОБАЛТ" (Ответчик), который работы принял однако оплату не осуществил. 

Таким образом, задолженность ООО ПКБ "ПЕТРОБАЛТ" (Ответчик) перед ООО "БАЗИС" (Истец) по договору №190606-01 от 08 июля 2019г. составляет 300 000, а общая задолженность ООО ПКБ "ПЕТРОБАЛТ" (Ответчик) перед ООО "БАЗИС" (Истец) составила 2 341 280,65 руб.

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению.

В связи с тем, что при подаче иска истцу была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины, с ответчика подлежит взысканию в доход федерального бюджета 34 706 руб. 00 коп.  государственной пошлины                 

Руководствуясь статьями 309, 310, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ПЕТРОБАЛТ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "БАЗИС" 2 341 280 руб. 65 коп. задолженности.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ПЕТРОБАЛТ" в доход федерального бюджета 34 706 руб. 00 коп.  государственной пошлины.

Выдать исполнительный лист в порядке ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

 

Судья                                                                                                         Сергеева О.Н.