АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

 

20 сентября 2018 года

 

Дело № А33-1389/2018

Красноярск

 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 13 сентября 2018 года.

В полном объёме решение изготовлено 20 сентября 2018 года.

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Курбатовой Е.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Строительная группа Ангара" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), Красноярский край, г. Красноярск

к акционерному обществу "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), Красноярский край, г. Красноярск

о взыскании неосновательного обогащения, долга, неустойки,

в присутствии:

от истца (посредством видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа): ФИО1, представителя по доверенности,

от ответчика: ФИО2, представителя по доверенности от 22.01.2018,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО3, 

 

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Строительная группа Ангара" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к акционерному обществу "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания"  (далее – ответчик) о взыскании:

- 379 721 руб. 70 коп. неосновательного обогащения по договору подряда от 22.12.2014 № 3175714/1099Д на выполнение работ;

- 3 125 549 руб. 56 коп. неосновательного обогащения по договору подряда от 16.12.2015 №3175716/0081Д на выполнение работ;

- 787 006 руб. 20 коп. неустойки за просрочку обязательств по оплате по договору подряда по договору подряда от 16.12.2015 № 3175716/0081Д за период с 11.05.2017 по 27.11.2017;

- 1 519 988 руб. 27 коп. неустойки за просрочку обязательств по оплате по договору подряда от 24.02.2016 № 3175716/0275Д на выполнение работ за период с 30.04.2017 по 27.11.2017;

- 240 539 руб. 98 коп. неосновательного обогащения по договору подряда от 11.02.2015 № 3175715/0245Д на выполнение работ;

- 396 912 руб. 04 коп. неустойки за просрочку обязательств по оплате по договору подряда от 17.12.2014 № 3175714/1094 Д на выполнение работ за период с 02.03.2017 по 27.11.2017;

- 313 080 руб. 81 коп. неустойки за просрочку обязательств по оплате по договору подряда № 3175714/1176Д на выполнение работ от 12.12.2014 за период с 02.03.2017 по 27.11.2017 Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 19.02.2018 возбуждено производство по делу.

Рассмотрение дела откладывалось.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

22.12.2014 между ООО «Строительная группа Ангара» (далее - подрядчик) и ПАО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» (далее - заказчик) был заключен договор подряда № 3175714/1099Д на выполнение работ «на объекте Юрубчено-Тохомское мнр. Пункт сбора на площадке скважины № 5. Замерная установка. Реконструкция».

По условиям данного договора Подрядчик обязался выполнить работы по реконструкции объекта «Юрубчено-Тохомское мнр. Пункт сбора на площадке скважины № 25. Замерная установка. Реконструкция», включая добычу грунта из карьера № 13.

Подрядчик обязался выполнить все работы по строительству объекта собственными силами и с привлечением субподрядных организаций в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, содержащей перечень и состав работ, подлежащих выполнению, строительными нормами и правилами (СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН) и сдать результат Заказчику техническим заданием и передать Заказчику завершенный строительством объект, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В соответствии с п. 3.1 стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, определяется протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1 к договору подряда) и составляет 43 461 260 рублей 53 копейки в том числе:

-   стоимость строительно-монтажных работ, лимитированных и прочих затрат, которая является твердой договорной ценой и составляет - 34 717 864 рубля 54 копейки;

-   стоимость материалов поставки заказчика, которая является приблизительной ценой и составляет - 8 743 395 рублей 99 копеек.

Согласно п. 6.1 договора подряда заказчик оплачивает подрядчику стоимость фактически завершенных этапов работ согласно графику сдачи-приемки и финансирования строительно-монтажных работ по законченным этапам (Приложение № 5 к договору подряда). Расчеты производятся путем перечисления денежных средств в течение 90 календарных дней с даты подписания сторонами соответствующих актов о приемке выполненных работ (КС-2) на расчетный счет подрядчика на основании подписанной формы (КС-2, КС-3)

В соответствии с п. 4.1 договора подряда предусмотрены следующие календарные сроки выполнения работ по строительству объекта по настоящему договору: срок начала работ- 15.01.2015, окончание работ- 15.05.2015.

После завершения определенного этапа строительства между сторонами были под-писаны акты о приемке выполненных работ (КС-2): № 1 от 30.06.2016 на сумму 22 559 рублей 24 копейки, № 2 от 30.06.2016  на сумму 901 919 рублей 96 копеек, № 3 от 30.06.2016 на сумму 1 018 085 рублей 19 копеек, № 4 от 07.06.2016  на сумму 118 014 рублей 33 копейки, № 5 от 30.06.2016  на сумму 104 413 рублей 22 копейки, № 6 от 30.06.2016 на сумму 259 581 рубль 32 копейки, № 7 от 30.06.2016  на сумму 173 048 рублей 13 копеек, № 8 от 09.12.2016 на сумму 621 359 рублей 13 копеек и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3): № 1 от 30.06.2016  на сумму 3 064 013 рублей 24 копеек, № 2 от 09.12.2016  на сумму 733 203 рублей 77 копеек.

29.12.2016 ООО «Строительная группа Ангара» и ПАО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» Соглашением № 3175714/1099Д010 расторгли договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ № 3175714/1099Д с 29.12.2016.

В соответствии с указанным соглашением оплата выполненных на момент заключения соглашения этапов работ должна была быть произведена заказчиком подрядчику не позднее 90 дней с даты подписания сторонами соответствующих актов о приемке выполненных работ (КС-2) и формы КС-3.

АО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» свои обязательства перед ООО «Строительная группа Ангара» не выполнило в полном объеме.

В соответствии с п. 6.3 договора подряда заказчик резервирует 10 % стоимости работ и затрат до завершения строительства объекта (гарантийные удержания).

Учитывая, что 29.12.2017 сторонами подписано соглашение о расторжении договора подряда, оснований для резервирования суммы в размере 379 721 рубль 70 копеек у АО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» не имеется, указанная сумма является неосновательным обогащением и подлежит возврату в безусловном порядке без каких-либо вычетов или удержаний, поскольку в отношении ООО «Строительная группа Ангара» введена процедура конкурсного производства.

Общий размер неосновательного обогащения ответчика перед истцом по договору подряда № 3175714/1099Д, согласно расчету истца, составляет 379 721 рубль 70 копеек.

11.07.2017  ООО «Строительная группа Ангара» направило в адрес АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» претензию, в которой просило погасить имеющуюся у ответчика задолженность перед истцом.

Ответа на претензию не поступило.

30.09.2017  между истцом и ответчиком был подписан акт сверки взаимных расчетов, где ответчиком была признана задолженность перед истцом в размере 379 721 рубль 70 копеек.

16.12.2015  между ООО «Строительная группа Ангара» (далее - подрядчик) и ПАО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» (далее - заказчик) был заключен договор подряда № 3175716/0081Д на выполнение строительно-монтажных работ «на объекте «Юрубчено-Тохомское мнр.» Обустройство промышленной площадки Юр-5. Межплощадочные сети, эстакады. 10-й участок, 11-й участок, 12-й участок (УПН-УПТГ)».

По условиям данного договора подрядчик обязался выполнить работы на объекте «Юрубчено-Тохомское мнр.» Обустройство промышленной площадки Юр-5. Межплощадочные сети, эстакады. 10-й участок, 11-й участок, 12-й участок (УПН-УПТГ), включая добычу грунта из карьера № 7а.

Подрядчик обязался выполнить все работы по строительству объекта собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, содержащей перечень и состав работ, подлежащих выполнению, строительными нормами и правилами (СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН) и сдать результат заказчику техническим заданием и передать заказчику завершенный строительством объект, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В соответствии с п. 3.1 стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, определяется протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1 к договору под-ряда) и составляет 334 733 733 рубля 39 копеек. Стоимость строительно-монтажных работ, лимитированных и прочих затрат является твердой договорной ценой.

Согласно п. 6.1 договора подряда заказчик оплачивает подрядчику стоимость фактически завершенных этапов работ согласно графику сдачи-приемки и финансирования строительно-монтажных работ по законченным этапам (Приложение № 5 к договору подряда). Расчеты производятся путем перечисления денежных средств в течение 60 календарных дней с даты подписания сторонами соответствующих актов о приемке выполненных работ (КС-2) на расчетный счет подрядчика на основании подписанной формы (КС-2.КС-3)

В соответствии с п. 4.1 договора подряда предусмотрены следующие календарные сроки выполнения работ по строительству объекта по настоящему договору: срок начала работ - 01.02.2016, окончание работ-30.09.2017.

После завершения определенного этапа строительства между сторонами были подписаны акты о приемке выполненных работ (КС-2): № 1 от 31.03.2016  на сумму 2 050  313 рублей 42 копейки, № 2 от 31.03.2016 г. на сумму 3 990 939 рублей 29 копеек, № 3 от 11.04.2016 на сумму 6 033 рублей 58 копеек, № 4 от 11.04.2016 на сумму 2 178 101 рубль 73 копейки, № 5 от на сумму 3 496 630 рублей 64 копейки, № 6 от 11.04.2016  на сумму 4 002 319 рублей 66 копеек, № 9 от 31.05.2016 на сумму 3 894 564 рубля 37 копеек, № 8 от 31.05.2016 на сумму 4 326 124 рубля 87 копеек, № 10 от 30.06.2016  на сумму 302 152 рубля 96 копеек, № 11 от 10.10.2016  на сумму 5 577 345 рублей 72 копейки, № 12 от 10.10.2016 на сумму 3 212 329 рублей 39 копеек, № 13 от 31.10.2016 на сумму 1 256 418 рублей 85 копеек, № 16 от 31.10.2016  на сумму 846 876 рублей 30 копеек, № 15 от 31.10.2016 на сумму 1 548 707 рублей 21 копейка, № 14 от 31.10.2016 на сумму 3 664 102 рубля 38 копеек, № 19 от 10.11.2016 на сумму 3 225 658 рублей 80 копеек, № 18 от 10.11.2016 на сумму 4 505 548 рублей 63 копейки, № 20 от 31.11.2016 на сумму 86 351 рубль 16 копеек, № 21 от 10.03.2017 на сумму 953 639 рублей 21 копейка, № 22 от 10.03.2017 на сумму 1 664 980 рублей 95 копеек, № 23 от 10.03.2016 на сумму 1613 772 рубля 87 копеек и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3): № 1 от 31.03.2016 на сумму 7 128 678 рублей 20 копеек, № 2 от 11.04.2016 на сумму 11426 041 рубль 02 копейки, № 3 от 31.05.2016 г. на сумму 10 231 089 рублей 32 копейки, № 3 от 30.06.2016 на сумму 356 540 рублей 49 копеек, № 4 от 10.10.2016 на сумму 10 371 816 рублей 63 копейки, № 5 от 31.10.2016 на сумму 8 777 882 рубля 66 копеек, № 6 от 10.11.2016 на сумму 9 122 824 рубля 77 копеек, № 7 от 31.11.2016 на сумму 101 894 рубля 37 копеек, № 8 от 10.03.2017 на сумму 4 994 223 рубля 78 копеек.

29.12.2016 ООО «Строительная группа Ангара» и ПАО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» Соглашением № 3175714/1099Д010 расторгли договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ № 3175714/1099Д с 29.12.2016.

09.01.2016 ООО «Строительная группа Ангара» и ПАО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» Соглашением № 3175716/0081Д006 договор подряда № 3175716/0081Д с 09.01.2017.

В соответствии с указанным соглашением оплата выполненных на момент заключения соглашения этапов работ должна была быть произведена подрядчику не позднее 60 дней с даты подписания сторонами соответствующих актов о приемке выполненных работ (КС-2) и формы КС-3.

АО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» свои обязательства перед ООО «Строительная группа Ангара» по оплате строительно-монтажных работ не выполнило в полном объеме.

Общий размер задолженности по договору № 3175716/0081Д за выполненные работы в пользу ООО «Строительная группа Ангара» составляет 4 609 612 рублей 58 копеек.

В соответствии с п. 6.3 договора подряда заказчик резервирует 10 % стоимости работ и затрат до завершения строительства объекта (гарантийные удержания).

Учитывая, что 09.01.2017 сторонами подписано соглашение о расторжении договора подряда, оснований для резервирования суммы в размере 3 125 549 рублей 56 копеек у АО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» не имеется, указанная сумма является неосновательным обогащением и подлежит возврату в безусловном порядке без каких-либо вычетов или удержаний, поскольку в отношении ООО «Строительная группа Ангара» введена процедура конкурсного производства.

Общий размер неосновательного обогащения ответчика перед истцом по договору подряда № 3175716/0081Д, согласно расчету истца,  составляет 3 125 549 рублей 56 копеек.

В соответствии с п. 16.2 договора за задержку оплаты за выполненные строительно-монтажные работы (этапы работ) на срок свыше 30 дней от срока наступления обязательства по оплате предусмотрена неустойка в размере 0,1 % от своевременно не уплаченной суммы за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 10 % от своевременно не оплаченной суммы.

10.03.2017 были подписаны последние КС-2 и КС-3 по настоящему договору, следовательно, были завершены последние этапы работ. 60-дневный срок на оплату выполненных этапов работ истек 10.05.2017.

Согласно расчету истца, неустойка на сумму долга  4 609 612 рублей 58 копеек составляет 926 532 рубля 12 копеек; на сумму долга  3 125 549 рублей 56 копеек -  628 235 рублей 46 копеек. В связи с тем, что в размер неустойки превысил 10 % от своевременно не оплаченной суммы, то размер неустойки подлежит уменьшению и составляет: по сумме долга - 4 744 512 рублей 59 копеек - 10 % = 474 451 рубль 25 копеек; по сумме долга - 3 125 549 рублей 56 копейки -10 % = 312 554 рубля 95 копеек.

Общий размер неустойки за просрочку исполнения обязательств по оплате, согласно расчету истца,  составляет 787 006 рублей 20 копеек.

11.07.2017 ООО «Строительная группа Ангара» направило в адрес АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» претензию, в которой просило погасить имеющуюся у Ответчика задолженность перед истцом.

Ответа на претензию не поступило.

30.09.2017  между истцом и ответчиком был подписан акт сверки взаимных расчетов, где ответчиком была признана задолженность перед истцом в размере 7 735 162 рубля 14 копеек.

24.02.2016  между ООО «Строительная группа Ангара» (далее - подрядчик) и ПАО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» (далее - заказчик) был заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ № 3175716/0275Д на выполнение работ по строительству «Юрубчено-Тохомское нмр. Кустовое основание № 28».

По условиям данного договора подрядчик обязался выполнить работы по строительству в соответствии с проектной и рабочей документацией, техническим заданием и передать заказчику завершенный строительством объект, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В соответствии с п. 3.1 цена договора в соответствии с расчетом цены договора не превысит 115 447 702 рубля 12 копеек и включает:

-    стоимость работ - 114 341 125 рубля 45 копеек;

-    стоимость материально-технических ресурсов - 1 136 549 рублей 67 копеек.

Согласно п. 4.1 договора подряда заказчик оплачивает подрядчику стоимость фактически выполненного объема работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика на основании предоставленных подрядчиком, надлежаще оформленных первичных документов и после подписания заказчиком актов приемки выполненных работ, в соответствии с процедурой приемки.

В соответствии с п. 5.1 договора подряда предусмотрены следующие календарные сроки выполнения работ по договору: срок начала выполнения работ - 01.07.2016, срок окончания выполнения работ – 30.11.2016.

После завершения определенного этапа строительства между сторонами были под-писаны акты о приемке выполненных работ (КС-2): № 1 30.04.2016  на сумму 2 972 516 рублей 34 копейки, № 2 от 10.10.2016 на сумму 471 053 рубля 93 копейки, № 3 от 1 884 223 рубля 22 копейки, № 4 от 31.10.2016 на сумму 3 343 941 рубль 70 копеек, № 5 от 31.10.2016 на сумму 89 295 рублей 51 копейка, № 6 от 31.10.2016 на сумму 3 206 851 рубль 43 копейки, № 7 от 31.12.2016  на сумму 6 830 519 рублей 43 копейки, № 8 от 31.12.2016 на сумму 32 634 рубля 43 копейки, № 9 от 31.12.2016 на сумму 827 736 рублей 59 копеек, № 10 от 31.12.2016 на сумму 265 373 рубля 89 копеек, № 11 от 31.12.2016 на сумму 309 943 рубля 58 копеек, № 12 от 31.12.2016 на сумму 3 552 449 рублей 99 копеек, № 13 от 31.01.2017 на сумму 538 775 рублей 54 копейки, № 14 от 31.01.2016 на сумму 1 814 259 рублей 83 копейки, № 15 от 31.01.2017 на сумму 1 420 120 рублей 15 копеек, № 16 от 28.02.2017 на сумму 805 603 рубля 47 копеек и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3): № 1 от 30.04.2016 на сумму 3 507 569 рублей 28 копеек, № 2 от 10.10.2016 на сумму 2 779 227 рублей 04 копейки, № 3 от 31.10.2016 на сумму 7 835 304 рубля 60 копеек, № 4 от 31.12.2016 г. на сумму 13 946 016 рублей 33 копейки, 5 от 31.01.2017 на сумму 4 452 323 рубля 51 копейка, № 6 от 28.02.2017 на сумму 950 612 рублей 09 копеек.

08.02.2017 ООО «Строительная группа Ангара» и ПАО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ»

Соглашением № 3175716/0275Д007 расторгли договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ № 3175716/0275Д был расторгнут с 08.02.2017.

В соответствии с указанным соглашением оплата выполненных на момент заключения соглашения этапов работ должна была быть произведена подрядчику не позднее 60 дней с момента подписания соответствующих первичных учетных документов и подписания актов сдачи-приемки.

АО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» свои обязательства перед ООО «Строительная группа Ангара» по оплате строительно-монтажных работ не выполнило.

Общий размер задолженности по договору № 3175716/0275Д за выполненные работы в пользу ООО «Строительная группа Ангара» составляет 6 436 388 рублей 77 копеек.

В соответствии с п. 4.2 договора подряда заказчик производит гарантийные удержания в размере 10 % от очередного платежа за выполненные работы в соответствии с п. 23.2.

В соответствии с п. 23.2.1 договора подряда зарезервированная сумма выплачивается подрядчику не позднее 60 дней с момента подписания акта приемки законченного строительством объекта.

Учитывая, что 08.02.2017 сторонами подписано соглашение о расторжении договора подряда, оснований для резервирования суммы в размере 1 673 552 рубля 64 копейки у АО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» не имеется, указанная сумма является неосновательным обогащением и подлежит возврату в безусловном порядке без каких-либо вычетов или удержаний, поскольку в отношении ООО «Строительная группа Ангара» введена процедура конкурсного производства.

Общий размер неосновательного обогащения ответчика перед истцом по договору подряда № 3175716/0275Д составляет 1 673 552 рубля 64 копейки.

В соответствии с п. 24.1 договора подряда конкретные нарушения и меры ответственности за них установлены сторонами в приложении № 19.

Согласно приложению № 19 за задержку заказчиком сроков оплаты на срок свыше 30 дней от срока наступления обязательства по оплате предусмотрена неустойка в размере 0,1 % от своевременно не уплаченной суммы за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 20 % от своевременно не оплаченной суммы.

28.02.2017 были подписаны последние КС-2 и КС-3 по настоящему договору, следовательно, были завершены последние этапы работ. 60-дневный срок на оплату выполненных этапов работ истек 29.04.2017.

Согласно расчету истца, неустойка на сумму долга  6 436 388 рублей 77 копеек составляет 1 364 514 рублей 42 копейки; на сумму долга  1 673 552 рубля 64 копейки -  354 793 рубля 16 копеек. В связи с тем, что в размер неустойки превысил 20 % от своевременно не оплаченной суммы, то размер неустойки подлежит уменьшению и составляет: по сумме долга - 6 436 388 рублей 77 копеек - 20 % = 1 287 277 рублей 75 копеек; по сумме долга - 1 163 552 рубля 64 копейки -20 % = 232 710 рублей 52 копейки

Общий размер неустойки за просрочку исполнения обязательств по оплате за выполненные работы, согласно расчету истца,  составляет 1 519 988 рублей 27 копеек,

11.07.2017 ООО «Строительная группа Ангара» направило в адрес АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» претензию, в которой просило погасить имеющуюся у Ответчика задолженность перед истцом.

Ответа на претензию не поступило.

30.09.2017  между истцом и ответчиком был подписан акт сверки взаимных расчетов, где ответчиком была признана задолженность перед истцом в размере 8 109 041 рубль 41 копейка.

11.02.2015 между ООО «Строительная группа Ангара» (далее - подрядчик) и ПАО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» (далее - заказчик) был заключен договор подряда № 3175715/0245Д на выполнение работ «на объекте «Юрубчено-Тохомское мнр. Водопроводные очистные сооружения».

По условиям данного договора подрядчик обязался выполнить работы по строительству объекта «Юрубчено-Тохомское мнр. Водопроводные очистные сооружения».

Подрядчик обязался выполнить все работы по строительству объекта собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, содержащей перечень и состав работ, подлежащих выполнению, строительными нормами и правилами (СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН) и сдать результат заказчику техническим заданием и передать заказчику завершенный строительством объект, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В соответствии с п. 3.1 стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, определяется протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1 к договору подряда) и составляет 42 319 191 рублей 35 копеек в том числе:

- стоимость строительно-монтажных работ, лимитированных и прочих затрат является твердой договорной ценой и составляет — 29 241 722 рубля 52 копейки;

- стоимость материалов поставки Заказчика, которая является приблизительной ценой и составляет- 13 077 468 рублей 83 копейки.

Согласно п. 6.1 договора подряда заказчик оплачивает подрядчику стоимость фактически завершенных этапов работ согласно графику сдачи-приемки и финансирования строительно-монтажных работ по законченным этапам (Приложение № 5 к договору подряда). Расчеты производятся путем перечисления денежных средств в течение 90 календарных дней с даты подписания сторонами соответствующих актов о приемке выполненных работ (КС-2) на расчетный счет подрядчика на основании подписанной формы (КС-2, КС-3)

В соответствии с п. 4.1 договора подряда предусмотрены следующие календарные сроки выполнения работ по строительству объекта по настоящему договору: срок начало работ 15.03.2015, окончание работ-22.03.2016.

После завершения определенного этапа строительства между сторонами были подписаны акты о приемке выполненных работ (КС-2): № 1 от 31.03.2016 на сумму 47 608 рублей 79 копеек, № 3 от 165 229 рублей 25 копеек, № 5 от 31.03.2016 на сумму 106 032 рубля 33 копейки, № 2 от 31.03.2016  на сумму 160 203 рубля 99 копеек, № 4 от 31.03.2016  на сумму 102 808 рублей 36 копеек, № 6 от 30.06.2016  на сумму 922 561 рубль 84 копейки, № 7 от 30.06.2016 на сумму 195 478 рублей 15 копеек, № 8 от 30.06.2016  на сумму 69 339 рублей 67 копеек, № 9 от 30.06.2016  на сумму 229 066 рублей 11 копеек, № 10 от 30.09.2016 на сумму 428 108 рублей 36 копеек, № 11 от 30.11.2016  на сумму 55 940 рублей 07 копеек, № 12 от 09.12.2016  на сумму 1 120 101 рубль 69 копеек, № 13 от 09.12.2016  на сумму 474 470 рублей 22 копейки и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3): № 1 от 31.03.2016  на сумму 376 267 рублей 04 копейки, № 1 от 31.03.2016  на сумму 310 354 рубля 57 копеек, № 2 от 30.06.2016 на сумму 1 671 406 рублей 01 копейка, № 3 от 30.09.2016 на сумму 505 167 рублей 86 копеек, № 4 от 30.11.2016  на сумму 66 009 рублей 28 копеек, № 5 от 09.12.2016  на сумму 1 881 594 рубля 85 копеек.

29.12.2016 ООО «Строительная группа Ангара» и ПАО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» Соглашением № 3175715/0245ДО 11 расторгли договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ № 3175715/0245Д с 29.12.2016.

В соответствии с указанным соглашением оплата выполненных на момент заключения соглашения этапов работ должна была быть произведена Подрядчику в течение 90 календарных дней, но не ранее 60 дней с даты подписания сторонами соответствующих актов о приемке выполненных работ (КС-2) и формы КС-3.

АО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» свои обязательства перед ООО «Строительная группа Ангара» по оплате строительно-монтажных работ не выполнило в полном объеме.

В соответствии с п. 6.3 договора подряда заказчик резервирует 10 % стоимости работ и затрат до завершения строительства объекта (гарантийные удержания).

Учитывая, что 08.02.2017 сторонами подписано соглашение о расторжении договора подряда, оснований для резервирования суммы в размере 240 539 рублей 97 копеек у АО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» не имеется, указанная сумма является неосновательным обогащением и подлежит возврату в безусловном порядке без каких-либо вычетов или удержаний, поскольку в отношении ООО «Строительная группа Ангара» введена процедура конкурсного производства.

Общий размер неосновательного обогащения ответчика перед истцом по договору подряда № 3175715/0245Д, согласно расчету истца, составляет 240 539 рублей 98 копеек.

11.07.2017 ООО «Строительная группа Ангара» направило в адрес АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» претензию, в которой просило погасить имеющуюся у ответчика задолженность перед истцом.

Ответа на претензию не поступило.

30.09.2017 между истцом и ответчиком был подписан акт сверки взаимных расчетов, где ответчиком была признана задолженность перед истцом в размере 240 539 рублей 97 копеек.

17.12.2014 между ООО «Строительная группа Ангара» (далее - подрядчик) и ПАО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» (далее - заказчик) был заключен договор подряда № 3175714/1098Д на выполнение работ «на объекте Юрубчено-Тохомское мнр. Пункт сбора на площадке скважины № 25. Замерная установка. Реконструкция».

По условиям данного договора Подрядчик обязался выполнить работы по реконструкции объекта «Юрубчено-Тохомское мнр. Пункт сбора на площадке скважины № 25. Замерная установка. Реконструкция», включая добычу грунта из карьера № 13.

Подрядчик обязался выполнить все работы по строительству объекта собственными силами и с привлечением субподрядных организаций в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, содержащей перечень и состав работ, подлежащих выполнению, строительными нормами и правилами (СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН) и сдать результат заказчику техническим заданием и передать заказчику завершенный строительством объект, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В соответствии с и. 3.1 стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, определяется протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1 к договору подряда) и составляет 60 797 063 рубля 11 копеек в том числе:

-    стоимость строительно-монтажных работ, лимитированных и прочих затрат, которая является твердой договорной ценой и составляет - 47 905 854 рубля 27 копеек;

-    стоимость материалов поставки Заказчика, которая является приблизительной ценой и составляет - 12 891 208 рублей 84 копейки.

Согласно п. 6.1 договора подряда заказчик оплачивает подрядчику стоимость фактически завершенных этапов работ согласно графику сдачи-приемки и финансирования строительно-монтажных работ по законченным этапам (Приложение № 5 к договору подряда). Расчеты производятся путем перечисления денежных средств в течение 90 календарных дней с даты подписания сторонами соответствующих актов о приемке выполненных работ (КС-2) на расчетный счет подрядчика на основании подписанной формы (КС-2, КС-3)

В соответствии с п. 4.1 договора подряда предусмотрены следующие календарные сроки выполнения работ по строительству объекта по настоящему договору: срок начало работ- 15.01.2015, окончание работ - 15.05.2015.

После завершения определенного этапа строительства между сторонами были под-писаны акты о приемке выполненных работ (КС-2): № 1 от 16.11.2015  на сумму 54 077 рублей 60 копеек, № 2 от 16.11.2015  на сумму 59 363 рубля 05 копеек, № 2 от 16.11.2015  на сумму 390 973 рубля 09 копеек, № 4 от 16.11.2015  на сумму 323 345 рублей 74 копейки, № 5 от 30.11.2015  на сумму 243 рубля 67 копеек, № 5 от 13.05.2016  на сумму 311 637 рублей 08 копеек, № 6 от 13.05.2016  на сумму 135 609 рублей 96 копеек, № 7 от 13.05.2016 на сумму 25 563 рубля 69 копеек, № 8 от 13.05.2016  на сумму 270 163 рубля 64 копейки, № 9 от 13.05.2016 на сумму 34 298 рублей 14 копеек, № 10 от 13.05.2016  на сумму 1 105 236 рублей 57 копеек, № 12 от 13.05.2016  на сумму 69 015 рублей, № 13 от 13.05.2016 на сумму 29 717 рублей 71 копейка, № 11 от 13.05.2016  на сумму 115 667 рублей, № 14 от 30.06.2016 на сумму 963 421 рубль 81 копейка, № 15 от 30.06.2016  на сумму 72 169 рублей 86 копеек, № 16 от 10.10.2016  на сумму 221 415 рублей 67 копеек, № 17 от 10.10.2016 на сумму 66 953 рубля 97 копеек, № 18 от 10.10.2016  на сумму 418 284 рубля 11 копеек, № 19 от 10.10.2016 на сумму 297 213 рублей 27 копеек, № 20 от 10.10.2016 на сумму 227 275 рублей 26 копеек, № 21 от 30.11.2016  на сумму 563 681 рубль 27 копеек, № 22 от 10.11.2016 на сумму 696 989 рублей 86 копеек, № 25 от 30.11.2016  на сумму 725 745 рублей 27 копеек, № 24 от 30.11.2016  на сумму 279 473 рубля 92 копейки, № 23 от 30.11.2016 на сумму 2 325 014 рублей 37 копеек, № 26 от 30.11.2016  на сумму 879 123 рубля 79 копеек, № 46 от 31.12.2016 на сумму 190 726 рублей 48 копеек, № 44 от 31.12.2016 на сумму 536 941 рубль 52 копейки, № 41 от 31.12.2016 г. на сумму 2 802 545 рублей 15 копеек, № 47 от 31.12.2016 на сумму 95 671 рубль 74 копейки, № 45 от 31.12.2016 на сумму 47 470 рублей 18 копеек, № 43 от 31.12.2016  на сумму 67 312 рублей 20 копеек, № 42 от 31.12.2016  на сумму 227 186 рублей 22 копейки, № 40 31.12.2016 г. 23 422 рубля 14 копеек, № 39 от 31.12.2016 на сумму 465 565 рублей 55 копеек, № 38 от 31.12.2016 на сумму 492 838 рублей 52 копейки, № 37 от 31.12.2016  на сумму 248 863 рубля 08 копеек, № 36 от 31.12.2016 на сумму 367 003 рублей 86 копеек, № 34 от 31.12.2016 55 807 рублей 63 копейки, № 35 от 31.12.2016  на сумму 181 995 рублей 75 копеек, № 32 от 31.12.2016 на сумму 1 202 511 рублей 67 копеек, № 33 от 31.12.2016  на сумму 754 372 рубля 34 копейки, № 28 от 31.12.2016 на сумму 127 055 рублей 55 копеек, № 29 от 31.12.2016  на сумму 18 382 рубля 43 копейки, № 30 от 31.12.2016 г. на сумму76 408 рублей 98 копеек, № 31 от 31.12.2016  на сумму 655 рублей 68 копеек, № 48 от 31.12.2016  на сумму 44 422 рубля 39 копеек, № 49 от 31.12.2016 г. на сумму 105 45 рубля 63 копейки и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3): № 1 от 1 от 16.11.2015  на сумму 133 859 рублей 97 копеек, № 1 от 16.11.2015  на сумму 842 896 рублей 22 копейки, № 3 от 30.11.2015 г. на сумму 287 рублей 53 копейки, № 2 от 13.05.2016  на сумму 2 474 352 рубля 37 копеек, № 3 от 30.06.2016  на сумму 1 221 998 рублей 17 копеек, № 4 от 10.10.2016  на сумму 1452 747 рублей 89 копеек, № 5 от 10.11.2016 на сумму 1 487 591 рубль 93 копейки, № 5 от 30.11.2016  на сумму 4 967 041 рубль 67 копеек, № 6 от 31.12.2016  на сумму 9 596 481 рубль 79 копеек.

АО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» свои обязательства перед ООО «Строительная группа Ангара» по оплате строительно-монтажных работ не выполнило в полном объеме.

Общий размер задолженности по договору № 3175714/1098Д за выполненные работы в пользу ООО «Строительная группа Ангара» составляет 2 756 257 рублей 69 копеек.

В соответствии с п. 6.3 договора подряда заказчик резервирует 10 % стоимости работ и затрат до завершения строительства объекта (гарантийные удержания).

Учитывая, что договор подряда фактически прекратил свое действие оснований для резервирования суммы в размере 1 108 862 рубля 88 копеек у АО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» не имеется, указанная сумма является неосновательным обогащением и подлежит возврату в безусловном порядке без каких-либо вычетов или удержаний, поскольку в отношении ООО «Строительная группа Ангара» введена процедура конкурсного производства.

Общий размер неосновательного обогащения ответчика перед истцом по договору подряда № 3175714/1098Д составляет 1 108 862 рубля 88 копеек.

В соответствии с п. 16.2 договора за задержку оплаты за выполненные строительно-монтажные работы (этапы работ) на срок свыше 30 дней от срока наступления обязательства по оплате предусмотрена неустойка в размере 0,1 % от своевременно не уплаченной суммы за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 10 % от своевременно не оплаченной суммы.

31.12.2016 были подписаны последние КС-2 и КС-3 № по настоящему договору, следовательно, были завершены последние этапы работ. 90-дневный срок на оплату выполненных этапов работ истек 01.03.2017.

Согласно расчету истца, неустойка на сумму долга  2 756 257 рублей 69 копеек составляет 746 945 рублей 83 копейки; на сумму долга  1 108 862 рубля 88 копеек -  300 501 рубль 84 копейки. В связи с тем, что в размер неустойки превысил 10 % от своевременно не оплаченной суммы, то размер неустойки подлежит уменьшению и составляет: по сумме долга - 2 860 257 рублей 69 копеек - 10 % = 286 025 рублей 76 копеек; по сумме долга - 1 108 862 рубля 88 копеек -10 % = 110 886 рублей 28 копеек.

Общий размер неустойки за просрочку исполнения обязательств по оплате, согласно расчету истца, составляет 396 912 рублей 04 копейки.

11.07.2017 ООО «Строительная группа Ангара» направило в адрес АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» претензию, в которой просило погасить имеющуюся у ответчика задолженность перед истцом.

Ответа на претензию не поступило.

30.09.2017 между истцом и ответчиком был подписан акт сверки взаимных расчетов, где ответчиком была признана задолженность перед истцом в размере 3 865 120 рублей 57 копеек.

12.12.2014 между ООО «Строительная группа Ангара» (далее - подрядчик) и ПАО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» (далее - заказчик) был заключен договор подряда на выполнение работ № 3175714/1176Д «по строительству объекта «Карьер № 7а».

По условиям данного договора подрядчик обязался выполнить работы по строительству объекта «Карьер № 7а» в соответствии с проектной и рабочей документацией, техническим заданием и передать заказчику завершенный строительством объект, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В соответствии с п. 3.1 стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, определяется протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1 к договору подряда) и составляет 30 233 822 рубля 35 копеек в том числе:

- стоимость строительно-монтажных работ, лимитированных и прочих затрат является твердой договорной ценой и составляет — 29 016 568 рублей 77 копеек;

- стоимость материалов поставки Заказчика, которая является приблизительной ценой и составляет - 1 217 253 рубля 58 копеек.

Согласно п. 6.1 договора подряда заказчик оплачивает подрядчику стоимость фактически завершенных этапов работ согласно графику сдачи-приемки и финансирования строительно-монтажных работ по законченным этапам (Приложение № 5 к договору подряда). Расчеты производятся путем перечисления денежных средств в течение 90 календарных дней с даты подписания сторонами соответствующих актов о приемке выполненных работ (КС-2) на расчетный счет подрядчика на основании подписанной формы (КС-2, КС-3)

В соответствии с п. 4.1 договора подряда предусмотрены следующие календарные сроки выполнения работ по строительству объекта по настоящему договору: срок начало работ-22.01.2015, окончание работ-30.05.2015.

После завершения определенного этапа строительства между сторонами были под-писаны акты о приемке выполненных работ (КС-2): № 1 от 31.03.2015  1 680 980 рублей 48 копеек, № 2 от 31.03.2015 на сумму 173 358 рублей 15 копеек, № 3 от 31.03. 2015  на сумму 198 140 рублей 92 копейки, № 4 от 30.04.2015  на сумму 725 923 рубля 41 копейка, № 5 от 30.06.2015 на сумму 668 918 рублей 84 копейки, № 6 от 30.04.2015 на сумму 142 213 рублей 71 копейка, № 7 от 30.04.2015 на сумму 961 832 рубля 36 копеек, №8 от 31.08.2016  на сумму 315 955 рублей 21 копейка, № 9 от 31.08.2016  на сумму 372 677 рублей 51 копейка, № 10 от 09.12.2016  на сумму 1 583 129 рублей 26 копеек, № 11 от 09.12.2016  на сумму 628 975 рублей 95 копеек, № 12 от 09.12.2016  на сумму 2 485 190 рублей 52 копейки, № 13 от 09.12.2016  на сумму 943 953 рубля 63 копейки, № 14 от 09.12.2016  на сумму 148 036 рублей 56 копеек, № 15 от 28.02.2017  на сумму 291 223 75 копеек, № 16 от 28.02.2017 на сумму 1 536 434 рубля 59 копеек, № 17 от 28.02.2016 г. на сумму 274 103 рубля 12 копеек, и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3): № 1 от 31.03.2015  на сумму 2 421 925 рублей 87 копеек, № 2 от 30.04.2015 на сумму 856 625 рублей 02 копейки, № 3 от 30.06.2015  на сумму 789 324 рубля 23 копейки, № 4 от 30.04.2016  на сумму 1 302 774 рубля 36 копеек, № 5 от 31.08.2015 на сумму 812 686 рублей 61 копейка, № 6 от 09.12.2016 на сумму 6 831 357 рублей 39 копеек, № 7 от 28.02.2107  на сумму 2 480 078 рублей 52 копейки.

АО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» свои обязательства перед ООО «Строительная группа Ангара» по оплате строительно-монтажных работ не выполнило в полном объеме.

Общий размер задолженности по договору № 3175714/1176Д за выполненные работы в пользу ООО «Строительная группа Ангара» составляет 2 356 074 рубля 59 копеек.

В соответствии с п. 6.3 договора подряда заказчик резервирует 10 % стоимости работ и затрат до завершения строительства объекта (гарантийные удержания).

Учитывая, что договор подряда фактически прекратил свое действие оснований для резервирования суммы в размере 774 733 рубля 60 копеек у АО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» не имеется, указанная сумма является неосновательным обогащением и подлежит возврату в безусловном порядке без каких-либо вычетов или удержаний, поскольку в отношении ООО «Строительная группа Ангара» введена процедура конкурсного производства.

Общий размер неосновательного обогащения ответчика перед истцом по договору подряда № 3175714/1176Д, согласно расчету истца, составляет 744 733 рубля 60 копеек.

В соответствии с п. 16.2 договора за задержку оплаты за выполненные строительно-монтажные работы (этапы работ) на срок свыше 30 дней от срока наступления обязательства по оплате предусмотрена неустойка в размере 0,1 % от своевременно не уплаченной суммы за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 10 % от своевременно не оплаченной суммы.

28.02.2017 были подписаны последние КС-2 и КС-3 по настоящему договору, следовательно, были завершены последние этапы работ. 90-дневный срок на оплату выполненных этапов работ истек 29.05.2017.

Согласно расчету истца, неустойка на сумму долга  2 356 074 рубля 59 копеек составляет 428 805 рублей 58 копеек; на сумму долга  774 733 рубля 60 копеек -  141 001 рубль 52 копейки. В связи с тем, что в размер неустойки превысил 10 % от своевременно не оплаченной суммы, то размер неустойки подлежит уменьшению и составляет: по сумме долга - 2 356 074 рубля 59 копеек - 10 % = 235 607 рублей 45 копеек; по сумме долга - 774 733 рубля 60 копеек -10 % = 77 473 рубля 36 копеек.

Общий размер неустойки за просрочку исполнения обязательств по оплате, согласно расчету истца, составляет 313 080 рублей 81 копейка.

11.07.2017 ООО «Строительная группа Ангара» направило в адрес АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» претензию, в которой просило погасить имеющуюся у ответчика задолженность перед истцом.

Ответа на претензию не поступило.

30.09.2017 между истцом и ответчиком был подписан акт сверки взаимных расчетов, где ответчиком была признана задолженность перед истцом в размере 3 100 808 рублей 19 копеек.

В материалы дела поступил отзыв ответчика, согласно которому ответчик ссылается на следующие обстоятельства.

В части требований подрядчика о взыскании суммы задолженности по оплатестоимости завершенных этапов работ в общем размере 16 158 333,63 руб.: задолженность по оплате выполненных подрядчиком и принятых заказчиком работ в размере оплачена в полном объеме, что подтверждается:       платежным поручением от 11.04.2018 № 104 на сумму 2.356.074,59 руб. (по договору от 12.12.2014 № 3175714/1176Д); платежным поручением от 11.04.2018 № 122 на сумму 2 860 257,70 руб. (по договору от 17.12.2014 №3175714/1098Д);          платежным поручением от 11.04.2018 № 112 на сумму 4 744 512,59 руб. (по договору от 16.12.2015 № 3175716/0081Д);      платежными поручениями от 11.04.2018 № № 129-131 на общую сумму 6 436 388,77 руб. (по договору от 24.02.2016 № 3175716/0275Д). Своевременная оплата данной задолженности не была произведена по причине наличия у заказчика встречных требований к подрядчику по возврату давальческих материалов.

В части требований подрядчика о взыскании неустойки, начисленной на сумму задолженности   по   оплате   стоимости  завершенных  этапов  работ   в   общем  размере 2 283 362,21 руб. подрядчиком неверно произведен расчет неустойки, начисленной на сумму задолженности по оплате/стоимости завершенных этапов работ, поскольку подрядчиком неверно определены даты окончания периода просрочки. На основании абзаца 2 пункта 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2014 года N 35 «О последствиях расторжения договора», неустойка, установленная на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения указанной обязанности, начисляется до даты прекращения этого обязательства, то есть до даты расторжения договора. Вместе с тем, подрядчиком неправомерно начислена договорная неустойка в том числе за периоды после расторжения договоров. Ответчиком представлен контррасчет неустойки, согласно которому размер договорной неустойки за задержку заказчиком расчетов за выполненные строительно-монтажные работы (этапы работ) составил 619 255,34 руб.

В части требований подрядчика о взыскании зарезервированных сумм по договорам подряда от 12.12.2014 № 3175714/1176Д, от 17.12.2014 № 3175714/1098Д, от 24.02.2016 № 3175716/0275Д в общем размере 3 527 149,12 руб. Договоры подряда от 12.12.2014 № 3175714/1176Д и от 17.12.2014 № 3175714/1098Д не расторгались и являются действующими. Обязательства по строительству объектов по данным договорам подрядчиком исполнены. Договор подряда от 24.02.2016 № 3175716/0275Д расторгнут путем подписания соглашения о расторжении, однако объект был построен и введен в эксплуатацию, о чем составлен соответствующий акт по форме КС-11. В связи с тем, что акты приемки законченного строительством объекта формы КС-11 по вышеперечисленным договорам подписаны, зарезервированные суммы были выплетены подрядчику, что подтверждается следующими документами: платежными поручениями от 11.04.2018 № № 105-111 на общую сумму 774 733,60 руб. (по договору от 12.12.2014 № 3175714/1176Д); платежными поручениями от 11.04.2018 № № 113-121 на общую сумму 1 108 862,87 руб. (по договору от 17.12.2014 № 3175714/1098Д); платежными поручениями от 11.04.2018 № № 123-128 на общую сумму 1 673 552,64 руб. (по договору от 24.02.2016 № 3175716/0275Д).

В части требований подрядчика о взыскании неустойки, начисленной на зарезервированные суммы по договорам подряда от 12.12.2014 № 3175714/1176Д, от 17.12.2014 № 3175714/1098Д, от 24.02.2016 № 3175716/0275Д в общем размере 421 070,16 руб. По условиям заключенных договоров подряда, зарезервированные суммы выплачиваются подрядчику при выполнении им следующих условий: наличие акта приемки законченного строительством объекта формы КС-11; предоставление гарантии на исполнение обязательств подрядчиком в период гарантийной эксплуатации объекта; сдача на склад невовлеченных материалов заказчика, а в случае утраты материалов заказчика - полное возмещение стоимости материалов заказчика, включающей в себя учетную стоимость материально-технических ресурсов заказчика с учетом транспортно-заготовительных расходов.

Таким образом, срок исполнения обязательства заказчика по выплате зарезервированных сумм не мог наступить ранее срока выполнения всех трех вышеуказанных условий: подписания акта формы КС-11, предоставления гарантии в период гарантийной эксплуатации объекта и возврата заказчику невовлеченных материалов заказчика. Применительно к договорам подряда от 12.12.2014 № 3175714/1176Д, от 17.12.2014 № 3175714/1098Д, от 24.02.2016 № 3175716/0275Д, по которым заказчиком выплачены зарезервированные суммы, подрядчиком не выполнены условия о предоставлении гарантии в период гарантийной эксплуатации объекта и о возврате заказчику невовлеченных материалов заказчика. В связи с этим, ответчик указывает, что фактически обязательства по выплате зарезервированных сумм по договорам подряда от 12.12.2014 № 3175714/1176Д, от 17.12.2014 № 3175714/1098Д, от 24.02.2016 № 3175716/0275Д были исполнены заказчиком в полном объеме ранее согласованного в договоре подряда срока, в связи с чем основания для взыскания неустойки, начисленной на зарезервированные суммы по вышеуказанным договорам, в общем размере 421 070,16 руб. отсутствуют.

В части требований подрядчика о взыскании зарезервированных сумм по договорам подряда от 22.12.2014 № 3175714/1099Д, от 11.02.2015 № 3175715/0245Д, от 16.12.2015 № 3175716/0081Д в общем размере 3 745 811,24 руб. а также неустойки, начисленной на зарезервированные суммы по данным договорам в общем размере 312 554,95 руб. С целью обеспечения исполнения подрядчиком принятых по договорам обязательств, в заключенных договорах сторонами предусмотрено положение о резервировании части стоимости:

- от 22.12.2014 № 3175714/1099Д – 379 721,70 руб. (10%  на основании п. 6.3. договора в ред. дополнительного соглашения от 01.02.2015),

- от 11.02.2015 № 3175715/0245Д – 240 539,98 руб. (5%  на основании п. 6.3. договора в ред. дополнительного соглашения от 15.07.2016),

- от 16.12.2015 № 3175716/0081Д– 3 125 549,56 руб. (5%  на основании п. 6.3. договора в ред. дополнительного соглашения от 15.07.2016).

Итого зарезервировано 3 745 811,24 руб.

По условиям договоров зарезервированные суммы выплачиваются подрядчику при выполнении им следующих условий: наличие акта приемки законченного строительством объекта формы КС-11; предоставление гарантии на исполнение обязательств подрядчиком в период гарантийной эксплуатации объекта; сдача на склад невовлеченных материалов заказчика, а в случае утраты материалов заказчика - полное возмещение стоимости материалов заказчика, включающей в себя учетную стоимость материально-технических ресурсов заказчика с учетом транспортно-заготовительных расходов.

При этом стороны договорились, что в отношении сумм резервирования по договорам проценты на сумму долга не начисляются.

Подрядчик вел работы по строительству с существенным отставанием от графиков производства работ, в связи с чем календарные сроки начала и окончания выполнения работ, а также сроки выполнения отдельных этапов работ по договорам неоднократно переносились.

Ввиду того, что к установленным договорам срокам по вине подрядчика работы не были завершены и объекты не были построены, договоры подряда от 22.12.2014 № 3175714/1099Д, от 11.02.2015 № 3175715/0245Д, от 16.12.2015 № 3175716/0081Д были расторгнуты сторонами путем подписания соглашений о расторжении.

С учетом изложенного, отражение зарезервированных сумм в актах сверки взаимных расчетов, подписываемых сторонами после расторжения договоров, свидетельствует о сохранении действия условий договоров в части гарантийных обязательств подрядчика, а не о наступлении срока выплаты зарезервированных сумм.

При этом по перечисленным договорам подрядчиком не исполнены обязательства по строительству объектов. Акты приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 подрядчиком не представлены, гарантии на исполнение обязательств в период гарантийной эксплуатации объектов отсутствуют. Кроме того, заказчик понес убытки в сумме невозвращенных до настоящего момента материалов заказчика, переданных подрядчику на давальческой основе; соответствующие требования включены в реестр требований кредиторов подрядчика.

Следовательно, вышеуказанные условия выплаты зарезервированных сумм подрядчиком не выполнены.

Таким образом, требования подрядчика об уплате зарезервированных сумм противоречат предмету договоров, заключенных в отношении завершенных строительством объектов, а не отдельных этапов работ, частично выполненных подрядчиком, заказчик не смог получить то, на что рассчитывал при заключении договора - законченные строительством объекты.

При этом факт возбуждения в отношении подрядчика дела о банкротстве при решении вопроса о выплате зарезервированных сумм не имеет правового значения, поскольку в соответствии со ст. 63 Федерального закона N 127-ФЗ срок исполнения возникших до введения процедуры наблюдения денежных обязательств и уплаты обязательных платежей считается наступившим у должника (Подрядчика), а не у Заказчика. То есть на обязательства контрагентов Подрядчика такие последствия не распространяются, что также подтверждается сложившейся судебной практикой (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.08.2017 N 09АП-20975/2017 по делу N А40-251258/2016, Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 15.02.2017 N Ф02-7747/2016 по делу N АЗЗ-20833/2014, Определение ВС РФ от 30.06.2017 N 304-ЭС17-1977 по делу N А45-3928/2016, Определение ВС РФ от 12.03.2018 N 305-ЭС17-17564 по делу N А45-3928/2016). Во всех перечисленных случаях суды пришли к однозначному выводу о том, что в случаях, когда подрядчиком не выполнены все предусмотренные договором условия выплаты зарезервированных сумм, сам по себе факт нахождения подрядчика в состоянии банкротства не влечет возникновения у заказчика обязательств по досрочной выплате данных резервов. При наличии у должника контрагентов-заказчиков, срок исполнения обязательств которых не наступил, несостоятельный подрядчик имеет возможность реализовать дебиторскую задолженность, получив до ликвидации денежный эквивалент за свой актив.

На основании вышеизложенного, ввиду того, что резервирование стоимости работ производилось с целью обеспечения исполнения обязательств подрядчиком, учитывая, что обязательства Подрядчика по строительству объектов не исполнены, акты приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 подрядчиком не представлены, гарантии на исполнение обязательств в период гарантийной эксплуатации объектов отсутствуют, невовлеченные материалы заказчику не возвращены, оснований для выплаты сумм резерва по договорам подряда от 22.12.2014 № 3175714/1099Д, от 11.02.2015 № 3175715/0245Д, от 16.12.2015 № 3175716/0081Д в общем размере 3 745 811,24 руб., а также начисленной на суммы резерва неустойки в общем размере 312 554,95 руб. не имеется.

С учетом возражений ответчика, истцом заявлено об уточнении заявленных требований, истец просит взыскать с акционерного общества «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная группа Ангара»:

- неосновательное обогащение по договору подряда № 3175714/1099Д на выполнение работ от 22.12.2014 в размере 379 721 рубль 70 копеек;

- неосновательное обогащение по договору подряда № 3175715/0245Д на выполнение работ от 11.02.2015 в размере 240 539 рублей 98 копеек;

- неосновательное обогащение по договору подряда № 3175716/0081Д на выполнение работ от 16.12.2015  в размере 3 125 549 рублей 56 копеек;

- неустойку   за   просрочку   обязательств   по   оплате   по   договору   подряда   №3175714/1176Д на выполнение работ от 12.12.2014  за период с 02.03.2017  по 27.11.2017  в размере 313 080 рублей 81 копейка;

- неустойку   за   просрочку   обязательств   по   оплате   по   договору   подряда   №3175714/1098Д на выполнение работ от 17.12.2014  за период с 02.03.2017  по 27.11.2017  в размере 396 912 рублей 04 копейки;

- неустойку за просрочку обязательств по оплате по договору подряда № 3175716/0081Д на выполнение работ от 16.12.2015  за период с 11.05.2017  по 27.11.2017  в размере 787 006 рублей 20 копеек;

-  неустойку   за   просрочку   обязательств   по   оплате   по   договору   подряда   №3175716/0275Д на выполнение работ от 24.02.2016  за период с 30.04.2017 по 27.11.2017  в размере 1 519 988 рублей 27 копеек.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В том числе гражданские права и обязанности могут возникать из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Правоотношения истца и ответчика возникли из договоров № 3175714/1099Д от 22.12.2014, № 3175715/0245Д от 11.02.2015, № 3175716/0081Д от 16.12.2015, №3175714/1176Д от  12.12.2014, №3175714/1098Д от 17.12.2014, № 3175716/0081Д от 16.12.2015, №3175716/0275Д от 24.02.2016, являющихся по своей правовой природе договором строительного подряда, регламентированы положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Условия спорных договоров подпадают под определение статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В статьях 711 и 746 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что основанием для возникновения у заказчика обязательств по оплате выполненных работ в порядке, установленном договором подряда является сдача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работ в установленном законом и договором порядке.

Согласно статье 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Истец просит взыскать с ответчика неосновательное обогащение (гарантийные удержания) по договору № 3175714/1099Д от 22.12.2014 в размере 279 721,70 руб., № 3175715/0245Д от 11.02.2015 в размере 240 539,98 руб., № 3175716/0081Д от 16.12.2015 в размере 3 125 549,56 руб., а также начисленную неустойку.

В соответствии со статьей 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения; по требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (статья 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 и статьей 421 Гражданского кодекса Российской Федерации (здесь и далее в редакции, подлежащей применению к спорным отношениям; далее - Гражданский кодекс) юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Из указанного принципа свободы договора следует, что стороны подрядной сделки вправе определить порядок оплаты выполненных работ по своему усмотрению, в частности, отступить от общего правила статьи 711 Гражданского кодекса об оплате работ после окончательной сдачи их результата, установив, что частичная оплата выполненных работ приостанавливается до истечения гарантийного срока. Согласно сложившейся практике предпринимательских отношений в сфере подряда такое условие именуется гарантийным удержанием.

В соответствии с п. 6.3 договора подряда № 3175714/1099Д  заказчик резервирует 10 % стоимости работ и затрат до завершения строительства объекта (гарантийные удержания).

В соответствии с п. 6.3 договора подряда № 3175716/0081Д заказчик резервирует 10 % стоимости работ и затрат до завершения строительства объекта (гарантийные удержания).

В соответствии с п. 6.3 договора подряда № 3175715/0245Д заказчик резервирует 10 % стоимости работ и затрат до завершения строительства объекта (гарантийные удержания).

Подобное удержание применено сторонами для покрытия возможных расходов заказчика, вызванных ненадлежащим выполнением подрядчиком обязательств в отношении качества строительных работ.

По условиям договоров подряда от 22.12.2014 № 3175714/1099Д, от 11.02.2015 № 3175715/0245Д, от 16.12.2015 № 3175716/0081Д выплата гарантийного удержания производится ответчиком при условии не только наличия акта приемки законченного строительством объекта формы КС-11, но и также предоставления гарантии на исполнения обязательств подрядчиком в период гарантийной эксплуатации объекта (либо истечения гарантийного срока).

Таким образом, вопреки доводам истца, гарантийное удержание в рассматриваемом случае обеспечивает обязанности подрядчика не только на период самих работ, но и после завершения строительства объекта в течение срока его гарантийной эксплуатации.

Соответственно, в связи с отсутствием подписанного между истцом и ответчиком акта приёмки законченного строительством объекта (формы КС-11) и предоставленной гарантии на исполнение обязательств подрядчиком в период гарантийной эксплуатации объекта, условия для окончательного расчета с ответчиком не состоялись.

Условия договора, которые в силу своей природы предполагают их применение после расторжения договора (например, гарантийные обязательства в отношении товаров или работ по расторгнутому впоследствии договору и т.д.) либо имеют целью регулирование отношений сторон в период после расторжения (например, возврата уплаченного аванса и т.п.), сохраняют свое действие и после расторжения договора (пункт 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2014 N 35 «О последствиях расторжения договора»).

Соответственно, в связи с отсутствием подписанного между истцом и ответчиком акта приёмки законченного строительством объекта (формы КС-11) по договорам № 3175715/0245Д, № 3175714/1099Д (в настоящее время ведутся строительные работы), а также наличия предоставленной гарантии  на исполнение обязательств подрядчиком в период гарантийной эксплуатации объекта (п.8.1.4 договоров – 36 месяцев), условия для окончательного расчета с ответчиком не состоялись.

Согласно пункту 2 статьи 453, пункту 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации при правомерном одностороннем отказе от исполнения договора обязательства сторон прекращаются.

Исходя из данной нормы права, односторонний отказ от договора влечет прекращение обязательств на будущее время (прекращается обязанность подрядчика выполнять работы в будущем). Однако при этом сохраняется его ответственность за качество уже выполненных работ (пункт 2 статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации, абзац второй пункта 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2014 N 35 "О последствиях расторжения договора"). Таким образом, сам по себе отказ заказчика от исполнения договора подряда из-за действий (бездействия) подрядчика не является основанием для досрочной выплаты гарантийного удержания.

При ином подходе подрядчик, допустивший существенные нарушения сроков выполнения работ, послужившие основанием для прекращения договорных отношений по инициативе заказчика, в части сроков оплаты фактически выполненных работ будет поставлен в лучшее положение по сравнению с подрядчиком, выполнившим работы вовремя, что недопустимо.

Аналогичные выводы нашли отражение в определении Верховного Суда РФ от 12.03.2018 N 305-ЭС17-17564 по делу N А40-67546/2016.

Также не может служить основанием для досрочной оплаты всего объема выполненных работ факт возбуждения дела о банкротства подрядчика. Абзацем вторым пункта 1 статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) предусмотрено, что со дня открытия конкурсного производства считается наступившим срок исполнения возникших до этого денежных обязательств должника.

Такие последствия на обязательства контрагентов должника-подрядчика не распространяются. Это означает, что при наличии у должника контрагентов-заказчиков, срок исполнения обязательств которых не наступил, несостоятельный подрядчик имеет возможность реализовать дебиторскую задолженность, получив до ликвидации денежный эквивалент за свой актив (Определение Верховного Суда РФ от 30.06.2017 по делу N 304-ЭС17-1977, А45-3928/2016).

Приведенные истцом ссылки на судебные акты, а именно постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 29.06.2017 по делу № А33-13788/2016, а также постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 12.04.2017 по тому же делу, не может быть приняты во внимание, поскольку приняты по делу с иными фактическими обстоятельствами.

На основании изложенного, срок выплаты гарантийных удержаний по договорам подряда от 22.12.2014 № 3175714/1099Д, от 11.02.2015 № 3175715/0245Д, от 16.12.2015 № 3175716/0081Д в общем размере 3 745 811,24 руб. не наступил, в связи с чем основания для удовлетворении иска в указанной части отсутствуют.

Поскольку в удовлетворении требований истца о взыскании с ответчика суммы гарантийного удержания судом отказано, основания для взыскания неустойки, начисленной на указанные суммы,  также отсутствуют.

В соответствии с п. 16.2 договора № 3175716/0081Д за задержку оплаты за выполненные строительно-монтажные работы (этапы работ) на срок свыше 30 дней от срока наступления обязательства по оплате предусмотрена неустойка в размере 0,1 % от своевременно не уплаченной суммы за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 10 % от своевременно не оплаченной суммы.

В связи с тем, что в размер неустойки превысил 10 % от своевременно не оплаченной суммы, то размер неустойки подлежит уменьшению и составляет: по сумме долга - 4 744 512 рублей 59 копеек - 10 % = 474 451 рубль 25 копеек. Сумма долга ответчиком не оспаривается, оплачено в добровольном порядке.

В соответствии с п. 16.2 договора № 3175714/1098Д  за задержку оплаты за выполненные строительно-монтажные работы (этапы работ) на срок свыше 30 дней от срока наступления обязательства по оплате предусмотрена неустойка в размере 0,1 % от своевременно не уплаченной суммы за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 10 % от своевременно не оплаченной суммы.

В связи с тем, что в размер неустойки превысил 10 % от своевременно не оплаченной суммы, то размер неустойки подлежит уменьшению и составляет: по сумме долга - 2 860 257 рублей 69 копеек - 10 % = 286 025 рублей 76 копеек

В соответствии с п. 16.2 договора № 3175714/1176Д за задержку оплаты за выполненные строительно-монтажные работы (этапы работ) на срок свыше 30 дней от срока наступления обязательства по оплате предусмотрена неустойка в размере 0,1 % от своевременно не уплаченной суммы за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 10 % от своевременно не оплаченной суммы.

Общий размер задолженности по договору № 3175714/1176Д за выполненные работы в пользу ООО «Строительная группа Ангара» составляет 2 356 074 рубля 59 копеек. В связи с тем, что в размер неустойки превысил 10 % от своевременно не оплаченной суммы, то размер неустойки подлежит уменьшению и составляет: по сумме долга - 2 356 074 рубля 59 копеек - 10 % = 235 607 рублей 45 копеек.

В соответствии с п. 24.1 договора подряда № 3175716/0275Д  конкретные нарушения и меры ответственности за них установлены сторонами в приложении № 19. Согласно приложению № 19 за задержку заказчиком сроков оплаты на срок свыше 30 дней от срока наступления обязательства по оплате предусмотрена неустойка в размере 0,1 % от своевременно не уплаченной суммы за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 20 % от своевременно не оплаченной суммы.

В связи с тем, что в размер неустойки превысил 20 % от своевременно не оплаченной суммы, то размер неустойки подлежит уменьшению и составляет: по сумме долга - 6 436 388 рублей 77 копеек - 20 % = 1 287 277 рублей 75 копеек.

Довод ответчика об отсутствии оснований начисления неустойки после расторжения договора основан на неверном толковании закона.

Таким образом, обоснованно начисленный размер неустойки составляет 2 283 362 руб. 21 коп. В остальной части иск  удовлетворению не подлежит.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворённых требований.

Согласно положениям статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям истца. Поскольку истцом при обращении с иском заявлено о предоставлении отсрочки уплаты государственной пошлины, государственная пошлина в сумме 19 182 руб. 43 коп., исчисленная в соответствии с положениями статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета. В остальной части - 37 631 руб. 57 коп. государственная пошлина подлежит взысканию в доход федерального бюджета с общества с ограниченной ответственностью "Строительная группа Ангара".

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края 

 

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с акционерного общества "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Строительная группа Ангара" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 2 283 362 руб. 21 коп. неустойки, в доход федерального бюджета 19 182 руб. 43 коп. государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная группа Ангара" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 37 631 руб. 57 коп. государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд Красноярского края.

 

 

Судья

Е.В. Курбатова