Арбитражный суд Волгоградской области  

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 

г. Волгоград Дело № А12-416/2023 «23» августа 2023 года 

Резолютивная часть решения объявлена 16 августа 2023 года Полный текст решения изготовлен 23 августа 2023 года 

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Чуриковой Натальи  Владимировны, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Донцовой  Н.Н., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью «ВолгоЮгПроект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу  с ограниченной ответственностью «ГП-СТРОЙ 34» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) об обязании и взыскании денежных средств и по встречному исковому  заявлению общества с ограниченной ответственностью «ГП-СТРОЙ 34» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «ВолгоЮгПроект»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании денежных средств, с привлечением к  участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований  относительно предмета спора – государственного казенного учреждения Волгоградской  области «Управление капитального строительства» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>), государственного автономного учреждения Волгоградской области  «Управление государственной экспертизы проектов» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>),  

при участии в судебном заседании: от истца – ФИО1 по доверенности, от ответчика – ФИО2 по доверенности, 

от третьего лица – ГКУ ВО «Управление капитального строительства» - ФИО3  по доверенности.  

В Арбитражный суд Волгоградской области поступило исковое заявление общества с  ограниченной ответственностью «ВолгоЮгПроект» к обществу с ограниченной  ответственностью «ГП-СТРОЙ 34» о взыскании задолженности по договору № 96 от  09.02.2022 в размере 475 000 руб. и неустойки за период с 05.08.2022 по 20.11.2022 в  размере 51 300 руб., а также судебных расходов по оплате государственной пошлины в  размере 19 526 руб. и расходов по оплате услуг представителя в размере 25 000 руб. (с  учетом устного ходатайства в порядке ст. 49 АПК РФ принятого судом).  

Требования истца мотивированны тем, что им были выполнены работы по договору,  которые не были оплачены ответчиком, в связи с чем произведено начисление неустойки.  

Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 24.03.2023 к  производству принято встречное исковое заявление ООО «ГП-СТРОЙ 34» к ООО  

«ВолгоЮгПроект» о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ в рамках  договора № 96 от 09.02.2022 за период с 31.05.2022 по 30.08.2022 в размере 87 400 руб.  

В процессе рассмотрения спора, ООО «ГП-СТРОЙ 34» уточнило встречные  требования и просило взыскать неустойку за нарушение сроков выполнения работ в рамках  договора № 96 от 09.02.2022 за период с 31.05.2022 по 30.08.2022 в размере 87 400 руб. и  убытки в размере 352 540 руб.  

В соответствии со ст. 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном  суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение  дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер  исковых требований.  

Согласно положению п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 31.10.1996 № 13 «О  применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при  рассмотрении дел в суде первой инстанции», под увеличением размера исковых требований  следует понимать увеличение суммы иска по тому же требованию, которое было заявлено  истцом в исковом заявлении.  

Увеличение размера исковых требований не может быть связано с предъявлением  дополнительных исковых требований, которые не были истцом заявлены в исковом  заявлении. Так, например, требование о применении имущественных санкций не может  расцениваться как увеличение размера требований по иску о взыскании основной  задолженности. Такое требование может быть заявлено самостоятельно (абз. 5 п. 3  Постановления Пленума ВАС РФ от 31.10.1996 № 13).  

Заявление ООО «ГП-СТРОЙ 34» об уточнении исковых требований в части взыскания  убытков в размере 352 540 руб., которое при подаче иска не заявлялось и может быть  оспорено истцом в самостоятельном исковом порядке, судом рассмотрено и отклонено,  поскольку с учетом ст. 49 АПК РФ изменяет предмет и основание иска, что является  недопустимым.  

Таким образом, суд рассматривает встречные требования о взыскании неустойки за  нарушение сроков выполнения работ в рамках договора № 96 от 09.02.2022 за период с  31.05.2022 по 30.08.2022 в размере 87 400 руб.  

Исследовав материалы дела, арбитражный суд, - 

УСТАНОВИЛ:

Как следует из пояснений истца, 09.02.2022 г. между ООО «ВолгоЮгПроект»  (Субподрядчик) и ООО «ГП-Строй 34» (Генеральный подрядчик) был заключен  договор № 96 на выполнение проектно-изыскательских работ.  

По условиям п.1.1. Договора, Генеральный подрядчик поручает, а  Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению проектно-изыскательских работ с передачей Генеральному подрядчику их результатов по  объекту: «ООВП Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Среднеахтубинская центральная районная больница», Волгоградская область,  Среднеахтубинский район, х. Лебяжья Поляна».  

Согласно п.1.2. Договора Состав (виды, перечень) и объемы выполняемых по  настоящему договору работ, сроки выполнения работ и передача их результатов  Генеральному подрядчику установлены в Техническом задании - приложении № 1  (далее - Приложение), являющимся неотъемлемой частью Договора.  

Состав работ, согласованных сторонами Договора, а также оцененных  сторонами суммой – 950 000 руб., выполняемых Субподрядчиком полностью  поименован в п.1.12. Приложения.  

Данные работы выполнены истцом в полном объеме и претензий к ним не  имеется.  

Ответчиком произведена оплата выполненных работ в размере 475 000 руб. 

В адрес ООО «ВолгоЮгПроект» поступило письмо с предложением  подписания дополнительного соглашения к договору № 96 на выполнение проектно-изыскательских работ от 09.02.2022 г., которым предлагалось установить новую  стоимость работ, а именно - 570 875 руб.  

Основанием для подписания дополнительного соглашения ответчик указывает,  что ООО «ВолгоЮгПроект» выполнило, а также включило в изначальную цену  договора – 950 000 руб., несогласованные с ООО «ГП-Строй 34» работы, в связи с  чем, ответчик отказывается их оплачивать.  

Посчитав, что работы по договору субподрядчиком выполнены в полном  объеме на сумму 950 000 руб., а задолженность ответчиком не оплачена, истец  обратился с настоящим иском в суд.  

ООО «ГП-Строй 34» в свою очередь предъявлены встречные требования о  взыскании с субподрядчика неустойки за нарушение срока выполнения работ за период с  31.05.2022 по 30.08.2022 в размере 87 400 руб.  

Изучив материалы дела, доводы сторон и собранные по делу доказательства в их  совокупности и взаимосвязи, суд приходит следующим выводам.  

Порядок судебной защиты нарушенных либо оспариваемых прав и законных  интересов осуществляется в соответствии со статьями 11, 12 Гражданского кодекса  Российской Федерации и статьей 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации.  

Поэтому предъявление любого иска должно иметь своей целью восстановление  нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов обратившегося в суд лица.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации  гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и  иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя  и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла  гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.  

Статья 307 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что в  силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица  (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу,  уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет  право требовать от должника исполнения его обязанности.  

Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных  оснований, указанных в настоящем Кодексе.  

На основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями  обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких  условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно  предъявляемыми требованиями.  

В силу положений статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации  односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его  условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.  

Эффективная судебная защита нарушенных прав может быть обеспечена  своевременным заявлением возражений или встречного иска. Арбитражный суд,  рассматривающий дело о взыскании по договору, оценивает обстоятельства,  свидетельствующие о заключенности и действительности договора независимо от того,  заявлены ли возражения или встречный иск. При подготовке к судебному разбирательству  дела о взыскании по договору арбитражный суд определяет круг обстоятельств, имеющих  значение для правильного рассмотрения дела, к которым относятся обстоятельства о  соблюдении правил его заключения, наличии полномочий на заключение договора у лиц,  

его подписавших (пункты 1, 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 23 июля 2009 года № 57 «О некоторых процессуальных  вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим  исполнением договорных обязательств»).  

В силу пунктов 1, 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации  граждане и юридические лица свободны в заключении договора, условия договора  определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего  условия предписано законом или иными правовыми актами. Принцип свободы договора  предполагает добросовестность действий его сторон, разумность и справедливость его  условий, в частности, их соответствие действительному экономическому смыслу  заключаемого соглашения.  

Свобода договора предполагает, что стороны действуют по отношению друг к  другу на началах равенства и автономии воли и определяют условия договора  самостоятельно в своих интересах, при этом не означает, что стороны при заключении  договора могут действовать и осуществлять права по своему усмотрению без учета прав  других лиц (своих контрагентов), а также ограничений, установленных Кодексом и  другими законами.  

В соответствии со статьей 431 Гражданского кодекса Российской Федерации при  толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение  содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае  его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом  договора в целом.  

Норма, определяющая права и обязанности сторон договора, толкуется судом  исходя из ее существа и целей законодательного регулирования, то есть суд принимает во  внимание не только буквальное значение содержащихся в ней слов и выражений, но и те  цели, которые преследовал законодатель, устанавливая данное правило (пункт 1  Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 марта  2014 года № 16 «О свободе договора и ее пределах»).  

Условия договора подлежат толкованию таким образом, чтобы не позволить какой-либо стороне договора извлекать преимущество из ее незаконного или недобросовестного  поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). Толкование  договора не должно приводить к такому пониманию условия договора, которое стороны с  очевидностью не могли иметь в виду (пункт 43 Постановления Пленума Верховного Суда  Российской Федерации от 25 декабря 2018 года № 49 «О некоторых вопросах применения  общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и  толковании договора»).  

Заключенный сторонами договор субподряда является договором подряда и  регулируется, как общими положениями гражданского законодательства, так и  специальными нормами для отдельных видов обязательств, содержащихся в главе 37  «Подряд» Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Названный договор не признан недействительным или незаключенным в  установленном законом порядке.  

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию  другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а  заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702  Гражданского кодекса Российской Федерации).  

В пункте 1 ст. 706 ГК РФ указано, что если из закона или договора подряда не  вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично,  подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств других лиц  (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.  

Состав работ, согласованных сторонами Договора, а также оцененных сторонами  суммой – 950 000 руб., выполняемых Субподрядчиком поименован в п.1.12. Приложения.  

В соответствии со статьей 424 Гражданского кодекса Российской Федерации  исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. В  предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.),  устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами  и (или) органами местного самоуправления. Изменение цены после заключения договора  допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в  установленном законом порядке. В случаях, когда в возмездном договоре цена не  предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, исполнение  договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно  взимается за аналогичные товары, работы или услуги.  

Согласно статье 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре  подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения.  При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3  статьи 424 настоящего Кодекса.  

Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и  причитающееся ему вознаграждение.  

Цена работы может быть определена путем составления сметы. 

В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной  подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента  подтверждения ее заказчиком.  

Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии  других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой.  

Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой  причине в существенном превышении определенной приблизительно цены работы,  подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика. Заказчик, не  согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе  отказаться от договора. В этом случае подрядчик может требовать от заказчика уплаты  ему цены за выполненную часть работы.  

Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходимости  превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя  право на оплату работы по цене, определенной в договоре.  

Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее  уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда  исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ  или необходимых для этого расходов.  

При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования,  предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг,  которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, подрядчик имеет право  требовать увеличения установленной цены, а при отказе заказчика выполнить это  требование - расторжения договора в соответствии со статьей 451 настоящего Кодекса.  

Цена договора подряда после его заключения может быть изменена по соглашению  сторон, или на условиях договора, или в установленном законом порядке (пункт 2 статьи  424 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункты 5, 6 статьи 709 Гражданского  кодекса Российской Федерации).  

В ряде случаев у сторон может возникнуть необходимость изменить договорную  цену. Например, это касается случаев, когда в процессе исполнения договора появились  обстоятельства, из-за которых выполнение работы по прежней цене становится  невыгодным той или иной стороне (изменение стоимости материалов и оборудования,  

уровня инфляции, рыночных или нормативно установленных индексов цен,  коэффициентов и т.п.).  

Стороны могут согласовать в договоре следующие способы изменения цены: - изменение цены по соглашению сторон; - одностороннее изменение цены; - автоматическое изменение цены при наступлении определенных условий. 

Цена может быть изменена по соглашению сторон (пункт 1 статьи 450  Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 2 статьи 424 Гражданского кодекса  Российской Федерации) либо по требованию подрядчика в следующих случаях:  

- при согласовании твердой цены - в связи с существенным изменением  обстоятельств, на которое стороны не рассчитывали (абзац 2 пункта 6 статьи 709  Гражданского кодекса Российской Федерации);  

- при согласовании приблизительной цены - в порядке, установленном пунктом 5  статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Изменение цены так же, как и других условий договора, возможно в судебном  порядке по основаниям, указанным в пункте 2 статьи 450 и статье 451 Гражданского  кодекса Российской Федерации.  

Соглашение об изменении цены договора подряда заключается в той же форме, что  и договор (пункт 1 статьи 452 Гражданского кодекса Российской Федерации). При  заключении договора в письменной форме изменение его условий осуществляется в такой  же форме, например путем подписания дополнительного соглашения к договору (пункт 2  статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Соглашение об изменении цены может быть заключено в любой момент в течение  срока действия договора. Однако допускается согласование изменения цены и после  выполнения работ. Так, подписание сторонами соглашения о выполнении  дополнительных работ после их фактического выполнения будет означать согласие  заказчика на выполнение этих работ и увеличение цены.  

Если цена по договору определяется в соответствии со сметой, то для изменения  цены необходимо внести соответствующие корректировки в смету. Смета может быть  включена в текст дополнительного соглашения или оформлена в виде приложения к нему.  Изменение цены по видам работ в пределах сметной стоимости также должно быть  согласовано сторонами.  

В рассматриваемом случае, цена договора субподряда, является твердой и  определена сторонами в размере 950 000 руб.  

По условиям раздела 2 договора, результат выполненных истцом работ поставлен в  зависимость от получения положительного заключения государственной экспертизы.  

Факт ее получения, участниками процесса не оспаривается. 

Согласно ст. 711 ГК РФ и разъяснениям, содержащимся в пункте 8  Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации от 24.01.2000 г. № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору  строительного подряда», основанием для возникновения обязательства заказчика по  оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.  

Принимая во внимание, что работы субподрядчиком выполнены и претензий к  качеству у ответчика не имеется, а также учитывая цену договора, которая не поставлена в  зависимость от условий Государственного контракта № 67-ЭА.2021 от 07.12.2021 с  основным заказчиком ГКУ ВО «Управление капитального строительства», и является  твердой, требования ООО «ВолгоЮгПроект» о взыскании задолженности в размере 475  000 руб. заявлены обоснованно и подлежат удовлетворению.  

Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательства может  обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством,  банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или  договором.  

В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается  определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить  кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в  частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор  не обязан доказывать причинение ему убытков.  

По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение  ему убытков.  

Сумма неустойки исчислена истцом, исходя из 0,1% предусмотренного пунктом 6.4  договора на случай несоблюдения сроков оплаты за каждый день просрочки.  

Истцом произведено начисление неустойки за период с 05.08.2022 по 20.11.2022 в  размере 51 300 руб.  

Вместе с тем, производя расчет неустойки, начиная с 05.08.2022, истцом не учтено,  что результат работ вместе с актом приема-передачи и положительным заключением  государственной экспертизы были переданы Генеральному подрядчику 30.10.2022, что  подтверждается накладной № 13/1.  

В соответствии с п. 2.2.3 Договора, окончательная оплата за выполненные истцом  работы, производится Генеральным подрядчиком в течение 10 календарных дней.  

Учитывая указанное условие, истец вправе требовать неустойку не ране 10.09.2022.  

Так, по расчету суда, неустойка за период с 10.09.2022 по 20.11.2022 составит  34 200 руб.  

При таких обстоятельствах, требования истца в указанной части, подлежат  частичному удовлетворению.  

Рассматривая встречные исковые требования о взыскании неустойки за нарушение  сроков выполнения работ в рамках договора № 96 от 09.02.2022 за период с 31.05.2022 по  30.08.2022 в размере 87 400 руб., суд руководствуется следующим.  

На основании пунктов 1, 2 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются  начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в  договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы  (промежуточные сроки).  

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не  предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение, как  начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.  

Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки  выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных  договором.  

Срок окончания работ по Договору, определен сторонами до 30.05.2022. 

Все необходимые для исполнения договора субподряда документы, были переданы  Субподрядчику в установленные сроки, а именно, 10.02.2022, что подтверждается актом  приема-передачи документов.  

При этом, результат работ вместе с актом приема-передачи и положительным  заключением государственной экспертизы были переданы Генеральному подрядчику  30.08.2022, что не оспаривается сторонами.  

Размер неустойки исчислен Генеральным подрядчиком из 0,1% предусмотренного  пунктом 6.4 договора.  

Расчет неустойки судом проверен и стороной не опровергнут, период неисполнения  денежного обязательства, его размер и ставка соответствуют условиям договора.  

Оснований для применения ст. 333 ГК РФ судом не установлено. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 81 постановления Пленума  Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами  некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об  ответственности за нарушение обязательств», если неисполнение или ненадлежащее  исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон, либо кредитор  умышленно или по неосторожности содействовал увеличению суммы неустойки, то  размер ответственности должника может быть уменьшен судом по этим основаниям в  соответствии с положениями статьи 404 Гражданского кодекса Российской Федерации  и что в дальнейшем не исключает применение статьи 333 Гражданского кодекса  Российской Федерации.  

Применяя названные разъяснения, необходимо учитывать требования статей  716, 719 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Согласно пунктам 1, 2 статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации  подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний  приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности  предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или  переданной для переработки (обработки) вещи; возможных неблагоприятных для  заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не  зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности  результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.  

Пунктом 1 статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации  предусмотрено, что подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу  приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору  подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической  документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению  договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих  о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный  срок (статья 328 ГК РФ).  

Закон прямо обязывает подрядчика поставить заказчика в известность о  приостановке работ, при этом не возлагая на него обязанности незамедлительно  представить подтверждающие документы.  

Доказательств свидетельствующих о приостановке выполнения работ в связи с  наличием трудностей в их выполнении у субподрядчика, сторонами суду не представлено.  

При таких обстоятельствах, требования по встречному иску подлежат  удовлетворению в полном объеме.  

Истец также просит взыскать с ответчика 25 000 руб. судебных расходов на оплату  услуг представителя.  

В подтверждение понесенных расходов на услуги представителя, истец представил  договор на оказание юридических услуг, а также платежные документы на указанную  сумму.  

Согласно ст.106 АПК РФ расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц,  оказывающих юридическую помощь (представителей) относятся к судебным издержкам.  

По правилам ст.110 АПК РФ расходы на оплату услуг представителей, понесенные  лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с  другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.  

Из разъяснений Пленума ВАС РФ, изложенных в информационном письме № 82 от  13.08.04 г., следует, что при определении разумных пределов расходов на оплату услуг  представителя может приниматься во внимание время, которое мог бы затратить на  

подготовку материалов квалифицированный специалист, продолжительность  рассмотрения и сложность дела.  

При определении разумных пределов расходов на оплату услуг представителя  могут приниматься во внимание, в частности: нормы расходов на служебные  командировки, установленные правовыми актами; стоимость экономных транспортных  услуг; время, которое мог затратить на подготовку материалов квалифицированный  специалист; сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов;  продолжительность рассмотрения и сложности дела. Доказательства, подтверждающие  разумность расходов на оплату услуг представителя, должна представлять сторона,  требующая возмещения указанных расходов (ст. 65 АПК РФ).  

Суд, принимает во внимание количество проведенных по делу судебных заседаний,  в которых принимал участие представитель истца, необходимость подготовки правовой  позиции в суде первой инстанции, времени потраченного на подготовку процессуальных  документов, и считает, что разумным пределом судебных издержек по настоящему делу  является взыскание судебных расходов на оплату услуг представителя в размере 25 000  руб.  

В соответствии с п. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами,  участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются  арбитражным судом со стороны пропорционально удовлетворенным требованиям.  

Поскольку суд пришел к выводу о частичном удовлетворении первоначальных  исковых требований и полном удовлетворении встречного иска, судебные издержки по  оплате государственной пошлины и оплате услуг представителя, подлежат  пропорциональному распределению на стороны, по правилам ст. 110 АПК РФ.  

В соответствии со статьей 410 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного  требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен  моментом востребования. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачет  встречного однородного требования, срок которого не наступил. Для зачета достаточно  заявления одной стороны.  

В пункте 1 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации от 29.12.2001 № 65 разъяснено, что обязательство не может быть прекращено  зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил, после предъявления  иска к лицу, имеющему право заявить о зачете. В этом случае зачет может быть  произведен при рассмотрении встречного иска, который принимается судом на основании  пункта 1 части 3 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации (в настоящее время пункт 1 части 3 статьи 132 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации).  

 В соответствии с абзацем вторым части 5 статьи 170 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации при полном или частичном  удовлетворении первоначального и встречного исков в резолютивной части решения  указывается денежная сумма, подлежащая взысканию в результате зачета.  

На основании изложенного и руководствуясь ст. 110, 167 - 170, Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

По первоначальному иску. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ГП-СТРОЙ 34» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «ВолгоЮгПроект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) долг в размере 475 000 руб.  и неустойку в размере 34 200 руб., а также расходы по оплате услуг представителя в  

размере 24 187 руб. 22 коп. и расходы по оплате государственной пошлины в размере 13  086 руб. 52 коп., а всего 546 473 руб. 74 коп.  

Обществу с ограниченной ответственностью «ВолгоЮгПроект» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в удовлетворении остальной части иска отказать.  

По встречному иску. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ВолгоЮгПроект» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «ГП-СТРОЙ 34» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку в размере 87 400  руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 3 496 руб., а всего  90 896 руб.  

В результате зачета первоначальных и встречных исковых требований взыскать с  общества с ограниченной ответственностью «ГП-СТРОЙ 34» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ВолгоЮгПроект»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) денежные средства в размере 455 577 руб. 74  коп.  

Обществу с ограниченной ответственностью «ВолгоЮгПроект» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) возвратить излишне уплаченную при подаче иска  государственную пошлину в сумме 6000 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской  области.  

Судья Н.В. Чурикова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 16.02.2023 9:18:00Кому выдана Чурикова Наталья Владимировна