АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; 

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-30483/2023

город Саратов

02 апреля 2024 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО1, ОГРНИП  

<

***>, ИНН 

<

***>, своими силами и с использованием своего материала в  течение 15 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу устранить  недостатки выполненных работ по договору строительного субподряда № 25 от 21.06.2022, а  именно:  

на дворовой территории по ул. Молодежная, д. 29 в р.п. Екатериновка Саратовской  области  

 №  п/ п  

Обоснование 

Наименовани

е работ и 

затрат 

Едини 

ца 

измер 

ения  

Количество 

Сметная стоимость в  базисном уровне цен (в  текущем уровне цен (гр. 8)  

для ресурсов,  отсутствующих в ФРСН),  

руб. 

Инде

ксы  

Сметн 

ая 

стоим ость в  текущ 

ем 

уровн е цен,  

руб.  

на 

един ицу  

коэффиц

иенты  

всего с  учетом  

коэффици

ентов  

на 

един

ицу 

коэффиц

иенты  

всего 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Раздел 1. Асфальтобетонное покрытие проезжей части (487 м2) 

1 ФЕРр68-12- Разборка 100 м3 0,2435 1  

4 покрытий и 852,8

оснований: 6  асфальтобето 

нных с помощью молотков отбойных  Объем=(487*0,05) / 100 

1 ОТ 1 313,6 26,28 8  

288,0 4 242,46 

 5 

2 ЭМ 3 898,6  

690,7 9 

 2 

3 в т.ч. ОТм 398,1 96,96 10,66 1  

 8 033,59  

 ЗТм чел.-ч 39,05 9,508675  

 Итого по 4 1  расценке 978,7 212,3 

7 3 

 ФОТ 410,6 9  

0 276,05 

 Приказ № НР % 102 102 418,8 9  

812/пр от Благоустройс 1 461,57  

21.12.2020 тво Прил. п.102 (ремонтно-строительные) 

 Приказ № СП % 54 54 221,7 5  

774/пр от Благоустройс 2 009,07  

11.12.2020 тво Прил. п.102 (ремонтно-строительные) 

 Всего по 1  позиции 852,8 

6 

2 ФССЦпг-01- Погрузо- 1 т 43,83 17,95 786,7 

01-01-045 разгрузочные груза 5  

работы при  автомобильн ых  

перевозках:  Погрузка  прочих  материалов,  деталей (с  использовани ем  

погрузчика)  

 Объем=0,05*487*1,8 

 Всего по 786,7 

позиции 5  

3 ФССЦпг-03- Перевозка 1 т 43,83 2,91 127,5 

21-01-001 грузов груза 5  

автомобилями -самосвалами  грузоподъемн остью 10 т  работающих  вне карьера  на  

расстояние: I  класс груза до  1 км  

 Объем=0,05*487*1,8 

 Всего по 127,5 

позиции 5  

4 ФЕР27-06- Розлив т 0,3409 24,61 

026-01 вяжущих материалов  Объем=487*0,7/1000 

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных 04.08.2020 технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

 № 421/пр элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 п.58б 

2 ЭМ 39,10 1,25 16,66  

3 в т.ч. ОТм 7,15 1,25 3,05 10,66 32,51  

Н 01.2.01.01 Битум т 1,03 0,351127  

 ЗТм чел.-ч 0,66 1,25 0,2812425  

 Итого по 39,10 16,66 

расценке 

 ФОТ 3,05 32,51   Приказ № НР % 147 147 4,48 47,79  

812/пр от Автомобильн21.12.2020 ые дороги 

Прил. п.21  

(в ред. пр. №  636/пр от  02.09.2021)  

 Приказ № СП % 134 0,85 113,9 3,47 37,03 

774/пр от Автомобильн11.12.2020 ые дороги 

Прил. п.21  

(в ред. пр. №  317/пр от  22.04.2022)  

 Всего по 24,61 

позиции 

5 ФССЦ- Битум т 0,351127 1 593,4 

01.2.01.01- нефтяной 690,0 0  1022 дорожный 0  

БНД 60/90  

 Всего по 593,4 

позиции 0  

6 ФЕР27-06- Устройство 1000 0,487 5 

029-01 покрытия из м2 719,7

горячих 7  

асфальтобето нных смесей  асфальтоукла дчиками  

второго 

типоразмера,  толщина слоя  4 см  

 Объем=487 / 1000 

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных 04.08.2020 технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

 № 421/пр элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 п.58б 

1 ОТ 182,3 1,15 102,1 26,28 2   2 1 683,45  

2 ЭМ 7 1,25 4  

479,0 552,8

 3 6  

3 в т.ч. ОТм 234,4 1,25 142,7 10,66 1   6 3 521,50  

4 М 874,7 426,0   8 2  

П, 04.2.01.01 Смесь т 0 0  Н асфальтобето 

нная 

 ЗТ чел.-ч 20,86 1,15 11,682643  

 ЗТм чел.-ч 18,85 1,25 11,474937  

5 

 Итого по 8 5  

расценке 536,1 080,9 

3 9 

 ФОТ 244,8 4  

4 204,95 

 Приказ № НР % 147 147 359,9 6  812/пр от Автомобильн 1 181,28  21.12.2020 ые дороги  

Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) 

 Приказ № СП % 134 0,85 113,9 278,8 4 

774/пр от Автомобильн 7 789,44  11.12.2020 ые дороги  

Прил. п.21  

(в ред. пр. №  317/пр от  22.04.2022)  

 Всего по 5 

позиции 719,7 

7 

7 ФЕР27-06- При 1000 0,487 345,4 

030-01 изменении м2 0 

толщины 

покрытия на  0,5 см  

добавлять или 

исключать: к  расценке 2706-029-01  

 Объем=487 / 1000 

 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) 

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных 04.08.2020 технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

 № 421/пр элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  

п.58б 

1 ОТ 3,29 2,3 3,69 26,28 96,97  

 (2*1,15)  

2 ЭМ 254,8 2,5 310,3  

 9 (2*1,25) 3  

3 в т.ч. ОТм 5,95 2,5 7,24 10,66 77,18  

 (2*1,25)  

4 М 2,94 2 2,86  

П, 04.2.01.01 Смесь т 0 2 0  Н асфальтобето 

нная 

 ЗТ чел.-ч 0,35 2,3 0,392035  

(2*1,15) 

 ЗТм чел.-ч 0,47 2,5 0,572225  

(2*1,25) 

 Итого по 261,1 316,8  

расценке 2 8  

 ФОТ 10,93 174,15  

 Приказ № НР % 147 147 16,07 256,00 

812/пр от Автомобильн21.12.2020 ые дороги 

Прил. п.21  

(в ред. пр. №  636/пр от  02.09.2021)  

 Приказ № СП % 134 0,85 113,9 12,45 198,36 

774/пр от Автомобильн11.12.2020 ые дороги 

Прил. п.21  

(в ред. пр. №  317/пр от  22.04.2022)  

 Всего по 345,4 

позиции 0  

8 ФССЦ- Смеси т 58,8296 483,0 28  

04.2.01.01- асфальтобето 2 415,8 

0051 нные плотные 7  мелкозернист 

ые тип В марка II  Объем=487*(96,6+24,2)/1000 

 Всего по 28  

позиции 415,8 

7 

 Итоги по смете:  

 Итого прямые затраты (справочно) 36 318  

550,4 831,55 

 3  

 в том числе:  

 Оплата труда рабочих 419,4 11  

 4 022,88  

 Эксплуатация машин 5 62  

906,0 986,98 

 9  

 в том числе оплата труда машинистов (Отм) 249,9 2  

 8 664,78  

 Материалы 30 244  

224,9 821,69 

 0  

 Строительные работы 37 344  

866,2 812,09 

 1  

 Строительные работы 37 343  

738,6 424,35 

 6  

 в том числе:  

 оплата труда 419,4 11  

 4 022,88  

1 кв 2023 эксплуатация машин и механизмов 5 10,66 61  

Письмо 778,5 599,24  

Минстроя 4 

России от 17.02.2023г. № 8389- ИФ/09 

 в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 249,9 2  

 8 664,78  

1 кв 2023 материалы 30 8,1 244  

Письмо 224,9 821,69  

Минстроя 0 

России от 17.02.2023г. № 8389- ИФ/09 

 накладные расходы 799,2 15  

 7 946,64  

 сметная прибыль 516,5 10  

 1 033,90  

(64), ФЕР, 1 Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость 127,5 10,88 1  

кв 2023 строительных работ 5 387,74  

Письмо Минстроя России от 17.02.2023г.  № 8389- ИФ/09 

 Итого ФОТ (справочно) 669,4 13  

 2 687,66  

 Итого накладные расходы (справочно) 799,2 15  

 7 946,64  

 Итого сметная прибыль (справочно) 516,5 10  

 1 033,90  

 НДС 20% 7 68  

573,2 962,42 

 4  

 ВСЕГО по смете 45 413  

439,4 774,51 

на дворовой территории по ул. Калинина, 

<

...>, ул. Пушкинская, д. 39 в р.п.  Екатериновка Саратовской области  

 №  п/ п  

Обоснование 

Наименование работ и затрат 

Едини 

ца 

измер 

ения  

Количество 

Сметная стоимость в  базисном уровне цен (в  текущем уровне цен (гр. 8)  

для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН),  

руб. 

Инде

ксы  

Сметн 

ая 

стоим ость в  текущ 

ем 

уровн е цен,  

руб.  

на 

един ицу  

коэффиц

иенты  

всего с  учетом  

коэффици

ентов  

на 

един ицу  

коэффиц

иенты  

всего 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Раздел 1. Асфальтобетонное покрытие (225м2, ширина 2 м) 

1 ФЕРр68-12- Разборка 100 м3 0,1125 856,0 

4 покрытий и 6 

оснований: асфальтобетонных с 

помощью  молотков  отбойных  

 Объем=(225*0,05) / 100 

1 ОТ 1 144,9 26,28 3  

288,0 1 808,23 

 5  

2 ЭМ 3 415,2  

690,7 1 

 2  

3 в т.ч. ОТм 398,1 44,80 10,66 477,57  

 8  

 ЗТ чел.-ч 155 17,4375  

 ЗТм чел.-ч 39,05 4,393125  

 Итого по 4 560,1  расценке 978,7 2  

7 

 ФОТ 189,7 4  

1 285,80 

 Приказ № НР % 102 102 193,5 4  

812/пр от Благоустройс 0 371,52  

21.12.2020 тво Прил. п.102 (ремонтно-строительные) 

 Приказ № СП % 54 54 102,4 2  

774/пр от Благоустройс 4 314,33  

11.12.2020 тво Прил. п.102 (ремонтно-строительные) 

 Всего по 856,0  позиции 6  

2 ФССЦпг-01- Погрузо- 1 т 20,25 17,95 363,4 

01-01-045 разгрузочные груза 9  

работы при  автомобильн ых  

перевозках:  Погрузка  прочих  

материалов,  деталей (с  использовани ем  

погрузчика)  

 Объем=0,05*225*1,8 

 Всего по 363,4  

позиции 9  

3 ФССЦпг-03- Перевозка 1 т 20,25 2,91 58,93 

21-01-001 грузов груза 

автомобилями -самосвалами  грузоподъемн остью 10 т  работающих  вне карьера  на  

расстояние: I  класс груза до  1 км  

 Объем=0,05*225*1,8 

 Всего по 58,93 

позиции 

4 ФЕР27-06- Розлив т 0,1575 11,38 

026-01 вяжущих материалов  Объем=225*0,7/1000 

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных 04.08.2020 технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

 № 421/пр элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 п.58б 

2 ЭМ 39,10 1,25 7,70  

3 в т.ч. ОТм 7,15 1,25 1,41 10,66 15,03  

Н 01.2.01.01 Битум т 1,03 0,162225  

 ЗТм чел.-ч 0,66 1,25 0,1299375  

 Итого по 39,10 7,70  

расценке 

 ФОТ 1,41 15,03  

 Приказ № НР % 147 147 2,07 22,09 

812/пр от Автомобильн21.12.2020 ые дороги 

Прил. п.21  

(в ред. пр. №  636/пр от  02.09.2021)  

 Приказ № СП % 134 0,85 113,9 1,61 17,12 

774/пр от Автомобильн11.12.2020 ые дороги 

Прил. п.21  

(в ред. пр. №  317/пр от  22.04.2022)  

 Всего по 11,38 

позиции 

5 ФССЦ- Битум т 0,162225 1 274,1 

01.2.01.01- нефтяной 690,0 6  1022 дорожный 0  

БНД 60/90  

 Всего по 274,1 

позиции 6  

6 ФЕР27-06- Устройство 1000 0,225 2 

029-01 покрытия из м2 642,6

горячих 2  

асфальтобето нных смесей  асфальтоукла дчиками  

второго 

типоразмера,  толщина слоя  4 см  

 Объем=225 / 1000 

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных  04.08.2020 технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных  

 № 421/пр элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 

п.58б 

1 ОТ 182,3 1,15 47,18 26,28 1   2 239,89  

2 ЭМ 7 1,25 2  

479,0 103,4

 3 8  

3 в т.ч. ОТм 234,4 1,25 65,94 10,66 702,92   6  

4 М 874,7 196,8   8 3  

П, 04.2.01.01 Смесь т 0 0  Н асфальтобето 

нная 

 ЗТ чел.-ч 20,86 1,15 5,397525  

 ЗТм чел.-ч 18,85 1,25 5,3015625  

 Итого по 8 2  

расценке 536,1 347,4 

3 9 

 ФОТ 113,1 1  

2 942,81 

 Приказ № НР % 147 147 166,2 2  812/пр от Автомобильн 9 855,93  21.12.2020 ые дороги  

Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) 

 Приказ № СП % 134 0,85 113,9 128,8 2  774/пр от Автомобильн 4 212,86  11.12.2020 ые дороги  

Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) 

 Всего по 2  

позиции 642,6 

2 

7 ФЕР27-06- При 1000 0,225 159,5 

030-01 изменении м2 7 

толщины 

покрытия на  0,5 см  

добавлять или 

исключать: к  расценке 2706-029-01  

 Объем=225 / 1000 

 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)  

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных  04.08.2020 технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных  

 № 421/пр элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 

п.58б 

1 ОТ 3,29 2,3 1,70 26,28 44,68  

 (2*1,15)  

2 ЭМ 254,8 2,5 143,3  

 9 (2*1,25) 8  

3 в т.ч. ОТм 5,95 2,5 3,35 10,66 35,71  

 (2*1,25)  

4 М 2,94 2 1,32  

П, 04.2.01.01 Смесь т 0 2 0  Н асфальтобето 

нная 

 ЗТ чел.-ч 0,35 2,3 0,181125  

 ЗТм чел.-ч 0,47 2,5 0,264375  

(2*1,25) 

 Итого по 261,1 146,4  

расценке 2 0  

 ФОТ 5,05 80,39  

 Приказ № НР % 147 147 7,42 118,17 

812/пр от Автомобильн21.12.2020 ые дороги 

Прил. п.21  

(в ред. пр. №  636/пр от  02.09.2021)  

 Приказ № СП % 134 0,85 113,9 5,75 91,56 

774/пр от Автомобильн11.12.2020 ые дороги 

Прил. п.21  

(в ред. пр. №  317/пр от  22.04.2022)  

 Всего по 159,5 

позиции 7  

8 ФССЦ- Смеси т 27,18 578,8 15  

04.2.01.01- асфальтобето 9 734,2 

0054 нные плотные 3  тип Г марка II  

 Объем=225*(96,6+24,2)/1000 

 Всего по 15  

позиции 734,2 

3 

 Итоги по смете:  

 Итого прямые затраты (справочно) 19 168  

492,5 410,95 

 2  

 в том числе:  

 Оплата труда рабочих 193,7 5  

 9 092,80  

 Эксплуатация машин 2 29  

728,7 100,91 

 0  

 в том числе оплата труда машинистов (Отм) 115,5 1  

 0 231,23  

 Материалы 16 134  

570,0 217,24 

 3  

 Строительные работы 20 180  

100,4 414,53 

 4  

 Строительные работы 20 179  

041,5 773,37 

 1  

 в том числе:  

 оплата труда 193,7 5   9 092,80  

1 кв 2023 эксплуатация машин и механизмов 2 10,66 28 

Письмо 669,7 459,75  Минстроя 7  

России от  

17.02.2023г. 

 № 8389- 

 ИФ/09  

 в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 115,5 1   0 231,23  

1 кв 2023 материалы 16 8,1 134 

Письмо 570,0 217,24  Минстроя 3  

России от  

17.02.2023г. 

ИФ/09 

 накладные расходы 369,2 7  

 8 367,71  

 сметная прибыль 238,6 4  

 4 635,87  

(64), ФЕР, 1 Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость 58,93 10,88 641,16  

кв 2023 строительных работ Письмо Минстроя России от 17.02.2023г.  № 8389- ИФ/09 

 Итого ФОТ (справочно) 309,2 6  

 9 324,03  

 Итого накладные расходы (справочно) 369,2 7  

 8 367,71  

 Итого сметная прибыль (справочно) 238,6 4  

 4 635,87  

 НДС 20% 4 36  

020,0 082,91 

 9  

 ВСЕГО по смете 24 216  

120,5 497,44 

 3  

на дворовой территории по ул. Железнодорожная, д. 16 в р.п. Екатериновка Саратовской  области  

 №  п/ п  

Обосновани 

е 

Наименовани 

е работ и 

затрат 

Едини 

ца 

измер 

ения  

Количество 

Сметная стоимость в  базисном уровне цен (в  текущем уровне цен (гр. 8)  

для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН),  

руб. 

Инде

ксы  

Сметн 

ая 

стоим ость в  текущ 

ем 

уровн е цен,  

руб.  

на 

един ицу  

коэффиц

иенты  

всего с  учетом  

коэффици

ентов  

на 

един ицу  

коэффиц

иенты  

всего 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Раздел 1. Асфальтобетонное покрытие проезжей части (326,2 м2) 

1 ФЕРр68-12- Разборка 100 м3 0,163 1 

4 покрытий и 240,3

оснований: 1  асфальтобето 

нных с 

помощью  молотков  отбойных  

 Объем=(326*0,05) / 100 

1 ОТ 1 209,9 26,28 5  

288,0 5 517,49 

 5  

2 ЭМ 3 601,5  

690,7 9 

 2  

3 в т.ч. ОТм 398,1 64,90 10,66 691,83  

 8  

 ЗТ чел.-ч 155 25,265  

 ЗТм чел.-ч 39,05 6,36515  

 Итого по 4 811,5  

расценке 978,7 4  

7 

 ФОТ 274,8 6  

 Приказ № НР % 102 102 280,3 6  

812/пр от Благоустройс 5 333,51  

21.12.2020 тво Прил. п.102 (ремонтно-строительные) 

 Приказ № СП % 54 54 148,4 3  

774/пр от Благоустройс 2 353,03  

11.12.2020 тво Прил. п.102 (ремонтно-строительные) 

 Всего по 1  позиции 240,3 

1 

2 ФССЦпг-01- Погрузо- 1 т 29,34 17,95 526,6 

01-01-045 разгрузочные груза 5  

работы при  автомобильн ых  

перевозках:  Погрузка  прочих  материалов,  деталей (с  использовани ем  

погрузчика)  

 Объем=0,05*326*1,8 

 Всего по 526,6 

позиции 5  

3 ФССЦпг-03- Перевозка 1 т 29,34 2,91 85,38 

21-01-001 грузов груза 

автомобилями -самосвалами  грузоподъемн остью 10 т  работающих  вне карьера  на  

расстояние: I  класс груза до  1 км  

 Объем=0,05*326*1,8 

 Всего по 85,38 

позиции 

4 ФЕР27-06- Розлив т 0,2282 16,47 

026-01 вяжущих материалов  Объем=326*0,7/1000 

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных 04.08.2020 технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

 № 421/пр элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 п.58б 

2 ЭМ 39,10 1,25 11,15  

3 в т.ч. ОТм 7,15 1,25 2,04 10,66 21,75  

Н 01.2.01.01 Битум т 1,03 0,235046  

 ЗТм чел.-ч 0,66 1,25 0,188265  

 Итого по 39,10 11,15  

расценке 

 ФОТ 2,04 21,75  

 Приказ № НР % 147 147 3,00 31,97 

812/пр от Автомобильн21.12.2020 ые дороги 

Прил. п.21  

(в ред. пр. №  636/пр от  

02.09.2021)  

 Приказ № СП % 134 0,85 113,9 2,32 24,77 

774/пр от Автомобильн11.12.2020 ые дороги 

Прил. п.21  

(в ред. пр. №  317/пр от  22.04.2022)  

 Всего по 16,47 

позиции 

5 ФССЦ- Битум т 0,235 1 397,1 

01.2.01.01- нефтяной 690,0 5  1022 дорожный 0  

БНД 60/90  

 Всего по 397,1 

позиции 5  

6 ФЕР27-06- Устройство 1000 0,326 3 

029-01 покрытия из м2 828,8

горячих 2  

асфальтобето нных смесей  асфальтоукла дчиками  

второго 

типоразмера,  толщина слоя  4 см  

 Объем=326 / 1000 

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных 04.08.2020 технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

 № 421/пр элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 п.58б 

1 ОТ 182,3 1,15 68,35 26,28 1   2 796,24  

2 ЭМ 7 1,25 3  

479,0 047,7

 3 0  

3 в т.ч. ОТм 234,4 1,25 95,54 10,66 1   6 018,46  

4 М 874,7 285,1   8 8  

П, 04.2.01.01 Смесь т 0 0  Н асфальтобето 

нная 

 ЗТ чел.-ч 20,86 1,15 7,820414  

 ЗТм чел.-ч 18,85 1,25 7,681375  

 Итого по 8 3 

расценке 536,1 401,2 

3 3 

 ФОТ 163,8 2  

9 814,70 

 Приказ № НР % 147 147 240,9 4 

812/пр от Автомобильн 2 137,61  21.12.2020 ые дороги  

Прил. п.21  

(в ред. пр. №  636/пр от  02.09.2021)  

 Приказ № СП % 134 0,85 113,9 186,6 3 

774/пр от Автомобильн 7 205,94  11.12.2020 ые дороги  

Прил. п.21  

(в ред. пр. №  317/пр от  22.04.2022)  

 Всего по 3  

позиции 828,8 

2 

7 ФЕР27-06- При 1000 0,326 231,2 

030-01 изменении м2 3 

толщины 

покрытия на  0,5 см  

добавлять или 

исключать: к  расценке 2706-029-01  

 Объем=326 / 1000 

 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) 

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных 04.08.2020 технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

 № 421/пр элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  

п.58б 

1 ОТ 3,29 2,3 2,47 26,28 64,91  

 (2*1,15)  

2 ЭМ 254,8 2,5 207,7  

 9 (2*1,25) 4  

3 в т.ч. ОТм 5,95 2,5 4,85 10,66 51,70  

 (2*1,25)  

4 М 2,94 2 1,92  

П, 04.2.01.01 Смесь т 0 2 0  Н асфальтобето 

нная 

 ЗТ чел.-ч 0,35 2,3 0,26243  

(2*1,15) 

 ЗТм чел.-ч 0,47 2,5 0,38305  

(2*1,25) 

 Итого по 261,1 212,1  

расценке 2 3  

 ФОТ 7,32 116,61  

 Приказ № НР % 147 147 10,76 171,42 

812/пр от Автомобильн21.12.2020 ые дороги 

Прил. п.21  

(в ред. пр. №  636/пр от  02.09.2021)  

 Приказ № СП % 134 0,85 113,9 8,34 132,82 

774/пр от Автомобильн11.12.2020 ые дороги 

Прил. п.21  

(в ред. пр. №  317/пр от  22.04.2022)  

 Всего по 231,2 

позиции 3  

8 ФССЦ- Смеси т 39,3808 483,0 19  

04.2.01.01- асфальтобето 2 021,7 

0051 нные плотные 1  мелкозернист 

ые тип В марка II  Объем=326*(96,6+24,2)/1000 

 Всего по 19  

позиции 021,7 

1 

 Итоги по смете:  

 Итого прямые затраты (справочно) 24 213  

466,9 426,51 

 4  

 в том числе:  

 Оплата труда рабочих 280,7 7  

 7 378,64  

 Эксплуатация машин 3 42  

953,5 163,73 

 6  

 в том числе оплата труда машинистов (Отм) 167,3 1  

 3 783,74  

 Материалы 20 163  

232,6 884,14 

 1  

 Строительные работы 25 230  

347,7 817,58 

 2  

 Строительные работы 25 229  

262,3 888,65 

 4  

 в том числе:  

 оплата труда 280,7 7  

 7 378,64  

1 кв 2023 эксплуатация машин и механизмов 3 10,66 41  

Письмо 868,1 234,80  

Минстроя 8 

России от 17.02.2023г. № 8389- ИФ/09 

 в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 167,3 1  

 3 783,74  

1 кв 2023 материалы 20 8,1 163  

Письмо 232,6 884,14  

Минстроя 1 

России от 17.02.2023г. № 8389- ИФ/09 

 накладные расходы 535,0 10  

 3 674,51  

 сметная прибыль 345,7 6  

 5 716,56  

(64), ФЕР, 1 Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость 85,38 10,88 928,93  

кв 2023 строительных работ Письмо Минстроя России от 17.02.2023г.  № 8389- ИФ/09 

 Итого ФОТ (справочно) 448,1 9  

 0 162,38  

 Итого накладные расходы (справочно) 535,0 10  

 3 674,51  

 Итого сметная прибыль (справочно) 345,7 6  

 5 716,56  

 НДС 20% 5 46  

069,5 163,52 

 4  

 ВСЕГО по смете 30 276  

417,2 981,10 

 6  

на дворовой территории по ул. Калининская, д. 103 в р.п. Екатериновка Саратовской  области  

 №  п/ п  

Обоснование 

Наименование работ и затрат 

Едини 

ца 

измер 

ения  

Количество 

Сметная стоимость в  базисном уровне цен (в  текущем уровне цен (гр. 8)  

для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН),  

руб. 

Инде

ксы  

Сметн 

ая 

стоим ость в  текущ 

ем 

уровн е цен,  

руб.  

на 

един ицу  

коэффиц

иенты  

всего с  учетом  

коэффици

ентов  

на единицу 

коэффиц

иенты  

всего 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Раздел 1. Асфальтобетонное покрытие (472 м2) 

1 ФЕРр68-12- Разборка 100 м3 0,236 1 

4 покрытий и 795,7

оснований: 9  асфальтобето 

нных с 

помощью  молотков  отбойных  

 Объем=(472*0,05) / 100 

1 ОТ 1 303,9 26,28 7  

288,0 8 988,59 

 5  

2 ЭМ 3 871,0  

690,7 1 

 2  

3 в т.ч. ОТм 398,1 93,97 10,66 1  

 8 001,72  

 ЗТ чел.-ч 155 36,58  

 ЗТм чел.-ч 39,05 9,2158  

 Итого по 4 1  расценке 978,7 174,9 

7 9 

 ФОТ 397,9 8  

5 990,31 

 Приказ № НР % 102 102 405,9 9  

812/пр от Благоустройс 1 170,12  

21.12.2020 тво Прил. п.102 (ремонтно-строительные) 

 Приказ № СП % 54 54 214,8 4  

774/пр от Благоустройс 9 854,77  

11.12.2020 тво Прил. п.102 (ремонтно-строительные) 

 Всего по 1  позиции 795,7 

9 

2 ФССЦпг-01- Погрузо- 1 т 42,48 17,95 762,5 

01-01-045 разгрузочные груза 2  

работы при  автомобильн ых  

перевозках:  Погрузка  прочих  

материалов,  деталей (с  использовани ем  

погрузчика)  

 Всего по 762,5 

позиции 2  

3 ФССЦпг-03- Перевозка 1 т 42,48 2,91 123,6 

21-01-001 грузов груза 2  

автомобилями -самосвалами  грузоподъемн остью 10 т  работающих  вне карьера  на  

расстояние: I  класс груза до  1 км  

 Объем=0,05*472*1,8 

 Всего по 123,6 

позиции 2  

4 ФЕР27-06- Розлив т 0,3304 23,85 

026-01 вяжущих материалов  Объем=472*0,7/1000 

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных 04.08.2020 технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

 № 421/пр элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 п.58б 

2 ЭМ 39,10 1,25 16,15  

3 в т.ч. ОТм 7,15 1,25 2,95 10,66 31,45  

Н 01.2.01.01 Битум т 1,03 0,340312  

 ЗТм чел.-ч 0,66 1,25 0,27258  

 Итого по 39,10 16,15  

расценке 

 ФОТ 2,95 31,45  

 Приказ № НР % 147 147 4,34 46,23 

812/пр от Автомобильн21.12.2020 ые дороги 

Прил. п.21  

(в ред. пр. №  636/пр от  02.09.2021)  

 Приказ № СП % 134 0,85 113,9 3,36 35,82 

774/пр от Автомобильн11.12.2020 ые дороги 

Прил. п.21  

(в ред. пр. №  317/пр от  22.04.2022)  

 Всего по 23,85 

позиции 

5 ФССЦ- Битум т 0,340312 1 575,1 

01.2.01.01- нефтяной 690,0 3  1022 дорожный 0  

БНД 60/90  

 Всего по 575,1 

позиции 3  

6 ФЕР27-06- Устройство 1000 0,472 5 

029-01 покрытия из м2 543,5

горячих 8  

асфальтобето нных смесей  асфальтоукла дчиками  

второго 

типоразмера,  толщина слоя  4 см  

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных  04.08.2020 технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных  

 № 421/пр элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 

п.58б 

1 ОТ 182,3 1,15 98,96 26,28 2   2 600,67  

2 ЭМ 7 1,25 4  

479,0 412,6

 3 3  

3 в т.ч. ОТм 234,4 1,25 138,3 10,66 1   6 3 474,60  

4 М 874,7 412,9   8 0  

П, 04.2.01.01 Смесь т 0 0  Н асфальтобето 

нная 

 ЗТ чел.-ч 20,86 1,15 11,322808  

 ЗТм чел.-ч 18,85 1,25 11,1215  

 Итого по 8 4  

расценке 536,1 924,4 

3 9 

 ФОТ 237,2 4  

9 075,27 

 Приказ № НР % 147 147 348,8 5  812/пр от Автомобильн 2 990,65  21.12.2020 ые дороги  

Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) 

 Приказ № СП % 134 0,85 113,9 270,2 4  774/пр от Автомобильн 7 641,73  11.12.2020 ые дороги  

Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) 

 Всего по 5  

позиции 543,5 

8 

7 ФЕР27-06- При 1000 0,472 334,7 

030-01 изменении м2 5 

толщины 

покрытия на  0,5 см  

добавлять или 

исключать: к  расценке 2706-029-01  

 Объем=472 / 1000 

 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)  

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных  04.08.2020 технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных  

 № 421/пр элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 

п.58б 

1 ОТ 3,29 2,3 3,57 26,28 93,82  

 (2*1,15)  

2 ЭМ 254,8 2,5 300,7  

 9 (2*1,25) 7  

3 в т.ч. ОТм 5,95 2,5 7,02 10,66 74,83  

 (2*1,25)  

4 М 2,94 2 2,78  

П, 04.2.01.01 Смесь т 0 2 0  Н асфальтобето 

нная 

 ЗТ чел.-ч 0,35 2,3 0,37996  

(2*1,15) 

 ЗТм чел.-ч 0,47 2,5 0,5546  

(2*1,25) 

 Итого по 261,1 307,1  

расценке 2 2  

 ФОТ 10,59 168,65  

 Приказ № НР % 147 147 15,57 247,92 

812/пр от Автомобильн21.12.2020 ые дороги 

Прил. п.21  

(в ред. пр. №  636/пр от  02.09.2021)  

 Приказ № СП % 134 0,85 113,9 12,06 192,09 

774/пр от Автомобильн11.12.2020 ые дороги 

Прил. п.21  

(в ред. пр. №  317/пр от  22.04.2022)  

 Всего по 334,7 

позиции 5  

8 ФССЦ- Смеси т 57,0176 483,0 27  

04.2.01.01- асфальтобето 2 540,6 

0051 нные плотные 4  мелкозернист 

ые тип В марка II  Объем=472*(96,6+24,2)/1000 

 Всего по 27  

позиции 540,6 

4 

 Итоги по смете:  

 Итого прямые затраты (справочно) 35 309  

424,6 011,20 

 6  

 в том числе:  

 Оплата труда рабочих 406,5 10  

 1 683,08  

 Эксплуатация машин 5 61  

724,1 046,96 

 8  

 в том числе оплата труда машинистов (Отм) 242,2 2  

 7 582,60  

 Материалы 29 237  

293,9 281,16 

 7  

 Строительные работы 36 334  

699,8 190,53 

 8  

 Строительные работы 36 332  

576,2 845,54 

 6  

 в том числе:  

 оплата труда 406,5 10  

 1 683,08  

1 кв 2023 эксплуатация машин и механизмов 5 10,66 59  

Письмо 600,5 701,97  

Минстроя 6 

России от 17.02.2023г. № 8389- ИФ/09 

 242,2 2  

 7 582,60  

 в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 

1 кв 2023 материалы 29 8,1 237  

Письмо 293,9 281,16  

Минстроя 7 

России от 17.02.2023г. № 8389- ИФ/09 

 накладные расходы 774,6 15  

 4 454,92  

 сметная прибыль 500,5 9  

 8 724,41  

(64), ФЕР, 1 Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость 123,6 10,88 1  

кв 2023 строительных работ 2 344,99  

Письмо Минстроя России от 17.02.2023г.  № 8389- ИФ/09 

 Итого ФОТ (справочно) 648,7 13  

 8 265,68  

 Итого накладные расходы (справочно) 774,6 15  

 4 454,92  

 Итого сметная прибыль (справочно) 500,5 9  

 8 724,41  

 НДС 20% 7 66  

339,9 838,11 

 8  

 ВСЕГО по смете 44 401  

039,8 028,64 

 6  

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1, ОГРНИП  

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Саратов, в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Регионэлектросеть» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Саратов,  расходы по оплате государственной пошлины в размере 6000 руб.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению  взыскателя.  

Решение арбитражного суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд  в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме через Арбитражный  суд Саратовской области.  

Судья Арбитражного суда Саратовской области ФИО2