Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А72-15997/2018

г.Ульяновск

29 ноября 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена 22 ноября 2018

 Решение в полном объеме изготовлено  29 ноября  2018

Арбитражный суд Ульяновской области в составе  судьи Страдымовой М.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью «ПРИОРИТЕТ ТОЛЬЯТТИ»        (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>), самарская область, г. Тольятти 

к Областному государственному казенному учреждению «Ульяновскоблстройзаказчик» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), Ульяновская область, г. Ульяновск

третьи лица:

- Министерство финансов Ульяновской области (ОГРН 

<

***>,                     ИНН 

<

***>),г. Ульяновск

- Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),г. Ульяновск

о взыскании задолженности в сумме 1 360 680 руб. 10 коп.  и пени в размере            83 319 руб. 01 коп. по государственным контрактам  №457, №458, №459, №460, №461,  № 462 №463, №464, №465, №466, №467, №468, №469, №470, №471 от 19.12.2017г., госпошлины, 

при участии:

от истца – ФИО2, паспорт, доверенность;

от ответчика – ФИО3, паспорт, доверенность

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «ПРИОРИТЕТ ТОЛЬТТИ» обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с исковым заявлением к Областному государственному казенному учреждению «Ульяновскоблстройзаказчик»  (далее – ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик») о взыскании задолженности в сумме 1 360 680 руб. 10 коп.  и пени в размере 83 319 руб. 01 коп. по государственным контрактам  №457, №458, №459, №460, №461, № 462 №463, №464, №465, №466, №467, №468, №469, №470, №471 от 19.12.2017г., госпошлины.

Определением от 01.10.2018 суд принял заявление к производству суда. 

Определением от 25.10.2018 удовлетворено ходатайство ответчика о привлечении к участию в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Министерства финансов Ульяновской области, Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области.

Так же указанным определением в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации удовлетворено ходатайство истца об уточнении исковых требований  - взыскать с ответчика  сумму задолженности за выполненные работы по Государственным контрактам №461, №462, №463, №464, №465, №466, №467, №468, №469,  №470, №471 от 19.12.2017 в сумме 961 582 руб. 07 коп., а также пени за просрочку  исполнения  обязательства по оплате выполненных работ по Государственным контрактам  №457, №458, №459, №460, №461, №462, №463, №464, №465, №466, №467, №468, №469,  №470, №471 от 19.12.2017 в сумме                                 83 319 руб. 01 коп. 

В судебном заседании представитель истца настаивает на удовлетворении исковых требований.

Представитель ответчика возражает против удовлетворения  исковых требований, при этом факт выполнения  работ по заявленным контрактам не оспаривает,  арифметический расчет основной задолженности и пени, представленный истцом,  признает верным.

Ходатайство ответчика, заявленное в предварительном судебном заседании 25.10.2018, о привлечении Правительства Ульяновской области к участию в деле  в качестве  третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, суд  оставил без удовлетворения в связи с отсутствием  правовых и процессуальных оснований, так как права и законные интересы Правительства Ульяновской области при рассмотрении настоящего дела не затронуты.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства, суд считает исковые требования подлежащими  удовлетворению. При этом суд исходит из следующего.

Как усматривается из материалов дела, между ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ПРИОРИТЕТ ТОЛЬЯТТИ» (Подрядчик) заключен государственный контракт № 38-17 от 03.07.2017 для обеспечения государственных нужд Ульяновской области, по условиям которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ  по объекту: капитальный ремонт кровли административного здания, расположенного по адресу: 

<

...> согласно локальной смете (приложение №1), описанию товаров, используемых при выполнении работ, оказании услуг (приложение №2), которые являются неотъемлемой часть контракта, проектной документации (п. 1.1. контракта).

В соответствии с п.2.2. Государственного контракта №38-17 от 03.07.2017 цена  контракта составляет 15 520 012 руб. 84 коп. 

30.11.2017 между сторонами заключено дополнительное соглашение №1 к Государственному контракту №38-17 от 03.07.2017 в соответствии с которым  цена контракта составляет 14 316 119 руб. 90 коп. 

19.12.2017 в пределах сумм лимитов бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт кровли административного здания, расположенного по адресу:                  

<

...>,  между ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ПРИОРИТЕТ ТОЛЬЯТТИ» (Подрядчик) на основании п. 4 ч. 1 ст.93 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ были заключены государственные контракты на выполнение дополнительных работ № 457, № 458, № 459, № 460, № 461, № 462, № 463, № 464,                  № 465, № 466, № 467, № 468, № 469, № 470, № 471 (далее - Контракты).

В соответствии с  условиями государственного контракта для обеспечения государственных нужд Ульяновской области №461  от 19.12.2017 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по объекту: капитальный ремонт кровли административного здания, расположенного по адресу: 

<

...>, согласно локальному сметному расчету №5доп (приложение №5), которое является неотъемлемой частью контракта (п.1.1. контракта).

Стороны пришли к соглашению, что цена контракта составляет  99 759 руб. 55 коп ( п.2.2. контракта).

В соответствии  с п.2.3.2. оплата по контракту осуществляется на основании подписанного сторонами  акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (акта взаимосверки обязательств, в случаях, предусмотренных контрактом), а также справки о стоимости  выполненных работ по форме КС-3; в пределах лимитов бюджетных средств, предусмотренных на 2017, в соответствии с п.2.2.  государственного контракта в течение 30 дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке.

Согласно п.3.1. указанного контракта сроки выполнения работ – в течение 20 календарных дней с момента заключения государственного контракта.

В материалы дела   представлен акт №1 от 20.12.2017 (по форме КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 20.12.2017, подписанные сторонами без замечаний на сумму 99 759 руб. 55 коп. ( л.д. 66-68, т.2).

19.12.2017 между ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ПРИОРИТЕТ ТОЛЬЯТТИ» (Подрядчик) заключен государственный контракт для обеспечения государственных нужд Ульяновской области №462, по условиям которого  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по объекту: капитальный ремонт кровли административного здания, расположенного по адресу: 

<

...>, согласно локальному сметному расчету №6доп (приложение №6), которое является неотъемлемой частью контракта (п.1.1. контракта).

Стороны пришли к соглашению, что цена контракта составляет  99 858 руб. 33 коп ( п.2.2. контракта).

В соответствии  с п.2.3.2. оплата по контракту осуществляется на основании подписанного сторонами  акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (акта взаимосверки обязательств, в случаях, предусмотренных контрактом), а также справки о стоимости  выполненных работ по форме КС-3; в пределах лимитов бюджетных средств, предусмотренных на 2017, в соответствии с п.2.2.  государственного контракта в течение 30 дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке.

Согласно п.3.1. указанного контракта сроки выполнения работ – в течение 20 календарных дней с момента заключения государственного контракта.

В материалы дела   представлен акт №1 от 20.12.2017 (по форме КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 20.12.2017, подписанные сторонами без замечаний на сумму 99 858 руб. 33 коп. ( л.д. 80-82, т.2).

19.12.2017 между ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ПРИОРИТЕТ ТОЛЬЯТТИ» (Подрядчик) заключен государственный контракт для обеспечения государственных нужд Ульяновской области №463, по условиям которого  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по объекту: капитальный ремонт кровли административного здания, расположенного по адресу: 

<

...>, согласно локальному сметному расчету №7доп (приложение №7), которое является неотъемлемой частью контракта (п.1.1. контракта).

Стороны пришли к соглашению, что цена контракта составляет  99 957 руб. 12 коп ( п.2.2. контракта).

В соответствии  с п.2.3.2. оплата по контракту осуществляется на основании подписанного сторонами  акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (акта взаимосверки обязательств, в случаях, предусмотренных контрактом), а также справки о стоимости  выполненных работ по форме КС-3; в пределах лимитов бюджетных средств, предусмотренных на 2017, в соответствии с п.2.2.  государственного контракта в течение 30 дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке.

Согласно п.3.1. указанного контракта сроки выполнения работ – в течение 20 календарных дней с момента заключения государственного контракта.

В материалы дела   представлен акт №1 от 20.12.2017 (по форме КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 20.12.2017, подписанные сторонами без замечаний на сумму 99 957 руб. 12 коп. ( л.д. 94-96, т.2).

19.12.2017 между ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ПРИОРИТЕТ ТОЛЬЯТТИ» (Подрядчик) заключен государственный контракт для обеспечения государственных нужд Ульяновской области №464, по условиям которого  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по объекту: капитальный ремонт кровли административного здания, расположенного по адресу: 

<

...>, согласно локальному сметному расчету №8доп (приложение №8), которое является неотъемлемой частью контракта (п.1.1. контракта).

Стороны пришли к соглашению, что цена контракта составляет  99 717 руб. 21 коп ( п.2.2. контракта).

В соответствии  с п.2.3.2. оплата по контракту осуществляется на основании подписанного сторонами  акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (акта взаимосверки обязательств, в случаях, предусмотренных контрактом), а также справки о стоимости  выполненных работ по форме КС-3; в пределах лимитов бюджетных средств, предусмотренных на 2017, в соответствии с п.2.2.  государственного контракта в течение 30 дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке.

Согласно п.3.1. указанного контракта сроки выполнения работ – в течение 20 календарных дней с момента заключения государственного контракта.

В материалы дела   представлен акт №1 от 20.12.2017 (по форме КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 20.12.2017, подписанные сторонами без замечаний на сумму 99 717 руб. 21 коп. ( л.д. 108-110, т.2).

19.12.2017 между ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ПРИОРИТЕТ ТОЛЬЯТТИ» (Подрядчик) заключен государственный контракт для обеспечения государственных нужд Ульяновской области №462, по условиям которого  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по объекту: капитальный ремонт кровли административного здания, расположенного по адресу: 

<

...>, согласно локальному сметному расчету №9доп (приложение №9), которое является неотъемлемой частью контракта (п.1.1. контракта).

Стороны пришли к соглашению, что цена контракта составляет  99 816 руб. 00 коп ( п.2.2. контракта).

В соответствии  с п.2.3.2. оплата по контракту осуществляется на основании подписанного сторонами  акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (акта взаимосверки обязательств, в случаях, предусмотренных контрактом), а также справки о стоимости  выполненных работ по форме КС-3; в пределах лимитов бюджетных средств, предусмотренных на 2017, в соответствии с п.2.2.  государственного контракта в течение 30 дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке.

Согласно п.3.1. указанного контракта сроки выполнения работ – в течение 20 календарных дней с момента заключения государственного контракта.

В материалы дела   представлен акт №1 от 20.12.2017 (по форме КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 20.12.2017, подписанные сторонами без замечаний на сумму 99 816 руб. 00 коп. ( л.д. 122-124, т.2).

19.12.2017 между ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ПРИОРИТЕТ ТОЛЬЯТТИ» (Подрядчик) заключен государственный контракт для обеспечения государственных нужд Ульяновской области №466, по условиям которого  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по объекту: капитальный ремонт кровли административного здания, расположенного по адресу: 

<

...>, согласно локальному сметному расчету №11доп (приложение №11), которое является неотъемлемой частью контракта (п.1.1. контракта).

Стороны пришли к соглашению, что цена контракта составляет  99 674 руб. 88 коп ( п.2.2. контракта).

В соответствии  с п.2.3.2. оплата по контракту осуществляется на основании подписанного сторонами  акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (акта взаимосверки обязательств, в случаях, предусмотренных контрактом), а также справки о стоимости  выполненных работ по форме КС-3; в пределах лимитов бюджетных средств, предусмотренных на 2017, в соответствии с п.2.2.  государственного контракта в течение 30 дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке.

Согласно п.3.1. указанного контракта сроки выполнения работ – в течение 20 календарных дней с момента заключения государственного контракта.

В материалы дела   представлен акт №1 от 20.12.2017 (по форме КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 20.12.2017, подписанные сторонами без замечаний на сумму 99 674 руб. 88 коп. ( л.д. 136-138, т.2).

19.12.2017 между ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ПРИОРИТЕТ ТОЛЬЯТТИ» (Подрядчик) заключен государственный контракт для обеспечения государственных нужд Ульяновской области №467, по условиям которого  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по объекту: капитальный ремонт кровли административного здания, расположенного по адресу: 

<

...>, согласно локальному сметному расчету №10доп (приложение №10), которое является неотъемлемой частью контракта (п.1.1. контракта).

Стороны пришли к соглашению, что цена контракта составляет  99 921 руб. 83 коп. ( п.2.2. контракта).

В соответствии  с п.2.3.2. оплата по контракту осуществляется на основании подписанного сторонами  акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (акта взаимосверки обязательств, в случаях, предусмотренных контрактом), а также справки о стоимости  выполненных работ по форме КС-3; в пределах лимитов бюджетных средств, предусмотренных на 2017, в соответствии с п.2.2.  государственного контракта в течение 30 дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке.

Согласно п.3.1. указанного контракта сроки выполнения работ – в течение 20 календарных дней с момента заключения государственного контракта.

В материалы дела   представлен акт №1 от 20.12.2017 (по форме КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 20.12.2017, подписанные сторонами без замечаний на сумму 99 921 руб. 83 коп. ( л.д. 10-12, т.3).

19.12.2017 между ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ПРИОРИТЕТ ТОЛЬЯТТИ» (Подрядчик) заключен государственный контракт для обеспечения государственных нужд Ульяновской области №468, по условиям которого  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по объекту: капитальный ремонт кровли административного здания, расположенного по адресу: 

<

...>, согласно локальному сметному расчету №12доп (приложение №12), которое является неотъемлемой частью контракта (п.1.1. контракта).

Стороны пришли к соглашению, что цена контракта составляет 57 614 руб. 49 коп. ( п.2.2. контракта).

В соответствии  с п.2.3.2. оплата по контракту осуществляется на основании подписанного сторонами  акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (акта взаимосверки обязательств, в случаях, предусмотренных контрактом), а также справки о стоимости  выполненных работ по форме КС-3; в пределах лимитов бюджетных средств, предусмотренных на 2017, в соответствии с п.2.2.  государственного контракта в течение 30 дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке.

Согласно п.3.1. указанного контракта сроки выполнения работ – в течение 20 календарных дней с момента заключения государственного контракта.

В материалы дела   представлен акт №1 от 20.12.2017 (по форме КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 20.12.2017, подписанные сторонами без замечаний на сумму 57 614 руб. 49 коп. ( л.д. 24-26, т.3).

19.12.2017 между ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ПРИОРИТЕТ ТОЛЬЯТТИ» (Подрядчик) заключен государственный контракт для обеспечения государственных нужд Ульяновской области №468, по условиям которого  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по объекту: капитальный ремонт кровли административного здания, расположенного по адресу: 

<

...>, согласно локальному сметному расчету №1доп (приложение №14), которое является неотъемлемой частью контракта (п.1.1. контракта).

Стороны пришли к соглашению, что цена контракта составляет 99 373 руб. 07 коп. ( п.2.2. контракта).

В соответствии  с п.2.3.2. оплата по контракту осуществляется на основании подписанного сторонами  акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (акта взаимосверки обязательств, в случаях, предусмотренных контрактом), а также справки о стоимости  выполненных работ по форме КС-3; в пределах лимитов бюджетных средств, предусмотренных на 2017, в соответствии с п.2.2.  государственного контракта в течение 30 дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке.

Согласно п.3.1. указанного контракта сроки выполнения работ – в течение 20 календарных дней с момента заключения государственного контракта.

В материалы дела   представлен акт №1 от 20.12.2017 (по форме КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 20.12.2017, подписанные сторонами без замечаний на сумму 99 373 руб. 07  коп. ( л.д. 38-40, т.3).

19.12.2017 между ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ПРИОРИТЕТ ТОЛЬЯТТИ» (Подрядчик) заключен государственный контракт для обеспечения государственных нужд Ульяновской области №470, по условиям которого  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по объекту: капитальный ремонт кровли административного здания, расположенного по адресу: 

<

...>, согласно локальному сметному расчету №13доп (приложение №13), которое является неотъемлемой частью контракта (п.1.1. контракта).

Стороны пришли к соглашению, что цена контракта составляет 48 475 руб. 50 коп. ( п.2.2. контракта).

В соответствии  с п.2.3.2. оплата по контракту осуществляется на основании подписанного сторонами  акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (акта взаимосверки обязательств, в случаях, предусмотренных контрактом), а также справки о стоимости  выполненных работ по форме КС-3; в пределах лимитов бюджетных средств, предусмотренных на 2017, в соответствии с п.2.2.  государственного контракта в течение 30 дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке.

Согласно п.3.1. указанного контракта сроки выполнения работ – в течение 20 календарных дней с момента заключения государственного контракта.

В материалы дела   представлен акт №1 от 20.12.2017 (по форме КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 20.12.2017, подписанные сторонами без замечаний на сумму 48 475 руб. 50 коп. ( л.д. 52-54, т.3).

19.12.2017 между ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ПРИОРИТЕТ ТОЛЬЯТТИ» (Подрядчик) заключен государственный контракт для обеспечения государственных нужд Ульяновской области №471, по условиям которого  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по объекту: капитальный ремонт кровли административного здания, расположенного по адресу: 

<

...>, согласно локальному сметному расчету №2доп (приложение №15), которое является неотъемлемой частью контракта (п.1.1. контракта).

Стороны пришли к соглашению, что цена контракта составляет 57 414 руб. 09 коп. ( п.2.2. контракта).

В соответствии  с п.2.3.2. оплата по контракту осуществляется на основании подписанного сторонами  акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (акта взаимосверки обязательств, в случаях, предусмотренных контрактом), а также справки о стоимости  выполненных работ по форме КС-3; в пределах лимитов бюджетных средств, предусмотренных на 2017, в соответствии с п.2.2.  государственного контракта в течение 30 дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке.

Согласно п.3.1. указанного контракта сроки выполнения работ – в течение 20 календарных дней с момента заключения государственного контракта.

В материалы дела   представлен акт №1 от 20.12.2017 (по форме КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 20.12.2017, подписанные сторонами без замечаний на сумму  57 414 руб. 09 коп. ( л.д. 66-68, т.3).

Согласно актам сверки взаимных расчетов на 31.12.2017  (л.д. 69, 73, 97, 114, 125, 139, т.3; 13, 27. 41, 55, 69, т.4) задолженность ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» перед Обществом с ограниченной ответственностью «ПРИОРИТЕТ ТОЛЬЯТТИ» составила:

-  по государственному контракту №461 от 19.12.2017 - 99 759 руб. 55 коп.;

- по государственному контракту №462 от 19.12.2017 - 99 858 руб. 33 коп.;

- по государственному контракту №463 от 19.12.2017 - 99 957 руб. 12 коп.;

- по государственному контракту №464 от 19.12.2017 - 99 717 руб. 21 коп.;

- по государственному контракту №465 от 19.12.2017 - 99 816 руб. 00 коп.;

- по государственному контракту №466 от 19.12.2017 - 99 674 руб. 88 коп.;

- по государственному контракту №467 от 19.12.2017 - 99 921 руб. 83коп.;

- по государственному контракту №468 от 19.12.2017 - 57 614 руб. 49 коп.;

- по государственному контракту №469 от 19.12.2017 - 99 373 руб. 07 коп.;

- по государственному контракту №470 от 19.12.2017 - 48 475 руб. 50 коп.;

- по государственному контракту №471 от 19.12.2017 - 57 414 руб. 09 коп.,  в общей сумме 961 582 руб. 07 коп. 

Истец направил в адрес ответчика претензию с требованием оплатить  имеющуюся задолженность в размере 1 360 680 руб. 10 коп., а также пени за просрочку платежей в размере 341 666 руб. 77 коп.  Однако, задолженность до настоящего времени в полном объеме не погашена, в связи с чем, истец обратился с настоящим исковым заявлением в суд.

Статья 702 Гражданского кодекса Российской Федерации  предусматривает, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса  РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии со ст. 711, 720 ГК РФ и основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Статьей 309 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

На основании изложенного, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований истца о взыскании с ответчика задолженности  за выполненные работы по Государственным контрактам №461, №462, №463, №464, №465, №466, №467, №468, №469,  №470, №471 от 19.12.2017 в сумме 961 582 руб. 07 коп.

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика  пени за просрочку  исполнения  обязательства по оплате выполненных работ по Государственным контрактам  №457, №458, №459, №460, №461, №462, №463, №464, №465, №466, №467, №468, №469,  №470, №471 от 19.12.2017 в сумме    83 319 руб. 01 коп. 

В соответствии с частью 5 статьи 34 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии с п.7.2. Государственных контрактов  №457, №458, №459, №460, №461, №462, №463, №464, №465, №466, №467, №468, №469,  №470, №471 от 19.12.2017 в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных  контрактом  Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней).

Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере  одной трехсотой действующей на дату уплаты  пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. (п.7.2.1. указанных контрактов).

Согласно представленных в материалы дела  расчетов неустойка за период с 20.01.2018 по 26.09.2018 составляет:

- по  государственному контракту №461 от 19.12.2017 - 6 108 руб. 62 коп.;

- по государственному  контракту  №462 от 19.12.2017 – 6 114 руб. 66 коп.  

- по государственному  контракту  №463 от 19.12.2017 – 6 120 руб. 70 коп.;

- по государственному  контракту  №464 от 19.12.2017 -  6 106 руб. 02 коп.;

- по государственному  контракту  №465 от 19.12.2017 - 6 112 руб. 07 коп.;

 - по государственному  контракту  №466 от 19.12.2017 - 6 103 руб. 43 коп.;

 - по государственному  контракту  №467 от 19.12.2017 – 6 118 руб. 54 коп.;

- по государственному  контракту  №468 от 19.12.2017 – 3 527 руб. 93 коп.;

- по государственному  контракту  №469 от 19.12.2017- 6 084 руб. 94 коп.;

-  по государственному  контракту  №470 от 19.12.2017 – 2 968 руб. 32 коп.;

-  по государственному  контракту  №471 от 19.12.2017 – 3 515 руб. 67 коп., на общую сумму 83 319 руб. 01 коп. 

Расчет пени, произведенный истцом, судом проверен и признан не нарушающим прав и законных интересов ответчика.

Расчет неустойки ответчиком не оспорен; контррасчет неустойки не представлен. 

На основании изложенного исковые требования подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ расходы по уплате государственной пошлины следует возложить на ответчика.

 Учитывая изложенное и руководствуясь статьями  110,  167-177, 180-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

                                                            Р  Е Ш И Л :

 

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Областного государственного казенного учреждения «Ульяновскоблстройзаказчик» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ПРИОРИТЕТ ТОЛЬЯТТИ» 961 582 руб. 07 коп. – основной долг по Государственным контрактам  №461, № 462, №463, №464, №465, №466, №467, №468, №469, №470, №471 от 19.12.2017; 83 319 руб. 01 коп. - пени с 20.01.2018 по 26.09.2018 по Государственным контрактам  №457, №458, №459, №460, №461,  № 462 №463, №464, №465, №466, №467, №468, №469, №470, №471 от 19.12.2017; 23 449 руб. 00 коп. – госпошлину

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «ПРИОРИТЕТ ТОЛЬЯТТИ» из федерального бюджета по справке 3 991 руб. 00 коп. – госпошлину.

Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу.

Решение вступает в силу по истечении месяца с момента его принятия. 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в порядке и сроки, установленные ст.ст. 257-260 АПК РФ.

Судья                                                                                Страдымова М.В.