Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-104844/2019

16 апреля 2020 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  05 марта 2020 года.

Полный текст решения изготовлен  16 апреля 2020 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи  О.Н. Сергеевой 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "МВ-ПРОЕКТ"; (адрес:  Россия 109287, г МОСКВА, 

<

...>/СТР.1; Россия 127521, Москва, 3-ий пр. Марьиной Рощи д. 40, стр. 1, оф. 605, ОГРН:1077759693703; 1077759693703)

ответчик: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" (адрес:  Россия 190900, г Санкт-Петербург, 

<

...> ОГРН:  

<

***>);

третье лицо:  

о взыскании 3 152 465 руб. 87 коп. задолженности 

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 02.12.2019

- от ответчика: ФИО3 по доверенности от 26.12.2019

установил:

ООО «МВ-Проект» предъявило иск о взыскании с СПБ ГКУ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" 3 152 465 руб. 87 коп. задолженности по оплате работ на основании государственного контракта № 40/ОК – 14 от 17.10.14

Ответчик иск отклонил и заявил о применении срока исковой давности.

Судом установлено:

14.10.2014 между Комитетом по строительству и ООО «МВ-Проект» заключен контракт № 40/ОК-14, согласно условиям которого ООО «МВ-Проект» приняло на себя обязательства выполнить проектные и изыскательские работы по объекту: «Реконструкция здания Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж метростроя» по адресу: ул. Ольминского, д. 13, литера А».

Дополнительным соглашением от 20.02.2017 № 5 Комитет по строительству передал, СПБ ГКУ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ"  в полном объеме права и обязанности заказчика по контракту.

Порядок оплаты работ установлен пунктом 3.3 контракта, согласно которому оплата выполненных работ осуществляется в следующем порядке: 

- работы по разработке технической документации стадий «Проектная документация» и «Рабочая документация» оплачиваются после их приемки в соответствии с контрактом в размере 60% от стоимости соответствующего вида работ, определенной контрактом; 

- окончательный расчет за работы по разработке технической документации стадии «Проектная документация» производится после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и подписания сторонами акта приема-передачи всей технической документации без замечаний.

Сторонами подписаны без замечаний акты приёма-передачи технической документации по стадии «Проектная документация №1 – №12.

Работы оплачены ответчиком в размере 60% от их стоимости в соответствии с п.3.3 контракта.

29.03.2018 контракт был расторгнут СПБ ГКУ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" и ООО «МВ-Проект» в связи с существенным изменением обстоятельств, которые связаны с необходимостью выполнения дополнительных работ в части обследования сооружений метрополитена, попадающих в зону реконструкции объекта.

Исковые требования в размере 2 820 954 руб. 67 коп. составляют оставшиеся 40% стоимости принятых ответчиком работ.

Ссылка ответчика на отсутствие положительного заключения экспертизы, необходимой для полной оплаты работ несостоятельна, так как это условие в связи с расторжением контракта никогда не наступит.

Довод ответчика об истечении срока исковой давности несостоятелен, так как право требования оставшейся задолженности возникло у истца с даты соглашения о расторжении контракта – 29.03.18, поэтому срок исковой давности истцом не пропущен.

Требование о взыскании 331 511 руб.20 коп. задолженности по оплате дополнительных работ удовлетворению не подлежит, так как документов о согласовании объема и стоимости этих работ истцом не представлено.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст. 309, 310, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "МВ-ПРОЕКТ" 2 820 954 руб. 67 коп. задолженности и 37 104 руб. 77 коп. расходов по оплате государственной пошлины.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Сергеева О.Н.