АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  248000, г. Калуга, ул. Ленина, 90; тел: (4842) 505-902, 8-800-100-23-53; факс: (4842) 505-957, 599-457;  

http://kaluga.arbitr.ru; е-mail: kaluga.info@arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Дело № А23-5973/2022

08 ноября 2022 года

г. Калуга

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Жадан В.В., 

руководствуясь статьями 110, 112, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Авангардстрой" в  течение одного месяца с даты вступления в силу решения суда устранить  недостатки работ, выполнив гарантийный ремонт по муниципальному контракту от  23.07.2019 № 0137300043319000432 цоколя и крыши многоквартирного жилого  дома № 155 по ул. Суворова г. Калуги, а именно:  

1. Произвести окраску цоколя по всему периметру жилого здания (п. 8  акта № 5 о приемке выполненных работ от 21.12.2020 по форме КС-2).  

2. Выполнить вскрытие воздушных пузырей на кровельном покрытие  рулонного материала с последующим восстановлением площадью 50 кв.м. в осях  АБ с 1-2 в количестве 4 шт., осях БВ с 1-2 в количестве 3 шт., осях АВ с 3-4 в  количестве 10 шт., осях АБ с 5-6 в количестве 7 шт. (п. 28 акта № 4 о приемке  выполненных работ от 12.10.2020 по форме КС-2).  

3. Произвести очистку и окраску металлического каркаса колпаков  площадью 5 кв.м. (п. 138., п. 139 акта № 4 о приемке выполненных работ от  12.10.2020 по форме КС-2).  

4. Выполнить вскрытие воздушных пузырей на примыкании к  дымовентиляционным каналам с последующим восстановлением в объеме 20 м.п. в  осях БВ с 2-5 (п. 31 акта № 4 о приемке выполненных работ от 12.10.2020 по форме  КС-2).  

5. Выполнить очистку и окраску кровельного ограждения стоек и  поперечной арматуры в объеме 78,48 м.п. в осях В с 1-6, осях А с 1-6 (п. 67, п. 68  акта № 4 о приемке выполненных работ от 12.10.2020 по форме КС-2).  

6. Выполнить восстановление кровельного примыкания на 68 стойках  ограждения по осям АВ с 1-6 (п. 70, п. 71 акта № 4 о приемке выполненных работ  от 12.10.2020 по форме КС-2).  

7. Выполнить герметизацию мест соединения водосточного желоба в  объеме 128 п.м. (п. 151, п. 152 акта № 4 о приемке выполненных работ от  12.10.2020 по форме КС-2).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Авангардстрой" в  пользу муниципального казенного учреждения "Центр по повышению  энергетической эффективности" 6 000 руб. расходов на уплату государственной  пошлины.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы  через Арбитражный суд Калужской области.  

Судья В.В. Жадан