АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  (резолютивная часть)

Дело № А59-2271/2024

г. Южно-Сахалинск

18 сентября 2024 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Мисилевич П.Б., при  ведении протокола судебного заседания секретарем Стародубцевой А.Д., рассмотрев в  открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью  «Ресурс-Плюс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью «Специализированный застройщик «Рыбоводстрой»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) об обязании устранить недостатки по  муниципальному контракту № 110 от 09.12.2019 г., о взыскании убытков в размере  101 500 рублей, а также судебных расходов по оплате государственной пошлины,  

при участии: от муниципального казенного учреждения «Служба «Заказчик»  администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» - представитель  ФИО1, по доверенности от 21.08.2024 от администрации городского округа  «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области Российской Федерации –  представитель ФИО1, по доверенности от 09.01.2024.  

руководствуясь ст. ст. 167-170,176 АПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Специализированный  застройщик «Рыбоводстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в месячный срок с  момента вступления решения суда в законную силу, безвозмездно устранить недостатки  объекта многоквартирного дома № 3 по ул. Карла Маркса, г. Александровск-Сахалинский,  Сахалинская область, а именно:  

- выполнить пароизоляцию перекрытия в границах вентшахты со стороны чердака с  заведением на воздухоотводы;  

- заменить участки воздухоотводов, выполненных из оцинкованных стальных труб  Ø 150*0,7 мм в уровне чердака и выше, на электросварочные стальные трубы Ø 159*4,5  мм. Соединение с существующими выпусками воздухоотводов из перекрытия ручной  электродуговой сварки;  

- зачистить выпуски воздухоотводов в уровне чердака от продуктов коррозии с  последующим покрытием огнезащитным составом;  

- теплоизолировать наружную поверхность воздухоотводов на уровне чердака и  выше теплоизоляционными матами ROCKWOOL Alul Wired Mat t = 25 мм;  

- утеплить зазоры между воздухоотводами минераловатными плитами вплотную;  

- выполнить дополнительное утепление чердачного (над 3-м этажом) перекрытия  для компенсации недостаточной толщины существующего утеплителя.  

Перечисленные работы применить ко всем вентшахтам в уровне чердака по всей  площади чердачного перекрытия.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный  застройщик «Рыбоводстрой» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Ресурс-Плюс» (ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>) 101 500 рублей убытков, 6 000 рублей судебных расходов по уплате  государственной пошлины, а всего 107 500 рублей.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный  застройщик «Рыбоводстрой» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход  федерального бюджета 4 045 рублей государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок со дня его изготовления в полном объеме, через Арбитражный суд  Сахалинской области.  

 Судья П.Б. Мисилевич