АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 156000, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2 http://kostroma.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть Дело № А31-6386/2023 

19 октября 2023 года по результатам рассмотрения дела № А31-6386/2023 по  иску областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения  "Окружная больница Костромского округа № 2" (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью Компания "Крафтлайнс"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 74326 рублей 63 копеек пени,  5000 рублей штрафа, выполнении гарантийных обязательств, предоставлении  документации в подтверждение происхождения материалов, исполнения гарантийных  обязательств по письму № 163  

суд первой инстанции в составе председательствующего судьи Авдеевой  Натальи Юрьевны,  

в соответствии со статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить в части. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Компания  "Крафтлайнс" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу областного  государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Окружная больница  Костромского округа № 2" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 74326 рублей 63  копейки пени, 3173 рубля расходов по уплате государственной пошлины.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью Компания "Крафтлайнс"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в десятидневный срок с момента  вступления решения в законную силу устранить недостатки в выполненных работах:  

1. В помещении 104 площадью 16,2 м2 на первом этаже на стене между 104 и  102 помещениями выполнить работы:  

- очистка дефектного слоя на стене; 

- восстановление слоя баритовой штукатурки (при деформации во время  очистки) до проектных - слой 15 мм;  

- шпаклевка стены; - покраска стены; покрытие лаком. 

2. В помещении 202 на втором этаже (площадь первой стены 17,98 м2, площадь  второй стены 15,54 м2) выполнить работы:  

- очистка дефектного слоя на стенах 1 и 2; 

- восстановление слоя баритовой до проектных - стена 1: слой 45 мм, стена  2: слой 10 мм;  

- шпаклевка стен 1 и 2; - покраска стен 1 и 2; 

- покрытие лаком стен 1 и 2. 

3. Заменить на новый канальный обеззараживатель-очиститель воздуха TION  В150Тх300.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью Компания "Крафтлайнс"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в десятидневный срок с момента  вступления решения в законную силу предоставить документацию, подтверждающую  происхождение, безопасность и качество применяемых строительных материалов,  комплектующих, конструктивных элементов (акты на скрытые работы, паспорта и  сертификаты на строительные материалы).  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.  

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его  ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй  арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.  

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Костромской  области.  

Резолютивная часть решения

 объявлена в судебном заседании и приобщена к  делу.  

Судья Н.Ю. Авдеева