28/2020-149296(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-11847/2020

г. Новосибирск

25 августа 2020 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой  О.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску  общества с ограниченной ответственностью "СК Центр" (ИНН 

<

***>), г.  Новосибирск  

к обществу с ограниченной ответственностью "Ремонтно-Монтажная  Компания Сити" (ИНН 

<

***>), г. Новосибирск  

об обязании устранить недостатки, при участии: 

от истца: ФИО2, доверенность от 14.01.2020 № 01, паспорт,  доверенность,  

от ответчика: ФИО3, доверенность от 24.04.2020, паспорт,  удостоверение адвоката,  

руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "СК  Центр" удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно- Монтажная Компания Сити" в срок до 05.04.2021 года на объекте –  

многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Новосибирск,  ул.Линейная, д. 53, устранить недостатки:  

устранить отслоение декоративного слоя штукатурки на уровне 4 этажа в  осях 6-В/Г;  

устранить отслоение декоративного слоя штукатурки на уровне верха 3  этажа в осях А-3/3/1;  

устранить отслоение декоративного слоя штукатурки на уровне 2 этажа  над пристройкой в осях А-3/5;  

устранить трещину декоративного слоя штукатурки между 3 и 4 этажами  в осях А-1/2;  

устранить горизонтальную трещину декоративного слоя штукатурки на  уровне низа 3 этажа в осях 1-Ж/Л;  

устранить горизонтальную трещину декоративного слоя штукатурки на  уровне верха 2 этажа в осях М-3/4;  

устранить вертикальную трещину декоративного слоя штукатурки на  уровне тех этажа в осях М-2/3;  

устранить вертикальную трещину декоративного слоя штукатурки на  уровне тех этажа в осях 1-Л/К;  

закрепить крепления парапетных сливов на крыше дома (по всему  периметру (40 шт.));  

устранить отслоение штукатурки на парапетных бетонных столбах в осях:  М-2/3; 1-Л/М; 1-И/К; 1-Ж/И; 1- Г/Д; А-4/6; 6-А/Д; 6-И/М.  

устранить отслоение краски на парапетных бетонных столбах в осях А- 1/3.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ремонтно- Монтажная Компания Сити" (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью "СК Центр" (ОГРН 

<

***>) судебные  расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его  принятия.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух  месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Судья О.В. Суворова 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента Дата 15.04.2020 3:19:13

Кому выдана Суворова Ольга Викторовна