1376/2021-116741(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е

 

27 апреля 2021 года Дело № А33-36201/2020 

Красноярск 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 21 апреля 2021 года. В полном объёме решение изготовлено 27 апреля 2021 года. 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Куликовской Е.А., рассмотрев в  

судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью Проектно- 

строительной компании "Системные решения" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г.  

Красноярск, дата регистрации – 13.11.2013) 

к обществу с ограниченной ответственностью "КПС" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

1159102129889, Республика Крым, дата регистрации – 27.11.2015) о взыскании суммы долга, в присутствии в судебном заседании: 

от истца: ФИО1, по доверенности от 20.01.2021 № 1/2020,  от ответчика: ФИО2, представитель по доверенности от 05.09.2020,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  

ФИО3, 

установил:

общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительной компании  "Системные решения" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с  иском к обществу с ограниченной ответственностью "КПС" (далее – ответчик) о взыскании  суммы долга по договору от 15.07.2019 № 07/3-85/1 в размере 6 240 000 руб.  

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 25.01.2021  возбуждено производство по делу.  

20 апреля 2021 года в материалы дела от истца поступило ходатайство об уточнении  исковых требований, согласно которому просит взыскать с ответчика сумму долга в размере  5 940 000 руб.  

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал с учетом  уточнений. Представитель ответчика не возражает против уточнений исковых требований.  

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ уточнение требования  принято судом, дело рассматривается с учетом уточнения.  

Представитель ответчика исковые требования не признал. 

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для  рассмотрения спора, обстоятельства.  

Между ООО ПСК «Системные решения» (Подрядчик) и ООО «КПС» (Заказчик)  заключен договор № 07/3-85/1 от 15.07.2019 на выполнение работ по разработке проектной  документации по титулу «Реконструкция ВЛ 330 кВ ГЭС-2-Машук».  

В соответствии с пунктом 2.1. договора по настоящему договору подрядчик обязуется  выполнить комплекс работ по:  

- разработке, проектной документации в соответствии с требованиями, указанными в  задании на проектирование (Приложение № 6 к договору), а также требованиями  нормативно-технических документов;  

- консультационному сопровождению заказчика при прохождении экспертизы  проектной документации и получению положительных заключений организаций по  проведению экспертизы;  

Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ  определены в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (Приложение № 1 к  Договору) и Задании на проектирование (Приложение № 6 к Договору).  

Согласно пункту 2.2. договора результат выполненных работ по настоящему договору  или его часть должны быть представлены подрядчиком заказчику:  

- в электронном виде в формате pdf с текстовой подложкой для документов с текстовым,  графическим содержанием; xls, xlsx для сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости  строительства, объектных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды  затрат; xml, ГСС для локальных сметных расчетов (смет) на всех этапах проектирования в  том числе её согласования;  

- в электронном виде в формате pdf с текстовой подложкой, а также в форматах rtf-, doc,  docx, xls и/или xlsx для документов с текстовым содержанием; dwg и/или dwx для  документов с графическим содержанием после получения положительных заключений  органов экспертизы.  

Пунктом 3.1. договора установлен срок выполнения работ по договору: начало  выполнения работ – 24.06.2019; окончание выполнения работ – 20.09.2019.  

Выполнение отдельных работ, входящих в общий комплекс работ по договору,  осуществляется Подрядчиком в сроки, указанные в Календарном графике выполнения работ  и стоимости (Приложение № 1 к Договору).  

В соответствии с пунктом 3.2. договора утвержденной заказчиком, а также принятой по  Акту о приемке выполненных работ и передаче прав.  

Подрядчик передает заказчику результаты выполненных работ на электронном носители  в соответствии с пунктом 2.2 настоящего договора, а также исключительное право на  результаты выполненных работ в полном объеме (пункт 3.3. договора).  

Согласно пункту 4.1. договора, цена договора составляет 9 400 000 руб., в том числе  НДС 20 % 1 566 666,67руб.  

Пунктом 5.1. договора установлено, что текущие платежи по разработке проектной  документации выплачиваются заказчиком в следующем порядке:  

- по разработке проектной документации - в размере 70% (Семидесяти процентов) от  стоимости соответствующих работ, указанной в Календарном графике выполнения Работ и  стоимости (Приложение № 1 к Договору), выплачиваются в течение 30 (Тридцати)  календарных дней со дня подписания соответствующего Акта о выполненных Работах.  

После получения Заказчиком заключения Организации по проведению  экспертизы о соответствии разработанных по Договору проектной документации и (или)  результата инженерных изысканий требованиям нормативных актов в области  проектирования и строительства (положительных заключений) Заказчик производит  оставшийся платеж в размере 30% в течение 30 дней со дня получения заключения (пункт  5.2.1. договора).  

В соответствии с пунктом 5.3. договора стороны договорились, что в случае, если  заказчик в течение трех месяцев со дня получения документации по акту приема-передачи от  подрядчика, не обратится в Организацию по проведению экспертизы, то датой наступления  обязанности оплаты оставшегося платежа 30% будет считаться дата истечения трех  месячного срока.  

Разделом 8 договора сторонами согласован следующий порядок сдачи и приемки  проектной документации:  

8.3. После завершения разработки проектная документация направляется Заказчику в  сопровождении оформленного со стороны Подрядчика в 2 (Двух) экземплярах Акта о  выполненных Работах.  

Заказчик в сроки, указанные в п. 7.1.3. настоящего Договора, при отсутствии замечаний  к Проектной документации подписывает со своей стороны Акт о выполненных Работах и  один его экземпляр возвращает Подрядчику. При наличии у Заказчика замечаний к  Проектной документации он направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания  указанного акта в сроки, указанные в п. 7.1.3. настоящего Договора.  

8.5. Подрядчик должен устранить обозначенные замечания в течение 5 рабочих  дней после получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта о  выполненных Работах (если иной срок не согласован письменно Сторонами) и передать  измененную и (или) доработанную Проектную документацию Заказчику.  

При отказе либо уклонении Подрядчика от выполнения доработок Проектной  документации Заказчик привлекает для фиксации и качественной оценки обнаруженных  недостатков компетентное третье лицо, имеющее опыт ведения работ, аналогичных  указанным в Договоре, а также в случаях, предусмотренных нормативными актами в области  проектирования и строительства, свидетельство о допуске к соответствующим видам работ,  оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное  саморегулируемой организацией. Акт, подписанный указанным третьим лицом и  Заказчиком, направляется Подрядчику.  

Подрядчик должен без дополнительной оплаты устранить отраженные в Акте  недостатки в установленный Заказчиком срок и возместить Заказчику понесенные  последним расходы по привлечению третьего лица.  

В случае не устранения Подрядчиком недостатков в соответствии с Актом,  составленным согласно настоящего пункта Договора, Заказчик вправе привлечь для  устранения недостатков работ третье лицо. Подрядчик обязан возместить Заказчику  понесенные расходы на устранение недостатков, а также без предъявления каких-либо  требований, по указанию Заказчика, передать ему всю документацию, полученную от  Заказчика и (или) разработанную Подрядчиком и оплаченную Заказчиком.  

Обязательства Подрядчика по разработке Проектной документации считаются  исполненными после получения положительного заключения Организации по проведению  экспертизы по Проектной документации.  

Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи  с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением,  расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в  претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 15 (Пятнадцать) календарных дней с  даты получения Стороной, которой предъявлена претензия, соответствующей претензии  (пункт 10.3. договора).  

В соответствии с пунктом 11.3. договора заказчик вправе в одностороннем порядке  отказаться от исполнения настоящего договора в любое время в течение срока действия  Договора путем уведомления Подрядчика.  

В этом случае договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной заказчиком в  уведомлении об отказе от исполнения договора, после получения указанного уведомления  подрядчиком.  

Согласно пункту 11.4. договора заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от  исполнения договора путем направления соответствующего уведомления подрядчику, с  указанием даты предполагаемого отказа в случаях (включая, но не ограничиваясь):  

- задержки Подрядчиком начала или окончания Работ и(или) этапов Работ более чем  на 30 (Пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;  

-неоднократного нарушения Подрядчиком сроков начала и окончания выполнения  этапов Работ;  

-несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ, если исправление  соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку выполнения Работ  более чем на 30 (Пятнадцать) календарных дней;  

- аннулирования лицензий на подлежащую лицензированию деятельность,  приостановления или прекращения действия свидетельств о допуске к работам, которые  оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных в  установленном законом порядке, а также аннулирования или прекращения действия других  актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в  рамках законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ;  

Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от  исполнения договора, после получения указанного уведомления подрядчиком.  

В случае одностороннего отказа заказчика от исполнения настоящего договора  подрядчик после получения уведомления об одностороннем отказе в течение 10 рабочих  дней предоставляет заказчику «Акт о приемке выполненных Работ и передаче прав» на  сумму фактически оплаченных работ (с учетом погашения авансовых платежей) (пункт  11.5.).  

Как следует из искового заявления подрядчик 09.12.2019 по электронной почте  (скриншот электронной почты 09.12.2019) для рассмотрения и согласования передал  выполненные работы в объеме:  

Наименование работ 

Стоимость работ 

Результат 

Перечень 

выполнения 

документ

работ 

ации, 

выполнен

ной 

Подрядчи

ком 

Проект полосы отвода 

Л3301180-

ППО 

«Проект 

полосы 

Технологические и  конструктивные решения  

линейного объекта.  Искусственные сооружения  

Л3301180-ТКР1  отвода»  

Л3301180-ТКР2.1  

Л3301180-ТКР2.2  

Л3301180-ТКР2.3  

Л3301180-ТКР2.4  

Л3301180-ТКР2.5  

Л3301180-ТКР2.6  

Л3301180-ТКР2.7  

Л3301180-ТКР2.8  

Л3301180-ТКР2.9  

Л3301180-ТКР3  

Л3301180-ТКР4  

Проект организации строительства 

Л3301180-ПОС  

Проект организации работ по  сносу (демонтажу) линейного  объекта  

Л3301180-ПОД  

Мероприятия по охране окружающей среды  

Л3301180-ОООС  

Л3301180-ПРЗ  

Мероприятие по обеспечению пожарной безопасности 

Л3301180-ПБ 

Инженерно-экологические 

изыскания (доработка)  

Л3301180-ИЭИ 

В отсутствие замечаний со стороны заказчика, истец направил по электронному адресу  

ответчика акт выполненных работ № 1 от 25.12.2019 (скриншот электронной почты от  14.01.2020) на сумму 6 410 000 руб.  

Акт выполненных работ на сумму 6 410 000 руб. ответчик не подписал, мотивированные  возражения в адрес истца не представил, направил в адрес истца акт на сумму 1 460 000 руб.  

Как следует из пояснений истца, ответчик до 25.12.2019 выплатил аванс в размере 510  000 руб., позже за период с 14.01.2020 по 21.08.2020 ответчиком произведена оплата за  выполненные работы в размере 2 450 000 руб., в том числе НДС 20%. Общая сумма  оплаченных ответчиком работ составила 2 960 000 руб.  

С учетом частичной оплаты, стоимость неисполненных ответчиком обязательств по  оплате работ составила 5 940 000 руб.  

Письмом от 05.11.2020 с исх. № 10-20/144, полученным истцом по электронной почте  09.11.2020 ответчик сообщил о расторжении договора в одностороннем порядке (направлено  посредством почтового отправления 05.11.2020, согласно сведениям об отслеживании  почтового отправления, письмо поступило на почтовое отделение ответчика 12.11.2020 и  13.12.2020 возвращено отправителю за истечением срока хранения).  

Истец в ответ на письмо о расторжении договора направил письмо 1/16-2020 от  16.11.2020 с требованием об оплате стоимости выполненных работ. Письмом № 10-20/150 от  01.12.2020 ответчик отказался оплатить задолженность.  

Неисполнение ответчиком требований истца в добровольном порядке, послужило  основанием для обращения в арбитражный суд с иском, уточненным в порядке 49  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к обществу с ограниченной  ответственностью "КПС" о взыскании суммы долга по договору от 15.07.2019 № 07/3-85/1 в  размере 5 940 000 руб.  

В свою очередь, ответчик требования не признает, ссылается: - истец не представил доказательств выполнения работ по договору; 

- предъявление актов выполненных работ после прекращения действия договора, путем  одностороннего отказа от исполнения договора не имеет правового значения;  

- истец был не вправе выполнять предусмотренные договоров работы, поскольку  16.07.2020 был исключен из СРО.  

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в  деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.  

Статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что  гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и  иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и  не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла  гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.  

Согласно пунктом 1 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу  обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора)  определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и  т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от  должника исполнения его обязанности.  

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства  должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и  требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в  соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми  

требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее  изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.  

Между истцом и ответчиком заключен договор, являющийся по своей правовой природе  договором подряда.  

В соответствии со статьей 758 Гражданского кодекса Российской Федерации по  договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик  (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую  документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и  оплатить их результат.  

Согласно статье 762 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда  на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан, если иное не  предусмотрено договором уплатить подрядчику установленную цену полностью после  завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов  работ.  

Пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что  в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По  согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки  завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено  законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет  ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков  выполнения работы.  

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом,  подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем  делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи  или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае,  если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (пункт 4 статьи 753  Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Истец обратился в суд, ссылаясь на факт выполнения работ и отсутствие оплаты в  полном объеме.  

Как следует из пояснений истца, результаты работ для рассмотрения и согласования  были направлены 09.12.2019 на электронную почту ответчика, в подтверждение чего в  материалы дела представлен скриншот электронной почты от 09.12.2019).  

 В отсутствие замечаний к результатам работ со стороны заказчика, истец направил по  электронному адресу ответчика акт выполненных работ № 1 от 25.12.2019 (скриншот  электронной почты от 14.01.2020) на сумму 6 410 000 руб.  

Акт выполненных работ на сумму 6 410 000 руб. ответчик не подписал, мотивированные  возражения в адрес истца не представил.  

В свою очередь ответчик направил в адрес истца акт выполненных работ № 1 от  25.12.2019, из содержания которого следует, что им принимаются работы в следующей  части: «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные  сооружения» стоимостью 860 000 руб. и «Сверка и уточнение пересекаемых инженерных  сооружений по трассе проектируемой ВЛ, установление собственников, получение  технических условий» стоимостью 600 000 руб., общая стоимость принятых ответчиком  работ составила на сумму 1 460 000 руб.  

Как пояснил ответчик, направление акта на сумму 1 460 000 руб. обусловлено тем, что  работы выполнены подрядчиком ненадлежащего качества и с нарушением установленного  договором срока сдачи работ (20.09.2019), в связи, с чем он был вынужден самостоятельно  дорабатывать результаты работ для передачи на государственную экспертизу.  

Также, как пояснил ответчик, сдача подрядчиком некачественной проектной  документации послужила одной из причин получения ООО «КПС» от ФАУ «Главэкспертиза  России» отрицательного заключения от 05.08.2020 № 00-1-2-3-037436-2020.  

При этом предъявление к подрядчику претензий по качеству выполненной проектной  документации после получения заказчиком отрицательного заключения по мнению  ответчика не имело смыла, поскольку с 16.07.2020 в отношении ООО ПСК «Системные  решения» Ассоциацией в области архитектурно-строительного проектирования «СРО «Совет  проектировщиков» принято решение № СП-УВ-131 об исключении истца из состава СРО.  

Судом установлено, что письмом от 05.11.2020 исх. № 10-20/144 (по истечении более  тринадцати месяцев с определенной договором даты окончания работ – 20.09.2019) ответчик  по иску уведомил истца о расторжении договора с момента получения уведомления в  соответствии с пунктом 11.4. договора в связи с просрочкой выполнения работ и наличия  претензии к качеству выполнения работ.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации,  если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет  работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным,  заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.  

Учитывая, что срок выполнения работ является существенным условием спорного  договора, то заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке при  существенном нарушении подрядчиком условий договора - просрочки исполнения  обязательств.  

Согласно пункту 2 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации при  расторжении договора обязательства сторон прекращаются.  

Пунктами 1 и 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации  предусмотрено, что предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными  правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения  договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем  уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор  прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено  настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.  

В подтверждение отправки и вручения уведомления об одностороннем отказе от  договора ответчиком представлена копия квитанции от 05.11.2020 и отчет об отслеживании  почтового отправления, согласно которому почтовое 12.11.2020 поступило на почтовое  отделение истца и возвращено отправителю 13.12.2020 в связи с истечением срака хранения.  

Согласно абз. 2 п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54  «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданскою кодекса Российской  Федерации об обязательствах и их исполнении» в силу пункта 1 статьи 450.1 ГК РФ право на  о постороннее изменение условий договорного обязательства или на односторонний отказ от  его исполнения может быть осуществлено управомоченной стороной путем  соответствующего уведомления другой стороны. Договор изменяется или прекращается с  момента, когда данное уведомление доставлено или считается доставленным по правилам  статьи 165.1 ГК РФ. сели иное не предусмотрено ГК РФ. другими законами, иными  правовыми актами или условиями сделки либо не следует из обычая или из практики,  установившейся во взаимоотношениях сторон.  

В соответствии с абз. 2-3 п. 63 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от  23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой  Гражданского кодекса Российской Федерации» с учетом положения пункта 2 статьи 165.1  ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное юридическому лицу, направляется по  адресу, указанному соответственно в едином государственном реестре индивидуальных  предпринимателей или в едином государственном реестре юридических лиц либо по адресу,  указанному самим индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом.  

При этом необходимо учитывать, что гражданин, индивидуальный предприниматель или  юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений.  доставленных по адресам, перечисленным в абзацах первом и втором настоящего пункта, а  также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя.  

Таким образом, договор расторгнут 13.12.2020, в связи с чем предъявленный к приемке  акт после прекращения правоотношений (со слов представителя ответчика акт приемки  выполненных работ на бумажном носителе поступил в адрес заказчика посредством  почтовой службы уже после уведомления истца о расторжении договора) не имеет значения  и не может служить доказательством приемки работ заказчиком.  

Оценив представленные в материалы дела доказательства и доводы сторон, суд не  находит основания для удовлетворения требований истца в силу следующего.  

Как выше установлено судом истец в доказательство передачи проектной документации  представил скриншот электронной почты от 09.12.2019. Ответчик получение проектной  документации посредством электронной почты не отрицает, вместе с тем ссылается на  ненадлежащее исполнение условий договора по передаче результатов работ, нарушение  сроков сдачи работ, выполнение работ не в полном объеме, а также ненадлежащего качества.  

В соответствии с пунктом 1.13 договора сторонами согласовано понятие Результат(ы)  выполненных Работ - Проектная документация, получившая положительные заключения  Организаций по проведению экспертиз о соответствии требованиям нормативных актов в  области проектирования и строительства.  

Согласно пункту 2.2. договора результат выполненных работ по настоящему договору  или его часть должны быть представлены подрядчиком заказчику:  

- в электронном виде в формате pdf с текстовой подложкой для документов с текстовым,  графическим содержанием; xls, xlsx для сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости  строительства, объектных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды  затрат; xml, ГСС для локальных сметных расчетов (смет) на всех этапах проектирования в  том числе её согласования;  

- в электронном виде в формате pdf с текстовой подложкой, а также в форматах rtf-, doc,  docx, xls и/или xlsx для документов с текстовым содержанием; dwg и/или dwx для  документов с графическим содержанием после получения положительных заключений  органов экспертизы.  

Пунктом 3.1. договора установлен срок выполнения работ по договору: начало  выполнения работ – 24.06.2019; окончание выполнения работ – 20.09.2019.  

Выполнение отдельных работ, входящих в общий комплекс работ по договору,  осуществляется Подрядчиком в сроки, указанные в Календарном графике выполнения работ  и стоимости (Приложение № 1 к Договору).  

В соответствии с пунктом 3.2. договора работа по разработке проектной документации  завершается созданием проектной документации, утвержденной заказчиком, а также  принятой по Акту о приемке выполненных работ и передаче прав.  

Подрядчик передает заказчику результаты выполненных работ на электронном носители  в соответствии с пунктом 2.2 настоящего договора, а также исключительное право на  результаты выполненных работ в полном объеме (пункт 3.3. договора).  

В соответствии с пунктом 8.1. договора, разработка проектной документации  осуществляется в сроки, установленные в Календарном графике выполнения Работ и  стоимости (Приложение № 1 к Договору). Подрядчик вправе досрочно разработать  проектную документацию, в этом случае заказчик обязан принять и оплатить ее в  соответствии с условиями договора.  

Согласно пункту 8.4. договора после завершения разработки проектная документация  направляется заказчику в сопровождении оформленного со стороны подрядчика в 2 (Двух)  экземплярах Акта о выполненных работах.  

Заказчик в сроки, указанные в п. 7.1.3. настоящего Договора, при отсутствии замечаний  к Проектной документации подписывает со своей стороны Акт о выполненных Работах и  один его экземпляр возвращает Подрядчику. При наличии у Заказчика замечаний к  Проектной документации он направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания  указанного акта в сроки, указанные в п. 7.1.3. настоящего Договора.  

Абзацем 5 пункта 8.5. договора предусмотрено, что обязательства Подрядчика по  разработке Проектной документации считаются исполненными после получения  положительного заключения Организации по проведению экспертизы по Проектной  документации.  

С учетом анализа действующего законодательства, регулирующего спорные  правоотношения, имеющейся в деле переписки сторон относительно исполнения договора,  условий спорного договора, суд пришел к выводу о том, что истец не представил  доказательств выполнения работ в полном объеме и сдачи результата работ ответчику в  установленный срок и в установленном порядке, как того требуют условия договора.  

Факт выполнения работ ненадлежащего качества подтверждается получением  заказчиком отрицательного заключение государственной экспертизы, выводы которой по  состоянию на 08.04.2020, в том числе подтверждают, что проектная документация по  объекту «Реконструкция ВЛ 330 кВ ГЭС-2-Машук»: не соответствует результатам  инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки; не соответствует заданию на  проектирование; не соответствует требованиям технических регламентов и иным  установленным требованиям.  

Таким образом, результат выполнения подрядчиком работ не имеет для заказчика  потребительской ценности и не может быть им использован в последующем.  

Учитывая изложенное, принимая во внимание отсутствие в деле доказательств  надлежащей сдачи работ согласно условиям договора, исковые требования ООО Проектно- строительной компании "Системные решения" удовлетворению не подлежат.  

Государственная пошлина за рассмотрение настоящего искового заявления составляет  52 700 руб. (определением от 25.01.2021 истцу предоставлена отсрочка от уплаты  государственной пошлины) и в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации подлежит отнесению на истца.  

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной  квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам,  участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети  «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).  

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут  быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства  заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.  

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

в удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью  Проектно-строительная компания "Системные решения" отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Проектно-строительной  компании "Системные решения" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации  13.11.2013) в доход федерального бюджета 52 700 руб. государственной пошлины.  

Настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия путем  подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья Е.А. Куликовская  

 Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 07.05.2020 3:47:54

Кому выдана Куликовская Екатерина Аркадьевна