Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-76338/2017

31 августа 2018 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  23 августа 2018 года.

Полный текст решения изготовлен  31 августа 2018 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Панюшкиным Н.В.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "Лемболовское" (адрес:  Россия 188731, п.Сосново, Ленинградская область, ул.Механизаторов д.13,оф.204, ОГРН:  );

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙДОРСНАБ"; (адрес:  Россия 193231, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

<

...> ЛИТ. А/11-Н; Россия 193231, Санкт-Петербург, ул.камышовая д.38,корп.1,пом.51Н, ОГРН:  

<

***>; 

<

***>);

о взыскании 1 873 760 руб. 78 коп.

 

при участии

- от истца: ФИО1 по доверенности от 22.05.17, 

- от ответчика: не явился, о времени и месте извещен надлежащим образом 

 

установил:

ООО "Лемболовское" обратилось в суд с иском о взыскании с ООО "СТРОЙДОРСНАБ" с учетом уточнения по ст. 49 АПК РФ 1 763 520 руб. 00 коп. авансового платежа по договору №01/2017 от 15.05.17, 89 730 руб. 08 коп. неустойки за нарушение срока выполнения работ и 20 509 руб. 98 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 02.10.17, а с 03.10.17 проценты от суммы неосновательного обогащения по день фактического возврата неосновательного обогащения.

Распоряжением заместителя председателя Арбитражного суда и Ленинградской области от 14.02.18 дело передано в производство судьи Сергеевой О.Н.

Ответчик иск отклонил и заявил ходатайство о назначении экспертизы.

После согласования сторонами экспертного учреждения, ООО «Центр судебной экспертизы» вопросов эксперту, ответчику было предоставлено время для внесения на депозитный счет суда денежных средств в размере 90 000 руб. 00 коп., подлежащих выплате эксперту. Ответчик денежные средства не перечислил, в заседание дважды не явился (05.07.18 и 23.08.18).

В связи с изложенным дело рассматривается без проведения экспертизы по имеющимся материалам.

Судом установлено:

Между сторонами был заключен договор подряда №01/2017 от 18.05.17 по демонтажу сооружений и очистки территории на земельном участке, площадью 12,8 га., расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, деревня Васкелово и дополнительные соглашения к нему.

Срок выполнения работ – не позднее 22.06.17.

Истец – заказчик перечислил ответчику авансовые платежи по договору и дополнительным соглашениям на общую сумму 1 763 520 руб. 00 коп.

Ответчик в установленный срок работы не выполнил, в связи с чем истец уведомлением от 03.08.17 исх. №03/08/2017 отказался от договора в одностороннем порядке и потребовал возврата авансового платежа.

До настоящего времени денежные средства не возвращены.

В соответствии с п.9.3 договора ответчику начислена неустойка за нарушение срока выполнения работ в размере 0,1% от цены договора за период с 23.06.17 по 15.08.17 в сумме 89 730 руб. 08 коп.

В соответствии со ст.395 ГК РФ ответчику начислены проценты за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 02.10.17 в размере 20 509 руб. 98 коп. Проценты подлежат начислению с 03.10.17 по день фактического возврата денежных средств по ключевой ставке Банка России в размере 7,25% годовых.

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению с отнесением расходов по государственной пошлине на ответчика.

Руководствуясь статьями 309, 310, 330, 395, 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙДОРСНАБ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Лемболовское" 1 873 760 руб. 78 коп, из них: 1 763 520 руб. 00 коп. неосновательного обогащения, 89 730 руб. 08 коп. неустойки и 20 509 руб. 98 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, а с 03.10.17 проценты от суммы неосновательного обогащения по ключевой ставке Банка России 7,25% годовых до фактической уплаты неосновательного обогащения, а также 31 738 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Сергеева О.Н.